東松 119安全센터 增築工事

基本및實施設計用役 課業指示書

鐵 原 消 防 署

東松 119安全센터 增築工事

基本 및 實施設計用役 課業指示書(案)

본 과업지시서는 동송 119안전센터 건립을 위한 설계용역에 대한 내용과 용역수행자의 업무범위 기타 용역수행에 필요한 제반 기술적인 사항 등을 규정하여 최적의 설계창출을 도모하고 당해 과업수행에 적정을 기하고자 함.

ꊱ 槪    要

❍ 과 업 명 : 동송 119안전센터 증축공사 설계용역

❍ 과업방향 : 동송 119안전센터 증축건물은 구조적으로 안전하고,

경제성· 실용성· 편리성에 적합하여야 함.

❍ 위    치 : 철원군 동송읍 이평리 854-3번지

❍ 부지면적 : 1,183.76㎡(358평)

❍ 지    목 : 대  지

❍ 건축규모 : 철근콘크리트조 / 지상 2층

❍ 연 면 적 : 195,45㎡((1층 70㎡, 2층125,45㎡)

※ 건축규모는 발주청의 사정 및 적정설계를 위하여 필요한 경우 조정가능

❍ 사 업 비 : 300백만원

※ 설계에 따라 산출되는 공사비는 최적의 공법, 경제적인 재료선정 등으로 총 공사비

(건축,토목,기계,소방,전기,통신,음향 등 포함)가 예산을 초과하지 않도록 설계        ❍ 난    방 : 1층 차고 : 난방없음, 2층 의용소방대 사무실 : 개별난방

❍ 전기시설 : 일반상용전원설비 (일부 3상전원-차고1)

❍ 외부마감 : 콘크리트 조적 미장 마감

❍ 용역기간 : 착수일로부터 40일

ꊲ 課業의 範圍

❍ 본 과업지시서는 동송 119안전센터 증축을 위한 실시설계용역 과업에        적용한다.

❍ 본 과업은 발주청과 용역수급자가 체결한 용역계약서와 본 과업지시서에        의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 행정처리 및 건축        협의에 필요한 도면과 구비서류 기타 본 용역에 관한 각종보고 및        제출자료 등 용역감독관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의        사항을 시행한다.

❍ 본 용역 설계시 발주청이 건설기술관리법령에 의한 설계자문회의        자문을 받을 필요가 있다고 요구 할 때에는 용역수급자는 이에 응        하여야 한다.

❍ 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서에 명기하지 아니한 사항은        발주청의 지시에 따라 수행한다.

❍ 본 과업수행기간은 착수일로부터 40일간으로 하며, 다음의 경우에        한하여 용역 감독관의 승인을 받아 과업수행기간을 변경 할 수 있다.

- 천재지변으로 인하여 과업수행이 불가능하였을 경우

- 발주청의 방침에 의하여 과업수행이 중지되었을 경우

- 발주청의 계획변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

❍ 설계변경 등은 기술용역계약일반조건【회계예규 2200.04-141-5, '04.4.6】         제16조의 규정에 따른다.

ꊳ 一般事項

❍ 발주청 이라 함은 강원도(철원소방서)를 말한다.

❍ 용역감독관 이라 함은 용역을 발주한 발주청장으로 부터 그 소속        기관의 장을 대리하여 용역전반에 관한 감독업무에 종사할 것을         명받은 분야별 담당공무원을 말한다.

❍ 용역수행자라함은 발주청과 기술용역계약을 체결한 자연인 또는          법인을 말한다.

❍ 사업책임기술자라함은 용역과업을 수행하기 위하여 용역수행자를        대리하여 용역전반에 관한 업무를 수행하는자(이하 "책임기술자"라        말한다)를 말한다.

❍ 용역수행자는 본 과업지시서 내용【건축, 토목, 전기통신, 기계설비,        소방 설계용역】을 성실히 수행하여야 한다.

❍ 용역수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 설계용역을 착수하여야        하며, 착수시에는 다음사항이 포함된 착수신고서를 발주청에 제출        하여야 한다.

- 세부시행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도)와 예정공정표(기본설계안          확정을 위하여 필요한 설명회 또는 용역보고회 개최 일정 등 포함)

- 책임기술자의 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부)와 분야별 참여기술자

투입계획서

- 보안대책 및 보안각서

- 도급내역서

- 사용인감계

- 기타 계약문서 및 관련법령에서 제출하도록 규정한 서류

❍ 용역수행자는 설계도서 및 각종 보고 서류의 제출기간을 준수하여야        한다.

❍ 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업책임기술자가 발주청에        등록된 인감 또는 서명을 연명으로 날인하여 제출하여야 하며, 과업        종료후 제출하는 최종용역 보고서에는 모든 참여기술자의 성명,         담당업무, 참여 기간 등을 구체적으로 기재하고, 연명으로 날인한 후        제출하여야 한다.

❍ 본 과업수행을 위하여 투입된 참여기술자는 임의로 교체할 수 없으며,        교체가 불가피한 경우에는 발주청의 사전승인을 받아야 하며,           발주청이 과업수행에 부적합하다고 판단하여 교체 요구시에는 용역         수행자는 이에 응해야 한다.

❍ 용역수행자는 각 분야별 하도급자 계약 체결시 발주청의 승인을         득하여야 한다.

❍ 보고의무

- 용역수행자는 수행중인 용역과업의 중요내용에 대하여 발주청의 사전의사           결정이 필요할 때에는 발주청에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여야           한다.

- 용역수행자는 하도급 업체가 재 하도급하거나 하도급 대금지급과 관련하여           분쟁 또는 민원이 야기된 경우에는 지체없이 그 사실을 발주청에 보고하여야           한다.

❍ 각종 설계자문회의, 보고회 개최운영

- 설계용역자는 각종 자문회의 보고회를 개최 운영함에 있어 보고, 검토된 자료에         의거 출석 설명토록 하고, 결정·보완·지시된 사항에 특별한 사유가 없는 한         수용하여 다음 과업에 반영한다.

- 자료제출

․ 설계용역자는 각종 자문위원회, 심의회, 보고회에 따른 보고서를 성실히 준비하여          제출하여야 한다.

․ 보고자료는 현황, 문제점, 대책순서로 알아보기 쉽게 작성하고 필요시 투시도,            슬라이드 등의 보조 설명자료를 준비하여 이해를 돕도록하는 등 보고자료 준비에           만전을 기하여야 한다.

- 보고용 설계도면은 설계도서 작성기준에 의하여 작성하고 각종심의 및 인·          허가에 필요한 설계도서로 사용할 수 있도록 하여야 한다.

- 각종 자문회의, 심의회, 보고회 결과에 대하여 조속히 처리·반영하여야 한다.

❍ 변경 및 정산

- 발주청은 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가          있다고 인정될  때에는 설계용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 발주청의          방침에 따라야 한다.  이때 과업 범위의 증감이 발생할 경우에는 예산의 범위          내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다.

- 추정공사비와 향후 실공사비간의 차이가 있을 시에는 정산 처리한다.

❍ 기   타

- 용역자는 각종 인·허가를 완료할 수 있도록 제반조치를 취하여야 하고 인·           허가시 보완사항을 보완하여 납품한다.

- 본 과업지시서에 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주청과 협의하여           결정하고, 기타 경미한 사항은 협조하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 모두           용역자가 부담한다.

- 감독관이 과업수행중 하도급자나 고용인이 과업수행에 부적합하다고 판단           될 경우에는 즉시 교체 요구할 수 있다.

- 용역수행중 또는 수행 완료후에 설계용역비가 과다 산정되었거나 지불되었음이           판명되어 수요기관으로부터 반납 또는 추가보완이 필요한 경우 즉시 이에           수락, 동의하여야 한다.

- 실시설계가 모두 완료 되었을시 준공계를 제출하고 성과품을 납품한다.

- 용역자는 동송 119안전센터 증축과 관련하여 발주청에서 별도로 발주하는           용역에 대하여 성실히 협조하여야 하며 해당 용역 수행에 필요한 설계도서           등 필요한 서류를 제공하여야 하며, 본 사업 수행관계자와 상호 자료 및            정보교환 등 유기적체제를 구축하여 성실히 협조하여야 한다.

- 본 지침에 언급되지 않은 사항은 수시로 발주청에 문의하여 협의하여야 하며           의문사항은 발주청의 해석에 따른다.

- 용역수행자는 이 과업과 관련된 정보와 과업진행사항을 임의로 소유하거나           이를 외부에 유출시켜서는 아니되며, 과업폐기물은 소각처리 하여야 한다.

ꊴ 設計方向

❍ 설계자는 건축물의 설계에 있어서 대지 고저차, 부지 및 주변환경을        면밀히 검토하여 사업부지가 지니고 있는 특성과 기능성을 연계하여        개발잠재력 및 장래변화에 대응하는 경관을 형성하고 생태환경을        고려한 효율적인 건축계획을 입안, 계획된 공사비 범위 안에서          설계도서를 작성하여야 한다.

❍ 동송 119안전센터는 본 건물은 사용에 편리해야 할뿐 아니라,             환경친화적 이면서 경제적인 시설물이 되도록 하여야 한다.

❍ 시공 및 유지관리시에 환경오염을 방지하고, 에너지절약과 효율적인        관리가 이루어지면서 쾌적한 환경이 유지 될 수 있도록 하여야 한다.

❍ 설계는 구조, 기능, 특히 유지관리가 용이 하면서 시설 및 관리비        용이 적게드는 시설물이어야 한다.

❍ 건축자재는 경제적인 자재로 공업표준화 및 공산품관리법에 적합        하여야 하며, 사후관리는 편의와 교환성을 고려하여 부득이한           경우를 제외하고는 국산자재를 사용함을 원칙으로 한다.

❍ 모든 공정 및 설비계통은 신기술, 신공법의 적극적인 활용을 통한        최신시설과 정확한 품질관리, 철저한 안전시공, 공사비 절감을 통한        공사의 내실화를 이뤄야 한다.

❍ 건축, 토목, 전기, 통신공사와의 시공한계를 명확히 하고 설계도        서간 상호 모순이 없어야 하며, 공사시공자(기술자 및 기능공)가            알기 쉽도록 설계도서를 작성하여야 한다.

❍ 설계를 위한 부하 계산시 관계법령 및 자료를 합리적으로 연구 검토하여        설계에 반영하고 예기치 못한 재해 및 특수상황, 부분 부하시 경제적         운전, 주요기기의 복수 등을 고려하여야 한다.

❍ 모든 적용단위는 C.G.S로 한다.

❍ 모든 설계도서 및 참고자료는 특정회사를 상징하는 표시를 하여서는        안된다.

ꊵ 課業의 內用

본 과업에는 동송 119안전센터 증축에 필요한 건축공사, 토목공사,      기계설비공사 및 전기·통신(소방)공사를 포함하여야 한다.

❍ 건축공사 : 주 건축물 및 오수정화시설 구조물공사 등

❍ 토목공사 : 성토 및 절토, 오·배수공사, 주변포장 등

❍ 기계설비공사 : 위생, 난방, 오·배수, 가스, 소방, 환기, 자동          제어설비, 급·배수, 오수정화시설내 배관공사 등 기타 기계설비분야     ❍ 전기·통신(소방)공사 : 전원, 동력 및 조명설비, 예비전원, 피뢰침        및 접지설비, BA설비, 전화, 통신설비, 방송설비, 소방설비 등 기타

전기·통신설비분야 관련 부대시설

ꊶ 設計圖書 作成基準

❶ 제반규정 및 관계법령의 준수

❍ 설계도서 및 시방서 작성시에는 특히 다음의 관계법규 및 제반규정에        위배됨이 없어야 하고, 용역수행중에 변경된 사항은 변경된 관계법        및 규정을 적용하며, 또한 법령에 정하지 아니한 사항이나 적용이        불합리한 사항에 대하여는 발주청과 협의 처리함을 원칙으로 한다.

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 국토의 계획 및 이용에 관한법률, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 건축법 및 건축사법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 건축물의 구조기준등에 관한 규칙

- 건축물의 구조내력에 관한 기준

- 건축물의 설비기준등에 관한 규칙

- 건축물의 피난·방화구조등의 기준에 관한 규칙

- 소방법, 동 시행령, 동 시행규칙, 소방기술 기준에 관한 규칙, 소방용기계

·기구등의 검정등에 관한 규칙

- 건설기술관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 건설교통부제정 건축공사 표준시방서

- 건설교통부제정 콘크리트표준시방서

- 건설교통부제정 콘크리트구조 설계기준

- 건설교통부제정 구조물 기초설계기준

- 건설교통부제정 토목공사 표준시방서 및 도로설계기준

- 건설교통부제정 건축기계공사 표준시방서 및 급·배수 설계기준

- 오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 대기환경보전법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 수질환경보전법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 수도법, 하수도법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 수도시설의 위생등에 관한 규칙, 음용수의 수질기준등에 관한 규칙

- 산업표준화법, 동시행령 및 동 시행규칙

- 에너지이용합리화법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 주차장법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 도시가스사업법, 동 시행령 및 동 시행규칙, 가스공급규정, 지자체 시공

기술지침 등

- 고압가스안전관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 품질경영촉진법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 전기용품안전관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 액화석유가스의 안전 및 사업관리법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 강원도 건축조례(철원군 건축조례)

- 전기공사업법, 동 시행령 및 동 시행규칙

- 전기설비 기술기준에 관한 규칙, 내선규정 및 배전규정

- 한전공급규정

- 전기용품  안전관리법

- 정보통신공사업법, 동 시행령 및 시행규칙

- 전기통신사업법, 동시행령 및 시행규칙

- 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙

- 기타 관계 법규, 고시, 규칙 및 자치단체조례

❍ 특수공법, 특수자재인 경우에는 공인기관의 기술검토서 및 실험적        데이터나 이론적 뒷받침 내용을 제출하고 이를 준용할 수 있으나,        이의 적용시 관련사항을 충분히 검토하여야 한다

❷ 설계도서 작성기준

❍ 설계도면 작성시 아래내용을 유의하여 작성하여야 한다.

- 각부치수의 정확한 표기

- 각종 사용자재의 명칭 기입

- 각종 부착시설의 표시

- 각종 자재의 품질, 규격, 형태의 표시

- 건축, 기계설비, 전기, 가스등 기타 부대설비공사와 관련하여 명확한 구분표시

- 철근배근도에 있어서 절곡근의 위치, 정착, 이음길이 및 결속선 묶는 방법           등을 명확히 표기

- 설계도서는 누락부분이 없어야 하며, 시공자가 알기 쉽고 정확하게 시공할           수 있도록 시공 상세도를 세밀히 작성

- 특수자재 및 특수공법(신기술, 신공법)에 대하여는 별도의 특기시방 및 상세도를           작성하여야 한다.

- 국내에서 시행된바 없는 특수공법인 경우에는 대한건축학회, 대한토목학회,           국립건설시험소 등의 기술검토서를 첨부

- 도면 이해를 위한 주기사항 명기

- 고저차가 있는 부분의 처리표시(계단, 자연경사 등)

- 도로의 중심선, 거리, F.L, 구배 표시

- 배수관의 관저고, 구배, 길이 표시

- 수량집계표 작성(규격, 단위, 수량 등)

- 계통설명도

- 건축협의 등 관계법규에 요구되는 사항은 도면에 표시

- 사업승인 관계법규에 요구되는 사항은 도면에 표시

❍ 설계도면의 표기방법

- KSA 0005 제도통칙

- KSF 1501 건축제도 통칙

- KSF 1001 토목제도 통칙

- KSB 0001 기계제도

- KSC 0301 옥내배선용 심볼

- 내무부 소방업무 처리규정(소방시설도시기호)에 의한다.

- 행정자치부훈령 예방업무처리지침(소방도시기호)에 의한다.

❍ 내역서의 작성방법

- 수량산출은 건설교통부 제정 적산요령으로 산출하되 적산은 실시설계 납품           기준일의 가격(거래실례, 견적, 정부고시 등)을 기준으로 산정하여야 한다.            (단, 납품일과 공사발주일이 다른 경우에는 납품이후 발주예정일에 맞게            설계내역상의 단가를 조정하는데 협조하여야 한다.)

- 산출내역서 및 원가 계산서 작성은 실적공사비에 의한 예정가격 작성준칙           (회계예규 2200-04-160) 및 실적공사비 및 표준품셈 관리규정(건교부 훈령           2003년 제446호) 등 정부가 제정하거나 공인하는 설계기준 적용 한다.

- 관급자재로 구매하여야 할 대상과 수량, 금액, 시방이 별도로 명시되어야 한다.

- 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 일식으로 적용           되는 단가에도 충분히 납득될 수 있는 자료를 첨부하여야 한다.

- 각 공사별 내역서를 작성하여 총괄 내역서를 작성하고 재료 및 인건비의            수량 산출근거를 상세히 작성 첨부하여야 한다.

- 자재비는 조달청 가격정보를 적용하고 가격정보지에 없는 것은 물가자료,           물가정보에 의한다.

- 노임은 대한건설협회에서 발표되는 개별직종 노임단가 또는 통계청에 등록된           통계관련 업체에서 발표되는 노임단가를 적용한다.

- 제잡비는 건설교통부 고시 실적공사비 요율을 적용하여야 한다.

- 과업수행자는 본 용역집행 완료후에 감사 또는 기타사유로 위반사항이 발생           하였을 때에는 변상 또는 이에 상응하는 어떠한 조치에 대하여 이를 감수           하여야 한다.

ꊷ 義務事項

❍ 과업수행자는 계약후 발주청이 제시하는 기본사항을 숙지하여 설계        자문회의, 보고회의 설계심의에 따른 각종 자료의 제출과 좋은 결과가        나오도록 최대한 노력을 다하여야 한다.

❍ 도서납품 후 설계하자 및 관계법규에 대한 위반 또는 미비사항 등        부득이한 사항이 있을 경우 자부담으로 변경하여야 한다.

❍ 모든 설계도서는 계약 기간 내에 납품하여야 하며 부득이한 경우나        천재지변 등의 경우 도와 협의하에 연장할 수 있다.

❍ 본 설계를 수행함에 있어 건축에 필요한 제반허가 및 심의절차 등을        수행하여야 하며, 소요되는 제비용은 용역자 부담으로 한다.

❍ 자문회의, 심의위원회 심의시 각 분야별 책임기술자를 대동하여         기술적인 사항에 대하여 질의에 답변하여야 한다.

❍ 건축사업무대가기준<건설교통부 공고 제2002-270호(2002.10.15)>        계획 및 실시설계 심사와 기타 심의 허가 등은 용역자가 수행하고        그 과정에서 도출된 보완사항은 지정기일 내에 보완하여야 한다.

❍ 설계에서 전문업체의 설계를 필요로 하는 부분에 대하여는 별도의        전문업체에서 설계를 하여야 한다.

❍ 용역수행자의 용역납품 이행이 불가능 하거나, 발주청의 특별한         사업계획의 변경, 기타 계약조건 위배시는 용역계약을 재제 또는        해지할 수 있다.

❍ 설계미비로 발주청의 피해가 발생될 경우에는 용역수행자는 이에        대한 책임을 진다.

❍ 본 설계도서와 자료일체, 저작권 및 기타 법률적인 행위의 권한         일체를 발주청의 소유로 한다.

❍ 기타 설계 과업지시서 및 계약조건에 없는 사항은 용역감독관과         협의하에 처리한다.

ꊸ 報    告

❍ 주간보고 : 주간 용역수행 내용에 대하여 사업책임 기술자가 구두                    또는 문서로 전주실적과 금주계획을 보고하여야 한다.                    (매주 금요일 12:00까지 제출)

❍ 월간보고 : 월간 용역수행 내용에 대하여 현황, 세부추진내용, 문제점,                   각종 협의내용, 기타 필요사항 등을 보고하여야 한다.

(관련서류 포함, 매월 3일까지 제출)

❍ 수시보고 : 발주청 및 용역수행자가 필요시 문서나 구두보고

❍ 특별보고 : 발주청은 설계안 검토, 과업수행상의 문제점등에 대한                   제시 등 필요한 경우 보고회를 개최할 수 있다.

※ 보고서의 내용 및 부수는 발주청의 요구에 따른다.

ꊹ 附帶業務

❍ 부지현황 및 지질조사

❍ 강원도 일상감사 업무처리에 관한 규정에 의한 일상감사 서류 작성

❍ 건축법령에 의한 건축협의 신청 서류의 작성

❍ 건축법령에 의한 건축착공서류의 작성

❍ 사전환경성검토 대상인 경우 승인신청 및 보완서류 작성

❍ 국토의 계획 및 이용에 관한법률에 의한 개발행위허가 대상인 경우        신청서 및 보완서류 작성

❍ 건축법령에 의한 건축물 사용검사승인 서류의 작성

❍ 건축법령에 의한 건축물관리대장 서류의 작성

❍ 기타 필요시 발주청이 요구하는 서류작성

設計 着眼事項

❶ 입지현황

❍ 청사부지는 앞에는 복개천이 위치하며 주변에는 좌.우측 종교시설 있        으면 전형적인 주거지역임

❍ 정면에 도로를 접한 지역임

❷ 배치개념

❍ 건물은 도로변에 근접하여 청사전면의 공간을 최대한  활용하여

배치

❍ 동송 119안전센터 본연의 역활수행이 가능하도록 요구되는 용도와         기능을 완전히 충족시키고 주변환경과 조화를 이루게 설계를 하여         야 한다.

❸ 평면계획

❍ 소방장비를 안전하게 사용할수 있도록 고려한 공간배치

❍ 자연채광 및 환기등을 고려하고 에너지절약에 효율적인 배치

❍ 설계시 내풍. 내진설계

❹ 기타사항

❍ 차고문은 완전 개방시 지면으로부터 4.5M의 높이 폭은4.5M이상         으로 한다.

❍ 차고문은  오버헤드도어 로 하고  자동 및 수동을 겸한 장치 로         한다.

❍ 난방시설- 개별․난방식(차고는 온풍기를 설치하고 매연에

따른 강제 배출시설을 한다)

❍ 차고내에는 소방차량이 세차시 물이잘 빠질수 있는 구조로 설치        한다.

❍ 2층 의용소방대 청사

- 의용소방대사무실은 방풍실1, 홀 1. 화장실2, 취사시설2, 가스시설2          설치-보일러실1설치 한다

❍ 차고내 3상 전원설비  1개소를 설치한다.

❍ 의용소방대 집무실은 각각 (전기, 전화, LAN)설치하여

정보통신설비 운영시 노출되지 않도록 설계하여야 한다.

❍ 청사 내·외  방송설비(스피커 포함) 를 설치한다.

❍ 기본에 청사에 설치된 외부 경계용 CCTV를 이전하여 설치한다

成果品 納品

분 야	구 분	규 격	수 량	비 고
공 통	1. 각종 실시설계 원도	원도	각1부
	2. 실시설계 축소도면	A3	5부
	3. 설계내역서(관급내역서 포함)	A4	5부
	4. 시방서(일반, 특기, 관급)	〃	5부
	5. 수량산출서	〃	5부
	6. 단가산출서	〃	5부	견적서 포함
	7. 일위대가표	〃	5부
	8. 자재대비표	〃	5부
	9. 건축계획심의에 필요한 도서	A3	1식
	10. 공사시행 공정표	A4	5부
	11. 기타 인․허가 서류		1식
	12. CD - Rom		2매	용역성과품 전체
	13. 기타 발주처의 요구자료		1식
건 축	1. 조감도	60× 90㎝	2부	원본파일포함
	2. 각종 구조계산서	A4	5부
기계설비 전기통신 소 방	1. 장비용량 계산서	A4	5부
	2. 부하계산서	〃	〃
	3. 각종 장비 계산서 등	〃	〃