강릉소방서 공공 직장어린이집 신축공사

설계용역 과업지시서

2019. 11.

	강 릉 소 방 서

-  목         차  -

제1장 총 칙

1. 과업의 일반개요	1

2. 과업의 범위	1

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 제출서류	3

2. 업무보고 및 회의	4

3. 지급자재의 선정	5

4. 에너지절약형 건축물 설계	6

5. 보안성 검토	6

제3장 과업수행 지침

1. 공통지침	7

2. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준	8

3. 설계 일반 지침	9

4. 세부 설계 지침	11

5. 설계진행 시 유의사항	16

6. 설계도서의 분리작성	16

7. 설계도서 표기	17

8. 도면작성	17

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항	17

2. 계획 설계	17

3. 중간 설계	19

4. 실시 설계	19

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	20

2. 중간설계 납품도서	20

3. 실시설계 납품도서	20

【부록】

〔붙임 1〕 책임기술자 선임계	23

〔붙임 2〕 보안각서	24

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서	25

〔붙임 4〕 설계 검사원	26

〔붙임 5〕 주간공정보고	27

〔붙임 6〕 월간공정보고	28

제1장  총     칙

1. 과업의 일반개요

가. 과 업 명 : 강릉소방서 공동 직장어린이집 신축 공사 설계용역

나. 과업목적 : 재난활동에 종사하는 현장활동 소방공무원과 지역 중소기업 임직원 자녀양육 부담경감을 위한『강릉소방서 직장어린이집 신축 공사』설계용역

다. 사업개요

1) 위    치 : 강원도 강릉시 홍제동 577(선수촌로 68-24)

2) 부지면적 : 28,090㎡ 내 일부(1,800㎡)

3) 규    모 : 연면적 660㎡(지상1~2층)

4) 주요시설 : 원장실, 교사실, 보육실, 유희실, 실외 놀이터, 화장실, 조리실, 식당 등

5) 예정공사비 : 2,158,500천원(부가세 포함)

☞ 공사비는 건축(인테리어 포함) ․ 건축구조 ․ 토목 ․ 지반보강 ․ 기계설비 ․ 전기 ․ 통신 ․ 소방 ․ 신재생에너지 ․ 폐기물처리 ․ 인입비(전기, 수도, 가스 등) 및 기타 부대경비 등에 대한 총 공사비이며, 공종 간 배분하여 제시된 예산 범위 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 함.

※ 공사비는 예산을 초과하지 않도록 설계하여야 한다.

라. 과업기간 : 착수일로부터 90일(공휴일 포함)

1) 강릉소방서의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 설계자는 내역서 수정 등 강릉소방서의 요구에 응해야 한다.

2) 다음 경우에는 강릉소방서가 지정하는 감독자의 승인을 득하여 과업기간을 변경할 수 있다.

① 용역계약일반조건 제19조(계약기간의 연장)

② 용역계약일반조건 제24조(불가항력)

③ 용역계약일반조건 제32조(용역의 일시정지)

④ 용역계약일반조건 제32조의2 (계약상대자의 용역 정지 등)

⑤ 강릉소방서의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

2. 과업의 범위

가. 과업의 범위는 강릉소방서(이하“발주자”라 한다.) 과 설계용역자(이하“계약상대자”라 한다.)가 체결한 용역계약서 및 본 과업 지시서에 의한 일체의 설계도서 작성을 그 범위로 하며, 이에 따른 과업범위는 다음과 같다.

1) 계획설계, 기본(중간)설계, 실시설계로 구성되며, 건축허가 등 각종 인․허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의를 포함한 인․허가 처리(설계용역성과물은 제반 인․허가를 득한 성과물) 및 공사 착공신고서 제출 시까지로 한다.

2) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인․허가는 설계자가 대행하여야 하며, 사용승인 시 발주처에서 세움터 입력 등을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

3) 설계자는 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인․허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

4) 설계자는 착공신고, 사용승인신청, 전기사용신청, 소방시설 설치신고 등 설계자의 인장날인, 설계도서 확인 등이 필요할 경우 이에 협조하여야 한다.

5) 설계자는 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인․허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 강릉소방서의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

6) 설계납품 및 검수가 완료될 경우 설계용역대가 중 90%까지 지급하고, 건축허가 및 공사계약 후 관련기관에 공사 착공신고업무가 완료된 후 10%를 지급한다. 다만 강릉소방서 사정에 의해 과업의 계속적인 수행이 불가능하다고 판단될 경우 과업수행을 중도에 타절 할 수 있으며, 중도 타절의 경우 타절 시점까지의 공정을 기준으로 정산한다.

나. 각종심의, 건축허가, 조감도, 투시도 및 당해 용역수행과 관련한 각종 조사에 소요되는 제반비용은 설계자가 부담한다.

다. 공공기관의 에너지 이용합리화 추진에 관한규정, 건축물의 에너지절약 설계기준 등 관련 규정에 따라 신‧재생에너지 설비 설치 등 에너지절감형 어린이집으로 설계한다.

- 서류작성, 제출, 인증 관련 기관과의 협의

라. 사업추진 및 각종 위원회, 자문, 심의, 영향평가 등에 대한 업무 협조 지원

마. 기타 기술(설계) 용역을 수행하는 데 강릉소방서(설계 감독관)이 필요하다고 인정하여 지시하는 사항에 대한 이행 및 보고서 작성

바. 설계자는 제공된 현황측량 도면에 부합되게 설계용역 업무를 수행하여야 하며 현장과 현황도면의 일치여부를 검토하여 현장조사 결과보고서에 포함하여야 한다.

사. 공사 발주와 관련 적정 공사기간(예정공정표 포함) 산출

아. 당해부지에 적합한 신․재생에너지 설치계획 작성 및 대안제출

※계약상대자는 당해부지에 적용 가능한 신재생에너지를 검토 및 원가분석하여 최적의 대안을 제출하여야 한다.

자. 본 과업을 수행함에 있어 과업내용서에 명기되지 아니한 사항은 강릉소방서 설계자의 협의 하에 수행한다.

제2장 과업의 내용

1. 과업수행 중 제출서류

설계자는 설계진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 설계착수 시

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류 제출하여야 한다.

1) 착수 보고서(착수계) 1부.

- 책임기술자의 선임계(이력서, 기술자격증 사본 첨부) 및 분야별 책임기술자 선임계 포함(기술자격증사본, 기술경력증명서, 이력서, 연락처 등), 사업자등록증, 사용인감계

※공동도급(분담이행방식)의 경우, 계약상대자 각각 책임기술자 선임계를 제출하여   하며 주계약자의 책임기술자가 총괄 책임기술자로 지정하여야 함

- 예정공정표(계획, 중간, 실시설계의 납품예정일자 명시)

- 계약금액 산출 내역서

- 기타 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

2) 과업수행계획서(분야별 세부공정계획 및 업무흐름도)

3) 분야별 참여기술자 및 장비의 투입계획 및 작업계획서

4) 설계용역수행 조직표

5) 기타 용역수행에 필요한 사항

나. 계획설계(안) 제출 시

1) 계획설계(안)

2) 관련법규 검토서

3) 현장조사 결과보고서

4) 기타 용역수행에 필요한 사항

다. 중간설계 제출 시

1) 중간설계도서

2) 설계검사원

3) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

4) 관급자재 선정을 위한 비교 검토서

5) 기타 용역수행에 필요한 사항

※ 실시설계 착수 전 관급자재 선정에 필요한 자료를 제출하여 사용자재 결정 후 실시설계를 실시하여야 함

라. 실시설계 제출 시

1) 실시설계도서 일체

2) 종결보고서 및 설계설명서

3) 설계검사원

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 인․허가 및 관계법규에 따른 각종 인증 취득 증빙서류 일체

6) 기타 용역수행에 필요한 사항

마. 승인서류

설계자는 필요시 다음 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

1) 용역 기성부분 검사원

2) 용역 완성 검사원

3) 하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

4) 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무보고 및 회의

설계자는 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야 한다.

가. 업무보고

1) 주간공정보고

매주 금요일 등 날짜를 지정하는 날에 붙임 양식에 의거 제출한다.

2) 월간공정보고

매월 말 일자를 기준으로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임서식에 의거 제출한다.

3) 수시보고

설계용역 진행시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

- 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 강릉소방서와 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

- 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 설계자 임의로 해석할 수 없으며 강릉소방서와 협의하여 결정하여야 한다.

- 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 강릉소방서의 승인을 받아 채택할 수 있다.

- 설계자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

2) 업무착수회의

- 업무착수회의는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.

- 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

3) 정기회의 (4회)

- 현장조사 결과보고서 제출시

- 설계단계별(계획, 중간, 실시설계) 납품시 (설계보고회로 대체가능)

4) 수시회의

- 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 보고 시 보고에 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

5) 기타 자문회의

강릉소방서가 필요하다고 인정하는 경우, 당해 건축물의 디자인 향상을 위한 자문회의 등 기타 기술적 검토가 필요하거나 이해관계자 협의가 필요한 사항에 대하여 회의를 개최할 수 있으며, 이 때 과업수행자는 강릉소방서의 요청에 따라 필요한 회의자료 등을 작성하여 회의개최 3일전에 제출 및 사전승인을 득하고 필요시 회의에 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변하도록 하고 회의결과에 대하여는 설계에 적극 반영하여야 한다.

6) 업무보고 및 회의내용의 기록

각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 강릉소방서에 제출하여야 한다.

3. 관급자재의 선정

가. 근거 규정

- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」제83조 및「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」제11조에 의거 공공기관은 중소기업청장이 지정․고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매토록 규정하고 있음

나. 지급자재는 KS품 사용을 원칙으로 하고 관련 법령에 따라 녹색제품(환경표시 인증, 우수재활용 인증), 신제품 인증 제품(NEP), 우수조달물품 등 의무구매 대상품목이 우선반영 될 수 있도록 최소 2개 이상 자재를 비교검토 자료를 작성하여야 하며, 추천품목에 대한 설명자료(가격, 장, 단점 등)도 함께 제출하여야 한다.

다. 중간설계 보고회시 “나”항에서 작성한 자재사양 등을 협의한 후 협의된 내용을 중간설계 보고서에 포함하여야 한다.

4. 에너지 절약형 건축물 설계

가. 관련 규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2017-203호, 2017.12.28.)

2) 건축물의 에너지절약 설계기준(국토교통부고시 제2017-881호, 2017.12.28.)

나. ‘건축물의 에너지절약 설계기준’에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 한국에너지관리 공단과 에너지절약 사전협의 실시

1) 사전협의 내용

- 에너지절약형 설계

- 고효율에너지 기자재 사용 점검표

2) 제출서류

- 건축협의 시 제출하는 에너지절약계획서에 준용하는 도면과 근거서류

- 공공기관 신축건물 에너지 관련 사업협의 신청서

- 고효율에너지기자재 적용 점검표

- 관련자료 CD

- 기타 증빙서류 : 평가 진행 중 필요 시 서류 보완 및 설계 수정

다. 건축물에너지효율 인증취득에 필요한 서류를 작성하여 제출한다.

1) 에너지 효율등급 예비인증 신청서

2) 설계도면 및 시방서 1부(설계도서 CD 포함)

건축계획서, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도, 실내마감도, 건축 설비도, 벽체․지붕 및 바닥의 부위별 상세도, 창호 및 출입문 상세도와 사용재료에 대한 구체적 명세서 포함

3) 에너지절약계획서 1부

4) 기타 인증에 필요한 자료

5. 보안성 검토

가. 설계자는 본 과업 내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 설계자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다. (착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 과업수행자 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 설계자에게 있다.

제3장 과업수행 지침

1. 공통지침

가. 적용요령

1) 용역의 수행은 본 과업내용서에 의하되 세부적인 사항은 계약상대자(이하 “설계자”)와 강릉소방서가 협의하여 구체화시킨다.

2) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

3) 설계자는 본 과업내용서에 대한 대안을 제시할 수 있으며 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출, 강릉소방서 승인 후 채택될 수 있다.

나. 설계자와 강릉소방서의 책임 및 의무

1) 설계자는 전문적 기술능력과 경험을 가지고 건설공사의 목적, 범위, 공정 계획, 자금 계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 해야 한다.

2) 설계자는 합리적으로 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 강릉소방서가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 한다.

3) 설계자는 강릉소방서의 승인 없이 과업의 범위를 변경할 수 없다.

4) 설계자는 건축, 설비, 전기, 통신, 소방 등 관련된 각 전문분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하고 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 설계는 관련법규와 계약조건, 강릉소방서와 협의된 기본설계조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 설계자는 강릉소방서에 그 내용을 보고하여야 하며 관계법규 및 계약서 검토, 강릉소방서와의 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

6) 설계자는 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 정확히 반영해야 하며, 모든 설계 도서에 실제조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

7) 설계자는 계약체결 시와 설계용역 착수 시 그리고 설계 도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 상이점이 발생되지 않도록 하여야 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 강릉소방서에 보고하여 필요한 조치를 취하도록 해야 한다.

8) 설계자는 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용이 서로 상충되지 않도록 필요한 부문별 협조 등 만전을 기하여야 한다.

9) 설계수행을 위한 시험․검토․조사 등에 소요되는 비용은 설계자 부담으로 한다.

2. 법령 등의 적용 및 시방서 작성기준

가. 본 과업은 건축허가 당시의 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등의 위배가 없어야 한다.(모든 관련 법령은 최신 개정기준에 의하되 서로 상이한 경우에는 강화된 기준 이상으로 한다.)

나. 본 과업에 대한 세부 시행 기준은 “기본설계 등에 관한 세부시행기준(국토교통부고시 제2014-268호, 2014.5.21.)”에 의거 기본설계 및 실시설계를 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 6조(설계도서 작성기준)는 “국토해양부 고시 제2017-3호(2017.1.6.)”에 의거 작성하여야 한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계자는 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계, 협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하며, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 설계자가 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계 법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

마. 시방서의 작성기준

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 지급자재 시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토해양부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성한다.

3) 특별시방서는 자재관련시방(각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명한다.

3. 설계 일반 지침

(일반사항)

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서 납품으로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의 사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 ,검토서 제출,현장 회의 등) 하여야 한다.

다. 설계자는 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련 기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

라. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술사의 협력을 받아야 한다.

마. 실내 및 실외공간은 무장애 공간으로 계획하되, 특히, 유희실, 유아교실 등 주요 공용공간에 대하여는 ‘유니버설 디자인’, ‘Barrier Free’기준을 적용한다.

바. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 전화 및 근거리통신망(LAN) 구축은 강릉소방서와 소요 회선(직통, 교환기, 팩스, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

4) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용하여야 한다.

사. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2017-203호, 2017.12.28.)을 철저히 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계 하여야 한다.

- 건축법 제64조의2(건축물의 열손실방지), 같은 법 제65조부터 66조의2까지 규정 에 적합한 설계

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조(건축물의 열손실방지) 규정에 적합한 설계

3) 기계 및 전기설비는 고효율 에너지기자재를 의무적으로 설치하여야 한다.

4) 기계설비는 신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법 제12조 제2항 및 동법시행령 제15조 제1항을 준수하여 신ㆍ재생에너지 설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 순환골재 및 GR마크 인증 제품 등 친환경 재료 활용 확대 및 재활용 폐기물의 분리수거 시설 설치

7) 불필요하게 과다한 면적이 반영되지 않도록 주의하고, 열손실이 많은 창호 면적을 적정 비율 이하로 반영

8) 내방고객 및 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

아. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

- 소음진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음 ․ 방진시설의 설치등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

4) 공사 예정지의 기존 수목에 대한 이식 계획을 포함한 단지 조경계획을 수립한다.

자. 피난 및 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

3) 공공직장어린이집의 업무의 특성상 1층 주출입구 및 부출입구 등에 대한 보안계획을 검토 후 반영한다.

자. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 내진설계 규정에 적합한 안전한 구조로 설계한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(문서고 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계한다.

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조 계획이 이루어진 설계를 한다.

- 향후 시설의 수직 또는 수평방향으로의 증축계획이 있는 경우에는 이를 설계시 반영하여 증축예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(설계하중, Expansion Joint) 등을 수립하여야 한다.

차. 합리적인 진·출입 동선 및 주차계획

카. 주요자재 사용 계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내 자재중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 강릉소방서와 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요 자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품을 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

타. 설계협력업체

“계약상대자”가 본 과업을 수행하면서 기계, 토목, 전기, 정보통신, 소방 등 전문분야에 대한 설계 협력업체를 선정코자 할 경우에는 관련볍령(전력기술관리법, 엔지니어링 기술진흥법, 기술사법, 소방법 등)에 적격한 자격을 갖춘 업체 중에서 선정하여 “발주자”의 승인을 받아야 한다.

파. 관계기관 협의

“계약상대자”는 소방시설물에 대하여는 소방관련 법규 내용을 숙지 설계에 반영하여야 하며 상하수도, 전기, 전화 등의 수탁 공사에 대하여는 관련부서와 협의 후 그 결과를 설계에 반영하여야 한다.

4. 세부 설계 지침

가. 공통사항

1) 일반사항

· 내부 공간, 주변공간은 다목적, 다기능적 활용이 가능한 공간계획이 될 수 있도록 설계하여야 한다.

· 기타 부대시설은 상기 시설의 설계범위가 기능적, 경제적, 구조적 측면 등 현실 여건상 불합리한 부분이 있거나 부득이 변경을 요할 때에는 발주기관과 협의하여 합리적으로 재조정하여야 한다.

· 에너지절약 및 환경 친화적인 건축물이 될 수 있도록 설계 각 분야에 걸쳐 다양한 신기술 및 우수 사례가 반영될 수 있도록 설계한다.

· 시공 중 설계변경 및 공사비 증액이 최소화 되도록 기본조사 내용을 반영하여 설계하여야 한다.

· 설계도서에 특정제품의 사양을 명시하여서는 안 되며 설계에 요구되는 성능과 재질을 구체적으로 명시해야 한다.

· 주차장은 주 진입도로와의 연결성을 우선적으로 고려하되 아이들의 출입동선과는 분리하여 차량으로부터의 위험요소를 배제한다.

· 옥외의 충분한 녹지공간과 휴식시설, 어린이 놀이터 등의 시설을 효율적으로 배치하여 외부의 위험으로부터 보호하고 이용자의 편의를 겸비할 수 있도록 배치한다.

· 인근시설과의 동선의 연계 및 분리를 고려하여 조화롭게 배치한다.

· 전체 공종에서 발생되는 건설폐기물에 대하여 성상별로 분류하고, 수량산출, 내역서 및 시방서를 작성한다.

· 건축물의 외관, 옥외시설물 및 조경은 주위경관과 어울리게 하여야 하고, 인접한 건축물의 직․간접적인 피해가 발생하지 않도록 주변 환경을 철저히 조사․분석하여 공사시행과정에서 예상되는 민원을 최소화 할 수 있도록 설계하여야 한다.

· 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 및 공공기관 신재생에너지 이용 의무화제도에 근거하여 신재생에너지 설치를 계획한다.

· 어린이집 건립시 동절기 공사를 할 수 있도록 기성구조자재 사용, 건식공법 등을 적극 검토하여 설계하여야 한다.

2) 사전조사

· 과업수행을 위한 기초조사로서 현지답사 및 자료수집, 측량조사 및 관련법령 조사 등을 수행하여야 한다.

· 용역 착수 전 현지의 문제점을 면밀히 조사하여 해결한 후 설계를 실시하여야 한다.

3) 대지의 여건조사

· 지형조사 : 우천시(호우) 유수의 흐름이 계획대지에 지장 유무 판단

· 교통 현황조사 : 대지 인접교통, 자재 반출, 반입, 공사용 장비 진출입 등 공사시 교통체계 문제점 분석 및 현 교통체계가 향후 보육아동과 보육시설 이용에 미치는 영향 등을 종합적으로 조사하여 설계반영

· 도시계획 관련조사 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 등 관련법에 적법하게 조치되도록 설계

· 상‧하수도 오수관거 통과 위치조사

- 현 사업지구 기반시설(우․오수 등)과 연계하여 설계

- 인접거리 및 하수구 오수관거 연결 거리확인 및 오수처리에 대한 검토

· 인접도로, 부지 등 레벨을 정확히 파악하여 대지 및 건축물이 기반시설(도로 등)보다 낮게 되지 아니하도록 지반고 설정

4) 대지 내 조사

· 대지경계조사 : 경계선 주위에 자연적, 인위적 장애물 등 설계 시 고려할 제반사항

· 대지 내 지하조사 : 상․하수도, 가스, 전화선, 전기선, 배수 구조물, 기타 설계 시 고려할 제반사항

5) 기타 임시사용시설 조사 등

나. 건축 분야

1) 어린이집을 상징할 수 있는 독창적인 입면형태와 다양한 계층의 어린이에게 호감을 줄 수 있는 세련되고 상징성 있는 외관을 계획한다.

2) 동시에 많은 영유아가 사용하는 공간임을 감안하여 층별, 실별 동선의 혼란이 없도록 계획한다.

3) 영유아와 장애인의 이용에 불편이 없도록 계획한다.

4) 발주처의 의견을 수렴하여 창조적으로 설계하되 이용자의 편리와 운영의 효율성, 경제성을 고려한다.

5) 외부마감재는 추후 유지관리를 감안하여 충분히 검증된 자재로 선정하여 설계하고 영유아가 활동하는 공간임을 고려하여 인체에 유해하지 않고 안전한 마감 재료와 공법을 사용한다.

6) 각 실의 연계성 및 다양성을 고려하고 운영자의 관리가 용이하도록 실을 배치한다.

7) 어린이집은 최대한 안전을 고려하여 설계하고 어린의 인체척도에 유의하여 계획한다.

8) 자연 채광 및 환기가 가능토록 설계하고 동절기, 하절기 시설운영비를 최소화 하도록 설계한다.

9) 장애를 가진 영유아가 또래의 친구들과 동등한 교육을 받을 수 있는 시설로 설계한다.

10) 실내‧외 마감재료는 친환경제품을 사용하여 영유아가 건강한 생활을 할 수 있도록  설계한다.

11) 실별 검토 사항

· 보육실 : 영아반 및 시간제 보육실은 1층에 배치하며 바닥난방시설을 갖추어야 한다.

· 조리실 : 청정한 실내 환경을 유지하기 위한 채광, 환기시설을 갖추고 창문에는 방충망을 설치한다.

· 목욕실 : 난방, 미끄럼방지 장치를 하고 온수 사용시 화상을 입지 않도록 설계하고 보육실과 인접배치 한다.

· 화장실 : 난방, 미끄럼방지 장치를 하고 영유아용, 성인용 남․여, 장애인용 등 관련 규정에 준하여 설치하며, 영유아 화장실은 보육실과 연결되도록 한다.

· 양호실 : 간단한 구급약품의 비치나 응급환자에 대한 응급처치 등을 할 수 있도록 약품보관함·침대 등을 계획하고 관리실, 사무실 등에 병설하여 설치 할 수 있다.

· 놀이터 : 놀이터에 설치하는 놀이시설물은 「어린이제품 안전 특별법」과 「어린이놀이시설 안전관리법」에 의하여 놀이기구 안전검사를 필한 제품을 사용하고 안전을 고려하여 설치한다.

· 주출입구, 홀 등 : 출입구는 방풍실 설치를 기본으로 하며 화재 등 피난 시 대피에 방해되지 않는 구조를 갖추고 폭우 시 우수 유입을 방지할 수 있도록 전면에 적정한 경사를 만들면 충분한 배수 설비를 갖춘다.

· 복도, 계단 등 : 복도에는 단차를 두지 않는 것을 원칙으로 하고 계단의 각 단에는 미끄럼을 방지할 수 있는 시설을 한다.

12) 기타 검토 사항

· 실내문 : 미닫이 및 부분유리문으로 설치하며 턱이 없고 안전을 고려하여 맞닿는 부분은 고무로 마감한다. 영유아가 문에 끼이는 사고가 발생하지 않도록 닫히는 강도를 고려하여 설계한다. 지도 선생님의 영유아 관리를 위하여 출입을 통제할 수 있도록 설계한다.

· 화장실 변기 : 영유아용 및 어른용으로 구분 설치

· 화장실 세면대 : 영유아용으로 설치 등

· 화장실 걸레 세탁조 설치

· 유희실 벽면 및 복도, 기둥 등 영유아 키 높이로 충격 흡수시설 설치

· 벽면 페인트 : 낙서 방지용 등으로 마감

· 바닥재 : 청소가 용이하고 탄력성이 있는 마감재로 미끄럼방지의 기능을 다할 수 있는 바닥재

· 강당 및 유희실 : 주변에 소음피해를 줄이기 위해 방음시설 설치하고 문턱 없이 접근이 가능한 통로에 연결되어 휠체어, 보행기 등의 출입에 장애가 없어야 한다.

· 비상구를 제외한 모든 출입문 및 창문은 안쪽에서 잠길 우려가 없어야 하고 밖에서 쉽게 열수 있어야 한다.

· 기타 「영유아보육법」 시행규칙 ‘[별표1] 어린이집의 설치기준’에 적합 하여야 한다.

다. 인테리어 분야

1) 보육시설

· 어린이집 내 보육실 문 설치시 안전성, 편리성 고려

- 문이 무거워 영유아 불편 및 안전문제 발생(미닫이 문 및 가벼운 재질 사용)

- 교실 내부를 학부모가 문 밖에서 쉽게 볼 수 있도록 투명 유리창으로 된 교실문 설치

· 어린이집 교실 내·외부 충분한 전기콘센트 설치

- 전기콘센트 부족시 멀티탭 이용으로 전선이 무분별하게 늘어져 이동 중인

영유아의 안전 저해

· 냉난방시설은 교실별 개별 설치 필요

- 교실 및 유리창의 위치, 환풍구 수 등에 따라 온도가 교실별로 다름(교실별

냉난방 개별 통제 필요)

· 효율적인 수납시설 설치 필요

- 안전을 위하여 아래 부분에 무거운 비품을 보관하여야 하고, 선반을 설치하는 경우에는

물건이 떨어지지 아니하도록 지지대를 설치하여야 하며, 무거운 물건은 너무 많이

쌓아 놓아서는 아니 된다.

2) 시설

· 어린이집 출입구 주변 차양(비가림시설) 설치 필요

· 어린이집 햇빛 차단용 유리필름 시공 필요

- 햇빛이 직광으로 들어올 시 냉난방 효율 감소

· 어린이집 주변 차량 가드(볼라드) 설치 필요

- 주차 미숙·급발진 등으로 인해 어린이집 내부로 차량이 돌진하게 되는 대형

사고 우려

· 식당 설치를 최우선으로 하되, 불가능시 급식용 승강기 설치

3) 안전

· 비상시 양방향 대피가 가능하도록 설계

· 비상대피시설은 철제 계단식, 완경사로 설치 필요

- 스테인레스 미끄럼 대피시설은 여름철 화상 발생 우려

· 어린이집 내부 시설 모서리 둥글게 마감 처리

· 영유아 추락방지를 위해 창호 하단의 높이가 바닥으로부터 120cm이상 계획하      며 영유아가 딛고 올라갈 수 없도록 계획

· 각종 스위치 등 안전사고 예방을 위한 높이 조정

- 소화기 설치함, 전등 스위치, 엘리베이터 버튼, 자동문 개폐 스위치 등

4) 실외놀이터

·대근육활동 놀이기구 1종 이상을 포함하여 연령별 적합한 놀이기구 설치 필요

·영유아를 위한 모래놀이, 물놀이 등 시설 확충

·실외놀이 후 손·발 씻을 수 있는 급·배수시설 설치 필요

- 배수, 위생관리 계획 철저

5) 내부 공간 계획은 사용자 및 영유아의 동선이 명확하여야 하며, 기능적으로 연계되고 효율적이며, 수용되는 제반활동의 특성에 따른 소요공간이 제공되어야 하며, 체계적인 가구배치가 가능하도록 구성·계획 되어야 한다. 공급과 처리공간은 서비스의 필요조건을 고려하여 체계적이고 효율적으로 배치하여야한다.

6) 내부 마감 재료는 건물의 특성과 공간 및 사용자의 활동에 부합하여야 하며 영구적, 내구적, 유지보수가 용이하고 영유아의 사용에 적합하여야한다.

· 내부(벽, 천장 등)의 마감재료는 「건축법 시행령」제2조에 따른 불연재료, 준불연재료 또는 난연재료를 사용하여야 하며, 보육실은 「환경보건법 시행령」제16조에 따른 환경안전관리기준을 준수하여 설치하여야 한다. 실내장식물과 창문에 설치하는 커튼류 및 카펫 등 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제12조에 따른 방염대상물품은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법령에 따른 방염성능이 있는 것으로 설치하여야 한다.

5. 설계진행 시 유의사항

가. 설계자는 신․재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의하여 승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.

나. 설계자는 신․재생에너지원이 지열로 결정될 경우 설비의 지원 등에 관한 기준(산업통상자원부 제2016-249호, 2016.12.28.)에 의거 신․재생에너지 지열로 설계 시 시험 천공을 실시하고, 열전도 테스트 결과 및 지열이용 검토서를 작성하여 제출하여야 한다. 단, 시험 천공 등 관련 비용은 추후 정산함

다. 설계자는 인테리어 설계가 필요한 실에서는 인테리어 설계에 대한 계획·중간·실시설계 단계별로 강릉소방서에 보고회를 개최하고 승인을 받아야 한다.

- 인테리어 설계가 필요한 실(세부설계 진행시 협의)

․ 공통사항 : 로비 및 각층별 공용부문

․ 고객상담실, 각종 고객창구, 다목적실

라. 설계자는 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설 방안을 조사하여 설계에 반영하여야 하며, 조사항목은 다음과 같다.

- 전기, 통신, 상․하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타 시설물

마. 설계자는 사업 대상부지가 연약지반일 경우 연약지반 개량검토 보고서를 작성하여 설계하여야 한다.

바. 설계자는 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

사. 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토 반영하여야 한다.

아. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

자. 본 사업과 관련 특별히 고려하고, 주의해야 할 사항과 00소방서의 요구사항에 대해 적법성을 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방, 신ㆍ재생에너지 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 강릉소방서와 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축 폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 작성하여야 한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어는 기술용역계약일반조건 제5조에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8. 도면작성

가. 도면규격은 A1 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방 등 도면은 강릉소방서의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용 자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

제4장 설계도서 작성요령

1. 공통 사항

가. “국토해양부 고시 제2017-3호(2017.1.6.) 건설공사의 설계도서 작성기준”을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 “기본업무 설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 해당사항을 반영하여야 하며 도서의 양은 중급 이상으로 한다.

2. 계획설계 단계

가. 설계자는 설계 후 심사위원회의 권고(자문)사항 또는 강릉소방서의 검토의견 등을 있을 경우 계획(안)을 즉시 보완하고  아래 ‘나’, ‘다’사항을 포함하여  우리 강릉소방서의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

나. 계획(안) 작성 시 포함사항

1) 설계설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획 개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변 도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 투시도, 조감도 : 3D Modeling 또는 스케치

9) 기타 필요한 사항 및 강릉소방서 요구사항

다. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 도시계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 제공된 측량관련 도서와 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 비교검토하여 불일치하는 사항을 검토하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

3. 중간설계 단계

가. 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

나. 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 하며,

다. 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

라. 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

마. Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 00소방서의 승인을 받는다.

바. 세부 작성기준은 “건설공사의 설계도서 작성기준”에 의한다.

4. 실시설계

가. 중간설계를 기초로 하여 작성하되 과업지시서 및 수정․보완지시서에 따라 작성한다.

나. 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

다. 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

라. 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

마. 납품 전에 강릉소방서가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.

(검토용 도서 제출일자 강릉소방서와 협의)

바. 지급자재의 승인

설계자는 중간설계시 강릉소방서와 협의된 지급자재와 실시설계시 추가 또는 제외된 지급자재를 강릉소방서의 승인을 받아 설계한다.

사. 산출내역서 작성

1) 예산내역서의 작성은 일위대가표 및 정부제정 관련공사 표준품셈을 적용하여야 한다.

2) 단가적용은 국토해양부 실적단가집, 조달청 시장시공가격 등을 우선으로 적용한다.

3) 산출내역서, 물량산출서 등 전산자료 일체는 조달청과 호환 가능한 프로그램으로 작성되어야 한다.

아. 세부 작성기준은 “건설공사의 설계도서 작성기준”에 의한다.

제5장 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획설계(안) 2개	A3	5	부
2	현장조사보고서	A4	5	부
3	관련법규 검토서	A4	5	부

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	소방	전기	통신
1	중간설계보고서	A4	5	부	◯
2	도 면	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종,반접이
3	내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	개략공사비
4	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯

3. 실시설계 납품도서

가. 종결보고서

종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면인쇄하고 무선무사철로 좌철하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

다. 공사별 현장설명서(A4) : 강릉소방서 요구부수(강릉소방서 요구시)

라. 조감도(A1 이상, 표구 포함) 3부

마. 에너지 절약 계획서 2부

바. 인증 관련 신청자료 각 2부

사. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

아. 기타 강릉소방서가 요구하는 성과품

[공종별 실시설계서 제출 목록]

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공 종						비 고
					건축	토목	기계	소방	전기	통신
1	종결보고서	A4	5	부							1부로 작성
2	설계설명서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	도면	A1	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
4	계산서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	산출내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	지급자재내역서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	수량산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	단가산출서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	외주 견적서 포함
9	일위대가표	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	일반시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	특기시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	지급자재시방서	A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	조감도		3	부	◯						틀포함
14	공정표		1	부							전공종 포함
15	CD-ROM		3	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
16	기타 강릉소방서 요구사항				◯	◯	◯	◯	◯	◯	기계,전기․통신 관급도면(A3반접):3부 추가

※ 1. 조감도는 제출시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출

2. 제본두께가 적을 경우, 산출내역서, 일위대가, 단가산출서 등은 합본가능

3. 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주 시 별로 제작 제출

4. 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

〔붙임 1〕 책임기술자 선임계

책임기술자 선임계

1. 용 역 명 : 강릉소방서 직장어린이집 신축공사 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

- 아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 생 년  월 일 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강릉소방서장 귀하

[붙임2] 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                      설계용역

2. 계약  일자 : 20   .   .   .

3. 착수  일자 : 20   .   .   .

4. 완수예정일 : 20   .   .   .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 기술용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 00소방서에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행 과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역계약특수조건 제13조(저작권 및 소유권)에 의거 00소방서에 귀속됨을 알고 별도로 00소방서의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

20   년    월     일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강릉소방서장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급 승인 요청서

1. 용 역 명 : 강릉소방서 직장어린이집 신축공사 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

-  아       래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기인에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역계약특수조건 제6조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강릉소방서장 귀하

〔붙임 4〕설계 검사원

설 계 검 사 원

1. 용 역 명 : 강릉소방서 직장어린이집 신축공사 설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 20  .   .   .

4. 착수일자 : 20  .   .   .

5. 완수예정일 : 20  .   .   .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간, 실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

20  .   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강릉소방서장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 :  강릉소방서 직장어린이집 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(20 . . .)	금주예정사항(20 . . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강릉소방서장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월 간 공 정 보 고

□ 용 역 명 : 강릉소방서 직장어린이집 설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 20  년  월  일 ～ 20  년  월  일

◦계약금액 : ○○○원

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (20 . . . ～ 20 . . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강릉소방서장 귀하