「어린이 119안전체험마을」 건립

설계용역 과업지시서(안)

2020. 08.

	강원도소방본부

목    차

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 과업명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 과업의 범위	2

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	5

2. 업무보고 및 회의	7

3. 설계에 사용하는 재료	8

4. 에너지절약형 건축물 설계	9

5. (가칭)어린이119안전체험마을 건립 자문위원회	9

6. 장애물 없는 생활환경 인증(BF)	10

7. 보안성 검토	10

8. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	10

Ⅲ. 설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	11

2. 설계 일반지침	12

3. 분야별 설계기준	15

4. 설계진행 시 유의사항	20

5. 전시․체험물 제작 설치와의 관계	21

6. 설계도서의 분리작성	22

7. 설계도서의 표기	22

8. 도면작성	22

9. 시방서	23

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통사항	24

2. 기본설계(계획설계)	24

3. 기본설계(중간설계)	26

4. 실시설계	29

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서	31

2. 중간설계 납품도서	31

3. 실시설계 납품도서	32

<부 록>

1. (붙임 1) 보안각서	34

2. (붙임 2) 책임기술자 선임계	35

3. (붙임 3) 하도급승인 요청서	36

4. (붙임 4) 계획, 중간, 실시설계 검사원	38

5. (붙임 5) 주간공정보고	39

6. (붙임 6) 월간공정보고	40

7. (붙임 7) 특정자재사용리스트	41

8. (붙임 8) 표준설계관리 일정표(작성예시)	42

9. (붙임 9) 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	43

10. (붙임 10) 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	43

※ 참고사항	44

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 과업명칭 : 어린이 119안전체험마을 건립 기본 및 실시설계 용역

2. 과업의 목적

본 과업은 어린이 119안전체험마을(체험시설, 사무실, 휴게실 등) 증축을 위한 설계용역의 내용과 용역수행자의 업무범위, 기타 용역수행에 필요한 제반 기술적인 사항 등을 규정하여 최적의 설계 창출을 도모하고 당해 과업수행에 적정을 기하고자 함.

3. 과업의 개요

3-1. 건축개요

가. 대지위치 : 원주시 동부순환로 201 원주소방서(원주소방서 부지내)

나. 용    도 : 문화 및 집회시설(전시장, 체험관)

다. 건축예정 규모 : 설계과정 중 조정될 수 있음.

1) 대지면적 : 17,264㎡중 건축부지는 1,575㎡ / 건폐율 60%, 용적율 200% 이하

2) 연면적 : 1,200㎡(± 5%)

3) 규  모 : 지상 3층 지하1층 1개동 규모(부지 내 도로교통 안전체험시설 포함)

- 건축 연면적, 층수, 구조 등은 추정공사비 범위 내에서 설계자의 기획의도와 공간활용계획 등에 따라 합리적으로 조정될 수 있다.

- 건물규모는 설계 진행과정에서 강원도소방본부(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

- 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(기술용역계약일반조건 등 참조)

3-2. 과업기간 : 착수일로부터 150일(5개월) / 공휴일 포함

가. 기본설계 : 착수일로부터 90일(계획설계 : 30일, 중간설계 : 60일)

나. 실시설계 : 기본설계 완료일로부터 60일

※ 기본설계 중 계획설계 시 배치평면(안) 3개안 이상을 3D로 작성하여 기본설계(안) 확정 후 조감도를 제출한다.

3-3. 예정공사비 및 설계비

가. 예정 공사비 : 3,578,000천원 (부가세 포함)

⁕ 건축공사 : 2,378,000천원 / 전시물 제작 설치 : 1,200,000천원

나. 예정 설계비 : 155,338천원 (부가세 포함)     ⁕ 계약 시 일부 변경될 수 있음.

<주의사항>

❶ 제시된 공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 인입비(전기, 수도, 가스 등), 전시물 제작□설비 등에 대한 총 공사비입니다.

❷ 제시한 설계비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 정보통신, 소방, 관급자재, 전시시설물 제작□설치 등 제반 분야의 기본 및 실시설계용역 등의 총 설계비입니다.(각종 행정절차에 필요한 자료작성 등 제반업무를 포함)

※ 예비인증(에너지효율등급, 제로에너지) 취득 일체비용을 포함함.

❸ 사업 규모(부지, 연면적, 공사비, 설계비 등) 및 용역 기간은 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음

.❹ 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격 예산을 초과할 수 없음)

❺ 기본설계 완료시 예정공사비 범위 내에서 전체 추정공사비 산출결과를 미리 보고하고 실시설계과정에 물량조정 등에 참고할 수 있도록 해야 함.

4. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계(가설계획 포함)로 구성되며, 관계기관과의 사전협의 및 각종 인 ․ 허가(건축협의, 실시계획 인가 등 포함)에 필요한 서류작성․제출, 연면적 증가 시 면적승인 및 시설비 증액협의에 필요한 모든 업무를 포함한다. (철거도서 작성 및 수량산출 포함)

※ 설계용역 성과물은 제반 인 ․ 허가, 각종 심의, 인증을 득한 성과물이여야 한다.

나. 대상 및 연령별로 적합하고 차별화된 체험시설을 통해 체험의 실효성을 높이고 스토리가 있는 실제 상황구현을 위한 효율적인 공간구성 배치(체험시설, 교육장 및 장비 전시장, 창고, 사무실 등)

다. 녹색건축 우수 등급(그린2등급), 건축물의 에너지절약설계기준(에너지절약계획서 제출), 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(건축물에너지효율 1등급 취득 포함), 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법 시행령(신․재생에너지 공급의무 비율) 및 장애물 없는 생활환경 인증에 관한 규칙 등을  고려하여 설계하여야 한다.(발주기관에서 별도 부담, 용역비에 제외)

※ 건축물 에너지효율등급 예비인증, 녹색건축 예비인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득 일정 등은 추후 협의 후 조정할 수 있다. (해당시)

※ 과업의 특성상 건축물 에너지효율 인증의 등급이 변경되는 경우 설계용역비를 조정한다. (해당시)

라. 인허가 업무

1) 본 용역의 시행에 필요한 일체의 대 관청 인□허가는 수급인이 대행하여야 한다.

2) 수급인은 용역착수 후 현장을 답사하고 해당 인허가 관청을 방문․협의하여 관련법규 및 규제사항 등을 면밀히 분석하여 본 과업의 건축허가 및 건축허가를 취득하기 위한 선결조건 등을 파악하여야 하며, 그 추진계획을 작성하여 제출하여야 한다.

3) 본 과업의 교통영향평가․개선대책수립 등 각종 영향평가, 도시계획시설결정 및 실시계획의 인가를 실시할 경우 수급인은 각종 용역업체와 협의하여 발주기관 업무에 적극 협조하여야 한다.

4) 수급인은 향후 사용승인 신청 시 준공도서 작성 및 제출, 인장날인 등 해당 발주기관의 업무에 적극 협조하여야 한다.

5) 수급인은 본 용역이 완료된 후라도 대 관청 인허가(협의사항)에 따른 서류보완이 필요하여 발주기관의 요청이 있을 시 적극 협조하여야 한다.

마. 설계자의 의무

1) 본 과업수행을 위하여 각 분야별 기술자가 주요시설을 조사하여 설계에 충분한 기초자료 수집 및 지식을 습득한 후 과업에 임하도록 하되, 조사계획 등에 대하여는 발주기관과 사전 협의를 거쳐 추진하여야 하며, 조사 후 결과 등을 보고서로 작성하여 제출하여야 한다.

2) 과업수행 과정에서 필요시 발주기관의 요구에 따라 위원회 등의 자문을 거쳐, 지적·보완사항이 있을 경우에는 발주자의 지시에 따라 설계에 반영하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 사업 책임 및 분야별 책임 기술자는 과업기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주자의 사전 동의를 받아야 한다.

4) 발주자의 의견이 반영된 기본설계 확정안을 발주기관에게 제출을 하고 중간 및 실시설계를 진행한다.

5) 발주자 및 관계 부서와 긴밀한 협조 체제를 유지하고 분야별 전문가의 참여를 유도하여 보다 광범위한 의견을 집약시킨다.

바. 현황측량 및 지반조사(NX 5공) 실시

사. 본 과업내용서에 명기되지 않았으나, 관계법규 및 발주기관의 요구하는 사항에 대하여 설계한다.

아. 전시‧체험시설 분야 업무범위에 따라 계획안의 변경 및 심의‧인증 기간이 추가 소요될 수 있다.

자) 기타 발주처에서 제시하는 부대업무

1) 도로교통 체험시설 및 미니어처(홍보체험 부스) 예정 부지 전기 시설 설치 등 발주처와 협의하여 설계

2) 강원도 계약심사 업무처리 규칙에 의한 심사 및 지적사항에 대한 시정조치

3) 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 수급인은 용역착수 시에 다음의 자료 3부를 제출한다. 단, 수급인은 다음 서류를 사업담당 감독관과 사전 협의/승인을 받아야 한다.

1) 착수계 (문서포함)

2) 설계용역 수행 조직도(연락처 기재)

3) 전체 참여기술자현황(분야, 성명, 업무, 등급, 자격종목, 참여기간, 생년월일 등)

4) 사업 및 분야별 책임기술자 선임계(자격증 사본, 건설기술진흥법에 의한 경력증명서, 재직증명서 포함)

- 공동, 분담이행일 경우 대표자 선임계 제출

5) 각 공종별(건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등)별 참여기술자 서류(자격증 사본, 건설기술진흥법에 의한 기술경력증명서, 재직증명서)

- 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

- 각 공종(하도급 포함) 참여기술자 변경 시 즉시 변경승인 요청 할 것

- 건설기술진흥법 제21조에 따른 경력신고 시 명단포함 기술자만 신고

6) 과업수행계획서

7) 설계용역 예정공정표

- 붙임의 표준설계관리일정표 참고, 모든 관련 용역의 일정을 포함하여 작성

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서(분담이행자 용역수행 내역서 포함, 총차 / 금차 구분)

9) 하도급 예정현황(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출)

10) 인력(실제 참여인력)투입 예정현황

※ 건설기술 진흥법 제30조에 따라 기술자현황 및 계약현황, 관련기관 통보 예정

11) 보안각서(보안각서 제출자만 용역 참여 할 수 있음)

- 하도급 공종은 하도급승인요청서에 첨부

12) 기타서류(설계용역 계약서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

14) 상기 제출물을 담은 CD 또는 usb(추후 최종도서납품 시 제출)

나. 수급인은 착수계 제출 후 협의 된 날짜에 착수회의를 개최하며, 위 ‘가’호로 승인된 착수회의 자료에 현장조사 결과 등을 포함하여 설명한다.

다. 수급인은 예정공정표에 따라 계획설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 계획설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 계획설계도서를 납품한다.(문서 제출)

1) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

2) 관련법규 검토서

3) 현장조사 결과보고서, 유사시설 견학보고서

4) 현황측량 성과도

5) 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

라. 수급인은 예정공정표에 따라 중간설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 중간설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 중간설계도서를 납품한다.(문서 제출)

1) 중간설계검사원[붙임 3]

2) 중간설계도서

3) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

4) 지반조사보고서

5) 주요공법, 구조, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

6) 녹색건축 인증 우수등급 취득 관련 검토서 및 자료(해당 시)

7) 건축물 에너지효율 1등급 취득 관련 검토서 및 자료(해당 시)

8) 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료(해당 시)

9) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

바. 수급인은 예정공정표에 따라 실시설계에 대하여 감독관과 사전 협의, 승인을 받아 실시설계보고회를 거쳐 수정, 보완한 후 아래의 실시설계도서를 납품한다.(문서 제출)

1) 실시설계검사원[붙임 3]

2) 실시설계도서 일체

3) 세부제출도서는 제5장 납품목록을 참조

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 종결보고서

6) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료 포함)

7) 설계검사원

8) 건축물 에너지효율 1등급 예비인증서

9) 녹색건축 예비인증서

10) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

11) 손해배상보험증권 (보증기간은 공사준공일까지 산정)

12) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

사. 기타서류

1) 용역의 진도보고

- 주간공정보고[붙임 4]

- 월간공정보고[붙임 5]

2) 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

3) 총사업비 지침에 따른 설계 적정성 검토를 위한 도서(필요시)

2. 업무보고 및 회의

가. 업무보고

1) 주간업무보고 : 매주 금요일 오전 10시까지 붙임 양식에 따라 발주처 사업 담당 및 감독관에게 전자우편으로 제출한다. (hwp파일로 작성, 책임기술자 확인, 각 공종 포함)

2) 월간업무보고 : 매월 말 오전 10시까지 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.(hwp파일로 작성)

3) 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 발주처 사업 담당 및 감독관에게 제출하여야 한다.

나. 업무회의

1) 일반사항

가) 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나) 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다) 본 설계지침서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라) 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 한다.

마) 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영한다.

2) 착수회의(Kickoff Meeting)는 장소와 일자를 협의하여 개최하고 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명한다.

3) 계획/중간/실시설계 발표회 : 수급인은 계획/중간/실시설계 발표 자료를 작성하여 최소한 발표회 7일전까지 발주처 담당자와 사전 협의를 거친 후 발표회를 수요기관 등에서 개최하여 관련내용을 협의한다.

4) 수시회의 : 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획설계, 중간설계, 실시설계 발표 시 필요한 자료를 작성․배부하여야 한다.

5) 기타 회의 : 수발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의 등 각종 자문회의를 개최 할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

6) 업무보고 및 회의내용의 기록 : 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계에 사용하는 재료

가. 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」에 따른 고효율에너지기자재를 사용한다.

나. 인체에 유해한 물질이 함유된 자재는 사용을 할 수 없으며, 가능한 친환경자재의 사용을 고려한다.

다. 관급자재의 선정

1) 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률시행령」 제11조에 따라 중소기업청장이 지정, 고시한 품목의 공사용 자재를 직접 구매하도록 설계한다.

2) 설계자는 상기 규정에 의거 해당되는 자재 리스트를 작성, 제출하여야 하며, 관급자재 선정을 위하여 각 자재에 대한 비교, 검토 결과를 발주청에 보고하고 승인 후 관급자재를 선정한다.

라. 제품선정에 있어 부득이하게 신기술 및 특허 등의 특정제품이나 공법을 사용하여야 할 경우, 유사 제품을 조사하여 비교, 검토하고 제품선정 사유를 작성하여 발주청의 사전 승인을 받아야 한다.

※ 특정제품이나 공법 사용(적용)시 사전에 별도의 절차를 거쳐야 하며, 임의로 특정제품이나 공법을 설계에 반영하여 설계도서의 재작성 등에 따른 용역 지연 등은 설계자에게 책임이 있음.

4. 에너지절약형 건축물 설계

가. 관련규정

1) 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정

2) 건축물의 에너지절약 설계기준

3) 효율관리기자재 운용규정

4) 신에너지 및 재생에너지 개발‧이용‧보급 촉진법에 따라 신‧재생에너지 설비의 지원 등에 관한 규정

5) 건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증 기준

6) 녹색건축 인증 기준

7) 기타 에너지 관련 제반 규정

나. 건축물의 에너지절약 설계기준에 따라 설계하고 건축허가 신청 전 에너지관리공단과 에너지절약 사전협의 실시

다. 건축물 에너지효율등급 및 제로에너지건축물 예비인증을 취득하여야 한다. 단, 녹색건축인증, BF 인증이 필요할 경우 취득에 필요한 수수료 및 기타비용(컨설팅비용 등)은 발주처에서 별도 부담한다.

5. (가칭)어린이119안전체험마을 건립 자문위원회

가. 수급인은 안전체험마을 건립 자문위원회 자문에 필요한 준비 및 협조를 하여야 한다.

나. 수급인은 본 자문위원회의 설계 자문 내용에 대하여 특별한 사유가 없는 한 그 결과를 설계에 반영하는 등 필요한 조치를 하여야 하며, 이에 따른 용역 내용의 변경 등이 발생할 경우에는 발주처와 협의하여 정한다.

6. 장애물 없는 생활환경 인증(BF)

가. 장애물 없는 생활환경 예비인증을 취득하여야 하며, 취득에 필요한 수수료는 발주처가 부담한다.(해당 시)

7. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

8. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사 시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대해 설계단계별(계획, 중간, 실시)로 어떻게 반영할 것인지 계획서를 작성하여 착수시에 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시에 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

Ⅲ. 설계수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술 진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 해당 지자체의 조례, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방시설공사업법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급 촉진법, 환경영향평가법, 도시교통정비 촉진법 등 당해 사업 관련된 법령과 각종 고시, 지침 등에 위배되지 않아야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 [국토교통부 고시]에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거 작성한다.

라. 설계의 책임 및 손해배상책임

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간 이내에 성과품을 납품 완료하여야하며, 이를 위반 시「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정자치부 예규)」 제14장 용역계약 일반조건에 의거 지연배상금 조치를 하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령[건축사법 제11조(자격의 취소 등), 제20조 업무상의 성실 의무 등]에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제55조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조(계약상대자의 손해배상책임)

다) 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건(조달청지침) 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

라) 엔지니어링산업 진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

마) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

바) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령(국토교통부고시)

사) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

2. 설계 일반지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용도서 별도)로 구분하여 제출한다.

나. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

다. 수급인은 공사 중 설계도서와 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서, 검토서 제출, 현장 회의) 하여야한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약 이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법 시행령 제91조의3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의  건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자가 건축사와 협력하여 해당 건축설비를 설계하여야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안전성과 조형미를 살리면서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물 및 지형과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

2) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

3) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안전성 있고 기존 건축물과 조화롭게 설계하여야 한다.

4) 도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

6) 해당 허가권자와 사전협의를 통하여 관계법 등에 따른 불필요한 변경이 생기지 않도록 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전검토를 철저히 하고 심의일정에 의한 사업일정에 차질이 없도록 한다.

사. 수요를 감안한 설계

1) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

2) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계한다.

3) 성장과 변화를 예측하여 합리적인 규모로 외관은 조형성·독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지를 반영하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우, 대책을 수립하여 설계한다.

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’과 ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다.

2) 창호, 내‧외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계를 하여야 한다.

4) 「신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법」 제12조 제2항에 따른 신재생에너지 설비를 설계하여야 한다.

5) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영한다.

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계를 한다.

차. 환경친화적 부지환경 조성

1) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 설계한다.

※ 소음·진동 관리법에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 내진설계 및 진동하중에 대한 검토를 적용한 안전한 구조설계를 계획한다.

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계를 계획한다.

3) 지반조사 결과에 따라 합리적인 기초구조 계획이 이루어진 설계를 실시한다.

파. 효율적 부지 활용 설계

1) 향후 시설의 증축 가능성에 따라 효율적인 부지활용 계획을 수립하여 반영한다.

2) 계획 시 수요기관과 반드시 협의하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 관급자재심의 전 철저한 검토(예산 및 기능) 후 심의회개최 결과에 따라 관급자재를 적용한다.

2) 주요자재는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재를 사용한다.

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 건축물의 요구성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 (붙임7)의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타 업체에 일괄하여 하도급 할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 건설공사의 수량 및 견적업무

마) 구조계산 및 검토 등에 관한 업무

바) 기타 발주기관에서 하도급이 필요하다고 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급 하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

너. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요)

1) 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립, 반영하여야 한다.

3. 분야별 설계기준

가. 교통분야

1) 교통

- 교통흐름에 대해서는 건물 외부 차량(버스 포함)의 접근을 체계화하고 이용 상에 간섭이 없도록 하는 등 필요한 체계를 구성한다.

- 버스는 체험객을 승·하차 한 후 사업부지내 체험객의 안전을 고려하여 계획한다.

- 향후 조성될 대중교통(시내버스, 택시)의 승강장 설치 등은 교통관련기관과 충분히 협의하여 교통계획을 한다.

나. 토목분야

1) 설계자는 현장답사를 통한 제반조사를 실시하여 설계 기초자료를 조사하고 조사내용은 설계에 활용한다.

2) 토목계획은 하부구조를 조성하는 단계로 시설의 효용성, 구조의 안전성 및 경제성을 고려하여 계획한다.

3) 지하구조는 대지여건, 지층조건, 공사목적 공법의 경제성 및 시공성 등을 종합적으로 고려하여 최적의 공법을 적용할 수 있도록 계획한다.

다. 건축분야

1) 주차계획

- 주차장법, 건축법 등을 고려하여 합리적으로 계획을 해야 하고 유도설비 등의 충분한 설치를 통해 보행자의 안전을 확보한다.

- 차량 진․출입은 주변 도로망의 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활하게 계획한다.

- 화재 시 긴급 피난․ 구조를 위한 차량 등의 진입공간을 계획한다.

- 안전체험관 주차장은 향후 수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획한다.

2) 건물의 배치계획

- 주변 환경과의 상호 관계 및 교통체계와 주변 토지이용계획을 검토하고, 장래의 지역개발 방향과 토지이용변화를 수용할 수 있도록 융통성 부여하여 배치한다.

- 부지 내 조경설계와 연계된 건축물의 배치계획을 하여야 한다.

- 공공의 이익을 고려하여 계획하고, 상충된 기능의 분리 및 보완적 기능은 집약시켜 용도간 결합성이 유지되도록 계획한다.

- 에너지 절약형 및 친환경 공법·재료를 적극적으로 적용하여 친환경건축물로 계획 및 배치하여야 한다.

- 향후 체험시설의 증축을 고려한 종합적인 부지 활용계획과 전체 부지의 단계별 배치 개념을 제안(건물배치, 조닝, 주차공간 등 오픈스페이스 활용) 하여야 한다.

3) 동선계획

- 차량과 보행이 분리되도록 하고 부지 내 야외 공간은 휴식공간 등이 적절하게 배치되도록 계획하여야 한다.

- 장비 및 물품 반‧출입에 있어 합리적인 기능성과 안정성이 확보되어야 하며, 원활한 이동이 가능하도록 동선계획을 수립하여야 한다.

- 체험객, 관리자 및 서비스동선 등 시설 체험객의 특성을 고려하여 동선계획을 수립하도록 한다.

- 체험동선 내에 적절한 휴게 공간을 마련해야한다.

- 동선의 독립성과 혼용 등을 고려하고 피난 및 보안에 충실하게 계획한다.

4) 평면계획

- 체험관 면적구성 및 체험시설 구성 및 동선은 설계공모지침서를 준수한다.

- 각 시설별 영역은 상호 시설별 기능에 따라 분리와 연계를 고려하여 효율적 공간계획이 되어야 한다.

- 체험객의 출입과 관리자의 출입구는 가능한 분리하여 외부인의 출입을 통제하고 안전체험관의 보안과 안전을 확보할 수 있도록 계획한다.

- 단체 체험객의 대기공간과 비를 피할 수 있는 캐노피 시설을 계획한다.

5) 입면계획

- 설계의 기본개념을 부각시킬 수 있는 상징성과 친근감 그리고 공공시설로서 품격을 고려하여 계획한다.

- 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

- 외장 마감은 첨단시설에 부응하여 계획하되 태양복사열로 인한 실내온도 상승으로 에너지 사용을 높일 수 있는 유리 또는 금속재질의 커튼월 공법 등은 최소 적용할 수 있도록 계획한다.

- 외부 CI 및 각종 안내표지 등의 부착을 고려하여 입면 계획한다.

- 냉방부하 저감을 위한 차양 등의 일사 차폐시설 설치를 고려한다.

6) 단면계획

- 안전체험관의 특성에 맞는 충분한 천장 높이와 복도 및 각 체험실로의 출입문의 폭을 확보하도록 계획하며, 전시‧체험설계자와 협의하여 계획한다.

- 기능별 조닝을 통해 서로 독립되면서 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획한다.

- 업무시설ㆍ연구시설ㆍ부대시설 등의 기능이 유기적으로 연계되도록 계획한다.

- 장애인ㆍ노약자 등의 이동에 불편이 없도록 적합하게 계획하고 사무실에는 외부 발코니 등 공간을 두어 운영자가 업무 도중에 출입하며 신선한 공기를 마실 수 있는 간이 휴게공간을 계획한다.

7) 재료 및 색상계획의 주안점

- 사용자재는 KS 규격품 사용을 기준으로 하고 유지보수가 용이한 재질 및 마감방법을 선택한다.

- 녹색건축물 인증과 관련하여 환경 친화적 제품(환경마크 인증 제품) 및 우수재활용 인증마크제품(GR마크 인증 제품)을 우선적으로 사용하여야 한다.

- 사용자재는 불연 재료로 설계하여야 하며, 실내의장 설계로 인한 가연성 자재 사용 시 방염처리를 소방관련법령에 맞도록 설계한다.

- 질감이 좋고 내후, 내구적이며 비 오염성인 재료를 선정하여야 하며, 특히 내장 재료의 경우 가급적 실내공기를 오염시키지 않고 유해물질이 적은 친환경 재료를 선정하도록 한다.

- 색채 사용 시 색약자를 고려하고 고령자 및 약시자를 배려한 문자 및 도안 등을 계획한다.

8) 인테리어 계획

- 체험관등 특성에 맞는 음향을 고려하되, 전체적인 디자인과 조화를 이루도록 하며 전체 실내공간에 적응성과 체험관 기능을 위한 음향․통신 등 설비를 반영한다.

- 다수의 체험객이 사용하는 공간의 경우 향후 트렌드를 고려한 인테리어 계획을 하고 편의성을 확보한다.

- 건축물 내·외부 및 주차장 등 요소요소에 안전사고 대비와 전시물 훼손·유출 등의 방지 목적으로 CCTV 설치를 계획한다.

- 문 손끼임 방지, 바닥미끄럼 방지, 유아 등 추락 방지, 모서리 및 각진 부분의 안전장치 적용 등을 통해 체험객의 생활안전사고 예방을 위한 계획한다.

라. 구조분야 계획

1) 최소 인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 중앙 집중형으로 계획하고 에너지 절약적인 시스템을 채택한다.

2) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있어야 한다.

3) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수한다.

4) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

5) 재난과 지진(내진설계), 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려한다.

6) 장스팬(Long Span)구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

마. 기계(소방)분야

1) 최소 인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 중앙 집중형으로 계획하고 에너지 절약적인 시스템을 채택한다.

2) 건축 및 소방 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

3) 건축ㆍ토목ㆍ전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

4) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

바. 전기(소방)분야

1) 최소 인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 중앙 집중형으로 계획하고 에너지 절약적인 시스템을 채택한다.

2) 전기설비는 최적의 시스템으로 안전성․경제성․확장성 등에 중점을 두어 계획하고, 유지관리를 일원화한 시설통합관리시스템을 고려한다.

3) 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」에 의한 신재생에너지 이용의 구체적인 추진방안(경제성, 시공성, 유지관리성 등)을 비교 검토하여 최적의 시스템을 계획에 반영한다.

4) 모든 조명기구는 실내디자인 및 설비마감과 조화가 되게 하고, 고효율 LED조명의 사용을 고려한다.

5) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

사. 정보통신분야

1) 최소 인원으로 운영ㆍ관리가 가능하도록 중앙 집중형으로 계획하고 에너지 절약적인 시스템을 채택한다.

2) 모든 정보통신설비는 신뢰성기능성․안전성․경제성․확장성․에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

3) 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

4) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

5) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

아. 조경계획

1) 디자인, 식재계획, 외부 시설물 등의 합리적인 설계안을 제시하고, 외부공간은 친환경공간으로 조성한다.

2) 부지 내 조경계획과 연계된 설계의 반영과 대상지 주변 자연환경 및 특성 등을 고려하고, 자연친화적 소재를 활용하여 옥상공간 활용(옥상녹화 및 정원) 등 다양한 공간조성을 검토한다.

3) 안전체험관 전체이미지와 공간별 이미지에 부합되는 시설물의 형태 및 재질, 색상 등을 고려하여 수목은 주변식생과 조화될 수 있는 수종을 도입한다.

- 자연친화적인 환경을 구현할 수 있는 수종 선정

- 계절별 변화감을 주고 수형이 아름다운 수종 선정

- 구입이 용이한 시장성 있는 수종 및 유지관리가 용이한 수종 선정

4) 전체적 분위기와 조화되도록 자연풍경식 위주로 식재하며, 시설주변은 정형적 형태를 미적·기능적 목적과 부합하도록 계획한다.

자. 기타 유의사항

1) 공사비는 예정 총공사비 이내로 계획하여야 한다.

2) 안전체험관에 적용되는 최신 관련법 규정을 확인하여야 한다.

3) 관계기관 인허가·심의 등 행정절차 및 인증계획을 수립하여 제출하여야 한다.

4) 전체 연면적, 주요기능 및 시설면적의 ±5% 범위 내에서 면적을 조정할 수 있으며 설계공모지침서를 참고하여 계획한다.

4. 설계진행 시 유의사항

가. 수급인은 신재생에너지 사용(지열, 태양광, 태양열 등)에 대하여 에너지사용계획서(또는 신재생에너지 설치계획서)를 작성하여 에너지관리공단과 사전협의/승인을 받아야 하며, 사전협의 결과서를 제출하여야 한다.(필요시)

나. 수급인은 현황측량을 실시하여 측량성과도를 기준으로 설계를 진행하며, 대지경계측량의 경우 필요 시 지적공사에 측량을 의뢰(경계복원측량)하여 성과도를 제출한다.

다. 수급인은 건물에너지효율등급, 제로에너지건축물에 대한 (예비)인증서를 용역 완료시에 함께 제출하여야 한다. 단 녹색건축물 및 장애물이 없는 생활환경(B/F) 해당 시 추후 발주처에서 별도 발주

라. 지질조사 공수는 NX 5공이며, 사전에 위치 선정 등 지질조사계획서를 발주기관 담당자에게 제출하여 승인 후 지질조사를 시행하고 지질조사 후 결과보고서 제출한다.(필요시)

마. 수급인은 지하매설물 여부에 대해 관할기관, 해당기관 등을 통해 조사하여야 하며, 지하매설물이 존재 시 이설방안을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.   (조사항목 : 공공시설물, 전기/통신/상하수도 시설물 및 기존 구조물, 기타시설물 등)

바. 수급인은 상수도는 기존 인입관로를 조사하여 가장 최단거리로 설계에 반영한다.

사. 수급인은 사업 대상 부지가 연약지반 또는 암반일 경우 관련보고서를 작성하여 설계한다.

아. 수급인은 부지 경계부근의 도로, 인접대지 및 구조물 등에 피해가 없도록 설계하여야 하며, 피해가 예상될 시 관련 내용 및 대책을 사전 협의 후 설계에 반영하여야 한다.

자. T.B.M(가수준점)을 부지 내 2점 이상 설정하여 도면에 표기하여야 하며, 유실 또는 훼손 우려가 없는 위치에 표시한다.

차. 수급인은 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영하여야 하며, 비산먼지 방지대책으로 세륜기 설치 등을 검토하여 반영한다.

카. 수급인은 「건설현장 축중기 설치지침」에 의거 축중기를 설치하여야 하는 현장은 의무적으로 설계에 반영하여야 한다.

타. 수급인은 기초공법(지정공사를 포함) 및 지하 굴토공사를 위한 흙막이설계 시 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변 구조물의 피해 등을 고려하여 적절한 방법을 선정하여 설계하여야 한다.

- 공사 착공 후 지질조사 분석보고서의 오류로 설계변경이 불가피하여 사업에 막대한 지장을 초래 시 보완설계 등 추가과업을 추가로 수행함은 물론 고의성, 경중을 검토 후 관련법령에 의거 조치됨을 숙지하고, 철저히 지질조사, 분석을 하여야 한다.

파. 장애인 등에 대한 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영한다.

하. 수급인은 각 분야별(건축, 토목, 조경, 설비, 전기, 통신, 소방) 실시설계 도서를 종합적으로 검토하여 향후 시공 시 분야별 도면 상이로 인한 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

거. 내역서 작성 시 감독기관의 감독관실에 비치되는 집기류 등 임대비용은 공사규모/공사기간별로 적정금액을 내역에 별도 반영하여야 한다.

너. 설계 완료 후 착공 시 시공사가 시행한 지반조사에 의거 기초구조 및 가설공법에 대한 설계변경 사항이 발생할 경우 설계자는 이에 대하여 검토하여야 하며, 감독기관(감리자 포함)이 설계변경의 타당성을 인정한 경우 변경사항에 대한 재설계 및 제반사항을 이행하여야 한다.

5. 전시‧체험물 제작 설치와의 관계

가. 전시‧체험시설에 대하여는 협상에 의해 선정된 전시‧체험업체의 내용을 반영하고 상호협의를 통한 설계도서 작성을 원칙으로 한다.

나. 전시‧체험공간은 주제 및 용도에 따라 전시‧체험계획 설계자와 협의를 통해 전시‧체험실의 수평, 수직적 규모를 충분히 검토하고 여유를 두어 계획한다.

다. 전시‧체험공간의 폭은 계획에 따라 전시‧체험물을 시각적으로 관람하기 쉬운 폭으로 전시․체험설계자와 건축설계자간 합의를 통해 설정하여 계획한다.

라. 건축공사와 전시‧체험물 제작 설치 간 명확한 책임한계를 구분하여 설계도면을 작성한다.

6. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 작성 전 발주기관과 협의하여 결정한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능하도록 작성하여야 한다.

7. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제2절 용역계약의 체결 3호(사용언어)에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M(소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E(전기소방 : EF)

7) 통신도면 : ET

8. 도면작성

가. 도면규격은 A1(현장공사용2부), A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

나. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 표기하여야 한다.

다. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

라. 설계도면에는 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

마. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문시방서 등) 작성하고 견적(부가세 및 제경비 포함여부 확인)일 경우 2개 이상 조사한다.

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

9. 시방서

가. 계약상대자는 실시설계 전 발주기관의 내부 시방서 기준에 의하거나 계약상대자가 합리적으로 검토․작성하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.

Ⅳ. 설계도서 작성요령

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준’을 준수하여야 하며 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 기본설계(계획설계)

가. “계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 설계자는 대지의 주변상황을 참고하여 계획 설계를 진행하되, 발주자의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

※ 계획설계 시 개념설정은 별도로 발주처가 제공하는 자료(「개념 및 구체화 용역 결과」를 말한다.)를 참고하여야 하며, 발주처와 협의·심의·조정한다.

2) 발주자가 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 설계자는 즉시 보완 제출하여 발주자의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성 시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master Plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우・오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사분석자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청으로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 공원조성계획 자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사(추후 발주처에서 별도 부담, 용역비에 제외)

1) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독원과 협의 후 측량한다.

2) 필요시 경계복원측량은 사업부지의 위치, 경계 및 면적을 기준으로 지적공사에 측량을 의뢰하여 성과도를 제출한다. (수요기관 비용부담)

3) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

4) 발주기관이 서면지한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

5) 인허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

6) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

7) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적의 10%이상 여유로 측량한다.

8) 현황측량은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지 내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

9) 표시항목 : 측량성과, 방위, 축적, 경계, T.B.M., 지상 및 지하구조물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 등 기타 설계에 필요한 모든 사항

바. 설계서 구성

1) 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 별표 2의 계획설계의 내용에 따르며, 도서작성의 구분은 중급을 기준으로 한다.

3. 기본설계(중간설계)

가. “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계단계에서 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

다. 지반조사(추후 발주처에서 별도 부담, 용역비에 제외)

1) 일반사항

가) 지질조사에 대하여는 조사계획서(조사일시, 방법, 기간, 위치, NX 5공)를 작성하여 발주자의 승인을 득한 후에 조사를 실시하여야 한다.

※ 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지반조사 위치를 정한다.

나) 현장 시추 작업 시 반드시 현장에 설계용역 책임기술자가 참석하여야 하며, 현장 시추 일정을 발주기관에 보고하여 발주기관에서 입회가 가능하도록 하여야 한다. 다만, 발주기관 사정에 의해 입회하지 못할 경우에는 설계용역 책임기술자가 현장 시추사진 등 시추 전 과정에 대한 현장시추결과보고서(증빙자료 포함)를 발주기관에 보고하여야 한다.

다) 지반(지질)조사는 엔지니어링기술진흥법에 의한 지질 및 지반, 토질 및 기초분야 엔지니어링활동주체 또는 기술사법에 의거 동 분야의 기술사 사무소를 등록한 기술사의 협력을 받아 수행 하여야 한다.

라) 지질조사는 발주기관이 지정하는 위치에서 실시하고, 채취된 시료는 시료보관상자에 위치별로 구분 표기하여 별도로 납품한다. 또한 기초구조를 설계함에 필요한 시험은 계획서에 따라 시험을 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 한다.

마) 수급인은 현장 지질조사 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계자료 및 공법을 제시하여야 하고 발주자의 검토를 받은 후 인쇄하여야 한다.

바) 지질조사 시 책임기술자를 상주하여 지질조사 시험규정 등 관련법규에 따라 시추조사를 하여야 한다.

사) 지반조사업체는 토질지반정수를 산정하여 건축구조(기초), 토목설계 업무 담당자와 공유하여 적정 토질지반정수가 설계에 반영되도록 하여야한다.

2) 지반조사방법

가) 지질조사는 계획설계(안)에 따라 건물의 위치가 확정된 이후에 건물의 위치를 고려하여 지질조사를 실시함을 원칙으로 한다.

나) 시추간격 및 심도는 현장여건을 고려하여 정하되 지질상태의 변화가 심하고 공사 기간 중 장기적 안정성이 요구되는 주요구조물 설치지역은 감독관의 승인을 득한 후 시추간격 및 심도를 조정할 수 있다.

다) 조사심도는 현장여건을 종합적으로 검토하여 기초설계 자료를 얻기에 충분한 지층까지 시행하는 것을 원칙으로 하며 일반적으로 연암 3.0m이상까지 실시하여야 한다.

라) 수급인은 현장 지질조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합적으로 분석하여 경제적이고 합리적인 설계 자료를 제시하여야 한다.

마) 수급인은 시추지점의 좌표 및 표고를 측정하기 위하여 측량을 실시하고, 좌표 및 표고를 보고서에 명기한다.

바) 수급인은 과업내용서에 명기되지 않은 사항은 건설기술관리법, 한국산업규격, 토질조사 시행지침, 관련규정 및 발주기관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

사) 지하질의 분포상태, 연약층의 유․무 등을 정확히 파악하여 기초지반의 심도, 기초의 형태 등을 결정하기 위한 자료를 제공한다.

아) 시추조사는 원칙적으로 주요 구조물의 설치 예정지를 검토 및 지정하여 실시토록 하고 토층여건과 토층변화에 따라 (변화가 심할 때 등) 위치 및 수량을 변경할 수 있다.

자) 토질조사 보오링 시추 및 표준관입 시험을 원근에 따라 1개소 당 2매 이상 사진 촬영하여 기록하고 사진첩을 작성 제출하여야 한다.

차) 본 조사설계의 토층, 심도, 원위치 시험, 실내시험 등은 추정한 것인바, 조사결과에 따라 설계에 맞추어 정산한다. 단 증가된 사항은 인정하지 않는다.

카) 시추조사 주상도에 기입되는 사항은 다음과 같다.

- 조 사 명

- 조사기간

- 조사위치

- 조 사 자

- 시 행 자

- 시추번호

- 시추장비명

- 각 채취시료의 위치 및 심도

- 시추중에 나타난 층의 관찰

- 지하수위 : 시추 완료 후 24시간, 48시간, 72시간 경과 후 각각 측정하여 안정된 수위를 산정

- 코아회수율 및 천공속도

- 앞층 천공압력 및 비트 회전속도

- 기타 시추작업 중 나타나는 관찰사항

- 시추중에 판단하는 토층 및 암층분류

- 토층 및 암층의 심볼위치

타) 수급인은 현장조사 및 실내시험 완료 후 성과를 종합 분석하여 공사비 산출 및 기초구조가 경제적이고 합리적인 설계가 될 수 있도록 세밀한 보고서를 작성하여야 한다.

파) 수급인은 보고서 작성시 다음과 같은 내용을 수록하여야 한다.

- 조 사 명

- 조사시행자명

- 조사요약 보고문 : 사업책임기술자 및 관련분야기술자의 인명날인

- 조사개요

- 조사세부내용 및 기타(지층분포상태 및 지층의 특성, 지하수의 분포, 표준관입시험 결과, 기초형태에 대한 제안, 지반정수 산정자료 및 기초지반의 지지력)

- 제시험의 성과표

- 시추주상도

- 조사현황 사진

하) 지질조사 보고서는 별도로 제출한다.

4. 실시설계

가. “실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정, 보완 지시에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 공종별 및 발주단위별로 내역을 작성한다.

6) 시설공사 계약요청 자료로 공사개요서(장기계속공사일 경우 금차분의 예산에 맞게 공사비 예산을 분리하여 작성) 및 관급자재 목록(운반거리, 조건, 금액, 구분표기), 공사원가계산서를 작성하여 제출한다.

7) 건설폐기물처리용역 관련 도서(건설폐기물, 폐아스콘, 지정폐기물 각각)는 수량을 검토한 후 관계법령에 맞게 분리발주가 가능하도록 작성한다.

※ 폐기물 수량산출서는 별도로 작성하여 제출

8) 성과품의 최종납품(인쇄)전 충분한 여유를 두고, 각 분야 감독관의 검토(승인)을 받도록 한다.

다. 설계서 구성

1) 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 별표 2의 실시설계의 내용에 따르며, 도서작성의 구분은 중급을 기준으로 한다.

2) 각종 계산서 및 검토서, 인증․심의․건축허가(실시계획인가) 관련도서를 포함한다.

3) 가설계획도, 기초 구조도, 토목 흙막이도면을 overlap(도면제출)하여 검토 확인한다.

4) 최종 CD 제작 : 계획/중간/실시설계 도서 및 검토/발표자료와 각종 서류, 인증/심의/허가 등 모든 자료를 포함하여 1장으로 제작하고, 분야별 참여기술자(책임기술자/담당자) 연락처를 포함한다. (1장으로 제작, 용량이 많을 경우 DVD or USB)

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	스케치 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설견학보고서 포함
3	현황측량보고서		4	부	현황측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

※ 위 제출목록 중 2~5번은 단권으로 제출 가능

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	조달청 제공 양식 특기시방 포함
6	지반(지질)조사보고서	A4	5	부		◯						해당 시
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부								해당 시
8	건축물 에너지효율인증 관련 검토서	A4	3	부								해당 시
9	장애물 없는 생활환경 인증 관련 검토서	A4	3	부								해당 시
10	기타											공사비 예산 초과시 조치 계획서 제출

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 CD 및 USB로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량	단위	공종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	종결보고서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	1부로 작성
2	설계설명서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
3	원도	A1	1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	설계도면	A1	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
	설계도면	A3	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	반접이
5	계산서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
7	관급내역서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
8	수량산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
10	일위대가표	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	표준시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	전문시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
13	관급시방서	A4	7	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
14	조감도		3	부	◯							표구 포함
15	공정표		1	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전공종 포함
16	CD 및 USB		5	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
17	공사계약요청 자료	공사원가계산서(총차/금차예산), 관급자재목록, 공사원가계산서 (모두 excel file), 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등
18	자재 견본서	A4	2	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	색상, 모델명 등 포함
19	녹색건축 예비인증서											인증획득 및 요구사항 조치
20	건축물 에너지효율 예비인증서
21	장애물 없는 생활환경 예비인증서
22	건축물 모형		1	개								스케일 1/200
23	기타 요구사항											발주기관 요구

※ 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본 File을 CD 및 USB로 제출

※ 폐기물처리는 관련 규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

나. 종결보고서 : 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정/보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성, 제출한다. 출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

마. 조감도 (A1 1장, A3 3부 등)

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등)

사. 건축물 모형 : 모형제작 시 발주처와 표현 방법 및 범위 등을 사전협의하여 진행한다.

아. 기타 발주자가 요구하는 성과품

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 2020.    .    .

3. 착수  일자 : 2020.    .    .

4. 완수예정일 : 2020.    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2020년     월      일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 2020.    .    .

4. 착수  일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2020년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2020.    .    .

4. 착수  일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원도소방본부장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2020.    .    .

4. 착수일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020년.     .     .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2020. . .)	금주예정사항(2020. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성6		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2020년   월   일 ～ 2020년   월   일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2020. . . ~ 2020. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                (인)

강원도소방본부장 귀하

붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

〔붙임 8〕 표준설계관리일정표(작성예시)

〔붙임 11〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

〔붙임 12〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것

참고 1		사업부지 토지조서 및 지적도

□ 토지조서

연번	소 재 지	지목	면 적(㎡)		소유자	비 고
			공부	편입
	합 계		22,817	17,264
1	반곡동 1402	전	2345	2345	강원도
2	반곡동 1402-5	전	5489	5489	강원도
3	반곡동 산15-3	도	5280	71	강원도
4	반곡동 산15-4	임	437	437	강원도
5	반곡동 산16-10	임	1310	1310	강원도
6	반곡동 산16-12	목	1708	1708	강원도
7	반곡동 산16-13	목	4896	4896	강원도
8	반곡동 산16-15	임	80	75	강원도
9	반곡동 산16-16	임	867	867	강원도
10	반곡동 산16-17	목	405	66	강원도

□ 지적도

참고 2		어린이 119안전체험마을 위치도 및 부지전경

□ 위치도

□ 배치계획

□ 어린이119안전체험마을 부지 전경

참고 3		어린이 119안전체험마을 소요면적

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
전체		1,200	◦ 지하층, 1층, 2층, 3층 전체
1층계	공용면적 포함	400	◦ 공용면적 : 400㎡*20%=80㎡(복도, 화장실, 계단. E/V 포함)
1층	소 계	320
	화재 안전 체험 (소화기 사용법)	150.00	◦ 기준 : 150㎡/1실 ◦ 소요 : (유치부) 30명 + (초등부) 20명 *1일 3회 운영 총 150명
	생활 안전 체험 (어린이 종합체험) *놀이터 안전교육 등	40.00	◦ 기준 : 40㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 30명(유치부) *1일 3회 운영 총 90명
	소방장비전시장	60.00	◦ 기준 : 60㎡/1실 ◦ 소요 : (유치부) 30명 + (초등부 이상) 20명 *1일 3회 운영 총 150명
	영상관 및 OT실	50.00	◦ 기준 : 50㎡/1실 ◦ 소요 : (유치부) 30명 + (초등부 이상) 20명 *1일 3회 운영 총 150명
	유아실	20.00	◦ 기준 : 20㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 30명(유치부) *1일 3회 운영 총 90명

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
2층계	공용면적 포함	400	◦ 공용면적 : 400㎡*20%=80㎡(복도, 화장실, 계단. E/V 포함)
2층	소 계	320
	피난 체험 (농연 체험)	150.00	◦ 기준 : 150㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명
	피난 체험 *도착 (완강기 및 구조대 등)	50.00	◦ 기준 : 50㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명
	생활 안전체험 (주택·아파트)	80.00	◦ 기준 : 80㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명
	생활 안전체험 (방화 셔터)	10.00	◦ 기준 : 10㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명
	생활 안전체험 (승강기 고립)	30.00	◦ 기준 : 30㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
3층계	공용면적 포함	250	◦ 공용면적 : 250㎡*20%=50(복도, 화장실, 계단. E/V 포함)
3층	소 계	200
	피난 체험 *출발 (완강기 및 구조대 등)	30.00	◦ 기준 : 30㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(초등부 이상) *1일 3회 운영 총 60명
	응급처치 체험 (심폐소생술, 하임리히법)	60.00	◦ 기준 : 70㎡/1실 ◦ 소요 : 1회 체험인원 20명(신청인원) *1일 2회 운영 총 40명
	사무실	70.00	◦ 기준(1인) : 직원 7㎡ ◦ 소요 : 12명 → (기획·운영) 4명, (교육인력) 8명 - 어린이 종합 체험 전문 교관 : (2명) 별도 운영 ◦ 면적 : (7㎡*10)
	탈의·휴게실	28.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 직원 12명, 공무직 2명 ◦ 면적 : 2.0㎡*14명
	샤워실	12.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 ◦ 면적 : 1.0㎡*12명

지층계	공용면적 포함	150	◦ 공용면적 : 150㎡*20%=30(승강기 포함)
지층	소 계	120
	전기실·발전기실	60.00	◦ 1실(전기실 40.00㎡, 발전기 20.00㎡)
	기계실	60.00	◦ 1실

[별동 : 차고]

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
별동	공용면적 포함	110	◦ 공용면적 : 100㎡*10%=10㎡
별동	소 계	100
	차고(전동차 등)	40	◦ 기준(1대) : 전동차·자전거 1m*2m = 2㎡ ◦ 소요 : 전동차 10대 → 20㎡, 자전거 10대 → 20㎡ ◦ 면적 : 2㎡*20대
	창고	60	◦ 안전교육 기자재 등 보관창고

참고 4		체험시설 별 용도(면적구성)

연번	체험존	체험실	체험종목	면적(㎡)	구분	비고
1	소방안전	화재 안전	어린이 소방관, 소화기 사용법 등	150	필수	1층
2		피난 체험	완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 등 각종 피난기구 체험-탈출(도착)	50	필수	2층
3		피난 체험	농연체험	150	필수	2층
4		피난 체험	완강기, 승강식 피난기, 구조대(미끄럼대) 등 각종 피난기구 체험-탈출(출발)	30	필수	3층
5	종합안전	생활안전	주택(아파트) 생활 안전	80	필수	2층
6		생활안전	어린이 종합체험(놀이터 안전교육)	40	필수	1층
7		생활안전	방화셔터 체험	10	필수	2층
8		생활안전	승강기 고립	30	필수	2층
9	구급체험	응급처치	심폐소생술, 하임리히법.	60	필수	3층
10	시청각 안전	전시실	소방장비전시장	60	필수	1층
11		영상실	종합안전 영상 교육장 및 OT장	50	필수	1층
합계				710

※ 체험존 별 체험시설 동선

(초등부 이상) 영상관 1층 → 전시관 1층 / 응급처치(3층) → 주택・아파트 생활안전(2층) → E/V고립(2층)          → 방화셔터 체험(2층) → 완강기 등 피난체험(2~3층) → 화재안전 1층 → 도로교통 체험(외부)

(유치부) 영상관 1층 → 전시관 1층  → 화재안전 1층  → 어린이 종합체험(1층) → 도로교통 체험(외부)

참고 5		지방청사의 표준 설계면적 기준

(강원도 공유재산 관리 조례)

1. 도 본청

가. 직무관련 1인당 면적기준

○ 도지사실 : 165.30㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 부지사실 :  71.28㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 실국장실 :  56.16㎡(집무실, 부속실, 접견실 포함)

○ 실과장실 :  17.92㎡

○ 담    당 :   7.65㎡

○ 직    원 :   7.20㎡

나. 부속공간 면적

실 명		설 계 기 준							비 고
회 의 실 (사용인원)		24명 미만	25～49명		50～99명	100～149명		150～199명	200명이상시 면적 = 0.8㎡×사용인원
		4～2.4㎡/인	2.6～1.5㎡/인		2～1.2㎡/인	1.6～1㎡/인		1.2～0.9㎡/인
상 황 실		2.64 × (과장급 이상 수 + 시장․군수 수)
서비스 및 동선 부분	화 장 실	100명 미만		100명～200명미만			200명 이상
		0.43㎡ / 인		0.40㎡ / 인			0.33㎡ / 인
	엘리베이터	(12.87～19.6㎡) × 대수
식 당		1.63㎡ × 공무원 수 × 0.3
휴 게 실		2.0㎡ × 공무원 수 × 0.15
민 원 실		{(6.55㎡×민원담당공무원 수)×1.1} + {(0.13㎡～0.2㎡×민원인 수×0.5)}							민원인 공간확장 가능
숙 직 실		1인		2～3인			4인 이상
		15.12㎡ / 인		11.52㎡ / 인			8.64㎡ / 인
자 료 실		(0.3～0.4㎡) × 공무원수
창 고		0.72㎡/인 ～ 0.85㎡/인
전 산 실		9.79㎡ × 담당직원 수 × 1.2
민방위대피시설		개소당 660㎡ 이상							평시 충무시설로 이용

다. 설비관계 면적

실 명		설 계 기 준
공조기계실	연 면 적	～3,000	3,000～7,500		7,500～13,000		13,000～18,000		18,000～23,000		23,000～
	연면적대(%)	4.5～7.0	4.0～6.0		3.5～4.5		3.0～4.0		2.5～3.5		2.3～2.8
층장비실 (㎡)	사무공간	500㎡			800㎡				1,000㎡
	층장비실	6.6㎡			8.4㎡				10.2㎡
주장비실 (㎡)	사무공간	～1,000		1,000～4,000		4,000～8,000		8,000～12,000		12,000～16,000
	주장비실	14		37		74		111		149
	사무공간	16,000～20,000		20,000～24,000		24,000～28,000		28,000～32,000
	주장비실	186		223		260		297

라. 공용면적 : (직무면적+부속공간면적+설비관계면적)×30~40％

2. 도 의회

구 분		실 별		설 계 기 준	비 고
의원실	a	의 장 실		집행기관장실 면적 준용
		부의장실		집행기관의 부기관장실 면적 준용
		위원장실		집행기관의 실․국장실 면적 준용	위원회 수만큼
회의실	b	본회의장		의원 수× 5㎡＋방청석 수 × 1.5㎡
		회 의 실		의원 수 × 3.3㎡ + 답변석 면적	대/중/소
		위원회실		의원 수 × 8.2㎡	위원회 수만큼
부속공간	c	사무처장실		집행기관의 실․국장실 면적 준용
		사 무 실		직원 수 × 7.2㎡
		자료실 및 도서실		일반적 자료실 면적기준에 의거 198~297㎡
		대기실	의 원	의원 수 × 2.5㎡
			기 자	50㎡
			운전기사	운전기사 수 × 1.8㎡
	d	휴게실	의 원	의원 수 × 2㎡
			직 원	직원 수 × 2㎡
			방청객	방청객 수 × 2㎡	방청객 수 =인구 수× 0.000015+50
		당 직 실		2인실 기준 15㎡
		화 장 실		청사기준에 준하여 확보
		기 타		예비실(50㎡)을 1개소 이상 확보	창고 / 예비실 등
연계공간		로비․복도․계단		(a + b + c) × 30~40%