강원도 홍천소방서 신축 청사

설 계 용 역  과 업 지 시 서

2020. 12.

강  원  도

( 소 방 본 부 )

목        차

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 과업의 명칭	1

2. 과업의 목적	1

3. 과업의 개요	1

4. 적용법위	2

5. 과업 준수사항	2

6. 참가자격	4

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류	6

2. 업무협의 및 보고	8

3. 설계용역수행자의 책임	9

4. 보안성 검토	10

5. 설계공모 심사위원 지적사항 반영	11

6. 책임기술자의 등의 교체	11

Ⅲ. 설계의 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	12

2. 설계 일반지침	13

3. 설계 기본 방향 및 세부지침	16

4. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인	24

4. 설계도서의 분리작성	24

5. 설계도서의 표기	25

6. 도면 작성	25

7. 견적 기준	26

8. 사용자 요구사항	26

Ⅳ. 설계도서 작성 요령 등

1. 공통사항	38

2. 계획설계	38

3. 중간설계	42

4. 실시설계	42

5. 분야별 설계도서 작성요령	43

V. 설계도서(성과품) 납품목록

1. 계획설계 납품도서	54

2. 중간설계 납품도서	54

3. 실시설계 납품도서	55

<기타 참고자료 등>

1. (붙임 1) 보안각서	57

2. (붙임 2) 책임기술자 선임계	58

3. (붙임 3) 하도급승인 요청서	59

4. (붙임 4) 계획, 중간, 실시설계 검사원	61

5. (붙임 5) 주간공정보고	62

6. (붙임 6) 월간공정보고	63

7. (붙임 7) 특정자재사용리스트	64

8. (붙임 8) 사업부지 현황 및 지적도	65

9. (붙임 9) 신축청사 위치도 및 부지전경	66

10. (붙임 10) 표준설계관리 일정표(작성예시)	67

11. (붙임 11) 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	68

12. (붙임 12) 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	68

Ⅰ. 설계용역 개요

1. 과업의 명칭 : 홍천소방서 청사 신축 설계용역

2. 과업의 목적

본 과업은 홍천소방서 신축을 위한 계획설계, 중간설계(기본설계) 및 실시설계를 수행함에 목적이 있음.

3. 과업의 개요

3-1. 건축개요

가. 대지위치 : 홍천군 홍천읍 태학리 94외 8필지

나. 용    도 : 1종일반주거지역, 공공청사

다. 건축규모 : 설계과정 중 조정 가능

1) 대지면적 : 10,249㎡ / 연면적 : 3,500㎡ 내외

2) 건축예정규모 : 철근콘크리트조 지하 1층 / 지상 3층 1동

가) 건축연면적은 설계상 가장 적정한 면적을 적용하되 ±5%를 초과하지 않는다.

나) 건물규모는 설계 진행과정에서 강원도소방본부(이하 “발주기관”이라 한다)과 계약상대자(이하 “수급인”이라 한다)가 협의하여 조정될 수 있으며, 제반법규 적합여부는 별도 검토하여야 함

다) 과업범위의 변경 없이 공사비가 증가할 경우 추가 용역비를 지급하지 않는다.(기술용역계약일반조건 등 참조)

3-2. 과업기간 : 착수일로부터 150일(5개월) / 공휴일 포함

가) 기본설계 : 착수일로부터 60일(계획설계 : 20일, 중간설계 : 40일)

※ 기본설계는 설계공모 당선(채택) 작품에 근거하되 계획설계 시 배치평면(안) 3D로 작성하여 스터디모형과 함께 제출하고, 최종 조감도를 제출한다.

나) 실시설계 : 기본설계 완료일로부터 90일

3-3. 예정공사비 : 8,687,804천원(부가세 포함)

가) 제시된 공사비는 건축(기본적 실내장식 포함), 토목, 조경, 기계설비, 전기(조명 포함), 정보통신, 소방, 폐기물처리, 환경관리비, 제반비용 등에 대한 전체 공사비이며, 또한 각종(전기/가스/수도) 인입비용을 조사하여 시설분담금으로 시설비에 포함하여야 한다.

나) 낙찰차액을 감안해서는 안 됨(공사예정가격 예산을 초과할 수 없음)

다) 기본설계 완료시 예정공사비 범위 내에서 전체 추정공사비 산출결과를 미리 보고하고 실시설계과정에 물량조정 등에 참고할 수 있도록 해야 함.

4. 적용범위

가. 본 과업은 “홍천소방서 청사 신축 기본 및 실시설계용역”에 적용한다.

나. 본 과업은 강원도소방본부(이하 “발주처”라 한다)와 홍천소방서 건립 공사의 기본 및 실시설계 용역업자로 지정된 자(이하 “수급인”이라 한다) 간 체결한 용역에 적용한다.

다. “수급인”의 용역범위는 용역계약서 및 본 과업지시서에 따른 설계도서 작성, 본 용역에 관한 각종 보고 및 자료 제출과 “발주처”가 필요하다고 인정하여 지시하는 사항을 시행한다.

라. 설계도서는 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」 규정에 따라 기본설계(계획 및 중간설계)와 실시설계는 중급으로 작성한다.

마. 본 용역은 각 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 및 공청회, 경관,  건축 관련 자문, 연약지반처리공법보고서 등을 포함) 설계에 해당된다.

5. 과업 준수사항

5-1. 기본 준수사항

가. 용역수행자는 건축물의 배치, 규모, 형태, 색채, 재료, 건축설비, 구조 등에 대하여 주변과의 조화, 경관, 안전성, 기능, 관련법규 및 규정, 경제성 등을 감안하여 최적의 미와 성능을 발휘할 수 있는 디자인으로 설계해야 한다.

나. 설계 납품 전에 관계법령에 해당되는 모든 행정절차<설계 심의, 계약심사, 녹색건축 및 건축물에너지효율·제로에너지등급 예비인증, 장애물 없는 생활환경 예비인증 등>이행 후 반영될 사항은 최종성과품에 반영하여야 하며 이에 소요되는 모든 비용은 용역 수행자 부담으로 하여야 한다.(단, 제로에너지인증 부분은 추가요율 적용)

다. 본 용역 설계진행 중 각 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경)로 사전 협조하여 용역 성과품 품질향상을 위한 중간검토를 받아야 한다.

라. 건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 전문분야는 등록된 국가기술자격법에 의한 해당분야 기술자 자격 소지자로 하여금 수행토록 하되 책임기술자가 총괄하여야 한다.

미. 본 과업을 수행함에 있어 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주처의 지시에 따라 수행한다.

바. 건축 협의(실시계획인가) 등에 대한 사항은 용역사업 종료 전까지 협의 등 절차를 마치되 부득이한 사정으로 지연될 때에는 발주처 업무담당자와 협의하여 정한다.

사. 「건축법시행령」제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 따른 관계기술자의 협력을 받아야 한다.

아. 본 용역 수행 중 필요 시 자문 또는 협의에 응하여야 하며, 협의 및 요청 내용에 대한 설계 반영사항을 날인 후 문서화하여 발주처에 제출하여야 한다.

※ 자문 및 협의에 소요되는 모든 제비용은 용역수행자 부담으로 한다.

자. 본 과업의 시설물 특성상 실내의 분진 제거, 정전기 방지, 화재예방 등 시설물 입주자 및 사용자의 업무특성을 감안하여 친환경 에너지 절약, 흡․배기 및 냉․난방시설, 화재 시 내화시간과 피난의 중요성을 인지하고 관련업체와 협력하여 설계에 반영해야 한다.

차. 설계자는 ‘공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토부 훈령)’ 제4조 제1항에 의거 공사기간에 영향을 미칠 수 있는 요소들을 고려하여 공사기간의 산정 및 산출근거를 설계 성과품의 일부로 제출하도록 하여야 한다.

카. 「건설기술진흥법 시행령」제75조의2에 따라 설계의 안전성 검토를 수행하여야 하며, 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」제2장(건설공사 참여자 안전관리업무)에 따라 설계 안전성 검토 보고서를 작성하고, 성과품(설계안전 검토보고서, 시공 시 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항)을 제출하여야 한다.

5-2. 부대업무

가. 측량, 지반조사 및 지하매설물 조사 등을 사전에 실시하여 설계에 반영

나. 실내건축(장식) 및 화장실공사(디자인)에 필요한 상세 설계도서 작성제출

다. 본 과업의 수행과 관련한 각종보고회 개최 시 자료작성 및 보고에 따른 업무 (착수보고회, 중간보고회, 최종보고회, 수시보고 등)

마. 기타 각종 자료의 작성 및 기술제공 등 과업수행에 필요한 사항

바. 필요시 공청회 또는 설명회 개최에 따른 업무

사. 용역 완료 전까지 관련법에서 정한 보험 또는 공제증서의 제출

아. 기본 및 실시설계를 위한 외부 자문 시 자문에 필요한 절차 이행

자. 공사 완료 후 준공도면 날인 및 건축물대장 작성 날인 제출

차. 기타 필요시 사례 비교조사 제출 및 본 사업 적용․반영 사항 등

5-3. 기타사항

가. “수급인”은 과업의 목적, 건축물 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 과학적이고 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 설계 용역 중 발주처 등 예측할 수 없었던 아래와 같은 사항 등으로 변경이 필요한 경우 즉시 서면질의 후 과업을 수행한다.

1) 오폐수처리시설의 연결

2) 예측 불가능한 지하매설물, 폐기물 등

3) 우수관 및 배수시설 확인

4) 계약내용의 누락부분 등

5) 기타 과업수행에 필요한 사항

나. 본 과업지시서는 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항, 건축법 등 관련 법률 등이 없는 한 본 과업지시서를 원칙으로 하고, 이의가 있을 때에는 서면질의에 의하여 확인 후 수행한다.

6. 참가자격

가. 건축사법에 의한 건축사 면허소지자로 같은 법에 따라 건축사사무소를 개설하고 있는 자로서 관계 법령에 결격사유가 없는 자

※ 단, 외국의 건축사 면허(자격)을 가진 자는 「건축사법」제23조의 규정에 따라 국내 건축사사무소 개설자와 공동으로 수행하여야 함.

나. 당선자는 계약 시 기계․전기․정보통신․소방 설계자격이 없는 경우 기계·전기·정보통신·소방 관련 법령 등 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링활동주체 신고를 필한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필한 자가 설계하여야 한다.

1) 전기분야 설계용역 과업의 자격 : 「전력기술관리법」제11조, 동법시행령 27조 및 별표4에 따라 전문설계업 1종 이상 등록된 자

2) 정보통신분야 설계용역 과업의 자격 : 「건축사법」, 「정보통신공사업법」 또는 「방송통신기본법」 등 관계법령에서 정하는 기준에 따라 엔지니어링 활동주체 신고를 필하거나 전문분야 기술자격을 보유하고 정보통신 설계업무 수행에 적합한 용역업자

3) 소방분야 설계용역 과업의 자격 : 「소방시설공사업법」제4조 및 제11조, 동법시행령 제2조 및 별표1에 따라 전문소방시설 설계업 이상 등록된 자

4) 건축구조, 토질 및 기초 설계용역 과업의 자격 : 「기술사법」 제6조 제1항 및 동법 시행령 19조에 따라 기술사사무소 등록을 필하였거나 「엔지니어링산업진흥법」에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 필하고, 해당 기술사를 보유한 업체로 건축구조분야, 토질 및 기초분야에 등록한자가 작성해야 한다.

5) 기계설비분야 설계용역 과업의 자격 : 기계설비설계는 기술사법에 의한 기술사사무소(설비부문) 또는 엔지니어링산업진흥법에 의한 엔지니어링사업(설비) 활동 주체가 작성하여야 함 (기계소방의 경우는 관련 법령에 따름)

Ⅱ. 과업의 내용

1. 과업수행 중 단계별 제출서류

1-1. 과업착수

가. “수급인”은 과업지시서와 관련법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

나. 용역수행 처리절차는 본 과업지시서에 따르고, 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여 처리함으로써 내실 있는 설계가 되도록 해야 한다.

다. “수급인”은 계약문서에 정하는 바에 따라 용역을 착수하여야 하며, 착수 시 관련 법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수계를 계약일로부터 7일 이내에 제출하여야 한다.

1) 착수계 1부(공문포함)

2) 책임기술자 선임계 1부

3) 설계용역 참여기술자(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함) 현황 1부

4) 과업수행계획서 1부

5) 설계용역수행 조직표 1부(연락처 기재)

6) 각 공종[건축(구조 포함), 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등]의 분야별 책임기술자 명단, 업무내용, 소지한 기술자격증 사본, 기술경력증명서 이력서 등 각 1부

7) 설계용역 예정공정표 1부

8) 낙찰금액에 대한 산출내역서 1부(분담이행자 용역수행 내역서 포함)

9) 하도급 예정(하도급 승인요청은 착수 후 30일 이내 제출) 현황 1부

10) 인력, 장비투입 예정현황 1부

11) 보안각서 각 1부(보안계획서 작성 포함)

12) 기타 관련서류(설계용역 계약서, 공동수급협정서, 사업자등록증, 업무신고필증, 인감증명서, 사용인감계, 등기사항 등)를 포함한 CD 및 전자파일

13) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

1-2. 계획설계 도서 납품

가. 계획설계 검사원 (붙임 4)

나. 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

다. 관련법규 검토서(건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 자연재해대책법, 도시교통정비 촉진법 등 인허가를 득하기 위한 기타 관련법 및 각종 영향평가 포함)

라. 현장조사 결과보고서

마. 현황측량 성과도, 측량보고서

바. 유사시설 견학보고서

사. 공사비 검토서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인)

아. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

1-3. 중간설계 도서 납품

가. 중간설계 검사원 (붙임 4)

나. 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

다. 중간설계도서(공종별 예산분배 및 각 공종 책임기술자 확인한 내역서 포함)

라. 공사시방서(초안)

마. 구조계산서, 부하계산서 등 계산서

사. 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

아. 녹색건축 인증 우수등급 이상 취득 관련 검토서 및 자료

자. 건축물 에너지효율·제로에너지 1등급 이상 취득 관련 검토서 및 자료

차. 장애물 없는 생활환경 인증 취득 관련 검토서 및 자료

카. 예산초과 시 예산절감방안 검토서

타. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

1-4. 실시설계 도서 납품

가. 실시설계 검사원 (붙임 4)

나. 세부 제출도서는 제5장 납품목록을 참조

다. 실시설계도서 일체

라. 공사예정공정표(공사기간 산출근거 포함)

마. 종결보고서

바. 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

사. 설계검사원

아. 장애물 없는 생활환경 예비인증서

자. 건축물 에너지효율·제로에너지 예비인증서

카. 녹색건축 예비인증서

타. 에너지절약계획서 검토 관련 증빙서류

하. 설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항

거. 손해배상보험증권(보증기간은 공사 준공예정일까지 산정)

너. 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

1-5. 기타 서류

가. 용역의 공정보고 : 주간공정보고 (붙임 5), 월간공정보고 (붙임 6)

나. 업무협의 결과보고서 등 기타 용역수행에 필요한 사항

2. 업무협의 및 보고

2-1. 수급인은 설계진행 시 정기적으로 설계진행사항을 보고하여야한다

2-2. 업무보고

가. 주간업무(공정)보고 : 매주 금요일 오전 10시(협의 후 변경 가능)까지 붙임 양식에 따라 감독관 및 수요기관 담당자에게 전자우편으로 제출한다.

나. 월간업무(공정)보고 : 매월 말 오전 10시까지 문서(공문)로 업무수행사항 및 예정사항을 작성하여 붙임 양식에 따라 제출한다.

다. 수시보고 : 설계용역 진행 시 문제점 발생 시에는 문제점을 분석하여 문제점 발생 시마다 담당 감독관에게 제출하여야 한다.

2-2. 업무회의 일반사항

가. 수급인은 설계진행과 관련하여 업무에 대하여 발주기관과 협의하고자 하는 경우에는 책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

나. 본 과업내용서에 제시된 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 수급인 임의로 해석할 수 없으며 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

다. 본 과업내용서에 대한 부분적 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를 제출하여 발주기관의 승인을 받아 채택할 수 있다.

라. 수급인은 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

마. 수급인은 각 단계별 보고회를 시행 후 발주기관의 지적/보완/수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 이에 따라 반영하여야 한다.

2-3. 업무 진행보고

가. 업무 착수보고(각 보고회 시 사업책임기술자 참석 필수)

1) 착수 후 7일 이내에 장소와 일자를 협의하여 개최한다.(단, 발주처의 별도 요구가 없는 때에는 용역과업수행계획서로 갈음할 수 있다.)

2) 업무착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 전체적인 설계의 진행계획을 설명하여야 한다.

나. 계획설계 보고

- 수급인은 계획설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 계획설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

다. 중간설계 보고

- 수급인은 중간설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 중간설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

다. 실시설계 보고

- 수급인은 실시설계(안)을 작성하여 최소한 보고회 7일전까지 감독관과 사전 협의를 거친 후 실시설계 보고회를 발주기관에서 개최하여 관련내용을 협의하여야 한다.

라. 수시회의 : 설계진행 과정에서 문제점이 발생하거나 발주처의 요구가 있을 때

※“수급인”은 발주처의 요구가 있거나 필요할 경우 프리젠테이션 보고 등을 하며, 분야별 담당책임기술자가 설명 자료를 준비하여 보고해야 한다.

마. 기타회의

1) 발주기관의 필요에 의거 각종 기술적인 사항 검토회의, 이해 관계자 회의, 디자인 향상을 위한 자문회의를 포함한 각종 자문회의를 개최할 수 있으며, 이 때 수급인은 발주기관의 요청에 의거 해당 검토서 등 관련 자료를 작성, 제출하여야 한다.

2) 필요에 따라 회의진행에 관한 세부사항은 발주기관에서 별도 통보할 수 있다.

바. 업무보고 및 회의내용의 기록

- 각종 업무보고 및 회의에서 협의된 사항을 회의록에 작성하고 참석자의 서명을 받은 후 익일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

3. 설계용역수행자의 책임

가. 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 반드시 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

나. 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로  인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 진다.

다. 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 후에도 설계상의 하자로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 일체의 책임 및 손해에 대하여는 관계법령에 따라 설계자가 부담(배상)한다.

라. 상기사항의 이행을 위하여 설계자는 설계용역 손해배상보헙에 가입하고 실시설계납품 시 그 증서를 제출하여야 한다.

마. 용역수행자는 본 과업과 관련된 정보와 과업진행사항을 임의로 소유하거나 외부에 유출시켜서는 안 되며, 과업폐기물은 소각 처리하여야 한다.

4. 보안성 검토

가. 수급인은 본 과업내용서에 의거 작성 또는 제출되는 각종보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 수급인은 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책을 수립하여야 한다.(착수계 제출시 설계참여 관련자 전원 보안각서 첨부)

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

3) 폐기물은 소각 처리하고, 소각대장은 제출해야 한다.

4) 수급인은 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 수급인에게 있다.

5. 설계공모 심사위원 지적사항 반영

가. 수급인은 설계공모 심사 시 심사위원의 지적사항이 설계에 반영될 수 있도록 한다.

나. 설계공모 심사위원 지적사항에 대한 설계단계별(계획, 중간, 실시) 반영계획서를 작성하여 착수 시에 보고한다.

다. 계획, 중간, 실시설계단계에 설계도서 납품 시 조치결과 보고서를 필히 첨부한다.

6. 책임기술자 등의 교체

가. 용역수행자는 발주처가 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 용역수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

나. 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그 기간동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 용역수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

Ⅲ. 설계의 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 건축법, 건축서비스산업 진흥법, 건축사법, 건설기술진흥법, 녹색건축물 조성 지원법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 소방공사업법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진에 관한 법률, 환경영향평가법, 도시교통촉진법, 해당 지자체의 조례 등 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 본 과업은 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침(국토교통부 고시)에 의거 수행하여야 한다.

다. 상기 기준의 24조(설계도서 작성기준)는 건설공사의 설계도서 작성기준에 의거하여 작성한다.

라. 본 과업은「건축구조기준」에 따라 내진설계를 수행한다.

마. 수급인은 본 과업내용서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한 경우 이를 발주기관에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

바. 설계의 책임 및 손해배상

1) 수급인은 계약서에서 정한 기간이내에 성과품을 납품 완료하여야 하며, 이를 위반 시 용역계약일반조건 제18조(지체상금)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

2) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계/협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야 하고, 일체의 책임 및 손해에 대하여는 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 애로가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령(건축사법 제11조 자격의 취소 등, 제20조 업무상의 성실의무 등)에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다.

3) 수급인은 용역 착수 시 관련규정에 따라 보험 또는 공제에 가입한다.

가) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제55조

나) (계약예규) 용역계약일반조건 제41조(계약상대자의 손해배상책임)

다) 국가기관용 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제16조, 제16조의2, 제16조의3, 제16조의4

라) 엔지니어링산업진흥법 제31조 및 동법 시행령 제42조

마) 건설기술진흥법 제34조 및 동법 시행령 제50조

바) 설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제 업무요령 (국토교통부 고시 제2019-997호)

사) 건축사법 제20조 및 동법 시행령 제21조

2. 설계 일반지침

가. 납품은 계획설계, 중간설계 및 실시설계도서(검토용 도서 별도)로 구분하여 납품한다.

나. 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서 제출 등) 하여야 한다.

다. 발주기관의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 수급인은 내역서 수정 등 발주기관의 요구에 응해야 한다.

라. 수급인은 건축법 등 관련 법규상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여 계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로 협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

마. 건축법시행령 제91조의3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정 규모이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

바. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 대지현황 및 주변 인접지 현장조사 및 지반조사, 측량, 우수량, 지하수위 등을 조사하여 설계에 반영하여야 한다.

2) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계하며, 주변건물과 조화를 이룰 수 있도록 설계되어야 한다.

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계하여야 한다.

4) 본 사업부지 주변현황을 고려하여 안정성 있고 주변건물과 조화롭게 설계하여야 한다.

5) 구내도로, 공동구, Pit 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계에 반영하여야 한다.

6) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및 실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계가 되어야 한다.

7) 관련기관 심의 시 문제가 없도록 사전 검토를 철저히 하고, 심의일정에 의한 차질이 없도록 한다.

사. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한   이미지를 반영하여야 한다.

2) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, fax, 인터넷전화 등)을 협의 후 적합한 통신회선을 반영하여야 한다.

3) 공동구, Pit 등 부식(腐蝕) 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계하여야 한다.

아. 대지주변이나 건축물 내 소음원(騷音源)이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계하여야 한다.

1) 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준을 적용

2) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준을 필히 적용

자. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) ‘공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정’, ‘건축물의 에너지절약 설계기준’ 등 제반 규정을 준수하여 설계하여야 한다. 특히, 냉난방설비는 심야전기를 이용한 축냉식, 도시가스, 집단에너지 사업허가를 받은 자로부터 공급되는 집단에너지, 신재생 에너지 등 각종 냉난방설비별 장·단점을 비교검토 후 설계하여야 한다.

2) 창호, 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 자연채광을 최대한으로 반영하고 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물 용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

5) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

6) 기타 에너지 관련 제반 규정을 적용한다.

차. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음․방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

카. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계하여야 한다.

타. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태(실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

파. 향후 증축대비 설계(수요기관과 사전 협의 필요) : 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분에 증축에 대비하는 사전대책(증축을 고려한 설계하중, Expansion Joint 등)을 수립․반영하여야 한다.

하. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경친화적이고, 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 KS품 사용이 원칙이며 KS품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주기관과 협의하여 선정한다.

3) 소방관계법에 의한 다중이용시설은 방염시설기준을 적용한 자재사용

4) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영하여야 한다.

5) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

6) 건축물의 요구 성능 만족을 위해 부득이하게 특정자재를 사용하게 될 경우에는 특정자재 사용목록을 (붙임7) 의 양식에 따라 작성하여 승인을 받아야 한다. (특정자재 사용목록은 관급자재 선정검토서 제출 시에 별도 제출)

거. 하도급의 범위

1) 수급인은 본 설계 용역을 타업체에 일괄하여 하도급할 수 없다.

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항은 다음과 같다.

가) 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

나) 지반조사와 이에 부수되는 시험 등 작업

다) 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

라) 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

마) 건설공사의 수량 및 견적업무

바) 기타 발주기관에서 특별히 인정하는 업무

3) 수급인은 하도급하는 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 수급인은 하도급된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 진다.

3. 설계 기본 방향 및 세부지침

3-1. 설계기본방향

가. 본 지침은 일반 원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특기사항이 없는 한 본 지침을 준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 안 되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 소방, 통신공사 등에 대한 설계는 관련 법령에 의한 제반 규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 에너지 절약을 위하여 고효율 구조물이 되도록 설계에 반영하여야 한다.

1) 설계 시에 부지의 환경조건, 건축물의 용도, 규모 등을 종합적으로 판단하여 건축물의 외벽을 통과하는 열의 손실 방지 및 공기조화설비 관련 에너지의 효율적인 이용을 고려하여 건축물 관련 에너지 사용의 합리화를 도모한다.

2) 에너지이용 합리화법 제3조(정부와 에너지 사용자․공급자 등의 책무), 산업통상자원부 고시 고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정, 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 의하여 고효율기자재를 사용하여야 한다.

3) 건물자체가 에너지절약적인 건물이 되도록 평면계획(실의 배치 등), 입면계획(적정창 면적비 등), 단면계획(최적 층고계획 등)을 하여야 한다.

라. 설계는 환경친화형(Green Building System) 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적성 향상을 위하여 각종 환경조절(제어)시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

1) ‘녹색건축물 조성 지원법’에 의하여 해당 녹색건물 인증 등급의 기준을 적용토록 한다.

2) 수자원의 효율적 활용과 수해방지 등을 위하여 빗물 저류조 또는 빗물이용시설 설치 등을 검토한다.

3) 주변 자연환경과의 조화로운 조형성과 자연환기 및 빛을 최대한 고려해야 한다.

4) 저탄소 환경친화적 구현을 위해 저CO₂소비 자재 사용을 고려해야 한다.

마. 설계자는 사전조사를 철저히 하여 시 도로의 연결 관계, 지반상황, 우․오수관의 위치, 전기 인입점, 국선 및 유선방송 인입점 등은 물론 과거의 기상관련 통계자료를 검토하여 설계에 반영하여야 한다.

바. 주차장은 진․출입에 지장이 없고 차량용 동선과 보행자의 동선이 분리되도록 하여야 한다.

사. 기타 발주기관의 요구사항을 반영한다.

3-2. 건축분야 계획

가. 일반사항

1) 사업시행 부지의 도시계획 및 관련법규와 관할 행정관청의 조례, 규정, 자치법규, 지구단위계획 등을 참고하여 각종 배치계획 및 대지이용계획과 규제사항을 확인, 설계에 반영한다.

2) 설계도서는 관계법령에 의한 인․허가 취득에 문제가 없도록 작성되어야 한다.

3) 합리성과 기능성이 조합된 계획안을 제시하고 요구 성능을 충족시킬 수 있는 기술적 해법 및 에너지 절약적인 시설계획을 고려한다.

4) 본 사업으로 인하여 발생되는 모든 지상 및 지하 매설 혹은 존치물의 이설․철거․증설 등에 대해 현장조사 및 관계기관과 사전 협의하여 합법적으로 제반사항을 이행하여야 한다.

5) 다중이 이용하는 시설이므로 재해시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처하도록 설계하여야 한다.

나. 배치계획

1) 소방관서의 특성 상 대형 소방차량 등의 긴급출동 동선(회전반경 등) 및 소방훈련 등 옥외활동 장소를 고려하여야 하며, 보행자 동선과 충돌하여 혼잡하지 않도록 유기적으로 배치하여야 한다.(화재, 구조, 구급훈련, 차량 및 장비정비, 세차 및 휴식 등)

2) 시설배치는 이용자의 편의를 고려하여 적절하게 배치토록 하며 설계자의 창의성이 발휘될 수 있도록 한다.

3) 부지에 접한 도로와 상위계획(개발, 실시계획(변경)) 등 제반 여건 및 관계규정 등을 고려하여 대지활용도를 높이고 건축물의 위치, 대지현황과 인접대지·시설, 대중교통 등과의 연계성을 고려하여 적정한 배치계획을 하여야 한다.

4) 입주자의 특성을 고려하여 층별, 기능별로 구분하여 효율적으로 배치한다.

5) 근무자의 쾌적한 근무환경을 배려하고 내․외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한 휴게 공간 및 녹지를 계획하여야한다.

6) 최근 신축한 소방청사 유사사례 견학 등을 통해 소방서의 다양한 상황별 이용공간 및 동선 등을 충분히 숙지하여 설계안에 반영해야 한다.

7) 심신안정실, 체력단련실, 직원식당 등 후생공간은 외부공간과 적정하게 연계하고, 식당은 환기 및 서비스 동선에 유의한다.

8) 장기적으로 부지 활용을 극대화하여 미래지향적인 공간체계가 될 수 있도록 계획안을 제시하고, 제시된 구획공간을 활용하여 건축물을 배치 계획한다.

다. 동선계획

1) 차량 및 보행자 이동의 효율성과 쾌적성을 고려한 편리하고 친환경적인 동선을 계획한다.

2) 부지 내 보행자 안전에 유의하고 보행 및 차량 동선이 간섭되지 않도록 계획한다.

3) 시설 간 연계 및 다양한 활동을 고려한 짧고 편리한 동선을 계획한다.

4) 화재‧비상시 신속하고 효율적인 대처가 가능하도록 대피 및 소방진입용 동선을 확보하고 특히 장애인 유형별 피난대책을고려한 계획을 수립한다.

5) 장애인의 출입은 관련 법 규정에 따라야 하며, 편리하게 계획되어야 한다.

6) 보도와 차도 및 주차장 계획은 이용성과 안전성이 우선되어야 하며, 보행 동선과 차량 동선의 교차부분이나 차도로 인한 분리 시에는 보행자 및 장애자 우선 구조로 하여 통행에 지장이 없어야 한다.

라. 평면계획

1) 각 시설의 조화로운 공간계획 및 기능별 합리성 확보

2) 전체 입주자가 이용할 수 있는 공적영역과 각 입주자의 사적 영역을 명확하게 분리, 구획하여 계획한다.

3) 설계자는 층별 면적 배분을 근거로 실별 면적표를 작성하여 제출한다.

4) 평면단위에 적합한 모듈계획을 제시하고, 양호한 비례를 유지할 수 있도록 계획하여야 하며, 연면적에 대한 적절한 공용면적의 비율을 찾아 필수시설을 최대한 확보 후 공용면적이 과하지 않는 범위 내에서 자유롭게 디자인한다.

5) 각종 시설은 중앙집중관리 및 통제가 용이하며, 최소인원으로 운영·관리가 가능하도록 계획한다.

6) 소방서 본서(내근)와 119안전센터(외근) 각각의 역할을 충분히 파악하여 조직별 기능을 만족하여야 한다.

7) 소방서 기능별 평면계획이 구분되면서도 전체 시설을 함께 수용하여야 하며, 개별기능의 중복과 충돌로 인한 공간낭비 및 사용상 불편이 없도록 명확하게 계획한다.

8) 특수소방장비차량의 주차공간은 긴급출동 시 소방대원 등의 이동 및 자동차문 개폐로 서로 부딪히는 안전사고 등의 방지를 위해 충분한 차간 간격 등을 유지하도록 계획한다.

9) 평면계획 시 상호 관련성을 갖는 기능들을 인접 배치하여 불필요한 동선이 유발되지 않도록 고려하여야 한다.

10) 시설물의 유지관리가 용이하도록 자재, 장비의 반출·입구와 개·보수 및 청소 등이 가능하도록 맨홀 등을 계획하여야 한다.

11) 대회의실(대강당), 식당 등 다수의 인원이 모이는 실의 출입구 주변은 대기실 역할을 할 수 있는 적정 규모의 홀을 계획하여야 한다.

12) 청소 용역분 등이 이용할 수 있는 휴게공간을 적정한 위치에 배치하여야 한다.

마. 입면계획

1) 설계의 방향 기본개념을 반영한 예술성과 친근감을 가지며, 홍천군 지역적 특성 및 소방과 안전(119)의 중추적인 기능을 가진 공공청사의 품격과 상징적 이미지를 나타내는 창의적인 입면을 계획한다.

2) 건축물의 조형미, 개방감, 입체감 등을 느낄 수 있도록 계획한다.

3) 첨단시설에 부응하는 외장 마감과 미관을 고려한 현대적인 건축물로 계획한다.

4) 특수장비 및 제반 부수시설 수용사항을 충분히 감안한 입면을 계획한다.

5) 내부공간과 각 실의 목적(용도□기능 등)으로 인해 전체시설의 계획개념과 입면설계 의도를 훼손하지 않도록 계획한다.

6) 소방무선망은 송수신이 가능한 안테나 구조물을 도시미관과 랜드마크적인 측면을 고려한 디자인으로 설치하도록 계획한다.

7) 외부 공간에 소방 업무를 홍보할 수 있는 옥외전광판(LED전자게시판) 또는 채널사인을 설치하도록 계획한다.

8) 입지조건, 주변경관, 주변시설과의 조화를 고려하여 계획한다.

9) 에너지의 효율성 및 유지□관리를 고려한 경제성과 실용적인 외장마감을 계획한다.

10) 안정감 있는 규모로 계획하고, 용도 및 기능을 고려하여 실용적이고 전체적으로 동질성을 갖는 입면을 계획하되, 입면도에 주요 마감재료를 표현한다.

19) 과도한 랜드마크적 형태 또는 입면에 치우친 디자인은 지양하고, 주변 환경 및 시설과 조화를 고려한 외부공간 및 시설물, 색채, 입면을 계획한다.

바. 단면계획

1) 실별 용도, 면적, 특성에 따라 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간을 계획한다.

2) 기능별 조닝(Zoning)을 통해 서로 독립되면서 전체시설을 통합하여 운영, 관리, 업무상 상호 유기적 연계가 가능하도록 수직 및 수평동선을 계획하고, 개별조직·기능의 중복 및 충돌로 인한 공간낭비 및 불합리함이 없도록 명확히 계획한다.

3) 천장고와 복도는 실의 용도, 면적, 기능을 고려하여 적정한 높이와 폭을 산정하되 공간의 쾌적성 및 공사비 절감을 함께 고려하여 계획한다.

4) 창대 및 난간 등의 높이를 적정하게 고려한다.

사. 기계(소방)설비계획

1) 건축법, 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙, 소방법, 소방시설기준에 관한 규칙 등 건축기계설비 관련 법령 및 규정에 적합하도록 설계하여야 한다.

2) 초기투자비, 운전경비 및 유지관리비를 최소화 하고 에너지 및 수자원 절약을 극대화할 수 있는 최적의 설비방식을 추구한다.

3) 건축, 토목, 전기 등 타 공종과 관련되는 제반사항을 면밀히 검토하여 계획하고, 특히 기존 시스템과 증설되는 시스템을 고려하여 유지관리에 문제가 없도록 고려한다.

4) 대기오염, 소음 및 진동 등의 공해에 충분히 대응할 수 있는 쾌적한 실내 환경의 조성을 고려하여 공간별로 제어 가능한 최적의 공조시스템으로 설계가 가능하도록 한다.

5) 방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어가 될 수 있는 시스템으로 계획한다.

6) 기계실 및 전기실에는 적정한 크기의 장비 반입구를 계획한다.

7) 엘리베이터는「승강기시설 안전관리법」규정에 적합하게 설치하고 장애인의 사용에 불편이 없어야 한다.

8) 유지관리의 편의성 확보를 위해 기기 및 장비의 표준화, 모듈화를 고려하고, 보수점검이 용이한 장비배치와 설비면적을 확보하며, 향후 증설(용량증가) 및 장비의 반․출입 통로등에도 대비할 수 있게 계획한다.

9) 전관에는 냉난방설비를 완비하여야 하며, 개별 냉·난방 방식을 적용하고 각 실별 부하 조건을 고려하여 에너지 절약을 위한 설계를 하여야 한다.

10) 위생설비는 내구성, 수두압 등을 감안하여 재질이나 규격을 산정하고 배관 경로가 전기실, 배전실 등을 통과하지 않도록 계획한다.

11) 화장실 등 환기가 많이 요구되는 시설은 외기와 접할 수 있도록 배치하고 악취가 비산되지 않도록 자연환기와 강제 배기를 병행 가능하도록 검토하여 설계한다.

아. 친환경계획

1) 환경친화적 계획요소는 실현성을 고려하고, 그 내용을 도판, 도면, 설명서 등에 구체적으로 제시한다.

2) 우수의 배수계통은 가능한 한 오픈 투수형으로 하여 지표면의 투수율을 높인다.

3) 보도의 포장(paving)은 투수율이 높은 재료를 사용하고, 도로와 주차장의 포장은 가능한 투수성 포장을 최대화한다.

4) 건물의 에너지 절감을 위한 자연채광, 자연환기 등을 적극 도입하며, 자연채광으로 인한 냉방부하 저감 및 일사조절이 가능하도록 남향 및 서향의 창호에는 가변형 차양장치를 적극 반영한다.

5) 에너지 저감대책과 생태 등 환경친화요소 적용 시에는 적용사례, 경제성, 유지관리 등에 관한 개념을 제시토록 하여야 한다.

6) 공공기관 신재생에너지 설치의무화 사업에서 규정하는 공급의무비율 이상의 신재생에너지 설비를 적용하여야 하며, 태양열, 태양광, 실내 루버형 집광채광 또는 지열 냉·난방시설 중에서 경제성, 유지관리의 편리 등을 종합적으로 검토하여 건물에 적합한 방식을 선정하여 반영한다.

7) 녹색건축 인증기준에 따라 녹색건축 우수(그린2등급) 이상, 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정에 따라 건축물에너지효율·제로에너지 1등급 이상의 건축물이 되도록 설계하여 용역 완료 전 예비인증을 받아야 하며, 녹색건축물조성 지원법 등 관련 규정을 준수하여 설계하여야 하며 건축협의 시 에너지절약계획서 및 설계 검토서를 제출하여야 한다.

자. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합하고 경제적인 자재를 사용하여야 한다.

2) 국내자재 중 K.S제품 사용이 원칙이며, K.S제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 선정한다.

3) 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인한 후 설계하고, 내역에 반영하여야 한다.

4) 조달청 우수제품 및 신기술제품은 우선적으로 설계에 반영하여야 한다.

5) 강원도에서 생산되는 자재를 적극 반영한다.

차. 구조분야 계획

1) 모든 구조계획은 합리적이어야 하며, 어떠한 경우라도 일반적인 구조해석을 통하여 그 내력을 확인할 수 있는 것이어야 한다.

2) 구조의 안전성능은 법령 및 정부, 학회, 국토교통부 산하연구소 등에서 정한 설계기준을 준수하여야 한다.

3) 각종 하중에 저항하기 위한 다양한 구조시스템을 검토 후 건물의 안정성, 경제성 및 시공성을 감안하여 최적화한다.

4) 재난과 지진, 풍하중, 지반침하 등 각종 변형을 고려하여야 한다.

5) 장스팬 구조는 사용성을 고려(가변성 및 공간적 융통성)하여 합리적인 구조시스템을 계획한다.

6) 응모안의 디자인에 따른 구조적 문제점을 분석하고, 이에 대한 대책과 적정한 구조시스템을 본 응모안 제출 시 설계 설명서상에 제안하도록 한다.

카. 경관 및 조경계획

1) 주변지역의 토지이용과 경관을 고려하여 미려한 스카이라인(skyline)이 될 수 있도록 한다.

2) 건축물의 용도에 부합되고 주변 경관과 조화로운 조경계획이 되도록 하며, 각종 법률과 조례 지침에 적합하게 계획한다.

3) 건축물과 주변 환경이 조화를 이루도록 하고 건축설계자의 의도와 조경 설계자의 의도가 부합되도록 하고, 향후 사후관리를 고려하여 조경수목과 조경시설물의 유지관리계획을 수립한다.

4) 풍향 및 일조량을 감안하여 도입수종을 검토하고, 대경목 위주의 조경수를 계획하도록 한다.

5) 시각적 즐거움과 휴게 공간 제공 및 공간의 특성화 계획수립으로 다양한 활동형태를 수용할 수 있는 조경이 되도록 계획한다.

6) 건물과 녹지의 유기적인 관계가 되도록 외부공간과 내부공간을 연결하고 위계성을 느낄 수 있도록 계획한다.

7) 주된 수목과 부차적인 부목, 일반적인 종목은 각 공간의 특성에 적합하게 조성하고, 시각적인 균형과 전체적인 경관이 어울려야 한다.

8) 건축물의 옥상 등 인공지반에 녹지를 계획할 경우, 토심이나 하중 배수, 급수 등 그에 따른 제반사항을 충분히 고려하여야 한다. 옥상식재의 경우 바람의 영향이나 옥상에서의 경관포인트 등을 고려한 식재 및 시설물 배치를 한다.

9) 시각적 주요지점에 대형목 및 화목류 등을 식재하며, 상록수와 낙엽수를 조화롭게 식재한다.

10) 전체 부지 중 건축물 외의 부지는 활용도를 높이는 방안으로 설계한다.

타. 교통 및 주차계획

1) 주차장은 법정 주차대수를 만족하여야 하며, 향후 주차수요 증가를 고려하여 증설이 가능하도록 계획하며, 방문객들을 고려한 주차계획을 고려해야 한다.

2) 차량 진․출입의 주차동선을 계획함에 있어 주변 도로망 등을 고려하여 교통흐름을 방해하지 않는 합리적이고 원활한 계획을 반영하며, 방문객 주차장(대형주차 및 승용차 주차 구분)을 구분해서 계획한다.

3) 고가사다리차 등 특수 장비를 포함한 차량의 진․출입 및 주차 등을 고려하여 적절하게 계획한다.

4) 주차장의 주차구획은「주차장법 시행규칙」제3조에 따라 주차단위구획을 계획한다.

- 평행주차형식 외의 경우(일반형 : 너비 2.5m x 길이 5.0m 이상, 확장형 : 너비 2.6m x 길이 5.2m 이상 등)

파. 정보통신 계획

1) 모든 정보통신설비는 신뢰성․기능성․안전성․경제성․확장성․에너지 절약 등을 고려하고 설계 시점에서 최신 기종 등을 종합적으로 고려한다.

2) 사무자동화, 건물자동화 등 각 IBS를 수용할 수 있도록 하고, 향후 정보통신설비의 증설 및 발전된 시스템 도입 시 각 실의 구조 변경 없이 자유로운 설치를 고려한다.

3) 방송통신위원회 고시 및 기타 규정이 정하는 바에 의하여 구내 통신선로설비, 이동통신구내선로설비 및 종합 유선방송 전송설비 등을 검토하여 시공과 사용에 지장이 없도록 계획한다.

4) 통신 인입관련 여건 등 충분한 현장조사 및 관련 기관과의 협의를 통하여 설계 및 시공과 사용성에 지장이 없도록 한다.

5) 시설 및 사무실의 수요를 감안하여 미래지향적인 충분한 용량을 확보하고 장래 증설이나 변경 및 개·보수에 대한 융통성이 있도록 계획한다.

6) 정보통신설비 설계는 TTA표준, KICI 설계기준(한국정보통신산업연구원) 등을 준용하여야 한다.

7) 통신설비들은 물리적 해킹에 의한 정보유출이 방지되도록 계획하여야 한다.

하. 방범 및 보안계획

1) 야간 등 필요시 외부인 출입 통제가 원활히 될 수 있는 구조로 계획한다.

2) 각실 출입구, 창호 등 개구부는 충분한 방범성능을 발휘할 수 있도록 설치한다.

3) 방법 취약지역을 중심으로 CCTV가 충분히 설치될 수 있도록 하고, 통합관제시스템 구축 등 효율적인 방범 및 보안계획을 수립한다.

4. 단계별 심사일의 지정 및 제출도서의 승인

가. 수급인은 조달청 표준설계관리일정표에 따라 각 사업특성에 맞게 예정공정표를 작성하여 승인을 득하여야 하며, 예정공정표에는 단계별 심사일을 지정하고 각 단계별 제출도서를 제출 후 승인을 득하여야 한다.

나. 수급인은 계약체결 시 수요기관의 단계별심사용 체크리스트를 감독관에게 전산파일을 지급받아 작성 후 제출하여야 한다.

다. 체크리스트의 서류작성 프로그램은 EXCEL로 작성하여야 한다.

라. 자료제출은 EXCEL로 작성된 CD 1부 및 A4 좌철제본 책자 3부 제출

마. 수급인은 체크리스트 “세부검토내용”에만 작성(대안제시를 포함하여 구체적으로 작성하여야 하며 도면번호를 기재할 것)

5. 설계도서의 분리작성

가. 건축(토목, 조경, 기계설비 포함), 전기, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성하여야 한다. (도면, 내역서, 일위대가표, 수량  산출기초 등) 단, 발주단위에 대하여는 필요 시 작성 전 발주기관과 협의하여 결정하여야 한다.

나. 건축폐기물처리도서는 분리발주가 가능토록 별도 작성(시방서 포함)하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제2절 용역계약의 체결 3호(사용언어)에 의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1～2회 나타나는 것은 원어사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 정보통신도면 : IT

7. 도면 작성

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A1(현장공사용2부), A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 토목, 건축, 기계설비, 전기, 정보통신도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계도면에는 참여기술자가 서명날인 하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

바. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 관련 공사와 관련하여 명확한 구분

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서(상세도, 전문 시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

8. 견적 기준

가. 수량산출은 국토해양부제정 적산요령으로 산출하되 납품일에 가장 가까운 달의 가격을 기준으로 선정하여야 한다(단, 납품일과 공사발주일이 다른 경우에는 납품 이후 발주 예정일에 맞게 설계내역상의 단가를 조정하는데 협조하여야 한다.

나. 관급자재로 구매하여야 할 대상과 수량, 금액, 시방이 별도로 명시되어야한다.

다. 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 일식으로 적용 되는 단가에도 충분히 납득 될 수 있는 자료(견적서 2개이상)를 첨부하여야 한다.

라. 각 공사별 내역서를 작성하여 총괄내역서를 작성하고 재료 및 인건비의 수량산출 근거를 상세히 작성 첨부하여야 한다.

마. 자재비는 조달청 가격정보를 적용하고 가격정보지에 없는 것은 물자자료와 물가정보에 의하고 단가대비표를 작성 첨부하여야 한다.

바. 제 잡비는 지방계약법 요율을 적용하여야 한다.

사. 과업수행자는 본 용역 완료 후에 감사 또는 기타 사유로 위반사항이 발생 하였을 때에는 변상 또는 이에 상응하는 어떠한 조치에 대하여 이를 감수 하여야 한다.

아. 본 과업지시서의 내용에 대하여 해석차이가 있을시 강원도청의 해석에 따른다.

9. 사용자 요구사항

9-1. 인원, 차량, 장비

가. 근무조건(여건)

1) 소방서 근무체제

가) 외근(현장대응과, 직할119안전센터, 구조대) - 1일 24시간 3교대 근무(1․2․3팀)

- 화재․구급․구조활동, 생활안전구조, 기타 재난대응 등 업무

- 비상근무시 전원근무

나) 내근(본서 사무실) - 8시간 근무(주기적인 당직근무병행 24시간)

- 소방행정 및 민원업무

- 비상근무시 전원 상황 및 현장출동근무

2) 현장출동 : 화재․구조․구급․안전사고 출동시 차고 탈출조건

가) 주간 : 약 20초 이내

나) 야간 : 약 30초 이내

3) 근무여건

가) 화재진압대원 귀서 후 물에 젖고 연기, 그을음, 오염 등에 대한 목욕 및 복장, 장구 등의 세척이 가능할 것(샤워시설 및 공동목욕탕)

나) 24시간 출동대기 소방관의 휴식 및 체력단련 공간 확보 필요

다) 장시간 현장 활동 후 휴식필요(24시간 상시 대기근무로 대기실, 구급대기실, 체력단련실, 당직실 등에 냉․난방시설 설치)

라) 빈번한 출동과 환자들과의 접촉으로 공기청정 항균시설 설치(대기동) 필요

마) 체력단련을 위한 운동시설 설치 필요

바) 24시간 근무여건에 맞은 식당을 설계하고 부식고 및 조리원 휴게공간 확보

사) 난방용 및 온수용 보일러를 분리하여 설치하되, 온수는 계절에 관계없이 사용가능하고, 난방은 개인 취양에 따라 각 실별 제어 가능토록 설계 할 것

나. 시설조건

1) 사무실

- 소방행정과, 예방안전과, 119재난대응과(신설예정), 현장대응단, 직할119안전센터, 119구조대

※ 각 사무실 탕비실, 탈의실, 휴게공간 별도 설치(탕비실에 정수기 설치가능토록 급·배수 설치)

- 실내온도 유지와 채광 및 에너지 효율성을 감안하여 일조시간과 일조량이 최대한 확보될 수 있도록 설계

2) 대기실(현장출동부서 남성직원, 여성직원, 의무소방원)

- 소방대원의 신속한 출동과 휴식·사생활보호 및 보건·안전을 고려하여 배치

- 대기실 출입문은 안으로 여는 구조로 설계하여 다른 대원 출동에 방해되지 않도록 함과 동시에 안전사고를 방지함

- 대기실에서 차고까지 이동 동선은 신속한 출동을 위해 2개소 이상 설치(후정에서 용이하게 출동할 수 있는 구조로 할 것)

- 차고에서 발생하는 배기가스가 실내로 유입되지 않도록 완충구획 설계

- 대기실내 공동 휴게공간 설치(TV, 인터넷, 전화단자 등 설치)

- 센터, 구조대 대기실은 3인 이상 1실 기준

3) 대회의실(행사장)

- 다목적 회의 및 행사공간으로 조성(방음시설 설치)

- 방송실 및 방송장비, 의자 등 집기류 보관창고 등 확보

- 태극기, 조명기구, 플래카드 설치 가능한 상하 조정 거치대 설치

- 다목적 LED 플래카드 설치 할 수 있도록 설계.

4) 체력단련실

- 바닥마감재는 층간소음을 최대한 줄일 수 있는 자재를 사용하며 내벽 4면 중 2면은 거울을 설치, 체력단련실 내부에는 탈의실과 샤워실을 설치하여 내‧외근 근무자가 사용할 수 있도록 설계

5) 차 고

- 신속하고 안전한 소방차량 출동을 위해 인접도로와 진․출입이 용이하고, 통행차량 운전자의 시야가 충분히 확보되도록 함.

- 센터·구조대 사무실 및 대기실과 가까운 곳에 배치하고 직원의 유해물질 노출, 감염 등을 고려하여 사무실 및 대기실과 별도로 구획함.

- 차종별 제원을 고려하여 주차면적을 확보하고, 대원의 안전과 활동(개인장비 착용, 이동 등) 공간 확보를 위해 차량의 전면은 1m 이상, 후면은 2m이상, 차량 간 측면은 최소 2m 이상의 여유면적을 확보 함.

- 차고 내 매연 및 유해가스를 원활하게 여과·배출할 수 있도록 배기시스템을 적용

- 차고의 높이는 소방서에서 보유중인 대형차량이 원활하게 출입할 수 있는 구조여야 하며, 바닥은 지면의 빗물 등이 유입되지 않는 구조

- 소방차량의 출동대기 및 정비공간이 충분히 확보 될 수 있도록 설계

- 차고 바닥은 소화용수를 적재한 소방차량 등의 하중을 반영하여 설계

- 차고 내 바닥은 배수가 가능토록 충분한 경사를 두어 물고임이 없도록 설계하고 차고 앞 배수시설(트렌치 배수 등) 설치

- 야간에 차량정비 등 작업을 할 수 있도록 차고 앞 건물 외벽에 외등 설치

- 차고 내 차량 근거리에 방수콘센트를 설치하고, 각 기둥에는 고압 공기 라인 설치

- 차고 내 방송용 스피커 높이는 3m 이상으로 설계

- 소방차고 조명은 측면과 후면의 그늘을 최소화 할 수 있도록 차량과 차량사이 조명 위치

- 차고문이 내려오는 지점은 다른 차고바닥과 구별하여 차고문 내려오는 지점 “충돌주의” 경고표지 설치

- 차고 바닥의 경우 방수 및 미끄럼 방지를 위한 재료로 가급적 친환경 소재를 사용

- 겨울철 소방차량 소화용수 결빙을 방지하기 위한 난방시설 설치

6) 호흡보호장비 정비실 : 화재진압 및 구조대원들의 현장활동시 사용하는 공기호흡기의 봄베(공기통) 공기충전실, 보관대, 용기세척살균건조시설, 면체검사시설, 바코드시스템 등 시설이 잦추어진 정비실을 말함.

- 면적 45㎡ 내외, 신선한 공기 유입 가능한 외기와 접하는 공간, 전원 380V 3상 확보

- 고압가스안전관리법 시행규칙 제2조 제1항 제23호 관련 제1종보호시설로 부터 5미터, 제2종보호시설로부터 8미터의 거리를 유지할 것.

※ 세부설치기준은 기본설계 시 홍천소방서와 협의 후 결정

7) 소방훈련장(다목적훈련탑)

- 건물 옥상과 외벽이 연결된 부분에 레펠 하강이 가능하도록 지지대를 설치

- 하강외벽은 중간에 창호 및 환기캡 등을 없도록 하여, 레펠 하강시 장애가 없도록 하고, 외벽마감재는 신발자국 등 훈련자국이 남지 않는 색상 및 재질로 설계

- 건물 외벽에 철탑형태로 훈련할 수 있는 구조물 설계

8) 소방안전교육장 : 화재안전 및 생활안전 등을 체험할 수 있는 실내시설을 말함

- 지진, 소화기, 옥내소화전, 소방시설, 피난, CPR 등의 체험 및 교육을 할 수 있도록 설계

※ 세부설치기준 및 안전체험시설은 기본설계 시 홍천소방서와 협의 후 결정

9) 장비창고 : 소방업무에 활용되는 장비의 수납 및 개인 보호 장비의 보관을 위해 마련된 공간을 말함.

- 신속한 출동과 복귀 시 편의를 위해 가급적 차고 내부 출동동선 상에 배치

- 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 하고 이동 시 장애가 없도록 문턱이 없어야 함.

- 진열장 위치를 고려하여 전등, 배전반, 콘센트 등 위치 고려

9) 감염관리실 : 구조·구급대원의 감염방지를 위하여 설치하는 시설을 말함.

- 감염관리실은 오염된 장비의 세척, 소독, 보관공간을 확보하고 감염의 원인물질을 차단함으로써 2차 감염을 방지하는데 그 목적이 있음

- 2차 감염 예방을 위해 입구와 출구는 분리하고, 화재·구조활동에 필요한 장비의 소독을 위한 공간과는 구분하여 배치

- 내부는 온습도를 잘 견딜 수 있어야하고, 상시 온수가 공급 가능해야함(환기시설 필수)

- 직접 손으로 작동하지 않아도 손 및 장비를 세척할 수 있는 절수페달 설치

- 압축공기를 사용하도록 에어라인 설치

- 출입문 개폐 시 외부 오염원이나 먼지 등의 유입을 최소화하기 위해 입구 문 상단에 에어커튼을 설치하며, 문틀은 밀폐성이 우수하여야 함.

- 반드시 전관방송 및 지령방송 가능토록 설계

- 면적 36㎡ 이상, 급수(냉·온수) 15A 이상, 배수 100A 이상, 전원 380V 확보

※ 세부설치기준은 기본설계 시 홍천소방서와 협의 후 결정

10) 심신안정실 : 소방공무원이 심리안정, 치유 및 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간을 말함.

- 내부마감은 소방대원들이 이용 시 심신 치유에 도움이 되는 마감재(재질, 색깔, 향 등 고려)로 설계

- 상담·치유·회복을 위한 각각의 구획된 공간을 확보하여 설치하되, 현장대원의 접근 및 이용편의를 고려하여 배치함.(상담실은 방음처리 할 것)

- 기준면적 50㎡(상담실과 치유실로 구분) 내외, 냉난방시설 필수 설치

※ 세부설치기준은 기본설계 시 홍천소방서와 협의 후 결정

11) 상황실(현장대응단) : 소방업무를 위한 정보의 수집·분석과 판단·전파, 상황관리, 현장지휘 및 조정·통제 등의 업무를 수행하는 시설을 말함.

- 상황실에는 전산실과 재난발생 시 상황판단회의 등을 할 수 있는 작전실을 별도의 공간으로 구획 함.

- 상황실과 통신실은 사무실과 구획 된 별도의 공간 하고, 통신 및 전산장비에서 발생하는 열을 배기할 수 있도록 냉방 및 배기설비를 반드시 설계

- 상황실, 전산실은 환기가 잘되고, 적정 온도·습도를 유지하도록 관련 설비를 갖추어야 함.

- 상황실에서 건물 전체 CCTV 확인 가능토록 설계

- 각종 상황정보를 한눈에 확인 할 수 있는 시스템 구축(대형 패널 4개 설치)

- 바닥 마감은 ACCESS FLOOR(이중마루)로 설계

12) 개인안전장비실

- 소방공무원 개인별 지급되는 개인안전장비 8종을 보관할 수 있는 보관함을 설치할 수 있는 공간으로 개인별 개인안전장비 보관함을 설치할 수 있어야 함.

13) 의무소방 생활실

- 군 대체복무를 위해 소방서에서 복무하는 의무소방 일과 후 생활공간으로 세탁실, 샤워실, 화장실 등을 포함함

다. 기계, 전기, 통신설비 조건

1) 호스건조대 : 오염된 소방호스를 세척 및 건조하는 시설

- 건물 벽 혹은 계단실 등을 이용 건물과 조화할 수 있는 소방호스 건조대 설치(지상 15M 이상)하고, 전원 380V 확보하여야 한다.

- 소방호스 건조대 아래 소방호스 세척장 설치

․ 비산 방지턱 및 배수 시설 설치

․ 수관세척을 위한 40mm 구경 수도관 또는 소화전 설치

- 수관 오르내림 자동모터 설치

․ 예비모터, 수동식시설 등 안전성 확보필요

․ 우천에 의한 모터 손상 방지 조치

2) 소화용 급수시설(소화전) : 차고지 내·외 상수도소화전(지상식) 각 1개소 이상 설치

3) 오버헤드도어

- 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 소방차량 2대 당 1개 도어 설치기준으로 설계, 비상시 수동 open/close 가능토록 설계

- 차고문 개폐장치는 각 차고문과 사무실에서 각 존별로 유선·무선 조작 가능토록 설계

- 차고의 폭은 소방차량의 문이 개방된 상태를 감안하여 설계

- 가이드레일 설치 시 창호 및 기타설비 등에 지장이 없어야하며, 차고문 추락을 방지할 수 있는 장치 설치

4) 무선송수신용 안테나 탑 설치

- 통신용 안테나 탑의 모형을 청사 건물과 조화를 이룰 수 있는 형태로 고려하여 설계하고 그 위에 안테나탑 등 설치

- 높이(18m) 및 규격은 무선송신이 가능한 구조로 지하층부터 안전성을 고려하여 설계

라. 기타 요구조건

1) 건축물 외관은 인근에 위치한 건축물과 쉽게 구분할 수 있도록 구조, 배치 등을 고려하여 설계

2) 건축물은 증‧개축이 용이한 일자형 구조를 기본으로 하고, 부지조건 및 주변 지형 여건에 따라 변형 구조로 설치할 수 있음.

3) 소방청사는 「건축법」 제48조 및 같은 법 시행령 제32조에 의거 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍압, 지진, 그 밖의 진동 및 충격 등에 대하여 안전한 구조를 가져야 한다.

4) 창고의 문은 대형물품이 이동할 수 있도록 양문형으로 하고 걸리는 것이 없도록 문턱이 없이 한다.

5) 소방서 식당 내 긴급구조표준시스템 단말기 설치

- 식사 중 출동지령 시 식당 내 설치된 긴급구조표준시스템에서 재난 위치의 확인과 동시에 신속히 차량 탑승

6) 청사 내 모든 구역 전관 및 지령방송(필요시 화재, 구조, 구급, 기타출동 방송 선택 조정) 가능토록 설계

- 각 실별 전관방송용 스피커와 지령방송용 스피커는 병용하여 사용 하지 말 것.

7) 안전센터 사무실과 차고 앞을 연결하는 전용 방송시스템 설치 : 차고 앞 불법 주정차 방지 및 계도(출동공간 확보 및 홍보 방송용)

8) 휴게실과 별도로 각 층 발코니를 활용한 휴게 공간 확보

9) 세탁‧건조실은 소방공무원의 오염 노출을 최소화하기 위하여 개인보호장비와 일반 세탁‧건조를 위한 공간을 분리하여 설치

10) 건물 전면 소방홍보용 옥외LED전광판 설치

11) 사인 및 로고 등은 「소방표지규정」과 해당 지자체의 BI(Brand Identity)규정·매뉴얼을 적용

9-2. 주요 시설개요 및 면적

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
총면적		3,500

1층계	공용면적 포함	1,510	◦ 공용면적 : 1,258㎡*20%=251㎡ 포함(승강기 포함)
1층	소 계	1,258
	소방차고	605.00	◦ 기준(1대) : 대형 3.6*12m, 소형 3.6*12m*1/2, ◦ 소요 : 20대(대형8, 소형12), 행정차·화물차 제외 ◦ 면적 : (43.2㎡*8대)+(43.2㎡*12대*1/2)
	창고(장비보관)	40.00	◦ 기준 : 2㎡*차량수 *소요 : 20대 ◦ 면적 : 2㎡*20대
	현장대응과 사무실	52.00	◦ 기준 : 담당 7.65㎡, 직원 7㎡, 상황관제 29.7㎡ ◦ 소요 : 담당1명 , 직원 2(6명*1/3), ◦ 면적 : [(7.65㎡*1명)+(7㎡*2명)]+ (29.7㎡)
	홍천안전센터 사무실	110.00	◦ 기준 : 직원 7㎡, 장비수납 30㎡ ◦ 소요 : 직원 11명(33명*1/3) → 정원 33명 ◦ 면적 : [7㎡*11명)]+(장비수납 30㎡)
	구조대 사무실	50.00	◦ 기준 : 대장 7.65㎡, 직원 7㎡, 특수장비 15㎡ ◦ 소요 : 대장1명 , 직원 4명(12명*1/3) → 구조대정원 13명 ◦ 면적 : [(17㎡*1명)+(7㎡*4명)]+(장비수납 15㎡)
	탈의·휴게실 (현장대응과)	26.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 13명(현장대응과 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*13명
	탈의·휴게실 (홍천119안전센터)	66.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 33명(홍천119안전센터 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*33명
	탈의·휴게실(구조대)	24.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인, *소요 : 12명(구조대 정원) ◦ 면적 : 2.0㎡*12명
	세탁건조실	25.00	◦ 기준 : 25㎡/1실
	샤워실	25.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 ◦ 면적 : (1.0㎡*25명)
	여성 탈의·휴게실 (세면·샤워·세탁)	25.00	◦ 기준 : 8.64㎡/1인 *소요 : 3명(1일 근무인원/특별수요포함) ◦ 면적 : 8.64㎡*3명
	화장실(남·여)	34.00	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 80명(특별수요포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*80명
	심신안정실	80.00	◦ 기준 : 50㎡+0.7㎡(출동대원-20)/1실 ◦ 50㎡+0.7㎡(43-20) = 50㎡+30㎡
	감염관리실	26.00	◦ 기준 : 26㎡/1실
	호흡보호정비실	45.00	◦ 기준 : 45㎡/1실
	호스건조실	25.00	◦ 기준 : 25㎡(높이8m)/1실

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거
2층계	공용면적 포함	1,132	◦ 공용면적 : 944㎡*20%=188㎡ 포함
2층	소 계	944
	서장실 (부속·대기)	57.00	◦ 서장실 산출근거(집무실, 부속실, 대기실) - 기준 : 56.16㎡/1실(실국장 기준)
	소회의실	50.00	◦ 기준 : 50㎡+0.7㎡(정원-20)
	소방행정과 사무실	84.00	◦ 기준(1인) : 직원 7㎡ ◦ 소요 : 12명(직원10) → 정원 10명, 특별2명 ◦ 면적 : (7㎡*12)
	방호구조과 사무실	119.00	◦ 기준(1인) : 직원 7㎡ ◦ 소요 : 17명(직원15) → 정원 15명, 특별2명 ◦ 면적 : (7㎡*17)
	탈의실(남)	50.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 *소요 : 25명 ◦ 면적 : 2.0㎡*25명
	탈의실(여)	20.00	◦ 기준 : 2.0㎡/1인 *소요 : 10명(현재 7명+특별수요3명) ◦ 면적 : (2.0㎡*10명)
	당직실	30.00	◦ 기준 : 8.64㎡/1인 ◦ 소요 : 4명(비상근무시 당직보강 2명 포함) ◦ 면적 : 8.64㎡*4명
	문서보존실	40.00	◦ 기준 : 0.4㎡*공무원수 *소요 : 100명 ◦ 면적 : (0.4㎡*100명)
	용도창고	50.00	◦ 기준 : 0.72㎡/1인 ◦ 소요 : 70명 ◦ 면적 : 0.72㎡*70명
	화장실(남·여)	34.00	◦ 기준 : 0.43㎡/1인 *소요 : 80명(특별수요 포함) ◦ 면적 : 0.43㎡*80명
	안전체험(교육)장	220.00	◦ 안전체험(교육)실 : 기준 : 200㎡/1실 이상
	정보통신기계실	60.00	◦ 정보통신기계실 : 기준 : 60㎡/1실
	화재분석실	30.00	◦ 화재분석실 : 기준 30㎡ / 1실
	방염실험실	25.00	◦ 방염실험실 : 기준 25㎡ / 1실
	체력단련실	75.00	◦ 체력단련실 기준 : 75㎡+(정원-100인)×0.16㎡ / 1실

3층계	공용면적 포함	464.64	◦ 공용면적 : 387.20㎡*20%=77.44㎡ 포함
3층	소 계	486.00
	대회의실	200.00	◦ 기준 : 1.0㎡/1인 *소요 : 200명(특별수요 포함) ◦ 면적 : 1.0㎡*200명
	식당(주방)	80.00	◦ 기준 : 1.63㎡*공무원(이용자)수＊0.3 ◦ 소요 : 105명(소방서 86,의무공익9,특별수요 10) ◦ 면적 : 1.63㎡*105명*0.3
	화장실(남·여)	32.00	◦ 기준 : 0.40㎡/1인 *소요 : 200명(대회의실 소요인원*0.4) ◦ 면적 :【(0.40㎡*200명)-(조정면적 48㎡)】
	독신자숙소	84.00	◦ 기준 : 21㎡(원룸형)/ 1인 ◦ 소요 : 4명 / 4실(1인 1실) ◦ 면적 : 21㎡ * 4실
	의소대사무실(남)	50.00	◦ 기준(회의실 준용) : 1.0㎡/1인 ＊소요 : 50명 ◦ 면적 : 1.0㎡*50명
	의소대사무실(여)	40.00	◦ 기준(회의실 준용) : 1.0㎡/1인 ＊소요 : 40명 ◦ 면적 : 1.0㎡*40명

지층계	공용면적 포함	204.00	◦ 공용면적 : 170.00㎡*20%=34.00㎡ 포함
지층	소 계	231.50
	전기실, 발전기실	111.50	◦ 기준 : 111.50㎡/1실
	기계실	120.00	◦ 기준 : 120㎡/1실

※ 지상2층부터 여유 공간을 활용하여 외부 공간(베란다, 발코니 등)을 설치, 직원 휴게공간으로 활용할 수 있도록 한다.

※ 위 표를 참고하여 1층을 제외하고 층별 조닝(zoning)은 자유롭게 할 수 있다(층별 면적 조정 가능).

9-3. 예상 소요 정원 및 구성

구분	부서명	계	소방정	소방령	소방경	소방위	소방장	소방교	소방사
총계		106	1	3	10	10	21	39	22
본서 계		41	1	3	8	6	10	12	1
소방행정과	소계	10	1	1	2	1	3	1	1
	소방행정	6	1	1	1	1	2
	예산장비	4			1		1	1	1
방호구조과	소계	17	0	1	3	3	5	5	0
	방호사법	4		1	1	1		1
	예방민원	10			1	1	4	4
	구조구급	3			1	1	1
현장대응과	소계	14	0	1	3	2	2	6	0
	현장지휘1,2,3	14		1	3	2	2	6
출동대 계		65	0	0	2	4	11	27	21
홍천119안전센터	직할센터	49			1	3	8	20	17
119구조대	구조대	16			1	1	3	7	4

9-4. 차량배치계획

번호	관리부서	차 종		차량규격			비고
		차명	차종	전장	전폭	전고
1	소방행정과	행정	중형승용	4,855	1,860	1,465	소형
2		행정	중형승용	4,560	1,780	1,435	소형
3	방호구조과	진단	경형승용	3,595	1,595	1,485	소형
4		진단	중형승합	5,125	1,920	1,925	소형
5		통제단	중형화물	6,775	2,260	2,885	중형
6	현장대응과	지휘	중형승용	4,440	1,855	1,635	소형
7		조사	소형화물	4,990	1,910	1,790	소형

번호	관리부서	차 종		차량규격			비고
		차명	차종	전장	전폭	전고
8	홍천센터	고가	대형특수	12,290	2,495	3,900	대형
9		굴절	대형특수	9,305	2,495	3,780	대형
10		화학	대형화물	8,055	2,495	3,345	대형
11		물탱크	대형화물	8,080	2,495	3,240	대형
12		배연	중형특수	7,715	2,390	3,065	대형
13		펌프	대형화물	7,375	2,370	3,040	대형
14		구급	중형승합	5,150	1,920	2,410	소형
15		특별구급	중형승합	6,195	2,436	2,777	중형
16		화물	소형화물	4,775	1,740	2,100	소형
17		순찰	중형승용	4,480	1,855	1,635	소형
18		버스	대형승합	12,030	2,495	3,490	대형
19	구조대	수난구조	소형화물	4,915	1,765	2,230	소형
20		산악구조	소형화물	4,990	1,910	1,790	소형
21		구조공작	대형특수	8,495	2,495	3,470	대형
22		생활안전	중형승합	5,150	1,920	2,350	소형
23		보트트레일러	소형화물	4,385	1,510	800	소형
24		DK트레일러	소형화물	3,395	1,880	860	소형
25		평판트레일러	소형화물	4,700	2,450	1,180	소형

※ 모든 차량 차고 내 배치

Ⅳ. 설계도서 작성 요령 등

1. 공통사항

가. ‘건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시)’을 준수하여야 하며, 동 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 ‘기본업무 설계도서’와 본 과업을 위해 필요로 하는 ‘추가업무 설계도서’를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 설계도서 작성 시 제출서류 및 납품도서는 BIM 데이터를 활용하여 작성할 수 있다.

다. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

라. 설계도서(시방서)에 다음의 내용을 명시하여야 한다.

-「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」의 [별표13] ‘내진능력산정기준’에 따라 산정한 건축물의 내진능력을 준공표지판에 공개하여야 한다.

마. 설계자가 작성․제출하는 시방서 안내

1) 설계자가 작성․제출하는 시방서는 조달청에서 ‘시방서 작성 간소화 및 내실화’ 목적으로 마련하여 제공하는 『설계자 작성용 공사시방서 방침』에 따라 작성한다.(붙임11, 12 참고)

2) 작성방법은 표준시방서(국토부)에 명시된 내용은 코드번호(링크처리)로 대체하고, 중요․핵심사항과 주의사항 등은 제공 양식에 따라 설계자가 별도 작성․제출한다.

3) 시방서의 내용과 관련하여 공사관계자 간의 시공관리에 혼선이 우려되는 부분은 보다 상세하게 작성하여 시공 중 논란이 없도록 하여야 하며, 논란이 발생 시에는 설계자의 의견 제시 등 해결에 적극 협조하여야 한다.

※ 특기시방서는 임의 양식으로 작성 가능

2. 계획설계

가. 정 의

- “계획설계”라 함은 발주기관으로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여 건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야(구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주기관에게 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 수급인은 전체부지의 효율적인 활용계획을 우선 수립하여 수요기관의 승인을 득한 후 계획설계를 진행한다.

2) 수급인은 대지에 대한 측량을 실시하고, 주변상황을 참고로 하여 계획 설계를 진행하고 작업 진행시에는 발주기관의 승인을 받은 후 진행하여야 한다.

3) 발주기관이 보완조건으로 계획(안)을 승인하면 수급인은 즉시 보완 제출하여 발주기관의 승인을 득한 후 중간설계를 진행한다.

다. 계획설계(안) 작성시 포함사항

1) 설계 설명서〔현장조사(지장물 포함)보고서, 관련법규 검토서, 건축계획개요, 동선계획, 우․오수계획 등〕

2) 주변도로망과 건물과의 배치를 포함한 종합배치계획(Master plan)

3) 대지 내 동선계획, 주차계획(전체주차대수 산출근거 포함)

4) 우․오수처리계획

5) 건물별 개략 평면, 입면계획 및 주변과의 조화

6) 조경계획

7) 개략공사비 산정내역

8) 측량성과도

9) 기타 필요한 사항 및 발주기관 요구사항(기존 유사건물 조사 분석 자료 등)

라. 현장조사방법

1) 현장조사는 관련문헌 및 서류조사와 현장조사를 병행하여야 한다.

가) 문헌 및 서류조사

- 기온, 습도, 강우량, 풍속, 강설, 동결심도, 지진 등 설계에 영향을 미칠 수 있는 모든 사항에 대하여 조사하여야 한다.

- 해당 관할관청 및 사업시행자로부터 대지에 관련된 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원, 등기부등본, 지방자치단체 조례, 지구단위계획자료 등 필요한 사항을 모두 조사, 입수하여야 한다.

나) 현장조사

- 대지의 지상과 지하매설물, 지형의 개황, 기존 수목, 대지 내 경작물, 대지 내 소음․진동, 주변 공사현장(지하수위, 토취장, 사토장, 민원사항 등)의 특징 등에 대하여 현장조사를 실시하고 전체를 확인할 수 있는 대지 전경을 촬영․보관하여야 한다.

- 주변과의 환경적 조화를 고려하여 주변건축물의 외관적 특징을 조사하여야 한다.

- 대지 주변의 건축물이나 공작물 등 공사 진행 시 영향을 미칠 수 있는 민원요인 등 모든 요인을 조사하여야 한다.

- 가스, 상․하수도, 오․폐수처리방법, 전기, 통신, 도로, 지역 냉․난방 등의 도시기반시설에 관한 일체의 사항을 조사한다.

- 현장의 대지 내 주위경계점, 레벨 등에 대하여 현장에서 측량을 실시하고 기록하여야 한다.

2) 문헌 및 서류조사에 의하여 조사된 결과는 계획설계 시 현장조사보고서로 작성․제시하여야 하며, 종결보고서에 첨부하여야 한다.

마. 측량조사방법

1) 일반사항

가) 측량조사는 계획설계, 중간설계, 실시설계 시 측량조사 시행에 관한 세부지침을 정하여 설계의 신뢰성을 확보하는데 있다.

나) 측량을 실시하기 이전에 측량에 관한 세부실시계획서를 작성하여 사전에 감독관과 협의 후 현지측량에 임해야 한다.

다) 본 지침서에 의거 조사하며 지침내용에 명기되지 않는 사항은 측량법 및 기타 관련규정에 따라 시행한다.

라) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계 목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

마) 조사와 관련한 실적수량이 계약서상의 설계수량과 상이할 때는 계약단가를 기준으로 과업수행 실적에 부합되게 정산한다.

바) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 경비는 실비 정산할 수 있다.

사) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결하여야 한다.

아) 조사내용 중 현장과 불일치하는 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

자) 지적도 및 임야도는 해당 시․군에 비치된 지적공부 원도를 기본으로 하되 도곽선 및 도근점을 아울러 등사하여야 한다.

차) 현황측량은 계획 및 설계에 지장이 없는 범위로 과업면적 10% 이상 여유있게 측량해야 한다.

2) 조사측량

가) 현황측량(평판측량)은 부지내외의 평면 형상 및 고저관계를 나타내는 지형측량과 부지내외의 건물 및 지하 매설물의 현황측량을 한다.

- 축척은 1/1,000으로 하고, 신축이 없는 용지를 사용하여야 하며, 과업면적의 10% 이상 여유로 측량하여야 한다.

나) 측량면적은 사업경계선으로부터 주위의 여건 및 설계수행을 감안하여 발주기관과 협의 후 결정한다.

다) 가수준점(T.B.M)은 주위의 영구구조물에 기준점을 설정하여 장기간 보존이 가능하게 설치한다.

라) 전기 및 통신, 상하수도 인입지점을 조사하여 사진으로 제출한다.

마) 현황측량은 다음 사항을 준수하여야 한다.

- 각도는 도․분․초로 면적 및 길이는 미터법을 사용한다.

- 각 측량성과는 측량법에 의한 공공측량 작업규정이 규정하는 허용범위 내에 들어야 한다.

- 현황측량은 도근점에 의하여 실시하되 수시로 지적의 기지점과 상이 여부를 검토함은 물론 지상 공작물 및 주요지점을 표시하고 등고선은 최소 1M 간격으로 표시하여야 한다.

- 주요 측량원점과 등고선에는 필히 지반고를 기입한다.

바) 각종조사 및 계산

- (지적의 복제) 기 조사된 지적도와 현황측량된 지구계를 확인하여 현황도에 지적도를 삽입하여야 한다.

- (계산) 각종 계산은 감독원의 지시에 의한 소정양식에 의하여 실시한다.

3) 표시항목

- 측량 성과도에는 측량 성과는 물론 방위, 축척, 경계, T.B.M, 지상 및 지하지장물, 주변도로 도시계획도로선, 주변건물 기타 설계에 필요한 모든 사항을 표기하여야 한다.

4) 기타사항

가) 본 지침서에 명기되지 않았으나 수급인이 설계목적상 필요하다고 판단되는 조사사항은 그 사유를 서면 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 실시한다.

나) 발주기관이 서면지시 또는 승인한 추가조사에 대한 추가경비는 실비 정산한다.

다) 인․허가(토지 사용, 진입로, 기타 시설물 이용 등)에 관한 제반사항은 수급인이 책임지며, 수급인 부담으로 이를 해결한다.

라) 조사내용 중 하자가 발생할 경우 수급인은 이를 수급인 부담으로 보완하여야 하며, 조사한 내용이 미비하거나 부적당할 경우 감독관의 요구에 따라 이를 보완, 수정 또는 전면 재검토한다.

3. 중간설계

가. 정의

- “중간설계(건축법 제11조제3항에 의한 기본설계도서를 포함한다. 이하 같다)”라 함은 계획설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연관분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계도서를 작성하여 발주기관으로부터 승인을 받는 단계이다.

나. 일반사항

1) 계획 설계를 기초로 하여 작성하되 과업내용서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 계획설계 위치를 기준으로 지질조사계획서에 근거한 지질조사를 실시한다.

3) 실시설계의 기본적인 기준을 제시할 수 있도록 공사별로 작성되어야 한다.

4) 주요기능의 특성, 성능, 재질, 형태 등을 기술하여 실시설계에 필요한 설계기준을 제시하여야 한다.

5) 기계, 전기설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 주요구조부의 구조계산 등 구조 계획서를 작성하고 설계기준, 참고자료, 참고도면을 첨부한다.

6) Utility(기계실, 전기실, 발전기실, 저수조 등)시설은 장비 Lay-Out을 작성하여 발주기관의 승인을 받는다.

4. 실시설계

가. 정의

- “실시설계”라 함은 중간설계를 바탕으로 하여 입찰, 계약 및 공사에 필요한 설계도서를 작성하는 단계로서, 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감, 색상 등을 결정하여 설계도서를 작성하며, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계관리업무 단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주기관의 요구조건 반영여부를 확인하고 최종 설계도서를 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

나. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․보완 지시서에 따라 작성한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

4) 전기, 기계설비, 통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5) 납품 전에 발주자가 검토용 설계도서 제출요구 시 이에 응하여야 한다.(검토용 도서 제출일자 발주자와 협의)

5. 분야별 설계도서 작성요령

5-1. 일반 사항

가. 관계법령 및 과업내용서, 설계지침서에 근거에 의해 작성하여야 한다.

나. 본 과업내용서 및 설계지침에서 제시한 관련법령 및 작성방법 등은 특별한 사유가 없는 한 수급자가 지켜야 할 사항으로 위반 시 계약해지 사항임.

다. 기본계획과 지침 등이 상충하는 경우 감독관과 협의 후 반드시 서면으로 근거를 남겨야 한다.

라. 본 설계용역의 성과품은 지방자치단체용 건설기술(설계)용역계약 특수조건 제10조(법령 등의 준수)에 의거 건축법, 국가기술자격법, 엔지니어링 기술진흥법, 에너지이용합리화법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 상수도법, 도로법, 측량법, 하수도법, 주차장법, 지적법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 소음진동규제법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 한다.

마. 설계도서의 작성방법은 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등) 건설기술진흥법시행규칙 제40조(설계도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토), 국토교통부고시 : 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준, KSF1501 : 건축제도통칙, KSF1505 : 건축구성재의 기본공차, KSF1509 : 건축부품의 치수정하기 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주기관과 협의 후 후속작업을 실시한다.

바. 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

사. 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

아. 전기, 기계설비, 정보통신 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부한다.

5-2. 건축분야

가. 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법

- 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획

- 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

나. 구조 계획서

- 설계근거기준

- 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석

- 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 지진에 대한 고려사항 등

- 구조계산서

다. 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

- 특기시방서에는 자재의 특성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

- 당해 공사의 시방서에는 건축물의 내진능력을 산정하여 준공표지판에 공개하도록 필히 기술

라. 도면종류

- 기존시설물 현황도 : 배치, 평면, 입면 , 단면 등

- 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 투시도 : 천연색채를 사용하여 제작 각 3부

- 조감도 : 청사 주변 단지전경

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수 시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

- 부분배치도 : 상기배치도를 구체적으로 표시

- 동선계획도 : 소방차량 및 인원의 긴급출동에 대한 동선계획 작성

- 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

- 샷다, 핏트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 조경계획 평면도 : 축척, 식수평면계획, 기타 시공에 필요한 사항 일체

- 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 안내판류 등

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사 자료 등

사. 실내건축 분야 : 실내투시도(각 시설별), 천정도, 전개도, 가구배치도, 실내색채, 계획서 등

5-3. 부대토목분야

가. 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

- 사전조사사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나. 구조 및 수리계산서

다. 지질조사 보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사, 세부토질시험 결과 등 표기하고 실시설계내용에 반영

라. 시방서 : 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식을 참고하여 작성한다.(붙임11, 12 참고)

마. 도면 종류

- 위치도, 종․횡단면도 / 평면도, 구조물도(지하매설물 포함), 부대시설도 기타

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

바. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5-4. 조경분야

가. 설계 보고서

- 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

- 세부시공계획

- 자재사용계획

- 세부공정계획

- 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

나. 시방서 : 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다. 도면 종류

- 배치도

- 종단면도 및 횡단면도

- 평면도

- 조경시설물 배치도

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

라. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5-5. 기계설비분야

가. 설계 설명서

- 냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

나. 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

다. 설계 계산서

- 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서(위생, 오․배수, 가스배관), 공조장비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

라. 도면종류

- 건축 주요부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면 목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외평면(정화조, 공동구 등 전체배치도),기계실 장비배치도

- 계통도 : 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도.

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

마. 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

5-6. 전기분야

가. 설계 설명서

- 전기설비개요 : 각 설비(전력, 소방 설비)에 대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에  대한 설명

나. 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이 및 덕트 규격 계산서, 접지저항계산서 등

다. 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라. 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

- 수변전설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도 및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 및 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거(각 회로별로 작성), 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

5-7. 정보통신분야

가. 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타설비)에 대한 설명

- 통신설비 설비도와 결선도 등에 대한 설명 : 국선인입, 통신실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지절감 및 유지관리, 정전대비방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 광케이블, CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

- 통합배선설비, 네트워크 등을 구성하는 케이블(코드)들은 광신호 Tapping에 의한 정보 유출 방지 방안에 대한 설명

- 통신설비들은 해킹지점 감시 방안 및 대·개체, 신·증설 등에 따른 현행화를 위한 운용·관리 스마트화 방안 설명

나. 계산서

- 통신 회선수 산출서, 앰프용량 산출서, TV전계강도 계산서

- 통신실 면적 산출서(집중구, 층구 통신실), DVR 용량계산서

- 케이블 트레이 용량계산서 등

다. 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등 제 규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 어려운 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라. 도면종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : TEL, LAN, CATV, CCTV, MA/CATV, 통신 및 기타설비의 계통도

- 각종 설비의 배치도 : 정보통신실, IPS실, 무정전전원장치, 항온항습장치, 전관방송, A/V, MA/CATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도(이전설치 예정인 정보통신장비 배치도 포함)

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

마. 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5-8. 소방설비

가. 설계설명서

- 소방설비개요 : 각 설비(소화,경보,피난설비 등)에 대한 설명

- 화재발생 조기감지 조치 등에 대한 설명 : 자동감지 또는 육안으로 화재발견시 화재 주수신반에 통보 및 기존 수신기와 연계부분에 대한 검토사항을 설명

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

나. 계산서

- 각종 계산에 적용한 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 소화펌프용량계산서, 소화가스설비 약제량산출서

- 소화수원량 산출서

다. 공사시방서(시방서 구성은 자재시방과 특기시방으로 한권으로 구성)

- 자재시방 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명한다. 단, K.S. 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치방법, 주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

- 일반시방서는 조달청에서 제공하는 “설계자가 작성하는 공사시방서” 양식으로 작성한다.(붙임11, 12 참고)

라. 도면종류

- 도면 목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공 상 유의할 특기사항

- 배치도 : 전체배치도(인입, 옥외시설 포함)

- 평면도 : 실명표기, 각종 기구배치, 공종별로 세분화하여 층별작성

- 주요 부분상세도 : 단면 및 평면으로 표시, 각종기호 및 상세도 작성

- 각종기구 및 함 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

마. 공사비산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

5-9. 공사내역서

가. 공사내역서의 작성은 국토교통부공고 최근 표준품셈 단가를 적용하고, 조달청에서 발표한 시설공사 적용가격을 내역 산정시 반영하여야 한다.

나. 공사비 내역서는 기획재정부 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙 및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

다. 공사비에는 지장물 이설비, 한전 인입비, 상수도 인입비, 시운전비(전기, 기계), 정보통신 이전 설치비 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

라. 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록할 것.

마. 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

바. 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

사. 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

아. 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시는 반드시 근거를 제시하여야 한다.

자. 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출내역을 첨부해야 한다.

차. 수량의 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준 산출하되 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성한다.

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 법률시행령, 법률시행규칙

- 예산회계법 및 동법 시행령, 재무회계예규 및 기타 관련법규 및 기준

카. 건설기술관리법 제23조의 2 및 동법 규칙 제14조의 3의 규정에 의한 공사 중 시공자가 작성해야 될 시공 상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영시켜야 한다.

타. 시방서 및 현장여건을 감안한 품질시험 항목․방법 및 실시횟수 등 품질 시험비를 반영하여야 한다.

Ⅴ. 설계도서 납품목록

1. 계획설계 납품도서

구분	설 계 도 서 명	규격	수량	단위	비 고
1	계획 설계(안)	A3	4	부	스케치 및 스터디 모형 포함
2	현장조사보고서	A4	4	부	유사시설견학보고서 포함
3	현황측량보고서		4	부	현황측량성과도
4	관련법규 검토서	A4	4	부
5	공사비 검토서	A4	4	부	시설비 예산에 대한 개략 공사비 검토 공종별 책임기술자 확인

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

※ 위 제출목록 중 2~5번은 단권으로 제출 가능

2. 중간설계 납품도서

구분	설 계 도 서	규격	수량	단위	공 종							비 고
					건축	토목	조경	기계	전기	통신	소방
1	중간설계보고서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
2	설계 도면	A3	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	전 공종 분리
3	내역서(관급내역서)	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공사비
4	계 산 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
5	시 방 서	A4	3	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	조달청 제공 양식 특기시방 포함
6	지반(지질)조사보고서	A4	5	부		◯
7	녹색건축 인증 관련 검토서	A4	3	부
8	건축물 에너지효율·제로에너지인증 관련 검토서	A4	3	부
9	장애물 없는 생활환경 인증 관련 검토서	A4	3	부

※ 건축도면에는 전 공종 포함 전체 본을 제본한다.

※ 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방도면은 해당 파트만 제본한다.

※ 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

3. 실시설계 납품도서

가. 공종별 실시설계서 제출 목록

구분	설계도서명	규격	수량		단위		공 종																				비 고
							건축			토목			조경			기계			전기			통신			소방
1	종결보고서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			1부로 작성
2	설계설명서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
3	원도	A1	1		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			발주기관 요구시
4	설계도면	A1	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			반접이
	설계도면	A3	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			반접이
5	계산서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
6	내역서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
7	관급내역서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
8	수량산출서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
9	단가산출서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			견적서 포함
10	일위대가표	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
11	일반시방서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			조달청 제공 양식
12	특기시방서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
13	관급시방서	A4	7		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯
14	조감도		3		부		◯																				1컷
15	공정표		1		부		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			전공종 포함
16	DVD(CD)		7		SET		◯		◯			◯			◯			◯			◯			◯			계획/중간/실시/각종심의/ 인허가관련문서/회의록/ 각종발표자료 등 포함
17	녹색건축 예비인증서, 건축물 에너지효율·제로에너지 예비인증서
18	장애물없는 생활환경 예비인증서, 에너지 절약계획서 관련 증빙서류
19	설계안정성 검토에 따른 설계안전검토보고서, 설계에서 잔존하여 시공단계에서 고려해야 하는 위험요소, 위험성, 저감대책에 관한 사항
20	공사계약요청 자료	공사원가계산서, 관급자재목록, 내역서(excel file, xml file), 각 공종 담당자 및 연락처 목록 등																									공사개요, 현장설명서 포함
21	자재 견본 자료	A4		2		SET		◯			◯			◯			◯			◯			◯			◯	제품명, 색상, 규격 등 포함
22	기타 발주기관 요구사항							◯			◯			◯			◯			◯			◯			◯

1) 조감도는 제출 시 별도로 A4 규격 5매와 원본File을 CD로 제출

2) 폐기물처리는 관련규정에 의거 분리발주로 별도 제작 제출

3) 위 제출목록 전부를 CD로 제작하여 제출

4) 녹색건축 및 건축물에너지효율·제로에너지 예비인증서, 장애물없는 생활환경인증서(보완사항이 없을 경우)는 발주처의 특별한 사유가 있는 경우 협의 시점까지 해당 인증기관 접수증 등으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 설계용역비 중 일부(인증관련 업무대가 또는 합의금)의 지급을 유보할 수 있음

5) 장애물 없는 생활환경 예비인증 및 에너지 절약계획서 관련 증빙서류

나. 종결보고서

- 종결보고서에는 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 하도급자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 건축자재에 선정사유 및 칼라에 대한 의견, 건축물 유지관리계획서, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4 규격의 책자로 양면 인쇄하고 왼쪽에 철하여야 한다.

다. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성․제출하여야 한다.

출력물은 1부(A1 이하 규격)를 제출하고 내용은 CD에 포함되어야 한다.

라. 공사별 현장설명서(A4) : 발주자 요구부수

1) 공사개요서는 수요기관의 총공사비 예산 및 당해연도 공사비예산(장기계속계약)을 구분하여 작성하되, 건축, 전기, 통신, 소방, 폐기물, 기타 예산을 예정공정표를 근거로 금차공사기간 및 금차공사금액을 추정 산출하여야 한다.

2) 현장설명서는 조달청 홈페이지에 게재된 기본양식을 기준으로 작성하되, 설계진행 중 현장조사내용 및 기타 공사관계자가 반드시 숙지해야 하는 사항을 위주로 작성하여야 하며, 관급자재 선정내용 등을 정확히 기재하여야 한다.

마. 조감도(A1 이상으로 규격은 사전에 협의하여 결정, 표구 포함) 3부

바. 참여기술자 현황 2부(공종, 기술자격, 참여기간 등, 하도급 공종 포함)

사. 기타 발주자가 요구하는 성과품

〔붙임 1〕 보안각서

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 2020.    .    .

3. 착수  일자 : 2020.    .    .

4. 완수예정일 : 2020.    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2020년     월      일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 2〕 책임기술자 선임계

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 :

3. 계약  일자 : 2020.    .    .

4. 착수  일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2020년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 3〕 하도급승인 요청서

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : ○○○원

3. 계약  일자 : 2020.    .    .

4. 착수  일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

-  아                      래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원도소방본부장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕 (계획, 중간, 실시)설계 검사원

(계획, 중간, 실시)설계 검사원

1. 용 역 명 :                         설계용역

2. 계약금액 : ○○○원

3. 계약일자 : 2020.    .    .

4. 착수일자 : 2020.    .    .

5. 완수예정일 : 2020.    .    .

붙      임 : 납품설계도서 목록  1부

(계획, 중간,실시)설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2020년.     .     .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 5〕 주간공정보고

주간공정보고

□ 용 역 명 :                            설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 201 년  월  일 ～ 201 년  월  일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구 분	전주진행사항(2020. . .)	금주예정사항(2020. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성6		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원도소방본부장 귀하

〔붙임 6〕 월간공정보고

월간공정보고

□ 용 역 명 :                         설계용역

□ 용역개요

◦현장위치 :

◦용역기간 : 2020년   월   일 ～ 2020년   월   일

◦계약금액 :

□ 용역진행사항

구분	월간 업무수행 내용 (2020. . . ~ 2020. . .)	비고
첫째주		(실시/예정공정)
둘째주
셋째주
네째주
다섯째주
익월	- 공정 지연시 : 지연의 구체적 원인 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :                (인)

강원도소방본부장 귀하

붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

[붙임 8] 사업부지 현황 및 지적도

□ 토지조서

연번	소 재 지	지번	지목	면 적(㎡)		비 고
				공부	편입
계	9필지			11,323	10,249
1	홍천읍 태학리	89-2	전	183	183
2	홍천읍 태학리	89-3	전	3,452	3,452
3	홍천읍 태학리	90	전	1,379	1,379
4	홍천읍 태학리	92-1	답	889	889
5	홍천읍 태학리	93	답	623	623
6	홍천읍 태학리	92-17	답	61	61
7	홍천읍 태학리	92-18	답	104	104
8	홍천읍 태학리	94	전	2,928	2,928
9	홍천읍 태학리	281-2	구	1,704	630

□ 지적도

[붙임 9] 신축청사 위치도 및 부지전경

□ 위치도

소방서 신축부지

□ 현청사(신축부지) 전경

〔붙임 10〕 표준설계관리일정표(작성예시)

〔붙임 11〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

〔붙임 12〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것