2021. 10.

기본 및 실시설계 과업지시서

강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 신축

실내 소방전술훈련관 신축 기본 및 실시설계 과업지시서(안)

❈ 청사부지 : 강원도 태백시 동점동 518번지 강원도소방학교(1,500㎡)

❈ 신축규모 : 철근콘크리트조 · 철골조 지상2층 1동, 연면적 1,240㎡내외(층고 15m 내외)

	강원도소방학교 (교육지원과)

목    차

Ⅰ. 설계용역 일반사항

1. 과업의 개요	1

2. 과업의 목적	2

3. 과업의 방침	2

4. 과업기간 및 절차 등	2

5. 과업의 범위	4

Ⅱ. 과업의 내용

1. 용어의 정의	5

2. 용역의 일반사항	6

3. 과업수행 중 단계별 제출서류	7

4. 관급자재의 선정	8

5. 보안성 검토	8

Ⅲ. 과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준	9

2. 설계 일반지침	9

3. 용역수행자의 책임	13

4. 책임기술자 등의 교체	14

5. 용역의 특별사항	14

6. 계약의 해지	15

Ⅳ. 설계용역 진행사항

1. 공통사항	15

2. 설계도서의 분리작성	16

3. 설계도서 표기	18

4. 도면 작성	19

5. 견적 기준	19

Ⅴ. 단계 및 분야별 설계지침

1. 설계의 범위	20

2. 분야별 설계	22

3. 분야별 설계도서 작성요령	33

Ⅵ. 성과품(설계도서) 납품목록

1. 기본설계 납품도서	45

2. 실시설계 납품도서	45

<기타 참고자료 등>

1. (붙임 1) 보안각서	47

2. (붙임 2) 책임기술자 선임계	48

3. (붙임 3) 하도급승인 요청서	49

4. (붙임 4) 계획·중간·실시설계 검사원 서식	51

5. (붙임 5) 주간공정보고	52

6. (붙임 6) 월간공정보고	53

7. (붙임 7) 특정자재사용리스트	54

8. (붙임 8) 실내전술훈련관 층별 소요면적	55

9. (붙임 9) 훈련시설별 세부지침	56

10. (붙임 10) 교육훈련시설의 표준설계면적 기준	60

11. (붙임 11) 사업부지 토지조서 및 지적도	61

12. (붙임 12) 신축청사 위치도 및 부지전경	62

13. (붙임 13) 표준설계관리 일정표(작성예시)	63

14. (붙임 14) 설계자가 작성하는 공사시방서 양식	64

15. (붙임 15) 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표	64

Ⅰ		설계용역 일반사항

1. 과업의 개요

가. 과 업 명 : 『실내 소방전술훈련관 신축 기본 및 실시설계 용역』

나. 위    치 : 태백시 동태백로 289-48 강원도소방학교(강원도소방학교 부지 내)

↳ 신축위치 변경 : 당초(대강당 위 주차장 부지) → 변경(항공기화재훈련장 부지)

다. 용    도 : 문화 및 집회시설(수련시설)

라. 지역/지구 : 자연녹지지역(유원지)

마. 부지면적 : 209,217.4㎡(사용면적 : 1,500㎡)

바. 건축규모 : 철근콘크리트조·철골조 지상 2층 1동(층고 15m 내외)

1) 건축면적 : 법정 건폐율 및 용적률 준수

2) 연 면 적 : 1,240㎡ 내외(발주처와 협의 조정 가능)

사. 예정공사비 : 2,563,636천 원(부가가치세 포함)

※ 예정설계비 : 129,594천 원(부가가치세 포함) ⁕ 계약 시 일부 변경될 수 있음.

1) 제시된 예정공사비는 건축, 토목, 조경, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 폐기물 처리 등에 대한 총 공사비

2) 전기, 가스, 상하수도 등 인입 및 각종 인·허가에 필요한 시설부담금 포함

3) 공종 간 배분하여 사업비 내에서 설계

4) 낙찰차액 감안 불가

아. 주요시설 계획

주 용 도	층 수	연면적(㎡)	세부시설	훈련과정	비 고
실내 소방전술훈련관	1층	990㎡	화재전술훈련장	화재진압 4인조법, 주수기법 등 화재진압 전술훈련	층고 15m 내외
			화재기초훈련장	소방차량 조작훈련, 사다리설치 및 등반훈련 등
			로프구조훈련장	로프하강 및 등반훈련, 수직·수평구조훈련 등
			로프악세스훈련장	로프악세스 레벨 1, 2, 3 과정
	2층	250㎡	VR지휘훈련실	지휘역량강화센터
			디브리핑룸	지휘역량강화센터
			ICT유지보수실	지휘역량강화센터

※ 공사규모, 각 실의 규모 및 배치 등은 발주처와 협의 조정 가능

2. 과업의 목적

본 과업지시서는 강원도소방학교 실내 소방전술훈련관 청사 신축을 위한 설계 용역의 내용과 용역수행자의 업무범위, 기타 용역수행에 필요한 제반 기술적인 사항 등을 규정하여 최적의 설계로 당해 과업수행을 목적으로 한다.

3. 과업의 방침

본 과업지시서는 설계도서 작성 상의 실내 소방전술훈련관 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사 방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관한 세부조사 및 분석, 비교․검토를 통해 최적 안을 선정하여 시공 및 유지 관리에 필요한 설계도면, 시방서, 내역서, 구조 및 수리계산서 등을 작성하고, 기타 각종 사업의 인․허가를 위한 업무를 수행하도록 하며, 설계기준 및 조건 등 설계용역에 필요한 기술자료 작성 등 특기사항을 정하여 설계용역자의 설계 기준으로 하여야 한다.

4. 과업기간 및 절차 등

가. 일반사항

1) 용역수행자는 설계진행과 관련, 책임기술자로 하여금 업무 협의

단, 세부적인 공종별 설계 내용에 대하여는 분야별 책임기술자가 협의 가능

2) 본 과업지시서의 내용이 불분명 또는 명시되지 아니한 경우에는 용역수행자 임의로 해석할 수 없으며 발주처와 협의하여 결정

3) 본 과업지시서에 대한 부분적 대안이 제시 가능하며, 이에 따른 객관성 있는 자료 제출 후 발주처의 승인을 받아 채택 가능

4) 용역수행자는 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위 등 협의 및 회의에 필요한 자료 작성과 회의 참석

5) 용역수행자는 각 단계별 보고회 시행 후 발주처 및 공종별 감독공무원 지적 / 보완 / 수정 요구사항에 대해 특별한 사유가 없는 한 반영

나. 과업기간 : 착수일로부터 150일(공휴일 포함)

1) 기본설계 : 착수일로부터 75일(계획 및 중간설계)

※ 기본설계 완료 승인 후 실시설계 실시

2) 실시설계 : 기본설계 완료 후 총 과업기간 내

3) 기간단축 : 과업 기간 내 설계 완료 후 용역수행자의 요청에 의하여 발주처 에서 검사한 결과 타당하다고 인정 할 경우 단축 가능

다. 업무 회의 및 진행사항 보고 등

1) 용역수행자는 설계 진행사항 정기적으로 보고

2) 각종 보고 및 회의 시 협의된 사항 등 회의록 작성(다음 날까지 제출)

3) 필요 시 회의진행에 관한 세부사항은 발주처에서 별도 통보

4) 주요 보고사항 등

구분	주요 내용	비고
주간 공정보고	○ 담당자 및 감독공무원 이메일 활용 보고(붙임 5 서식) ○ 금주 실적 / 다음 주 계획 작성 보고	매주 수요일
월간 공정보고	○ 금월 실적 / 다음 월 계획 등 작성 보고 ○ 제출방법 : 주간공정과 동일	매월 넷째주 수요일
수시 공정보고	○ 발주처 및 분야별 감독공무원 요청 시 ○ 진행 중 문제점 발생 시(분석 및 대책 포함)
착수보고 회의	○ 발주처와 장소 및 일자 협의 ○ 설계 목표설정 및 향후 일정별 추진 계획 등	착수일로부터 7일 이내
기본계획안 보고	○ 공사내용에 관한 기본적인 개요마련 ○ 청사 건축부지 분석․검토 후 최적의 건물배치(안) 제시 ○ 주요 과업항목에서 기본구상 및 계획에 포함되는 내용 ○ 용역수행 결과 및 의견수렴이 요구되는 내용	착수일로부터 30일 이내
계획설계 보고	○ 설계 개요 및 법령 제 기준 검토 보고 ○ 설계 기본골격 확정 및 후속공정 계획(안) 보고 ○ 배치계획 및 형태, 개략공사비 및 공사기간 등에 관한 조사, 분석, 비교 검토 보고 ○ 건물 내·외부의 동선계획 보고 ○ 주요 자재 ․ 장비 사용성 검토 등	착수일로부터 75일 이내
실시설계 보고	○ 기본설계 결과 토대로 시설물의 규모, 배치, 형태, 공사 방법과 기간, 공사비, 유지관리 등에 관하여 세부조사 및 분석, 비교․검토 보고 ○ 시설물의 기능별 배치 결정 ○ 구조물 형식 결정 및 적용공법 결정 등	착수일로부터 120일 이내
설계 최종보고	○ 실시설계 결과를 바탕으로 작성한 용역결과에 대하여 최종보고	과업종료 10일전
업무협의 결과 등 기타사항	○ 과업을 수행함에 있어 발생되는 문제점 및 이에 대한 해결방안 등
설계검토 보고	○ 계획설계 및 실시설계 완료 보고회 개최 후 설계사항에 대한 검토 및 자문예정으로 이에 필요한 자료 준비 ○ 설계도서 검토 및 보고회 요약 - 설계진행 절차 : 기본설계 → 발주처 검토 → 설계도서 수정 → 기본설계 승인 → 실시설계 → 발주처 검토 → 설계도서 수정 → 설계도서 완성 및 납품 ○ 자문사항 검토 후 설계반영 여부를 발주처에 통보하여 승인을 득하고 설계 반영 ○ 발주처는 필요 시 수시로 설계사항 검토할 수 있음	○ 발주처 검토 시 감독공무원 포함 ○ 발주처 요구 시 자료 준비

라. 과업기간 연장 또는 정지

1) 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인해 중단되었을 경우

2) 발주처의 방침에 의하여 과업수행이 중단되었을 경우

3) 발주처의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

4) 관련기관(부서)의 협의, 자문, 심의, 검토기간 등이 지연된 경우

5) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

6) 기타 발주처가 정당하다고 인정할 수 있는 사유가 발생한 경우

마. 용역완료 후라도 용역과 관련 각종 인·허가업무 관련자료 제출 및 설계 미비로 인한 하자 발생 시 그 내용이 완료될 때까지 수행

5. 과업의 범위

가. 본 과업은 계획설계, 중간설계, 실시설계로 구성되며, 건축협의 등 각종 인·허가에 필요한 서류작성, 제출, 제반협의를 포함한 인·허가 처리(설계용역 성과물은 제반 인·허가를 득한 성과물이어야 한다.)

1) 인·허가는 신청 일을 기준으로 한다.

2) 기본설계 : 규모·배치, 형태, 구조검토, 마감재, 개략공사비, 공법 등에 대한 보고서 및 패널 등 설명회 자료 포함(계획설계 도서)

※ 계획 설계 시 배치평면(안) 3안 이상을 3D로 작성하여 제출

3) 실시설계 : 공종별 공사용 도면, 시방서, 구조계산서, 내역서, 예정공정표 등 기타 관련규정이 정하는 공사에 필요한 서류(실시설계 도서)

※ 용역수행자는 과업기간 종료 후에도 발주처 요구가 있을 경우 또는  물가상승률, 표준품셈, 노임단가 등이 변동을 감안하여 요구시점 기준  으로 가장 최근에 발표된 표준품셈, 노임단가 등 공신력 있는 단가기준을  적용한 성과품(공사비 내역서 등)을 작성하여 추가로 발주처에 납품

(이 경우 추가납품 시기 및 성과품에 관한 사항은 발주처 의견에 따름)

나. 사업추진에 따른 각종 위원회 자문·심의, 영향평가와 건축물인증절차에 필요한 조감도 등을 포함한 도서작성 및 업무대행

1) 설계자문, 건축심의, 공공디자인 심의 등

2) 녹색건축물인증, 건축물 에너지효율등급, 장애물 없는 생활환경 인증을 받을 수 있도록 설계

3) 신재생에너지 설치 신고관련 서류 작성

4) 『녹색건축물조성지원법』에 따른 에너지절약계획 검토서류 작성 등

※ 인증 등에 따른 수수료는 발주처에서 납부

다. 측량, 지반 및 지장물 조사에서 폐기물 발견 시 지정폐기물(석면 등) 조사와 성분검사 결과 반영(대가 별도 협의)

1) 현황측량은 용역수행자가 시행

2) 지질조사는 필요 시 용역수행자 요청에 의해 발주처에서 시행

라. 기타 발주처에서 필요하다고 인정되어 요청하는 사항

1) 청사 조감은 「디자인 강원 프로젝트」와 연계하며, 지역특성·역사·문화를 반영한 디자인 및 지역경관 반영

2) 교육훈련시설 특수성 고려 소방전술훈련을 위한 효율적인 공간구성 및 배치

3) 『지진․화산재해대책법』에 따른 내진대책 설계 반영

4) 본 과업지시서에 명기하지 아니한 사항은 발주처 지시에 따라 수행

5) 실내장식공사에 필요한 상세설계 도서 작성

6) 소방 표지규정에 의한 소방관서 표지 실시설계 반영

7) 마감재 손상, 청사 미관에 저해되는 규정 외의 홍보시설 설치 금지

8) 내·외부 마감재는 미관, 사용빈도에 적합한 내구성 있는 자재 적용

9) 조명기기는 에너지 절약을 고려한 LED 조명기기(절전형)로 설계하되, 장시간  점등 할 실내 훈련장, 사무실, 간판 등 표지에 우선 적용

Ⅱ		과업의 내용

1. 용어의 정의

가.『계획설계』라 함은 발주처로부터 제공된 자료와 기획업무 내용을 참작하여건축물의 규모, 예산, 기능, 질, 미관 및 경관적 측면에서 설계목표를 정하고 그에 대한 가능한 계획을 제시하는 단계로서, 디자인 개념의 설정 및 연관분야 (구조, 기계, 전기, 토목, 조경 등을 말한다. 이하 같다)의 기본시스템이 검토된 계획안을 발주처에 제안하여 승인을 받는 단계이다.

나.『중간설계』라 함은 계획 설계 내용을 구체화하여 발전된 안을 정하고, 실시 설계 단계에서의 변경 가능성을 최소화하기 위해 다각적인 검토가 이루어지는 단계로서, 연과분야의 시스템 확정에 따른 각종 자재, 장비의 규모, 용량이 구체화된 설계 도서를 작성하여 발주처의 승인을 받는 단계이다.

다.『실시설계』라 함은 중간설계 결과를 바탕으로 입찰, 계약 및 공사에 필요한  설계도서를 작성하는 단계로 공사의 범위, 양, 질, 치수, 위치, 재질, 질감,  색상 등을 결정하여 작성하고, 시공 중 조정에 대해서는 사후설계 관리업무  단계에서 수행방법 등을 명시하며, 발주자의 요구조건 반영여부를 확인하고  최종 납품하는 설계의 최종단계를 말한다.

라.『지반조사』라 함은 기본설계 및 실시설계 단계에서 설계에 필요한 지반  상태에 관한 정보를 획득할 목적으로 수행하는 일련의 행위를 말한다.

마.『측량』이라 함은 기본설계 또는 실시설계에서 시설물 설치를 위하여     지리 ․ 지형 ․ 지장물 등에 관한 정보를 측정하는 일련의 행위를 말한다.

바.『용역감독자』라 함은 기본설계 ․ 실시설계 ․ 측량 ․ 지반조사 용역을 발주한 발주처의 임명에 따라 용역 감독 업무를 수행하는 자를 말한다.

사.『용역수행자』라 함은 발주처로부터 기본설계 또는 실시설계의 용역을    도급 받아 설계용역을 수행하는 자(설계자, 도급자, 계약자)를 말한다.

아.『발주처』라 함은 설계용역 계약관서 및 감독자인 강원도소방학교장을 말한다.

자.『건축사』라 함은 설계용역책임을 맡은 용역계약자를 말한다.

차.『검사원』이라 함은 발주처의 장이 임명 또는 위임한 공무원으로서 설계자가  납품하는 모든 설계도서의 검사를 담당하는 자를 말한다.

카.『책임기술자』라 함은 용역 과업을 수행하기 위하여 용역수행자를 대리하여  용역에 관한 업무를 수행하는 자를 말한다.

2. 용역 일반사항

가. 본 설계용역과 관련된 부대업무 및 각종 행정절차 등은 용역수행자가 수행  하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

나. 용역수행자는 용역과업이 준공된 이후에도 발주처의 사정에 의하여 설계  보완사항이 발생한 경우에는 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

다. 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업책임기술자가 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 하며, 과업종료 후 제출하는 최종용역보고서에는 모든 참여 기술자의 성명, 담당업무, 참여기간 등을 구체적으로 기재하고, 날인한 후 제출하여야 한다.

라. 설계도서의 작성방법은 발주처가 정하는 소정양식에 의하고, 설계도서     작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주처와 협의한 후 진행하여야 한다.

마. 본 설계용역에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에  적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주처와 협의하여 처리하여야 한다.

바. 건축 인․허가에 대한 사항은 용역사업 종료 시까지 인허가 절차를 득하되  부득이한 사정에 의해 지연될 시에는 감독관과 협의하여야 한다.

사. 건축 인․허가에 대한 사항은 인․허가 및 착수시점까지의 행정절차를 의미 한다.

3. 과업수행 중 단계별 제출서류

가. 공통사항 : 공공건축물의 설계도서 작성기준, 기본설계 등에 관한 세부시행  기준, 설계도서 작성기준 등의 작성방법에 따라 지침에서 정한 사항

나. 용역 착수 시(3SET) - 계약일로부터 별도 지정일 이내

1) 착수계 1부.

2) 공동수급 표준협정서 1부.

3) 사업등록 신고필증 사본 1부.

4) 사업자등록증 사본 1부.

5) 사용인감계 및 인감(법인) 증명서 각 1부.

6) 책임기술자 선임계 1부.

7) 설계용역 수행 조직표 1부.

8) 분야별 책임기술자 현황(재직증명서, 기술자격증 사본, 기술경력증명서 포함) 1부.

9) 분야별 참여기술자 현황(재직증명서, 기술자격증 사본, 기술경력증명서 포함) 1부.

10) 과업수행 계획서 1부.

11) 설계용역 예정공정표 1부.

12) 낙찰금액에 대한 산출내역서(분담이행자 용역수행 내역서 포함) 1부.

13) 인력, 장비투입 예정현황 1부.

14) 하도급 현황 및 계약 승인신청서 1부.

15) 보안각서(보안계획서 작성 포함) 각 1부.

16) 관련 서류 포함 CD 또는 USB 1개.

17) 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 사항

※ 승인된 과업수행 계획서는 본 용역계약 서류의 일부로서 계약서와 동일한 효력을 갖는다.

다. 계획 설계도서  ※ 세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조

1) 계획 설계 검사원[붙임 4]

2) 계획 설계(안) - 3개 이상

3) 현장조사 결과보고서

4) 현황측량 성과도

5) 관련법규 검토서

6) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

7) 관련 서류 포함 CD 또는 USB

라. 중간설계도서 납품  ※ 세부 제출도서는 제5장 납품목록 참조

1) 중간설계 검사원[붙임 4]

2) 중간설계도면

3) 개략 공사비 내역서(관급내역서 포함)

※ 예산 초과 시 절감방안 및 관급자재 선정 및 반영 검토 사항 포함

4) 공종별 설계도면 및 공사 시방서(초안)

5) 구조계산서 등 계산서 및 물량산출서

6) 지질조사 보고서(시료는 보관 상자에 담아 발주처에 직접 제출)

7) 주요공법, 장비, 자재 선정 보고서(대안제시 및 선정사유, 예산비교 등)

8) 녹색건축 예비인증 취득 관련 검토서 및 자료

9) 건축물 에너지효율 등급 예비인증 취득 관련 검토서 및 자료

10) 제로에너지건축물 인증(또는 에너지절약계획) 취득 관련 검토서 및 자료

(해당 건축물 법적 기준 이상)

11) 장애물 없는 생활환경 예비인증 취득 관련 검토서 및 자료

12) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

13) 관련 서류 포함 CD 또는 USB

마. 설계VE 반영결과 제출(적용대상 시)

1) 설계VE 검토, 확인, 반영된 설계도면

2) 설계VE 검토, 확인, 반영된 시방서

3) 설계VE 검토, 확인, 반영된 내역서(예산절감내역 전․후대비표 포함)

4) 각종 계산서 및 산출서 등 기타 VE 관련 요구자료 제출

바. 실시설계도서 납품

1) 실시설계 검사원[붙임 4]

2) 종결보고서

3) 실시설계 납품도서

○ 실시설계 도면(총괄, 분야별)

○ 발주용 내역서(총괄 및 분야별, 관급자재 내역 별도)

○ 공사 시방서

○ 구조 계산서, 부하계산서

○ 물량 산출서

○ 단가산출서 및 견적서

4) 공사예정공정표(공기산출근거 포함)

5) 건축협의서(제반 인허가 증빙자료를 포함한다)

6) 녹색건축 예비인증서

7) 건축물 에너지효율 예비인증서

8) 제로에너지건축물 예비인증서(또는 에너지절약 계획 검토서)

9) 장애물 없는 생활환경 예비인증서

10) 기타 발주기관의 요구 및 사업추진에 필요하다고 판단하는 사항

11) 관련서류를 포함한 CD 또는 USB

사. 용역수행자는 제반서류 제출 승인 득(필요 시)

1) 용역 기성부분 검사원

2) 준공기한 연기원

3) 준공 검사원

4) 기타 용역수행에 필요한 사항 등

4. 관급자재의 선정

가. 근거규정

1) 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관할 법률 시행규칙』제86조

2) 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령』제11조

나. 용역수행자는 상기 규정에 해당되는 자재리스트 및 선정검토서 작성·제출

다. 용역수행자는 관급자재 선정에 필요한 자료 작성 시 발주처 및 감독공무원과 긴밀히 협조하여 관급자재 선정에 적극 협조

1) 관급자재 선정 시 일정금액 이상 시 강원도 내 생산·취급 제품 반영

2) 강원도 내 생산·취급 제품이 없는 경우 인근 시도에서 생산·취급하는  제품 적용

5. 보안성 검토

가. 용역수행자는 본 과업지시서에 의거 작성 또는 제출되는 각종 보고서 및 지식을 개인 또는 특정단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

나. 용역수행자는 본 과업과 관련된 정보와 과업진행사항을 임의로 소유하거나  외부에 유출시켜서는 안 되며, 과업폐기물은 소각 또는 파쇄 처리하여야 한다.

다. 용역수행자는 보안상 다음사항을 준수해야 한다.

1) 착수 시 보안대책 수립

2) 착수계 제출 시 설계참여 관련자 전원 보안서약서 첨부

3) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의 복사 또는 외부 유출 금지

4) 폐기물 소각 또는 파쇄처리, 처리대장 제출(사진첨부)

5) 용역수행자는 보안상 결함이 없도록 하고 보안상 불이행으로 발생되는 모든 책임은 용역수행자에게 있다.

Ⅲ		과업수행 지침

1. 법령 등의 적용기준

가. 본 과업의 수행은 당해 사업과 관련된 각종 법령·고시·지침 및 해당 지자체의 조례 등에 위배되지 않도록 하여야 한다.

나. 용역수행자는 본 과업지시서에 제시한 설계지침 등이 위 관련 규정과 상이한  경우 이를 발주처에 통보하여(관련 근거 제시) 협의 후 설계를 진행한다.

다. ｢설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침｣   (국토교통부 고시 제2020-15)에 의거 기본 및 실시설계를 수행하여야 한다.

라. 설계도서 작성방법은 건설기술진흥법 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 경우 발주처와 협의 후 후속작업을 실시한다.

2. 설계 일반지침

가. 일반사항

1) 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도 지시나 특기사항이 없는 한  본 지침을 준용함을 원칙으로 하되, 이의가 있을 경우에는 발주처에 서면 질의 및 답변에 의하여야 한다.

2) 납품은 계획 설계, 중간 및 실시설계 도서로 구분하여 납품한다.

(필요 시 중간설계는 발주처와 협의하여 계획설계에 포함 가능)

3) 공사 중 설계도서에 관련된 문의 및 질의사항에 적극적으로 협조(답변서  제출 등)하여야 한다.

4) 발주처의 사정에 의하여 공사발주가 지연될 경우 용역수행자는 내역서 수정 등 발주처의 요구에 응해야 한다.

5) 용역수행자는 건축법 등 관련 규정상 건축이 가능한지의 여부를 판단하여  계약이행에 문제가 있을 경우에는 이에 대한 내용을 관련기관과 문서로  협의하고 설계기간 중 변경되는 법규나 기술기준을 반드시 적용하여야 한다.

6) 용역수행자는 설계 착수 전에 최근 2년 이내 신축한 훈련시설 기관을 현지 조사하여 설계 반영에 참고하여야 한다.(발주처 동행)

7) 건축법 시행령 제91조의 3(관계전문기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

8) 소방특유의 기능과 예술성을 창조하여 119의 이미지를 부각시킨 상징적    이미지가 부각되도록 감각적으로 설계하여야 한다.

9) 대지주변이나 건축물 내 소음원이 있는 경우에는 소음에 대한 대책을    수립하여 설계하여야 한다.

○ 소음진동이 많이 발생하는 실(훈련장, 교육장 등)과 소음과 분리가 필요한     실(회의실 등)을  구분 및 각 실의 소음 차단을 위하여 흡음제 등을      사용하여 구획

○ 전기 및 정보통신분야(LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술기준 적용

○ 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술기준 필히 적용

나. 대지의 입지조건에 적합한 합리적인 설계

1) 안정성과 조형미를 살리면서 공공기관 건물로서 상징성이 부각되도록 설계

2) 지역특성 등을 반영한 디자인 및 주변건물과 조화롭게 설계

3) 방수, 방습, 단열, 차음 및 소음방지에 지장이 없어야 하며, 각 기능별 유기적 관련성을 고려하여 설계

4) 구내도로, 공동구, PIT 등이 침하되지 않도록 대책을 수립하여 설계

5) 기능을 원활하게 수행할 수 있도록 유기적으로 공간이 연결되고 동선 및  실의 크기가 적절하게 배분되어 최소비용으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 합리적인 설계

다. 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

1) 성장과 변화를 예측한 합리적 규모로 외관은 조형성, 독창성이 있는 설계로 쾌적한 환경을 조성하고 외형과 조경의 모든 요소에 친근한 이미지 반영

2) 「초고속 정보통신 건물 업무용 1등급 기준」에 적합한 통신설비 계획

3) 전화 및 LAN 구축은 수요기관과 소요회선(직통, 교환기, 인터넷전화, FAX 등)을 협의 후 적합한 통신회선 반영

4) 공동구, PIT 등 부식 우려가 있는 모든 장소에는 자재선정 시 내구성과 미관을 동시에 고려하여 설계

5) 유비쿼터스 시대에 맞는 정보통신의 발전 대응을 위한 기반시설 구성

라. 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

1) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」, 「건축물의 에너지 절약 설계기준」등 제반 규정을 준수하여 설계

2) 창호, 내․외벽, 슬래브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

3) 기계 및 전기설비는 에너지 고효율 자재사용 및 고효율 시스템 설계

4) 기계설비는「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」제12조 제2항에 의거 신재생에너지 설비를 설계

5) 자연채광 최대한 반영 및 적정 환기로 최적화 환경을 조성하고, 건물용도와 실에 따른 적정 조도의 반영

6) 근무 직원의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

7) 에너지절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 설계

마. 환경 친화적 부지환경 조성

1) 합리적인 토지이용계획으로 대지이용을 극대화하고 쾌적한 근무환경 조성

2) 조경포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 외부 옹벽, 우·오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계

3) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

4)「소음 ․ 진동관리법」제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음 ․ 방진 시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치 기준 등)에 맞게 설계

바. 방범, 방재 등에 편리하고 유지관리가 용이한 설계

1) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을 고려한 경제적인 설계

2) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

3) 범죄예방환경설계(CPTED) 개념을 도입하여 범죄예방 환경기반을 조성 하도록 설계

사. 안전성과 시공성이 확보된 설계

1) 기능과 내진설계 규정에 적합하며, 안전한 구조로 설계

2) 고정하중, 적재하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태 (실험실 등)에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의 영향을 고려한 구조안정성이 확보된 설계

3) 지반조사보고서의 결과에 따라 합리적인 기초구조계획이 이루어진 설계

아. 향후 증축대비 설계(발주처와 협의)

1) 향후 시설의 증축계획을 고려하여 증축 예상부분 사전대책 수립·반영

2) 증축 대비 설계하중, Expansion joint 등 고려한 설계

자. 주요자재 사용계획

1) 기능에 적합한 환경 친화적이고, 경제적인 자재 사용

2) 국내자재 중 KS제품 사용이 원칙이며 KS제품이 없을 경우 국내 최상품 자재 중에서 발주처와 협의하여 선정

3) 관급자재 및 주요자재(골재 등)는 현지 생산 공급처를 확인 후 설계하고 내역에 반영

차. 하도급의 범위

1) 용역수행자는 본 설계 용역 중 발주처의 서면 승인 후 용역업무 일부를 하도급 할 수 있다. 이 경우 하도급 관련 법령에서 정하는 하도급의 적정성이 보장되어야 한다.(일괄 하도급 금지 등)

2) 하도급으로 처리할 수 있는 사항

○ 각종 조사, 측량 및 이와 유사한 작업

○ 지반조사와 이에 부수되는 시험 등

○ 기계설비, 전기․정보통신, 인테리어, 부대토목, 구조, 조경 등의 설계업무

○ 구조계산 및 검토, 풍동시험에 관한 업무

○ 건설공사의 수량 및 견적업무

○ 기타 발주처에서 특별히 인정하는 업무

3) 용역수행자는 하도급 업무에 대하여 관계법령에서 정하는 적격자에게 하도급 할 수 있으며, 하도급 된 당해 업무에 대해서도 모든 책임을 져야한다.

4) 발주처는 하도급 계약자가 용역업무 추진 능력이 없다고 인정되거나 성실히 그 의무를 다하지 않을 경우 용역수행자에게 하도급 계약자의 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 설계자는 특별한 사유가 없는 한 교체하여야 한다.

5) 용역수행자는 기계설비·전기·정보통신·소방분야 등의 설계를 하도급 하고자 할 경우 연계성 및 소요면적 등에 대하여 충분히 협의하여 진행하고, 하도급은 동 공종의 관련실적이 있는 업체로 제한하며 착수계 제출 시 관련 증명서를 제출하여야 한다.

카. 미래지향적이고 독창적인 설계

1) 외관은 조형성이 가미된 독창성 있는 설계

2) 내부 시설 및 장비 등은 최첨단시설로 설계

3) 실내장식은 세련된 디자인과 창의성이 발휘된 설계

4) 훈련 동선을 고려한 효율적인 공간 설계

3. 용역수행자의 책임

가. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계 내용은 관계법규와 제반규정에 저촉되지 않아야 하며, 건축사법의 규정에 따라 제출된 도서에 대하여 잘못된 사항 발생시 일체의 책임을 진다.

2) 용역수행자는 공사 추진 또는 하자발생 시 시공자간의 분쟁이 없도록 각 공종별 업무범위를 명확히 구분·설계하여야 한다.

3) 용역수행자는 계약서에서 정한 기간 내에 성과품을 납품하여야 하며, 이를  위반 시「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장 용역계약 일반조건에 의거 지연배상금을 요구하여도 이의를 제기할 수 없다.

4) 설계용역 완료 후라도 설계용역과 관련한 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 상이, 건축협의 불가, 구조적인 모순, 물량누락, 보완설계 및 협의가 필요한 부분)로 인하여 발생되는 모든 사항에 대하여 설계변경을 포함한 일체의 책임을 져야하며, 손해에 대하여는 관계 법령에 따라 용역수행자가 부담(배상) 하여야 한다. (공사착수 시 관련기관에 제출하는 설계도서 및  관련서류 작성 제출 포함)

5) 설계상의 하자내용이 보완될 때까지 수급인은 무상으로 추가과업을 수행 하여야 하며, 이에 대한 비협조로 사업추진에 장애가 발생되거나, 중대한 설계과오로 판단될 경우 관계법령에 의거 조치하여도 이의를 제기할 수 없다. (건축사법 제11조 및 제20조 등)

6) 용역수행자는 총사업비 적정 관리를 위한 관리지침에 따라 사업발주 후  과다한 사업량 증가로 인한 사업비 증가발생을 초래할 시「건설기술진흥법」제53조(건설공사 등의 부실 측정) 의한 부실벌점 부과(아래기준) 및 부정당 업자의 입찰참가자격 제한 등 불이익을 받을 수 있으므로 성실한 설계도서 작성으로 사업추진 중 설계변경 사례가 발생되지 않도록 특별히 유념하여야 한다.

※「건설기술진흥법」제53조(건설공사 등의 부실 측정)

「건설기술진흥법 시행령」제87조(건설공사 등의 부실 측정)

「건설기술진흥법 시행규칙」제47조(건설공사 등의 부실측정 결과의 관리)

7) 용역수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항,  발주처의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 발주처의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

나. 상기사항의 이행을 위하여 용역수행자는 설계용역 손해배상보험에 가입하고, 실시설계 납품 시 그 증서를 제출하여야 한다.

4. 책임기술자 등의 교체

가. 용역수행자는 발주처가 과업에 참여하고 있는 책임기술자 등이 용역수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

나. 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그  기간 동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

다. 용역수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에 발주처의 승인을 받아야 한다.

5. 용역의 특별사항

가. 본 과업을 수행함에 있어 발주처의 특별한 사정이나 계획변경, 용역수행자의 과업이행이 불가능하다고 인정될 경우, 기타 중대한 계약 조건의 위반이 있을 때에는「지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률」및 기술용역계약 일반조건 등 관계법령 등에서 정한 바에 따라 본과업의 일부 또는 전부를 중지하고, 착수계 제출 시 제출한 낙찰금액에 대한 산출내역서 및 예정공정표에 의거 정산처리하거나, 용역계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

1) 기본구상, 기본계획, 중간설계, 실시설계 등의 작업 단계별 작업성과, 작업 일정 등을 준수하여야 한다.

2) 작업성과는 각 단계별 자문회의 결과를 보완, 재검토, 작업불가 등으로 구분하여 설계보완, 재설계, 계약해제 등으로 조치하여야 한다.

3) 작업일정은 계약 시 제시된 일정을 근거로 정상, 지연(예정 작업일수의 20% 범위 내 지연), 부진(예정 작업일수의 20%초과 지연) 등으로 구분하여 지연의 경우에는 상호협의하고, 부진의 경우에는 발주처의 판단에 의해 계약조건 및 관계법령에 의하여 계약해제 등으로 조치하여야 한다.

나. 본 용역수행을 위하여 생산된 성과품(설계용역관련 인쇄물, 책자, 도면,  영상물, 컴퓨터그래픽 등 기타)등의 원판이 있는 경우 반드시 발주처에 제출하여야 하며, 저작권법상의 저작권(인격권 포함), 소유권 등 모든 권리는 발주처에 귀속된다.

다. 계약기간의 연장 및 계약금액의 조정 등의 사유가 발생될 경우에는「지방 자치단체를당사자로하는계약에관한법률」및 기술용역계약일반조건 등 관계법령 등에서 정한 바에 따른다.

6. 계약의 해지

가. 설계 납품이 지연되거나 설계이행이 불가능하다고 인정될 때

나. 감독공무원의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

다. 부득이한 사유로 본 공사 건설계획을 중단할 때

라. 기타 계약 조건을 위반할 때

Ⅳ		설계용역 진행사항

1. 공통사항

가. “국토교통부 고시 제2016-105호(2016.12.30.) 건축물의 설계도서 작성기준”을  준수하여야 하며 같은 기준의 별표(설계도서 작성방법)에서 명시한 내용 중 기본업무설계도서”와 본 과업을 위해 필요로 하는 “추가업무 설계도서”를 작성하는 것을 원칙으로 한다.

나. 아울러, 각 과업 단계별 설계서 구성 등은 아래 내용에 주의하여 작성하고 반영하여야 한다.

2. 설계도서의 분리 작성

가. 일반사항

1) 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 및 관급자재 등 공종별로 분리하여  발주단위별(도면, 내역서, 일위대가표, 수량 산출기초 등)로 작성하여야 한다. 단, 발주 단위에 대하여는 필요 시 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

2) 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 도면은 발주처의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종 간 Overlapping에 의한 대조가 가능하도록 하여야 한다.

3) 설계도면에는 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결보고서에는 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등 구체적으로 명시하여야 한다.

4) 설계도면을 작성함에 있어서 건축, 기계설비, 전기, 통신 등 해당 공사와 관련하여 명확히 구분하고 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

5) 설계도서의 작성방법은 발주기관에서 정하는 양식에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 반드시 발주처와 협의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

6) 본 과업지서에서 제시한 과업의 목적, 건립 규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주처에서 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속작업을 진행하여야 한다.

나. 작성지침

1) “공공 발주 사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”(국토교통부)에  의하며,「공공기관 에너지이용 합리화 추진지침」을 준용한다.

2) 설계도서는 최종 축소판을 고려하여 표준규격으로 작성하여야 한다.

3) 공사 관리계획 수립 및 예정공정표를 작성하여 제출한다.

4) 공사분야(공종)별로 도면목록을 작성하고, 방향, 단면, 상세표시 및 범례를  넣어 해당 부분을 쉽게 찾아볼 수 있도록 하며, 용도별 면적표를 첨부한다.

5) 표기문자는 한글을 원칙으로 하되 이해가 곤란한 경우에 한하여 영문 및  한문을 혼용할 수 있다. 단, 숫자 표기는 아라비아 숫자 사용을 원칙으로 한다.

6) 설계내역서 작성은 일위대가, 국토교통부 표준시장단가, 표준 품셈을 적용하여 산출하여 작성한다.

7) 재료의 단가는 3개 이상에서 단가(조달청단가, 국가공인 물가정보지 및 견적단가)  조사 후 작성한다.

다. 시공 상세도

1) 철근배근도는 정․부 철근의 유효간격 유지용 및 피복두께(측, 저면)유지용  스페이서 및 CHAIR-BAR의 위치, 설치방법 및 가공을 위한 상세도면을 작성하여 철근배근 및 콘크리트 타설 시의 하중 등 각종 철근 간격이 충분히  유지될 수 있도록 설계하여야 하며 각 철근배근 간의 순 간격, 거푸집과 철근 간의 순 간격 등 수치를 표시하여야 한다.

2) 철근 이음부의 위치, 간격, 설치방법 및 사용 재료(채움재)등에 대한 상세  도면과 시공법을 표기하여야 한다.

3) 상기 각 호 및 연속 슬래브 콘크리트 타설 시 시공순서와 시공법 등 도면  상에 명시하기 어려운 사항에 대하여는 도면 하단부에 주서로 설명을 기재하거나 시방서로 대체할 수 있다.

4) 상세도 대상은 아래와 같으며 누락되지 않도록 한다.

벽돌쌓기, 화강석 붙이기 또는 깔기, 천장틀 설치, 창호설치(상ㆍ하ㆍ횡단면), 파일 항타, 재료분리, 난간 등 구조물 및 금속(잡철) 부문, 처마, 파라펫, 수직ㆍ수평방수, 배수드레인 또는 그레이팅, 건식벽, 연도 또는 배기덕트, 단열, 붙박이장, 캐노피, 장애인전용설비, 유리블록 접합, 위생도기 및 수전류, 파고라 및 벤치 등 조경시설물, 수목 식재, 기타 각종 마감부분

5) 오․하수처리계획도를 작성하되 인입․배출구를 포함한 각 접합부에 대한 상세도를 각각 표기한다.

라. 내역서 작성

1) 단가적용 기준일 : 기본설계 승인 후 실시설계 착수일로 한다.

2) 단가산출서 작성

○ 단가적용 기준 일의 해당 월에 적용되는 조달청 단가, 물가조사 공인  기관에서 발행하는 2종 이상의 물가정보지를 근거로 산출한 3개의 단가를 일정기준에 의한 표로 작성하고 단가는 최저가를 적용한다.

○ 단가자료가 없는 경우에 한하여 관련협회의 고시 가격이나 협정가격과  2개 이상의 관련업체 견적금액을 기재할 수 있으며 견적금액 적용 시에도 공정별 세부 일위대가표를 작성하여 제출하여야 한다.

○ 단가산출서 작성이 불합리한 경우에 한하여 일위대가를 적용하되 일위  대가 작성은 건설(토목, 건축, 전기․통신, 소방) 표준품셈에 의한다.

마. 수량산출서 작성

1) 설계도면 및 내역서에 포함될 모든 품목에 대하여 수량산출 근거를 작성  하여야 하며 단위는 길이(㎜), 넓이(㎡), 부피(㎥), 무게(ton)로 환산한다.

2) 산출근거 작성은 좌표 망에 의한 세부용도별 실별로 산출하여 객관적인  증명이 가능토록 한다.

3) 관급자재내역은 별도로 작성하여야 한다.(관급자재 품목식별번호 기재)

4) 공사 시 발생하는 폐기물 및 잔토의 반출예상량, 기존건축물 철거물량을  산정하여야 한다.

바. 특기시방서 작성

1) 특별시방서는 당해 설계도서의 시공 상 특별히 요구되는 공법이나 유의사항을  명시하여야 하며, 신공법과 관련하여 특별히 유의하여야 할 사항을 기록한다.

2) 시공자가 수급하여 시공하는 건설자재 중 기준 및 재질과 시험방법 등을  특별히 명시하여야 할 사항을 기재 한다.

3. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 기술용역 계약일반조건 제5조(사용 언어)에 의한다.

나. 약어를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어사용을, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A

2) 건축구조도면 : S

3) 토목도면 : C

4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (소화설비도면 : MF)

6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 정보통신도면 : IT

라. 설계도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량산출 및 시공이 용이하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방 등 기타 부대설비 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계 도서를 작성

(상세도, 특기시방서 등)

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

4. 도면 작성

가. 설계용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품 사용

나. 도면규격 : A1(현장공사용 1부), A3 규격 사용

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선 식별 가능하도록 상세하게 표기

라. 토목, 건축, 기계, 전기, 정보통신, 소방 도면은 발주처의 지시에 따라 공종간 대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 동일한 축척으로 표현

마. 「건설기술진흥법 시행규칙」제43조 및 국토교통부 고시“공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준”의 규정에 의거 설계 도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인

바. 종결 보고서에는 구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적으로 명시

5. 견적기준

가. 수량산출은 국토교통부 제정 적산요령으로 산출하되 납품 일에 가장 가까운 달의 가격을 기준으로 선정하여야 한다.(단, 납품일과 공사발주일이 다른 경우에는 납품이후 발주 예정일에 맞게 설계내역상의 단가를 조정하는데 협조하여야 한다).

나. 관급자재로 구매하여야 할 대상과 수량, 금액, 시방이 별도로 명시되어야 한다.

다. 복합단가로 구성되는 가격은 반드시 일위대가표를 작성하고 일식으로 적용 되는 단가에도 충분히 납득될 수 있는 자료(견적서 2개 이상)를 첨부하여야 한다.

라. 각 공종별 내역서 및 총괄 내역서를 작성하고 재료·인건비의 수량산출 근거를 상세히 작성 첨부하여야 한다.

마. 자재비는 조달청 가격정보를 적용하고 가격정보지에 없는 것은 물가자료와 물가 정보에 의하고 단가대비표를 작성 첨부하여야 한다.

바. 제 잡비는 「지방자치단체를당사자로하는계약에관한 법률」 요율을 적용하여야 한다.

사. 과업수행자는 본 용역 완료 후에 감사 또는 기타 사유로 위반사항이 발생하였을 때에는 변상 또는 이에 상응하는 어떠한 조치에 대하여 이를 감수하여야 한다.

아. 본 과업지시서의 내용에 대하여 해석 차이가 있을 경우 발주처의 해석에  따라야 한다.

Ⅳ		단계 및 분야별 설계지침

1. 설계의 범위

지침에 의해 의도하는 목적이나 건축되는 시설물의 실현과 관련된 여러 가지 조건을 종합하여 이에 부합된 충분한 가치와 효용을 가진 건축계획안 및 각종 분야(훈련시설의 화재진압전술 훈련장, 화재진압기초 훈련장, 로프구조 훈련장, 로프악세스 교육장, VR지휘훈련실, 디브리핑룸, ICT유지보수실, 기계설비, 전기, 정보통신, 소방)에 대한 설계를 진행하는 단계로 관계 법령 및 지침 등에 의거 다음과 같이 과업을 수행하여야 한다.

가. 기본구상

1) 소방전술 교육훈련시설 특성상 특수 공간 및 분야별 훈련시설 배치, 교육 동선을 고려하여 안전한 교육환경을 제공

2) 실내 소방전술훈련관 신축 관련계획과 용역결과 등을 참조하여 공사의 필요성, 규모 및 공사비, 다른 법령에 의한 계획과의 연계성을 검토하여 공사 내용에 관한 기본적인 개요 마련

3) 건축설계와 연계한 부지조성 토목설계로 실내 소방전술훈련관 청사 건립 후 최적의 공간 활용 건축물로 평가 받을 수 있도록 건물배치 및 평면계획을 철저히 검토

4) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

○ 공사의 규모 및 공사비, 예정지의 입지조건

○ 도시관리계획 등 다른 법령에 의한 계획과의 연계성

○ 공사의 시행에 따른 위험요소 및 환경에 미치는 영향 예측

○ 기대효과 등

나. 기본설계

1) 층고 15m 이상의 2층 건축물로 화재진압훈련 공간, 사다리훈련 및 로프훈련, 지휘역량강화센터(VR지휘훈련실, 디브리핑룸, ICT유지보수실)를 위한 시설을 중점으로 설치

2) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

○ 공사의 목표 및 기본방향

○ 공사의 내용 ․ 공사기간 ․ 시행자 및 공사수행계획

○ 공사비 및 재원조달계획

○ 공사시행계획, 시설물 유지관리계획

○ 환경보전계획 등

다. 중간설계

1) 관련법에서 정한 아래내용에 대한 세부내용 제시

○ 공사의개요 및 필요성

○ 공사의 효과

○ 공사기간 및 연차별 투자계획

2) 지장물 및 문화재 조사

○ 부지 내 각종 지하 매설물 및 지장물 등에 대하여 정확히 현장 및 자료를 조사하여 설계에 반영

○ 부지 내 지장물 조사 시 문화재 조사를 병행하여 실시하며, 문화재 출토 시 관련 법령을 준수하여 시행토록 설계에 반영

3) 토취장 골재원 및 사토장 조사

○ 공사시기를 고려하여 토취장 및 사토장을 조사하여 설계에 반영

라. 실시설계

1) 기본설계를 구체화하여 실제 시공에 필요한 내용을 설계도서에 표시

2) 설계공모, 기본설계 등의 시행 및 설계의 경제성 등 검토에 관한 지침 제25조(국토교통부고시 제2020-15호, 2020.01.13.)에 의한 세부내용 표시

3) 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제 2016-1025호, 2016.12.30.)에 의한 설계도서 작성

2. 분야별 설계

가. 실내전술훈련관 훈련시설 분야

1) 실내 소방전술훈련관은 실내에서 이루어지는 교육 및 훈련시설로서 화재진압·인명구조·응급처치 교육훈련을 위한 화재진압전술훈련장, 화재진압기초훈련장, 로프구조훈련장, 로프악세스교육장, 지휘역량강화센터(VR지휘훈련실, 디브리핑룸, ICT유지보수실)으로 구성한다.

2) 화재진압전술 훈련장

가) 화재발생 시 화재진압 4인조법, 주수기법, 지하층·저층·고층 화재진압전술을 습득하기 위한 교육훈련장

나) 다양한 화재현장에서의 재난대응 및 화재진압, 인명구조에 필요한 화재진압 전술 훈련시설

3) 화재진압기초 훈련장

가) 화재진압을 위한 펌프차량 조작, 사다리 설치 및 등반, 소방호스 전개 및 회수 훈련을 위한 화재진압기초 훈련장

4) 로프구조 훈련장

가) 사고발생 시 인명구조에 필수적인 로프 구조기술을 습득하기 위한 교육훈련장

나) 다양한 상황에서의 재난대응 및 인명구조에 필요한 구조기술 훈련시설

5) 로프악세스 교육장

가) 사고발생 시 인명구조에 필수적인 전문구조기술을 습득하기 위한 교육훈련장

나) 다양한 상황에서의 인명구조에 필요한 구조기술 훈련시설

6) 지휘역량강화센터(ICTC)

가) VR지휘훈련실

: 가상현실과 실제 현장 상황을 접목한 시뮬레이션 재난대비 훈련시설

나) 디브리핑룸

: 가상현실 훈련 종료 후 훈련 참여자들이 함께 훈련에 대한 평가 및 회의 장소

다) ICT유지보수실

: 지휘역량강화센터 내 각종 전산장비 및 시설에 대한 관리실

7) 교육훈련시설 기능 고려사항(발주처 의견 적극 수용)

가) 소방의 상징성 고려, 창의적이고 이상적인 공간구성 반영 설계

나) 동선의 집중화 및 단순화

(1) 각 훈련시설 분야별 교육훈련에 용이하도록 설계

(2) 실내전술훈련관 내 각 훈련장 공간을 집중화하여 유기적으로 배치

(3) 대형 소방차량의 회전과 진입을 고려한 동선 확보와 교육생의 안전을             확보하기 위한 소방차량과의 동선이 분리될 수 있도록 설계

다) 교육훈련 등에 대한 적합한 시설 반영

(1) 실내전술훈련관 내 교육훈련을 위한 음향시설 확보

(2) 청사 전면 소방차량 출입 공간 충분히 반영한 설계

라) 소방장비의 유지관리 및 경제성 제고

(1) 자연채광 확보 등 에너지 절약형 청사 설계

∙ 사무실 등 열손실 최소화 및 자연환기 극대화 고려한 설계

∙ 훈련장, 교육장, 지휘역량강화센터 등 훈련시설의 특성을 고려하여              각 실을 제어할 수 있는 냉난방시스템 등을 검토하여 설계 반영

∙ 효율적인 에너지 절약이 가능한 시설로 설계

(2) 소방차량 등 활용한 화재진압 전술훈련 공간 확보 가능토록 설계

(3) 부대시설 확보 : 전술회의실, 기자재 보관 창고 등 설계 반영

마) 현대화된 미래지향적 시설 설계

(1) 훈련 및 기타 평상 시 다용도로 활용 가능한 공간 확보

(2) 조형의 현대화

∙ 미래지향적이며 경쾌하고 안정감 있는 구조로 설계

∙ 강원도소방학교의 교육훈련시설로서의 상징적인 조형 추구

∙ 곡선, 원 등을 활용한 부드럽고 현대적 감각의 청사 설계

∙ 다양한 교육훈련에 대비한 구조물의 안전한 설계

∙ 장비 현대화 등에 따른 여유 있는 증축 공간 확보

(3) 각종 출입문

∙ 적용하는 출입문 등은 가능한 크고 관련 규정에 적합하도록 설계

∙ 물 사용이 많은 훈련시설 특성 고려, 부식방지 가능한 재질로 설계

나. 건축 분야

1) 일반 사항

가) 교육훈련시설의 상징성이 나타나도록 고려하여 설계

나) 현대적인 감각에 맞게 자재를 선정하여 설계에 적극반영

다) 각 실별 배치 및 규모는 가변성 및 융통성이 있게 하고, 향후 변경이 가능한 구조와 재질로 설계

라) PD, AD, EPS, IPS 등은 계획단계부터 유지관리를 고려하여 사람과 장비가 출입이 가능하도록 충분한 크기를 확보

마) 건물 내 각종 장비 중 고정식(매입형), 운영관리용 기기 및 주변기기 등의 비품 등은 본 시설공사에 포함하며, 집기 등 배치 고려 설계

바)「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」등 관련법령에 적합하게 세부시설을 계획

사) 기타 부대시설(공용면적, 샤워실, 탈의실, 서비스지원 공간, 기계 및 전기실 등)은 관련 법령에 적합하게 설계

아) 주차시설은 주차장법과 관할 지자체 관리 조례에 적합하게 설계

자) 시설물의 기능을 최대한 발휘할 수 있도록 법적 기준에 적합한 마감 처리

차) 설계도서 작성방법은 건설기술진흥법 등 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의 후 후속작업 실시

2) 구조 계획

가) 기능적으로 공간 활용의 효율성이 높고 안전한 구조로 설계

나) 구조는 경제적이며 시공상 어려움이 없도록 설계하고, 특수구조이거나 시공상 특수공법이 필요한 경우 이에 대하여 객관적으로 인정할 수 있는 공인기관의 기술 검토서 첨부

※ 건축물 하중기준과 극한강도 설계법에 의한 철근콘크리트 구조기준 등에 적합하여야 함.

다) 구조형식은 장기, 단기하중 및 지진에 의한 처짐과 비틀림 방지 등 구조체 변형에 충분히 대처할 수 있도록 설계

라) 기둥 등 주요 구조부는 추후 증축에 대비하여 설계

다만, 기둥 폭이 굵어지는 것을 방지하기 위하여 차량 등 청사 진출입이 방해되지 않도록 설계

3) 주요자재 사용계획

가) 기능에 적합하고 경제적인 자재 사용 및 현대감각에 조화되도록 설계

나) 관급 및 주요자재(골재 등)는 현지생산 공급처 확인 후 설계

다) 특허 ․ 실용신안 등 특별히 그 제품을 써야 될 상황 제외

(특정제품 명시 금지)

라) 모든 재료는 원칙적으로 산업표준화법에 의한 KS규격표시 인증품 사용

다만, K·S 규격 인증품이 없는 경우 건축법 등 관계법령에 의한 표준품 이상의 시중 최상품 사용

마) 특수자재 또는 공법을 사용하고자 하는 경우 그 사유와 성능, 경제성, 시공성, 유통구조 및 기타 필요한 사항을 발주처에 제시
다만, 건설기술진흥법 제18조의 규정에 의하여 지정·고시된 건설 신기술의 사용이 가능한 경우에는 제외

바) 모든 석재(자연석 경계석 등 포함)는 국내산 원석을 사용하며, 제품의 검사 ․ 검수 시 원산지 증명서, 원석매입계산서 등 제출

마) 청사의 외벽은 대리석 등 불연재로 설계

사) 본 공사의 설계서 및 내역서 등은 조달청 계약발주가 가능하도록 작성

아) 공사비 산출은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제10조를 기준으로 내역서를 작성하고 이에 대한 산출내역서 제출

※ 조달청장이 조사 통보한 가격, 각종 물가정보지 및 현물 시세견적 등 비교 검토하여 “최저 실행가격으로 설계내역서 작성”하여야 하며, 원가산출 과다계상으로 인하여 발주처 원가심사부서의 공사원가 심사 에서 감액되지 않도록 설계

⇒ 원가 과다계상으로 인하여 공사원가 감액조치 통보 시 심사부서에서 요구한 감액 해당 부분을 반영한 설계 내역서 수정 제출

다. 실내장식 분야

1) 일반사항

각 시설물의 바닥, 벽, 천장 등의 마감 재료는 연계성 및 조화롭고 유지관리에 적합하게 설계

2) 설계내용 및 세부사항

가) 구조물의 연계와 시설구분을 명확히 하여 실내건축(장식)의 정확한 구획과 공사에 필요한 설계도서 작성

나) 각실 투시도

다) 배치도, 실내조감도, 평면도, 입면도(전개도), 각종단면도 및 상세도

라) 공사 및 각종 시설물 제작사양 외 시방서 작성과 전력부하 계산서

마) 공사비(공사내역서, 물량산출기준, 일위대가 등) 명세서

3) 실내건축 : 건축물의 내부 공간 설계로서 다음분야 포함

가) 실내 마감표 작성

나) 벽, 천장, 바닥으로 형성되는 실내공간의 설계

다) 실내구획 시설물의 설계

라) 건축내부구조물(마감)의 문제점과 연계, 내부 설계 시 참고하여 시공 상 문제점이 없도록 설계

4) 실내설비

가) 실내건축 설비에 따른 해당 조명기구의 조명배치(국부 / 일반조명 / 디자인 조명) 및 전열설비 설계

나) 각종 전기설비 및 기타 동력분배에 필요한 배관배선 및 기구 설계

다) 외부소음, 설비소음 등의 배제 조치한 설계

라. 토목 분야

1) 일반사항

가) 설계도서는 본 지침서에 의거 작성하되 사전조사 단계에서 부지현황을 인근의 지형까지 포함하여 세밀히 조사한 후 현황도를 작성하고 계획 설계에 필요한 자료 제공

나) 부지의 효율적인 이용을 위하여 도로, 하수관로, 맨홀, 고압선, 통신선, 기타 지상 및 지하구조물, 지하매설물 같은 사항을 면밀히 사전 조사․분석

다) 계획평면도는 종합계획 평면도를 작성하고 배수계통도, 포장평면도, 하수계획평면도는 세분하여 작성

2) 토공 및 흙막이 설계

가) 토공은 가급적 절․성토의 균형을 유지하여 경제적 설계가 되도록 조치하고 부득이 토취장 또는 사토장이 필요한 경우에는 최소비용으로 처리할 수 있도록 계획하여야 하며 토취장 또는 사토장은 지번까지 명확히 표기

나) 설계자는 토공설계 시 토취장 또는 사토장을 현지에서 직접 조사하여 중간 및 실시설계 시 운반거리에 따른 비용을 내역에 반영

다) 건설기계 선정 시에는 토공의 규모, 토질, 작업조건 등을 감안하여 현장에 가장 적절한 기계를 선정하고 작업성과 장비 주행성을 확보

라) 지하 굴토공사를 위한 흙막이 설계는 지질조사보고서의 결과에 따라 작성하되 지하수 유무, 굴착에 따른 주변구조물의 피해 등 고려하여 적절한 방법 선정 후 설계

마) 흙막이 설계에 따른 구조계산서의 제반설계정수는 지질조사, 전문서적 등 객관적 근거에 의하여 작성하여야 하며 적용근거 첨부

바) 흙막이 시공을 위하여 필요한 계측사항에 대하여는 계측기의 종류 및 설치수량 등을 설계내역서에 반영

사) 흙막이 설계는 경제적 ․ 합리적인 공법 선정 및 공법 선정 시 반드시 발주처와 협의하여 결정

3) 구내 우 ․ 오수 설계

가) 배수시설 계획은 주변지역개발계획 등을 감안한 용량검토 후 인접 우·오수관로 등을 정확히 조사한 후 설계에 반영

(※ 용량검토 후 수리계산서 첨부)

나) 단면 결정 시 설계 최대유량에 여유를 두어 단면을 결정하되 관거인 경우 최소관경이 250㎜ 이상이 되도록 설계

다) 우수관 및 오수관이 지형구배상 부득이 3.0m/sec이상일 때는 맨홀을 설치하여 낙차를 두어 유속을 상기 범위내로 유도하도록 설계

라) 맨홀의 위치는 기점 및 구배, 방향, 내경의 변화시점에 설치하는 것을 기본으로 하며 적당한 간격으로 설치

마) 우수관 및 오수관은 별도로 분리하여 설계

바) 신축건물의 화장실 배수관 등은 개별 또는 통합배관을 실정에 맞게 검토하여 설치

4) 포장설계

가) 포장의 두께 및 각 층의 구성은 노상재료, 교통하중, 기상조건(동결심도) 및 경제성 등을 고려하여 결정

나) 지질조사 결과 추후 침하가 예상되는 연약지반 등의 경우에는 포장 설계 시 P.P. Mat 및 PET Mat 등 적용 검토

다) 포장 면은 우수맨홀과 연계하여 설계하고 포장 면은 적절한 경사도를 주어 우천 시 우수의 흐름이 원활하게 설계

5) 기타

가) 인접구조물 등에 피해가 없도록 조치

나) 옹벽설치 예상 시 경제적이며 합리적인 설계(구조 계산서 첨부)

다) 일반적인 부지 내의 비탈면 경사는 1 : 1.5를 기준으로 하고 그 보호 방법은 현장여건에 적합한 방법으로 계획

마. 기계설비 분야

1) 일반사항

가) 건축, 전기 등 관련된 타 공사와 긴밀한 협조 하에 건축물의 각 구성 요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하고, 고효율 기자재로 인증된 제품을 우선 고려하여 선정

나) 유지관리가 용이하고 장래 증설, 변경 및 개보수에 대한 적응성이 있게 설계

다) 진동 및 소음을 최소화하고 기능실 설치 등 실내 쾌적한 환경을 제공할 수 있도록 설계

라) 수질오염이나 대기오염의 억제 또는 방지에 대한 대책 고려

마) 가능한 신기술 ․ 신공법을 적극적으로 반영하고, 관계 규정 준수

(1) 건축기본법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 건축물의 설비기준 등에 관한규칙

(2) 에너지 이용 합리화법, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 열사용기자재관리규칙

(3) 물환경보전법, 수도법, 고압가스안전관리법, 도시가스사업법, 같은 법 시행령 및 시행규칙

(4) 에너지이용합리화법 제22조 및 제23조의 규정에 의한 “고효율 에너지 기자재 보급촉진에 관한 규정”

(5) 기타 본 공사와 관련된 법령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 조례 등

2) 일반지침

가) H.V.A.C.(냉난방) 설비

(1) 주요장비는 경제적이고 효율과 기능이 우수한 것으로 설계

(2) 실내의 냉난방 방식은 조절이 용이하고 쾌적한 환경이 되도록 설계

(3) 24시간 사용구역에 대한 배관은 별도로 고려하여 설계

나) 위생설비

(1) 저수조는 제반법규에 적합한 위생용수, 소화용수 확보

(2) 급탕조는 별도로 설치함을 원칙으로 화장실, 샤워실 등에 공급

(3) 위생기구는 K·S 제품 또는 동등이상 품질 사용

(4) 급수관은 관할 지자체 상수도사업소와 협의하여 인입위치 및 구경 등 결정

(5) 급수, 급탕, 위생설비에는 최신 디자인을 갖춘 절수형기기 채택

(6) 에너지 절약 및 안정적인 급수공급방식 검토(직결급수 및 고가수조 형식 등)

(7) 건물내부 오·배수는 가능한 자연배수 되도록 설계하고 관로는 개별 또는 통합으로 검토하여 설계

(8) 장애인 화장실 위생기구는 장애인 관련법에 의한 설치기준 준용

(9) 정화조 내에는 적정 환기설비를 채택하고 법규에서 정한 규정 준용

다) 공통설비 : 각 분야별 설비의 기능에 적합하게 설계

라) 상수도 : 인입관로 조사 후 가장 최단거리로 설계

마) 하수도(건물 내)

(1) 욕실, 화장실, 식당 등의 하수(배수)시설은 신속한 배수가 가능하도록 시중 제품 중 가장 큰 것으로 설계

(2) 하수구(배수구)에서 발생하는 냄새가 실내로 유입되지 않도록 설계

바. 전기설비 분야

1) 일반사항

가) 전기설비는 에너지이용합리화법 및 에너지법 등의 관계법규에서 규정한 제품, 자재 및 에너지절약 고효율기기를 설치하여야 하고, 증설 및 유지 관리가 용이하도록 설계

나) 가장 최근의 관련 법, 시행령, 시행규칙 및 관련 기술기준 등 적용

다) 전기 인입은 한국전력공사와 협의하며, 수전 전압은 한국전력공사의 공급 방식 적용

라) 상용전원 정전이 허용되지 않는 부하는 비상부하로 분류하고, 비상 부하는 정전 또는 사고 시 자동 절체 되도록 계통을 구성

마) 모든 기기 및 부품은 KS인증제품 또는 검정품 이상으로 설계하며, 이외의 기기 및 부품을 적용할 경우에는 감독관과 협의

바) 실내 건축디자인 및 경관조명 설치에 따른 조명계획 수용

사) 향후 유지보수 및 관리에 편리를 도모하며, 특히 훈련시설 특성 상 물의 사용이 빈번한 곳은 방수성능이 우수한 제품 선택

아) 전기설비 설치에 따라 설계내역에 안전점검수수료 등 반영

2) 적용법규

가) 전기사업법, 전기공사업법, 전력기술관리법, 전기설비기술기준

나) 기타 관련 법령 등의 규정은 반드시 준수

3) 설계기준

가) 수 ․ 변전설비(필요시 적용)

(1) 전기실은 실용성과 유지 보수면을 고려

(2) 전기시설 용량은 부하 및 사용용도별 부하와 기계설비 용량 등을 고려하여 최대 용량 확보

나) 전력간선설비

(1) 배전거리, 전압 강하, 고주파유도장애 등을 관련규정에 맞게 고려하여 용도, 용량별로 구분하여 설계

(2) 전선 및 배관의 굵기는 케이블의 허용전류, 전압강하 및 단락전류, 기동 시 전압강하 등을 고려하여 설계

(3) 본 건물에 사용되는 모든 전선은 IEC규격 및 관련규정에 따라 용량에 적합한 규격 또는 동등이상의 것이어야 하고, 규격 결정시에는 허용 단락 전류 및 전압강하 등에 대한 충분한 검토 후 설계

다) 동력설비

(1) 전원공급용 케이블은 케이블 트레이, 덕트 또는 전선관 등을 사용하여 배선하도록 설계

(2) 부하 및 용도별로 구분하여 동력제어반(MCC)을 구성하고 제어는 현장 제어반에서 자동 및 수동으로 운전이 가능하도록 설계

(3) 전동기의 기동장치는 공급변압기 용량 가동 시의 순간 전압강하와 그 영향 등을 고려하여 적절히 적용하며, 전동기의 적용 전류치는 관련규정에 맞게 설계

(4) 통합 자동제어반, MCC반은 운전자의 동선을 고려 적정위치에 설계

라) 전열설비

(1) 콘센트의 설치높이 및 위치는 관련규정에 적합하게 설계

(2) OA System에 부응하는 안정된 전원공급 방안을 검토하여 반영

마) 조명설비

(1) 조명기구

∙ 조명기구 설치기준은 건축마감 재질을 감안, 조도기준, 조명률, 보수율 등 고려

∙ 각종 등기구는 에너지 절약 및 유지보수에 용이하도록 선정, 배열            ∙ 고효율기구 점멸방식에 유의하여 설계

∙ 내·외부 조명기구는 방수형으로 설계

(2) 비상등은 전기관련법, 건축법 및 소방법 등의 관계규정에 맞게 설계

(3) 조도기준

∙ 전등은 적정한 설계를 위하여 명확한 조도계산서 제출

∙ 조명설비의 조도는 관련규정에 적합하게 설계

바) 피뢰침 및 접지설비

(1) 피뢰설비는 KS C IEC 62305 피뢰설비 기준에 적합토록 설계

(2) 접지설비

∙ 접지는 건물, 전기, 통신장비 등 개별 접지방식을 원칙으로 하며, 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙 및 배전규정, 공급규정, 전기용품안전관리법, 내선규정 등 관련규정에 의거 설계

∙ 접지선의 굵기 선정 및 시설방법은 관련 규정에 따라 설계

사. 정보통신 분야

1) 일반 사항

가) 정보통신 수요를 감안한 미래지향적 첨단시설로 설계

(1) 통신 국선인입, 통합배선(TEL 및 LAN), 구내방송, TV설비, 영상감시 장치(내부, 외부카메라), 무선통신장비 기지국(외부 안테나 포함)의 구축과 충분한 정보통신 회선 반영 및 미래지향적인 설계

(2) 모든 기준은 최근 개정된 관련규정 및 해당하는 기술기준 등 반영

(3) 유지관리 방법과 비용을 고려한 경제적인 설계

(4) 모든 통신기자재는 전기통신기본법의 형식승인 제품을 사용하며, 형식승인 대상제품이 없을 경우에는 KS 및 국내표준규격의 성능기준 규격에 적합한 제품으로 설계하고, 이외의 기기 및 부품을 적용할 경우 감독관과 협의

나) 통신설비의 보안성과 생존성 확보를 위해 설계

(1) 통신망 설계는 TTA표준, KICI기준 등 준용

(2) 각종 통신설비들은 행정안전부 업무지시, TTA표준 등에 준해 해킹 지점 감시 및 시설변동에 따른 운용·관리 스마트화 방안을 계획

(3) 통합배선설비, 구내통신선로, LAN 등을 구성하는 케이블(코드)들은 광신호 Tapping이 차단되는 해킹 방지용으로 설계

3) 국선 및 구내정보통신 설비

가) 국선 인입관로 매설은 기간망 통신사업자와 협의하고 통신사업자 맨홀에서 주 배선반까지 인입관로를 매설하도록 설계

나) 정보통신실에 주배선반(MDF)을 설치하여 국선을 수용하고 모든 구내선로는 각 실 IDF로 분배되도록 설계

다) 통합배선(TEL, LAN)은 미래 수요를 감안한 충분한 정보통신 회선을 반영해 TEL, LAN 통합배선망과 예비관로를 확보토록 설계

라) Network가 가능하도록 설비를 반영하고, 스위칭 허브 및 패치 판넬 등을 설계

마) Network설비는 내․외부망을 분리 설치하여 선택적으로 사용할 수 있게 설계

바) 사무실 또는 필요한 개소에 업무용 PC 및 전화기를 충분히 사용 할 수 있도록 설계

4) 적용법규 : 관계법령에 적합 하도록 설계

가) 전기통신기본법, 시행령, 시행규칙

나) 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 시행령, 시행규칙

다) 전기공사업법, 시행령, 시행규칙

다) 정보통신공사업법, 시행령, 시행규칙

라) 구내통신 및 종합유선방송전송선로설비 사용 전 검사 기술기준

(1) 방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(대통령령 제29886호)

(2) 접지설비ㆍ구내통신설비ㆍ선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준            (국립전파연구원 고시 제2019-11호)

(3) 단말장치 기술기준(국립전파연구원 고시 제2019-4호)

(4) 유선방송국설비 등에 관한 기술기준(과학기술정보통신부 고시 제2019-78호)

(5) 방송통신기자재 등의 적합성평가에 관한 고시

(과학기술정보통신부 고시 제2019-95호)

마) 전력, 통신설비 내진대책 기준

(1) 전력, 통신설비 등의 내진대책 가이드라인

(2) 지진화산재해대책법 제14조(내진설계기준의 설정)

(3) 건축구조기준(국토교통부 고시 제2019-117호)

(4) 방송통신설비의 안전성, 신뢰성 및 통신규약에 대한 기술기준

(국립전파연구원 고시 제2019-15호)

아. 소방 분야

1) 일반 사항

가) 방재반 등에 연결하는 배선수 최소화로 공사비 및 유지비를 절감하고, 화재의 사전예방, 화재 시 조기경보 및 조기 진화를 할 수 있도록 설계

나) 자동 화재탐지설비

(1) 화재를 조기에 발견하여 근무자의 피난, 안전센터 통보 및 초기 소화를 위해 신뢰성이 높은 기기를 반영하여 설계

(2) 모든 방재 설비가 자동 화재탐지설비와 연동되기 때문에 감지기의 경계구역을 효율적으로 구분하여 설계

다) 자동화재 탐지설비는 실별 용도, 층고 등을 고려하여 화재를 조기에 발견 할 수 있도록 감지기의 종류를 반영하여 설계

라) 기타 전기 소방 설비는 관계규정을 준수하여 설계

2) 설계 기준

가) 각종 소방시설은 소방관련 법령 및 화재안전기준 등에 적법하게 설계

나) 소방법 및 소방시설의 설치규정, 위험물 제조소 등의 설치기준 적용

다) 소방설비

(1) 화재의 수평, 수직의 확산을 방지하기 위하여 방화구획 검토 후 설계

(2) 화재 시 인간의 행동특성과 피난동선을 고려한 실내·외 소화설비 적정 배치

(3) 건물의 용도 및 규모와 소방대상물에 적합한 소방시스템 채택

3. 분야별 설계도서 작성요령

가. 일반 사항

1) 관계법령 및 설계지침서에 근거에 의해 작성하여야 한다.

2) 본 지침에서 제시한 관련법령 및 작성방법 등은 특별한 사유가 없는 한 용역수행자가 지켜야 할 사항으로, 위반 시 계약해지 할 수도 있다.

3) 기본계획과 지침이 상충할 경우 감독관과 협의 후 서면으로 근거를 남긴다.

4) 본 설계용역의 성과품은 기술(설계)용역계약특수조건에 의거 건축기본법, 국가기술자격법, 엔지니어링산업 진흥법, 에너지이용 합리화법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 수도법, 도로법, 공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률, 하수도법, 주차장법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 소방기본법, 화재예방‧소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률, 위험물안전관리법, 소음진동관리법, 농지법 및 상기 각 법의 시행령, 시행규칙과 기타 본 과업과 관련 있는 관련법, 령, 규칙, 고시, 예규, 규정, 훈령, 각 지방자치단체 조례 등에 위배 또는 저촉되지 않도록 하여야 한다.

5) 설계도서의 작성방법은 건축물의 설계도서 작성기준(국토교통부 고시 제2016-1025호, 2016.12.30.) 관련규정에 의하고, 설계도서 작성 중 이의가 있을 때에는 발주처와 협의 후 후속작업을 실시하여야 한다.

6) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록하여야 한다.

7) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정하여야 한다.

8) 전기, 기계설비, 정보통신, 소방 및 주요장비의 용량산출과 구조물의 구조 계산 등 계산서를 작성하고 설계기준 등을 첨부하여야 한다.

나. 건축분야

1) 설계 설명서

○ 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

○ 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률, 주차면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

○ 사전조사 사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상․하수도, 도로상황 등 사전조사내용을 바탕으로 설계내용에 반영

○ 세부 시공방법

○ 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

○ 건물의 색채 사용계획

○ 공정계획(공정표 포함)

○ 기타 필요한 사항

2) 구조 계획서

○ 설계근거 기준

○ 구조재료의 성질 및 특성

○ 제반 하중조건에 대한 분석

○ 각부 구조계획

○ 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

○ 구조계산서

3) 시방서

○ 당해 공사에 필요한 일반 및 특기시방서

○ 특기시방서에는 자재의 특성, 시험방법, 시공순서 등 모두 기술

4) 도면종류

○ 기존시설물 현황도 : 배치, 평면, 입면, 단면 등

○ 부근안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

○ 투시도 : 천연색채를 사용하여 제작 각 3부

○ 조감도 : 청사주변 단지 전경

○ 도면 목록표

○ 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설, 건축물의 부수시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한 사항

○ 부분배치도 : 상기 배치도를 구체적으로 표시

○ 동선계획도 : 각 교육훈련 진행에 대한 동선계획 작성

○ 주차장 평면도 : 주차장 배치평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

○ 구적도

○ 건축면적 산출표

○ 내 ․ 외부 마감표 : 바닥, 천장, 내벽, 외벽, 지붕 등

○ 각층 평면도, 단위 평면도

○ 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

○ 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

○ 주단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 계단 평․단면상세도 :  시공에 필요한 사항 일체

○ 셔터, 피트, 발코니 등 부분상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

○ 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 옹벽배근도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각층 기둥 ․ 보의 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 조경시설물 공사계획 : 잔디, 휴지통, 벤치, 각종 안내판 등

○ 건물 색채사용 계획도면 및 기타 필요한 도면

○ 기타 시공에 필요한 사항 일체

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사 자료 등

6) 실내건축 분야 : 실내투시도, 천장도, 전개도, 가구배치도, 실내색채, 계획서 등

다. 토목분야

1) 설계 보고서

○ 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

○ 계획 및 방침 : 위치선정, 주요구조물 및 수리계획

○ 사전조사사항 : 지하매설물, 지질, 강우량, 동결심도, 상하수도 등

○ 세부시공계획

○ 자재사용계획

○ 세부공정계획

○ 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 구조 및 수리계산서

3) 지질조사 보고서 : 토층의 성상, 지하수 상태, 세부토질조사, 세부토질시험 결과 등 표기하고 실시설계내용에 반영

4) 시방서

5) 도면 종류

○ 배치도, 위치도, 평면도, 종 ․ 횡단면도

○ 구조물도(지하매설물 포함), 부대시설도 기타

○ 기타 시공에 필요한 사항 일체

6) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

라. 조경분야

1) 설계 보고서

○ 공사개요 : 목적, 범위, 내용, 기간, 과업수행지침, 설계금액 등

○ 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도 등

○ 세부시공계획

○ 자재사용계획

○ 세부공정계획

○ 세부공사비 산정 기타 필요한 세부사항

2) 시방서

3) 도면 종류

○ 배치도

○ 종단면도 및 횡단면도

○ 평면도

○ 조경시설물 배치도

○ 기타 시공에 필요한 사항 일체

4) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

마. 기계설비 분야

1) 설계 설명서 : 냉난방시스템 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용 등

2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 주 닥트 계산서, 관경계산서 (위생, 오․배수, 가스배관), 공조설비 선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

4) 도면종류

○ 기계설비 주요부분 평면도, 단면도

○ 범례

○ 도면 목록표, 계통도

○ 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

○ 배치도 : 방위, 상하수도 연결, 수조, 위험물 저장소, 각종 탱크, 굴뚝, 기계실의 위치, 기기 반입구 등

○ 계통도 : 공조, 닥트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

○ 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도

○ 단면도 : 각종 설비의 기준층 및 특수층에 대한 주요 단면도, 기계실 단면도

○ 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

○ 상세도 : 각종 설비별 상세도

○ 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

○ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

○ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

6) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

바. 전기분야

1) 설계 설명서

○ 전기설비개요 : 각 설비(전력, 소방 설비)에 대한 설명

○ 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

○ 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명

- 인입, 변전실의 배치, 결선도 등에 대한 경제성 및 안전성 검토사항 포함

○ 에너지절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

○ 각종 계산에 적용한 계산 기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거

○ 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

○ 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

○ 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이  및 덕트 규격 계산서

3) 시방서

○ 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명 단, KS 등은 해당규격의 번호로 표시할 수 있다.

○ 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종기기의 설치기준, 설치 방법, 주의 사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과 특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

4) 도면종류

○ 도면 목록표, 현장 안내도

○ 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

○ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

○ 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

○ 옥외간선도 : 전력설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반 간선의 정격설치방법, 설치상세도 등

○ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함), 가격조사자료 등

사. 정보통신

1) 설계 설명서

○ 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MA/CATV 기타설비)설명

○ 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명

- 국선인입, 정보통신실의 배치, 결선도 등에  대한 경제성 및 안전성에 대한 검토사항을 포함한다.

○ 본 설계에 적용된 기준 시설물 등에 대한 설명

○ 유지관리, 정전대비 방안 등에 관한 고려사항

○ 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

○ 통합배선, 통신선로설비 등은 광신호 Tapping에 의한 정보 유출 차단방법 설명

○ 각종 통신설비들의 해킹지점 감시 및 운용·관리 스마트화 방안에 대한 설명

○ 외부 임차 통신망에 대한 해킹지점 감시 대책 설명

(필요시 통신사업자와 협의하여 제시)

2) 계산서

○ 회선용량계산서, 전계강석계산서

○ DVR 용량계산서, 무정전전원장치 용량계산서, 항온항습장치 용량계산서

3) 시방서

○ 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

단, KS 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로 표시할 수 있다.

4) 도면종류

○ 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

○ 범례 : 사용될 기호

○ 배치도 : 각 건축물 및 시설물의 배치 및 위치 평면도

○ 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점 및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의 연결방법 표시

○ 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

○ 각종 설비의 계통도 : TEL, LAN, CATV, CCTV, MA/CATV, 통신 및 기타 설비

○ 각종 설비의 배치도 : 정보통신실, IPS실, 무정전전원장치, 항온항습장치, 전관방송, A/V, MA/CATV 등 통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도(이전설치 예정인 정보통신장비 배치도 포함)

○ 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

○ 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

○ 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

아. 소방설비

1) 소방 계획서에는 다음의 사항 중 당해 대상물에 해당하는 사항을 개조식·서술식 또는 기입형으로 기재하거나 도해하여야 한다.

2). 소방(설비·전기)설비 설계업 등록을 필 한 자가 설계하여야 한다.

가) 소방대상물의 개요

○ 위치·규모(면적)·주용도

○ 층별·용도별 면적대지 및 도로상황(소방진입로 포함)

나) 계획의 기준자료

예) 화재예방‧소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 및 소방시설 종류별 화재안전기준, 위험물안전관리법 제6조

다) 계획의 내용

○ 방화구획의 계획 및 피난 동선 계획

○ 대상 장소의 성격(용도 및 연소특성 등 고려)별 소방시설 적용계획

3) 소방시설의 종류별로 표시되어야 할 사항

가) 소화기구

○ 수동식·자동식소화기 및 간이소화용구

- 종류·위치 및 개수

- 배치기준

나) 옥내소화전설비

○ 수원의 종류(평수조, 고가수조 압력수조 등) 위치 가압송수장치가 펌프방식의 경우에는 정압흡입형·부압흡입형 또는 청수(또는 해수)형의 저수조로 구분

○ 가압송수장치의 종류·위치·기동방법 및 다른 설비와의 겸용 여부

○ 가압송수장치의 연계작동방식

○ 부압흡입형 펌프장치를 사용하는 경우에는 물올림장치의 위치 및 수량

○ 옥외연결 송수구의 위치 및 개수

○ 소화전방수구의 위치 및 개수

○ 수평배관의 배치방식(환상식 또는 비환상식)

○ 전원의 종류·위치

○ 제어반의 종류 및 위치.

다) 자동화재탐지설비

○ 대상 장소의 성격(용도·평상온도·연소특성·내부의 기류상황 등)별 적용 감지기 종류 및 개수

○ 대상 장소에 대한 감시구역 구성(회로) 계획

○ 신호제어방식(P형·GP형·R형·GR형)

○ 수신기의 위치 및 개수

○ 중계기 및 발신기의 위치

라) 유도등·비상조명 유도표지 종류

4) 기타 소방배관을 사용하는 설비시설 표기 및 명시 사항

가) 배관의 루트

나) 배관부속의 표기

다) 행거의 위치 및 규격표기

라) 벽체 등 배관 관통부 슬리브 등의 위치표기

마) 방화구획용의 벽·바닥·천정 등에 대한 배관 관통부 밀폐마감재료 및 방식표기

바) 관로상의 장치(밸브류, 연결송수구, 방수구, 시험배관 등)의 설치상세 표기

사) 펌프의 설치상세 표기

아) 수조와 배관사이의 연결 상세

자) 평면도 또는 입상도에 나타내기 곤란한 부분은 입체상세도

차) 배관의 보온재 재질 및 마감 재료의 표기

카) 그 밖의 시공에 필요한 사항

5) 소방시설 중 닥트 설치 시 표시하여야 할 사항

가) 닥트의 루트

나) 닥트의 형태(각형 또는 환형)·재질

다) 단열재의 두께, 재질 및 마감상태 표시

라) 행거의 위치 및 규격 표시

마) 벽체 등 닥트 관통부의 밀폐마감재료 및 방식표기

바) 평면도 또는 입상상세도에 나타내기 곤란한 부분은 입상상세도

사) 그 밖의 시공에 필요한 사항

자. 유지관리 지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

1) 시설개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

2) 구조계획도 : 구조일반도, 주요단면도

3) 구조의 특성 : 구조의 역학적 특성, 주요구조부재의 특징

4) 유지관리시설 및 장비 : 시설 및 장비의 종류, 목적, 사용방법

5) 주요 점검내용 : 각종 법령에서 규정하고 있는 주요 점검항목 및 점검방법

6) 보수방법 : 건축마감, 기계설비, 전기설비 등 보수방법

차. 공사 시방서

1) 시방서의 작성은 일반적으로 적용하고, 공통적으로 수용할 수 있는 표준시방서와 특수 공종이 발생하거나 특수한 현장조건에 따라 표준시방서의 추가, 수정, 삭제를 할 필요가 있을 때 특별시방서를 작성하며, 특별시방서는 특기시방서, 관급시방서를 말한다.

2) 표준시방서는 국토교통부 제정 건축공사표준시방서, 토목공사표준시방서, 건축전기설비공사표준시방서, 건축기계설비공사표준시방서를 기준으로 작성하여야 한다.

3) 특별시방서는 자재 관련시방(각종기자재의 특성, 정격사용방법, 제작기준, KS규격 품 등)과 도면에 표시가 힘든 각종 기기의 설치기준, 설치방법, 시험방법, 시공방법, 주의사항 등을 설명하여야 한다.

4) 특정 제품에 대한 시방작성(특허, 실용신안, 신기술 등)을 불가하며, 설계에 의한 마감, 자재 등이 특수하여 특정제품 사용 시에도 발주처의 의견을 들어 적용할 수 있으며, 발주처의 의견 ․ 승인 없이는 시방이나, 도서작성으로 인해 공사, 내역의 상승 시 용역수행자의 책임으로 한다.

5) 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주처 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성 하여야 한다.

6) 공사시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용우선순위, 설계도서 검토의무 등에 관한 상세사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문시방서, 관련법규 및 지침, 제기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록, 부수, 작성기준 등 필요한 사항

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에 관한 세부사항

사) 발주처와 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종검사, 기성지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비, 소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 기타 주요공사 사항

카. 공사 내역서

1) 공사내역서의 작성은 국토교통부 공고 최근 표준품셈을 적용하고, 조달청에서 발표한 시설공사 적용 가격을 내역 산정시 반영하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 기획재정부예규 제427호(2019.05.31.) 원가계산에 관한 지침 및 행정안전부 훈령(지방자치단체 원가계산준칙 제1호, 2017.07.26.)을 적용하여야 한다.

3) 공사비에는 지장물이설비, 한전인입비, 상수도인입비, 시운전비(전기, 기계) 등이 포함되어 내역서에 표기하여야 한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는 자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록하여야 한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련 자료를 인용할 수 있으나 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 주요자재 수량은 별도 집계로서 작성하여야 한다.

7) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내관련 기준 및 외국의 사례를 참조 작성하여야 한다.

8) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료 적용 시 반드시 근거를 제시하여야 한다.

9) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부 산출 내역을 첨부하여야 한다.

10) 수량 산출은 국토교통부 발행 적산요령을 기준으로 하여 내역과 근거를 알아보기 쉽도록 품목별 부위별로 작성 집계하며, 작성방법은 다음 규정의 기준에 따라 작성하여야 한다.

가) 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 및 시행령, 시행규칙

나) 예산회계법 및 동법 시행령, 재무회계예규 및 기타 관련법규 기준

11) 건설기술관리법 제23조의 2 및 동법 규칙 제14조의 3의 규정에 의한 공사 중 시공자가 작성해야 될 시공 상세도면(SHOP DRAWING)을 작성하는데 필요한 인건비, 소모품비 등의 물량을 산출하고 공사비 내역에 반영시켜야 한다.

12) 시방서 및 현장여건을 감안한 품질시험 항목 ․ 방법 및 실시횟수 등 품질 시험비를 반영하여야 한다.

Ⅴ		성과품(설계도서) 납품목록

1. 기본설계 납품도서

구분	설계 도서명	규격	수량	단위	비 고
1	기본설계(안)	A3	3	부
2	건축(시설물)계획(안)	A3	3	부
3	기본설계(안)(판넬)	A3	1	매
4	기본설계보고서	A4	3	부
5	지질조사보고서	A4	3	부	별도 용역결과 첨부
6	지하매설물조사서	A4	3	부
7	기본도면	A3	3	부	건축,실내장식,토목 조경,기계,전기,통신소방
8	내역서(계략공사비)	A4	3	부

2. 실시설계 납품도서

가. 용역준공 20일전에 최종보고회를 개최하여야 하며, 종결보고서에는 문제점, 지적사항, 설계설명서, 공사개요, 추진경위, 용역계약 현황, 용역의 진행과정, 참여기술자 현황, 수정․보완 지시사항 및 조치결과, 납품설계도서 목록 등 일체 기재하여 A4에 양면 인쇄하여 책자로 제출하여야 한다.

나. 공정표는 공정계획을 수립하여 공사기간을 산정하고 PERT/CPM에 의한 Network 공정표를 공사량에 맞게 정확하게 작성 ․ 제출하여야 한다.

다. 조감도(A3 표구 포함), 실내투시도(A3) : 각 2매

※ 조감도 및 투시도는 출력이 가능토록 그림파일로 CD에 담아 제출

라. 기타 발주자가 요구하는 성과품 및 관련서류

○ 건축물 및 시설물 건립에 따른 인·허가 서류 등

마. 시공관련도서(발주처와 협의 후 제본)

○ 현장설명서(시공, 감리) 각 10부(CD-ROM 포함) --------- 제출 전 협의

○ 감리업무수행 지침서(과업지시서) 3부  ----------------- 제출 전 협의

바. 공종별 실시설계서 제출목록

구분	설계도서명		규격	수량	단위	공 종								비 고
						건축	실내 장식	토목	조경	기계	전기	정보 통신	소방
1	실시설계보고서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	일괄
2	설계 도면	백 도	A3	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	좌철
			A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	책철
3	계산서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
4	내역서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	구조계산포함
5	관급내역서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
6	수량산출서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	단가산출서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	견적서 포함
8	일위대가		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
9	표준시방서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
10	특기시방서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
11	관급시방서		A4	5	부	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯
12	조감도		A3	2	매	◯								건 축 물
13	투시도		A3	2	매		◯							실내장식
14	CD-ROM			15	SET	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	공종별 통합
15	기타사항					◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	발주처요구

〔붙임 1〕

보 안 각 서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  일자 : 2021.    .    .

3. 착수  일자 : 2021.    .    .

4. 완수예정일 : 2021.    .    .

본인은 상기의 용역에 참여함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약하며 그 증거로서 이 각서를 제출합니다.

1. 본인은 본 용역수행의 모든 사항이 국가의 보안상 중요 시설임을 인식하고 과업 수행 중 과업수행과 관련한 모든 사항이 기밀임을 인정한다.

2. 본인은 본 용역을 수행함에 있어 용역수행과정에서 알게 된 정보 또는 기밀사항을 용역계약일반조건 제35조(기술지식의 이용 및 비밀엄수 의무)에 의거 용역수행기간의 전후를 막론하고 일체 외부에 누설하지 않는다.

3. 본인은 본 용역수행과 관련하여 지득한 사항을 누설하거나 고의 또는 과실로 인하여 발주기관에 유무형의 손해가 발생되는 경우에는 건축사법 제20조(업무상의 성실의무 등) 제2항에 의한 손해배상 책임을 지고 보안관계법에 의거 처벌되어도 일체의 이의를 제기하지 않는다.

4. 본인은 본 용역수행 종료 이후라도 공사 진행과정에서 의견을 필요로 하는 경우에는 이에 적극 협력한다.

5. 본인은 본 계약과 관련하여 제출한 모든 설계도서, 서류 및 자료에 대한 저작권, 소유권 등 일체의 권리는 기술용역(설계)계약특수조건 제12조(저작권 및 소유권)에 의거 발주자에게 귀속됨을 알고 별도로 발주자의 승인을 얻은 경우를 제외하고는 외부에 누설하지 않는다.

2021년     월      일

주        소 :

주민등록번호 :

기 술  분 야 : 참여공종 표기

성        명 :                   (인)

강원도소방학교장 귀하

〔붙임 2〕

책 임 기 술 자 선 임 계

1. 용  역  명 :                             설계용역

2. 계약  금액 : 금○○○원

3. 계약  일자 : 2021.    .    .

4. 착수  일자 : 2021.    .    .

5. 완수예정일 : 2021.    .    .

-  아     래  -

가. 성        명 :

나. 주        소 :

다. 주민등록번호 :

라. 기술자격(면허)종별 :

상기 인을 본 설계용역의 책임기술자로 선임하여 제출하오며 분야별 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자를 대리하여 책임질 것을 서약합니다.

붙임 : 유자격자임을 입증할 수 있는 자격(면허)증 또는 경력증명서 사본 1부

2021년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원도소방학교장 귀하

〔붙임 3〕

하도급승인 요청서

1. 용  역  명 :                           설계용역

2. 계약  금액 : 금○○○원

3. 계약  일자 : 2021.    .    .

4. 착수  일자 : 2021.    .    .

5. 완수예정일 : 2021.    .    .

-  아     래  -

가. 하도급분야 : (구조계산, 건축기계설비, 측량, 지질조사 기타 등)

나. 하도급금액 :

다. 하도급자

- 주    소 :

- 상    호 :

- 대 표 자 :

- 보유면허 :

붙임 : 1. 유자격을 입증하는 서류(엔지니어링활동주체신고증등) 사본 1부

2. 하도급계약서 사본 1부

3. 참여기술자 명단(기술자격 및 경력증명서 포함) 1부

상기 자에게  ○○○분야 설계용역을 하도급하고자 하오며 기술용역(설계)계약 특수조건 제5조에 의거 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2021년.    .    .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원도소방학교장 귀하

※ 하도급 신청 자기검토서

하도급 신청 자기검토서
용 역 명
하 도 급 분 야
하 도 급 계 약 일				승인요청 (통보)일
착수일자				완수일자
수 급 인				하수급인	연락처 포함
※ 제출서류 목록 및 검토내용
제출서류		관계규정	하도급 신청내용			검토결과	비고
계약서		표준하도급계약서
사업자등록증
하도급 수행에 필요한 자격요건		기술사법 제3조(기술사무의 직무) 기술사법 시행령 제2조(기술사의 직무범위) 엔지니어링산업진흥법 제2조 엔지니어링진흥법 시행령 제3조(엔지니어링 기술) 소방시설공사업법 시행령 제2조
책임기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고)
참여기술자 기술자격 및 경력증명서		건설기술진흥법 제21조 (건설기술인의 신고) 소방시설공사업법 시행령 제2조 별표1
하도급 금액 및 비율		하도급거래 공정화에 관한 법률 제3조의 2 등
하도급 사유		건축법 제67조(관계전문기술자) 건설기술(설계)용역계약특수조건 제5조

〔붙임 4〕

(계획․중간․실시) 설계 검사원

▢ 용 역 명 :                           설계용역

▢ 계약금액 : 금○○○원

▢ 계약일자 : 2021.   .   .

▢ 착수일자 : 2021.   .   .

▢ 완수예정일 : 2021.   .   .

(계획, 중간, 실시) 설계가 완성되어 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

붙임  납품설계도서 목록  1부.

2021.   .   .

계 약 자

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                (인)

강원도소방학교장 귀하

〔붙임 5〕

주간공정보고

▢ 용 역 명 :              설계용역

▢ 용역개요

○ 현장위치 :

○ 용역기간 : 2021.   .   . ~ 2021.   .   .

○ 계약금액 : 금○○○원

▢ 공 정 률 :  %

▢ 용역진행사항

구 분	금주진행사항(2021. . .)	다음주예정사항(2021. . .)	비고(진행률)
업무내용	- 인원투입현황 - 외주작업진행현황 등 - 주요협의사항이나 회의 등이 있을 경우 반드시 표기 - 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 등 분야별로 구분되도록 작성		실시공정/예정 공정(%)을 표기
특기사항	문제점 및 해결책 등 표기

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원도소방학교장 귀하

〔붙임 6〕

월간공정보고

▢ 용 역 명 :              설계용역

▢ 용역개요

○ 현장위치 :

○ 용역기간 : 2021.   .   . ~ 2021.   .   .

○ 계약금액 : 금○○○원

▢ 공 정 률 :  %

▢ 용역진행사항

구분	월간 추진사항 (2021. 00. ~ 00.)	비고
1주차	○ ○ ○	(실시/예정공정)
2주차
3주차
4주차
5주차
다음 월	※ 공정 지연 시 구체적 원인 및 대책 강구

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :

책임기술자 :           (인)

강원도소방학교장 귀하

〔붙임 7〕 특정자재사용리스트

특정자재 사용 목록

품 목	규 격	물량	금액(천원)	사 유

확인자   사업책임기술자  ○ ○ ○ 서명

※ 1. 관급자재 제외   2. 품목당 100만원 미만 제외

[붙임 8]

실내 소방전술훈련관 층별 소요면적

구분	세부시설	산출근거	면적(㎡)	비고
화재 진압 훈련	화재진압전술훈련장	가로30m×세로20m	600
	화재진압기초훈련장	높이13m이상×가로10m이상×세로7m이상	170
	소계		770
구조 훈련	로프구조훈련장	높이10m이상×폭3m이상	100
	로프악세스교육장
	소계		100
행사장	행사장(무대)	가로10m×세로5m	50
	소계		50
공용 공간	화장실, 기계·전기실, 창고 등 (전술회의실, 기자재실)	(직무면적+부속공간면적+설비관계면적)×36%	70
	소계		70
지휘 역량 강화 센터	VR지휘훈련실	부스1개(1.5m*2m)*22개 = 66㎡	200	소방전술훈련관 내 설치
	디브리핑룸		40	〃
	ICT유지보수실		10	〃
	소계		250
합계			1,240

※ 세부 훈련시설 규모는 설계 검토 결과에 따라 변동될 수 있음.

[붙임 9]

훈련시설별 세부지침

□ 실내 소방전술훈련관

① 시설개요

·실내 소방전술훈련관은 실내에서 이루어지는 교육 및 훈련시설로서 화재진압·인명구조·응급처치 교육훈련을 위한 화재진압전술훈련장, 화재진압기초훈련장, 로프구조훈련장, 로프악세스교육장, 지휘역량강화센터(VR지휘훈련실, 디브리핑룸, ICT유지보수실)로 구성

·기상조건에 관계없이 실내에서 교육훈련이 가능한 시설로서 교육훈련생들의 안전을 최우선으로 고려하여 무사고 교육환경을 제공하고 실전경험을 습득할 수 있도록 시설물을 계획

·화재진압훈련 및 요구조자 구조·구급에 필요한 각종 전술훈련 및 장비활용법을 습득하는 훈련시설

② 설계주안점

·각 훈련장 교육훈련 동선을 고려한 공간 배치

·실내 소방차량 진입 및 배치와 호스전개, 방수훈련이 가능(옥내소화전 설치) 하도록 계획

·훈련관으로 소방차량이 진입 가능하도록 셔터(오버헤드도어), 실내 매연저감장치 계획 및 바닥 마감재를 설치하고, 방수훈련으로 인한 배수 트렌치를 설치

·실내 냉·난방설비 및 분야별 교육을 고려한 앰프·방송 음향시스템 설치

·실내훈련장, 실내체육시설 등 다양한 목적으로 활용할 수 있는 공간으로 계획

Ⅰ. 화재진압전술 훈련장

① 시설개요

·화재발생 시 화재진압 4인조법, 주수기법, 지하층·저층·고층 화재진압전술을 습득하기 위한 교육훈련장

·다양한 화재현장에서의 재난대응 및 화재진압, 인명구조에 필요한 화재진압 전술 훈련시설

② 설계주안점

·화재진압 4인조법 및 펌프차량 교육을 위해 소방차량 입출입이 가능하도록 계획

·지하층·저층·고층 화재진압전술 훈련이 가능하도록 주택화재 전술훈련용 실물모형 설치

Ⅱ. 화재진압기초 훈련장

① 시설개요

·화재진압을 위한 펌프차량 조작, 사다리 설치 및 등반, 소방호스 전개 및 회수 훈련을 위한 화재진압기초 훈련장

② 설계주안점

·펌프차량 조작훈련을 위한 훈련 공간, 벽면에 사다리 전개 지지가 가능하도록 계획

Ⅲ. 로프구조 훈련장

① 시설개요

·사고발생 시 인명구조에 필수적인 로프 구조기술을 습득하기 위한 교육훈련장

·다양한 상황에서의 재난대응 및 인명구조에 필요한 구조기술 훈련시설

② 설계주안점

·로프 하강 및 등반, 수직 및 수평구조, 경사면 및 계곡구조 훈련이 가능하도록 계획

·도하훈련 공간 계획 및 레펠 훈련시설 설치

Ⅳ. 로프악세스 교육장

① 시설개요

·사고발생 시 인명구조에 필수적인 전문구조기술을 습득하기 위한 교육훈련장

·다양한 상황에서의 인명구조에 필요한 구조기술 훈련시설

② 설계주안점

·각 유형별 인공암벽을 설치하여 다양한 상황에 대비한 훈련이 가능하도록 계획

·암벽장 뒷면 활용과 철골구조물 설치로 로프악세스 훈련이 가능하도록 계획

·철탑 로프구조 훈련이 가능하도록 타워 시설물을 별도 설치

·로프악세스, 테크니컬로프구조 및 고공에서의 다양한 상황에 대비한 훈련이 가능하도록 계획

Ⅴ. 지휘역량강화센터(ICTC)

① 시설개요

·VR지휘훈련실, 디브리핑룸, ICT유지보수실을 설치하여 VR(가상현실)과 실제상황을 연계하여 실시할 수 있는 시뮬레이션 교육하는 시설

② 설계주안점

·가상현실과 실제상황을 연계하여 훈련할 수 있는 사무공간을 확보할 수 있도록 계획

·훈련 참가자들이 함께 토론 및 피드백 할 수 있는 공간 계획

·시뮬레이션 훈련장비(컴퓨터, 모니터, 무전기 등) 유지 보수할 수 있는

공간을 계획

Ⅵ. 기타시설

전술회의실

① 시설개요

·실내전술훈련관 내 교관사무실 및 전술 회의를 위한 시설

② 설계주안점

·훈련시설과 연계성을 고려하여 배치 및 구성하여 설치

체력단련실

① 시설개요

·소방전술훈련을 위한 체력 측정 및 단련을 위한 시설

② 설계주안점

·외부조망 및 자연채광이 충분하도록 계획하고 소음 및 진동이 전달되지 않도록 흡음 및 방음, 방진구조로 계획

장비 보관실

① 시설개요

·교육 및 훈련용 각종 장비를 보관하는 공간

② 설계주안점

·교육용 장비 및 기자재 보관 공간 확보

[붙임 10]

교육훈련시설의 표준 설계면적 기준

□ 소방교육훈련기관 시설·인력 및 장비 등의 설치운영 기준

별표2) 옥외 교육훈련시설 설치기준

구 분	종류	면적기준	비고
소방종합 훈련탑	화재진압 장비조작훈련장	가로 30m × 세로 20m 이상
	호흡보호장비훈련장	가로 7m이상 × 세로 5m 이상	보관 및 충전시설 겸용 가능
	인명검색훈련장	실내진입 후 이동거리 20m이상
	팀단위전술훈련장	지하 1층, 지상4층(최상층 포함) 높이 13m이상, 연면적 300㎡이상	기타 훈련시설을 포함하여 설치할 수 있다.
산악구조 훈련장	수평구조 훈련장	높이 3m이상, 안전지역과 위험지역간지지물거리 15m이상 가로 7m이상 × 세로 5m이상	하방 안전네트 설치
	수직구조 훈련장	높이 10m이상 × 폭 6m이상	지지물의 위치는 하강 벽면으로부터 수평거리 0.5m 이상으로 한다.
소방차량 및 장비 조작훈련장	소방차량 조작훈련장	대지 1,000㎡이상의 대지 또는 4m 폭원의 도로로 이격하고 고층건물화재진압훈련장과의 이격 거리는 6m이상 확보
	장비조작실습실	400㎡ + 초과인원×10㎡
실물화재 훈련장	실물화재훈련실 (선택)	구체적 설치기준은 별표3을 따른다.	화재진압, 소화훈련 및 화재성상체험 가능한 훈련실
대응전술 훈련장	화학구조훈련장	대지 1,000㎡이상	유해화학물질 누출/누설 훈련시설(활동구역 설정훈련 포함) 유조차량 사고훈련 화학방호복 착용실습
	도시탐색훈련장 (선택)	대지 2,000㎡이상	도시탐색기초기술훈련 도시탐색장비운용훈련 건물붕괴구조탐색훈련 한정공간구조탐색훈련
	맨홀사고 인명구조	사다리높이 2m이상, 맨홀직경 0.6m이상	교육생 10명당 1개
	차량구조 훈련장	대지 200㎡이상 (승용차 2대 이상/대형차 1대 이상)	{대형차량 기준 1대당 20㎡+ 35㎡(가로7m이상 × 세로5m이상)}
비고 1. 2이상의 옥외 교육훈련시설의 겸용이 가능할 경우 해당 시설을 설치하지 않을 수 있다. 2. 옥외 교육훈련 시설 중 용수를 사용하는 시설에는 10미터 이내에 소화전 등 교육용 수리시설을 설치해야 한다.

[붙임 11]

사업부지 토지조서 및 지적도

□ 토지조서

연번	재산의 표시				소유자	비고
	소재지	지번	지목	면적(㎡)
계		2필지		209,217.4
1	태백시 동점동	518	유원지	128,417.5	태백시
2	태백시 동점동	519	임야	80,799.9	태백시

□ 지적도

태백시 동점동 518	태백시 동점동 519

[붙임 12]

신축청사 위치도

□ 위치도

□ 부지전경

〔붙임 13〕 표준설계관리일정표(작성예시)

〔붙임 14〕 설계자가 작성하는 공사시방서 양식

□ ‘설계자가 작성하는 공사시방서’ 양식은 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 작성할 것

〔붙임 15〕 표준시방서(국토교통부) 코드 링크표

□ ‘표준시방서 코드 링크표’ 는 <조달청 홈페이지→정보제공→업무별 자료→시설공사 게시판>에서 다운로드 받아 활용할 것