- 춘천소방서 퇴계119안전센터 신축 - 설 계 용 역 과 업 지 시 서

2024. 9.

강원특별자치도

· 제1장  설계용역 일반사항	3

· 제2장  설계용역 진행사항	13

· 제3장  일반지침	19

· 제4장  성과품 작성 및 납품	26

· 제5장  설계도서 작성요령	35

목     차

제1장 설계용역 일반사항

1. 과 업 명 : 춘천소방서 퇴계119안전센터 신축공사 설계용역

2. 과업목적

본 과업은「춘천소방서 퇴계119안전센터 신축공사 설계용역」를 위한 설계용역으로 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 인근 대규모 아파트 단지의 건립 및 퇴계동 농공단지 조성으로 늘어난 시민의 안전과 기존 주변 안전센터의 업무강도 축소, 스트레스 감소 등을 위하여 퇴계119안전센터를 신축(신설) 하고자 함.

3. 사업개요

가. 위    치 : 강원특별자치도 춘천시 퇴계동 1245번지

나. 사업규모 : 지상 2층(1동), 연면적 약 1,000㎡ 미만

※ 각 실의 용도 및 면적은 설계과정에서 적정성을 검토하여 결정하며,

공종간의 주요사항은 발주자와 협의하여 최종 결정한다.

다. 과업기간 : 착수일로부터 270일

(기본 및 실시설계 210일, 그 외 인허가 및 인증수행기간 60일 등)

1) 기본설계는 발주처와 협의하며, 협의내용을 토대로 실시설계를 실시한다.

※ 설계심사, 설계자문, 계약심사, 건축허가 등 인·허가 등의 사유로 인하여 사실상 과업 기간의 변경이 불가피한 경우에는 감독 공무원의 검토를 거쳐 기간을 변경할 수 있다.

2) 과업의 추진은 합리적인 공정계획에 의하여 차질없이 수행하여야 하며, 다음의

경우에는 발주처의 승인을 얻어 용역 기간을 변경할 수 있다.

·추가 과업, 특별 업무수행, 물량 등의 증가로 용역 기간 연장이 불가피할 때

·천재지변, 일기불순 등 예측이 불가능한 작업 일수가 계속될 경우

·발주처의 사정으로 작업 중지 또는 연장의 필요가 있을 때

·기타 부득이한 사정으로 연장이 불가피하다고 발주처에서 인정할 때

·용역을 수행할 수 없는 기간에는 발주처에서 설계자에게 통보하고, 통보된

날로부터 용역 기간에 산입하지 아니한다.

3) 대지내 차량의 진입을 위한 설계(가감속 차로, 도로점용) 시 발주처 및 인허가         부서와의 협의를 통해 일정에 지장이 초래하지 않도록 한다.

라. 사 업 비(예상 건축공사비) : 금3,500,000,000원(금삼십오억원)

※ 상기 공사비는 건축(부대토목 포함), 기계설비, 전기, 통신, 소방 등에 대한 총 공사비이며, 공종 간 배분하여 제시된 예산 내에서 설계가 이루어지도록 하여야 한다.

4. 과업내용

가. 본 과업 지시서는「춘천소방서 퇴계119안전센터 신축공사 설계용역」에

적용한다.

나. 과업의 범위

1) 기본 및 실시설계 등 제반 사항 설계(지내력시험, 토목설계 포함)

2) 건축공사의 계획, 기본 및 실시설계 도서 작성(건축, 토목, 전기, 기계설비, 통신,  소방 등 해당 분야 모두 포함)

3) 공정표 작성

4) 건축 협의(인·허가)

※ 신축 관련 인·허가, 착공 신고, 준공 시 사용승인 및 건축물 대장 생성을 위한 관계기관 협의 및 자료 제출, 전산시스템(새움터) 자료 등록 등 일체

5) 설계 등을 위한 관련 인·허가 검토, 협의 등의 제반 업무 수행

6) 건물 전체에 대한 구조계산서

7) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 설계도서 작성

8) 전 공종 관급자재의 G2B 식별번호 목록이 포함된 전자파일 및 도서 제출

9) 준공 후 최종 설계변경이 반영된 설계도서(준공도서) 및 전자파일 제출

5. 과업시행 방법 및 준수사항

가. 설계 용역자의 성실 등의 의무

1) 설계 용역자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 건축물 및 관련시설의 미관, 에너지 절약, 기능 및 구조상 지장이 없도록 설계하고 본 과업의 질적향상에 노력하여야 한다.

2) 계약 체결 후 과업 착수 전에 착수계․사업수행계획표․용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 발주처에 제출하여야 한다.

나. 보안 등

1) 설계 용역자는 본 과업 지시서에 의거, 작성 또는 제출되는 각종 보고서 등 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 지식을 개인 또는 특정 단체 등의 이익을 위하여 이용할 수 없다.

2) 모든 성과품은 개인이 소유하거나 임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며,  과업 폐기물은 소각처리를 원칙으로 한다.

또한 과업 수행 시 보안상 결함이 없도록 하여야 하며, 보안 사항 불이행으로 발생 되는 모든 책임은 설계 용역자가 진다.

다. 업무수행

1) 관련 부서 협의 충실

가) 설계용역자는 본 과업을 수행함에 있어 관련부서(협의부서 및 각 분야별 공사 감독 등)와 수시로 협의하고 그 의견을 충분히 검토 반영하여야 한다.

※ 협의 및 요구 시 협의록을 작성, 발주처에 제출하여야 한다.

나) 건축 부분 설계자와 전기․정보통신 부분 설계자간 설계도서 작성에 있어서 상호 간의 의견 일치가 되지 않는 사항이 발생할 경우 발주처와 협의하여야 하며, 설계에 필요한 자료를 협의하여 각종 자료를 제공받아 제안자 간의 의견을 충분히 반영하여 설계하여야 한다.

다) 발주처에서 의견의 협의를 위하여 회의를 소집할 경우 소집에 응하여 의견을 제시하여야 한다.

2) 설계자료 조사 성실

설계 용역자는 설계 등을 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 설계의 질을 높여야 하며, 안전하고 경제적이며 에너지 절약형의 최신 시설이 되도록 노력하여야 한다.

3) 회의 참석 등

설계 용역자는 본 과업과 관련된 해당 심의(자문)위원회 개최 및 발주처의 요구가 있을 시 참석 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대하여 책임기술자로 하여금 질의에 답변토록 하여야 한다.

4) 기술자문

설계 용역자는 본 과업과 관련, 발주처의 요구가 있을 시 전문기관(대학, 연구소 등)에 기술 검토를 의뢰하여야 한다.

5) 각종 보고 등 성실의무

가) 설계 용역자는 아래 사항에 대하여 일반적인 사항 또는 당초 계획과 변경이 있을 경우 사전 보고 한 후 검토된 자료에 의거 과업을 진행한다.

(1) 기술인력 구성에 관한 사항

(2) 설계자료 또는 통계 조사연구 적용 및 개선 등에 관한 사항

(3) 새로운 기술도입에 관한 사항

(4) 공사비, 공사기간 등

(5) 설계용역과 관련된 홍보활동 및 간행물 발간 등

(6) 기타 발주처로부터 지시받은 사항

나) 발주처가 본 과업 진행상 필요하다고 인정할 경우 관계전문가 및 관계 기관의 자문을 들어야 한다.

6) 자료 제출 성실

설계 용역자는 과업수행중 심의(자문)위원회 등을 위하여 자료제출 요구가 있을 시이에 응하여 제출하여야 하며, 지적사항이 있을 때에는 설계 용역자가 보완하여 납품하고, 자료 제출 등으로 인한 비용은 용역자 부담으로 한다.

7) 설계 용역자는 설계 전 반드시 용역감독관과 같이 현장 확인하여 각종 인입위치, 냉․난방부하 분석 등 현장 여건 등을 충분히 검토하여 설계에 반영한다.

라. 관계사항 숙지 의무

1) 설계 용역자는 본 과업지시서 내용과 본 용역시행 관련 전반사항을 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 아니하여 발생되는 사항에 대하여는 설계용역자가 책임을 진다.

2) 본 과업 지시서에서 정하지 않거나 누락된 부분에 대하여는 발주처와 협의하여야 하며, 이견이 있을 경우 감독관의 의견에 따른다.

3) 기타 경미한 사항은 협의하여 시행하며, 이에 소요되는 비용은 설계 용역자가 부담한다.

4) 본 과업 지시서는 과업 수행을 위한 사항을 규정하였는 바 이에 규정되지 아니한 사항은 관련 법규의 규정, 건설공사 조사 및 시험 규정, 한국공업 규격 및 관련 규정에 따라 감독관과 협의하여 수행한다.

5) 본 과업을 수행함에 있어 설계 용역자는 제반 여건 조치를 하여야 하며, 본 과업으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 설계 용역자가 손실보상을 하여야 한다.

6) 설계 용역자는 건축협의 등 각종 행정 절차상의 승인, 협의, 인․허가를 완료할 수 있도록 제반 조치를 취하여야 하며, 필요 시 관계기관의 협의에 따른 필요한 관련 자료를 작성 제출하여야 하며, 납품 후라도 행정절차 이행이 완료되어야 본 용역 과업이 완료된 것으로 본다.

7) 용역자는 납품 후라도 설계 또는 오류 및 보완되어야 할 사항은 용역자 부담으로 책임지고 설계보완 하여야 하며, 또한 본 공사 시공 중에 발생하는 제반 사항에 대한 설계내용을 자문할 경우 적극 응해야 한다.

8) 과업 수행 중 설계 용역자의 고용인이나 하도급자가 과업 수행에 부적당하다고 감독관이 인정할 때는 교체를 요구할 수 있으며, 용역자는 즉시 이를 교체하여야 한다.

9) 건설기술진흥법 제48조(설계도서의 작성 등), 동법 시행규칙 제40조(설계     도서의 작성), 제41조(설계도서의 검토 등), 국토교통부 고시 제2016 - 1025호“건축물의 설계도서 작성기준”, KSF1501(건축제도 통칙), KSF1505(건축구성재의 기본공차), KSF1509(건축부품의 치수 정하기) 등 관련 규정에 의하여 작성하여야 하며 설계도면에 설계자, 책임기술자 등의 설계도서 작성자가 실명 날인 하여야 한다.

10) 본 과업 수행상 발주처의 사정에 의하여 일부 변경이 있을 때는 발주처의 방침에 따라야 한다.

11) 건축 평면도 작성 지연으로 인한 기계설비 설계 용역 기간 축소가 되지 않도록 하여야 하며, 이로 인한 책임은 계약자에게 있으며 해당 분야 감독관과 충분히 협의하여야 한다.

12) 본 용역 설계에 의하여 공사 시행 중 주요 사항이 누락, 설계자의 귀책 사유에 의한 설계변경, 용역설계로 인한 피해가 발생될 시는 설계 용역자가 피해보상을 하거나 변경 설계를 이행하여야 하며 이에 따른 대가를 요구할 수 없다.

마. 설계의 책임 및 손해배상

1) 설계 용역자는 성과품 납품 후에라도 시공 시 관계자 합동회의, 각종 도면요구 등 발주처의 자문에 성실히 응하여야 하며 과업 수행 서류에 위 내용을 포함한다.

2) 설계도서는 설계자의 책임으로 작성하며 납품 이후에 설계상의 하자(설계도서 상호 간의 모순, 건축협의 불가, 구조적 모순 등)로 인하여 발생 되는 설계 변경 등 모든 사항에 대하여 관계 법령에 따라 설계자가 일체의 책임(배상)을 져야 한다.

바. 변경 및 정산

1) 본 과업의 일부 또는 전부를 중지시키거나 과업을 변경할 필요가 있다고 인정할 때에는 설계 용역자에게 이 사실을 요구할 수 있으며, 설계 용역자는 발주처의 방침에 따라야 한다.

2) 발주처의 요구에 의한 과업 범위의 증감이 발생할 경우 예산의 범위 내에서 당해 계약금액을 조정 또는 정산한다.

또한, 과업 범위의 현저한 변경 없이 계획 및 실시설계 결과, 과업제시 기준 공사비를 초과한 범위에 대하여는 용역비의 증액 지급이 불가하다.

6. 설계용역 일반사항

가. 설계 용역의 정의

본 설계 용역의 최종 도면은 건축법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 정보통신공사업법, 전기사업법, 전력기술관리법, 전기공사업법, 소방관련법, 지적법, 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 녹색건축물 조성 지원법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 등 관련 법규와 각종 기술 기준에 위배됨이 없고 관계기관과의 건축 협의가 완료된 것이어야 한다.

나. 납품

납품은 신축 최종 실시설계로 한다. 다만, 설계용역 기간 등에 따라 납품횟수와납품도서 작성방법, 부수는 당해 용역 설계 지침에서 정하는 바에 따르거나, 발주처와 협의한다.

다. 관계기술자 협력

건축법시행령 제91조의 3(관계기술자와의 협력)과 건축물의 설비기준 등에 관한규칙 제3조(관계전문기술자의 협력사항)에 의한 일정규모 이상의 건축물에 대하여는 관계법에서 정하는 기술자의 협력을 받아야 한다.

라. 설계의 기본 방향 및 개요

1) 안전성과 시공성이 확보된 설계

가) 고정하중, 활하중, 적설하중, 풍하중, 지진하중 및 건축물의 실제의 상태에 따라 하중, 수압, 진동, 충격 등에 의한 외력, 온도변화, 수축 및 크리프의영향 등을 고려한 건물 전체의 구조안전성 및 내진기준이 확보된 설계

2) 건물의 미적 디자인 확보 및 통일성 고려

가) 타 소방청사와의 균형과 조화 중점

3) 소방활동 고려

가) 실 배치 및 동선은 신속한 출동이 가능하도록 단순화

나) 현장출동 지령과 관련 유·무선 통신시설 확보

4) 각 실별 구획

가) 업무 특성에 적합한 사무 및 기타 공간 조성

5) 안정적인 옥상 방수 대책 강구

6) 수요를 감안한 미래지향적 첨단 시설 설계

가) 전화 및 LAN 구축으로 충분한 통신회선 반영

나) 내구성과 미관을 동시에 고려하여 주변과 조화롭게 설계

다) 인근에 소음원이 있는 경우에는 소음(騷音)에 대한 대책을 수립하여 설계

라) 전기 및 정보통신 분야(특히 LAN 분야 등)는 미래 지향적인 기술 기준을 적용

마) 모든 기준은 최근 개정된 최신법령에 해당하는 기술 기준을 필히 적용

7) 에너지 절약형(Energy Saving) 설계

가) 창호, 내외벽, 스라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍, 방한, 단열 등 에너지 절약형 구조로 설계

- 건축법 제66조(건축물의 에너지 이용과 폐자재 활용)

- 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제21조(건축물의 열 손실방지), 제22조(에너지절약 계획서의 제출), 건축물의 에너지절약 설계기준에 적합한 설계

나) 전기 및 기계설비는 에너지 고효율 자재 사용 및 고효율 시스템 설계

다) 열손실이 적으며 에너지 효율의 극대화를 이룰 수 있는 설계

라) 이용객의 쾌적성과 편리성이 확보된 설계

마) 신․재생에너지 사용 적정성 검토

8) 환경 친화적 환경 조성

가) 외부 구조물, 우․오수 계획 등 기타 시설은 환경친화적으로 설계

나) 주변의 자연환경을 보존하도록 계획하고 공사 시행 시 분진, 소음, 진동, 폐기물의 발생이 최소가 되도록 고려한 설계

※ 소음․진동관리법 제21조(생활소음과 진동의 규제), 제29조(방음·방진시설의 설치 등), 제40조(방음시설의 성능과 설치기준 등)에 맞게 설계

9) 유지·관리가 용이하고 안전한 설계

가) 건축물의 완성뿐만 아니라 유지관리에 대한 비용이 최소화되는 방법 등을고려한 경제적인 설계가 되어야 한다.

나) 화재, 지진, 태풍, 홍수 등 재해에 대하여 안전하고 피난에 유리하도록 하고, 방범 및 보안관리가 용이한 구조로 설계

다) 외부 마감 재료는 내후성과 내오염성이 우수한 재료를 사용하여야 하며,내부 마감 재료는 고급스럽고 교체 주기가 긴 재료를 사용하여야 한다.

10) 녹색건축 인증 및 제로에너지건축물 인증을 위한 설계

가) 토지 이용을 조화롭고 교통부하를 줄이는 설계.

나) 지속가능한 에너지원을 사용 및 수자원이 절약 가능한 설계.

다) 생활폐기물이 최소화 되고 녹지공간이 조성되는 설계.

라) 건물의 수리 및 관리가 용이한 설계.

마) 에너지 및 온실가스 감축을 위해 건물의 에너지 사용량을 최소화하고,

신재생 에너지를 생산하여 건물의 총 에너지 소요량을 최소화하는 설계.

마. 공사비 산출

「지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령(행정안전부 훈령 제1호)」에 의거, 공사비의 개략적인 계산은 신빙성 있는 자료를 근거로 하여 실제 소요 공사비의 근사치가 되어야 하며, 공사비 산출은 아래와 같은 규정이 정해져 있는 것은 그 규정에 따르고 그렇지 못한 것은 관련 계산 근거 및 자료를 제출하여야 한다.

1) 공사비 계산은 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙의 공사원가 계산 및 실적 공사비에 의해 작성하여야 한다.

2) 공사비 적산은 표준품셈, 시중노임단가, 적산기준 및 실적공사비 등에 의거산출한다.

3) 특수공정은 제조원가계산서 양식에 따른 서식으로 2개소 이상의 견적서를 받아 합리적인 단가를 택한다.

4) 제조원가에 의할 수 없는 공정의 단가는 전문가의 견적단가로 계산한다.

7. 발주처와 수급인의 책임 및 의무

가. 설계의 목표와 추진절차

1) 수급인은 건설공사의 시행과정에 대한 전문적 기술능력과 경험을 가지고 주어진 건설공사의 목적, 범위, 공정계획, 자금계획 등 사업계획을 파악하여 최상의 계획 및 설계가 되도록 하여야 한다.

2) 수급인은 합리적인 설계를 추진하기 위해 용역착수 시 계약에 의거 발주처가 요구하는 모든 조건과 기준을 충분히 검토하여야 하고, 기본적인 프로그램의 요구조건들을 판단하고 결정하여 설계요구조건을 작성하여 발주처의 승인을 받아야 한다.

3) 수급인은 발주처의 승인 없이 과업의 범위에 어떤 변경도 행할 수 없다.

4) 수급인은 건축과 관련된 각 전문 분야에 대하여 기술적 경험을 가지고 설계용역의 각 단계별 성과품을 작성하여 그에 대해 총체적 책임을 진다.

5) 설계는 관련 법규와 계약조건, 발주처와 협의된 기본설계 조건을 만족하여야 한다. 만약, 설계용역의 시행과정에서 변경요인이 발생했을 경우 수급인은 발주처에 보고할 책임이 있고 관계법규 및 계약서 검토, 발주처와 협의 등을 통하여 그에 대한 적절한 해결책을 제시하여야 한다.

6) 수급인은 언제든지 설계용역과 관련하여 필요한 자료를 이용할 수 있으며, 계약조건 또는 제공된 자료의 문제점이나 상이점에 대해 즉시 발주처에 보고한다.

7) 수급인은 계약의 범위 내에서 설계를 수행하는 동안 대지의 현 상황을 준수하여야 하며, 모든 설계도서에 실제 조건을 정확하게 표시 반영하여야 한다.

8) 수급인은 계약 체결 시와 설계용역 착수 시, 설계 도서를 완성하여 제출할 때는 반드시 대지를 확인하여 계약 및 설계도서와 다른 점이 발생되지 않도록 한다. 대지의 조건에 중요한 변경이 발생되었을 때는 발주처에 보고하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

9) 수급인은 설계 추진과정에서 건축, 기계, 전기, 통신 등 각 공종별로 서로 긴밀히 협조하여야 하며, 세부 설계내용에 상이함이 없도록 만전을 기하여야 한다.

10) 수급인은 용역 종료 후 공사 진행과정 또는 기타 사정으로 설계도면의 미비 또는 하자가 확인되거나 수량산출서, 설계도서, 내역서 등 성과물 간의 불일치 등으로 설계변경 등이 필요하여 발주처가 이에 대한 보완자료를 요구하였을 경우 지체없이 이를 이행하여야 하며 그에 따르는 비용을 요구할 수 없다.

11) 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의하여 해결한다. 분쟁 기간 중이라 할지라도 수급인은 본 용역의 수행을 중지하여서는 아니된다.

나. 공정계획

1) 수급인은 설계용역의 공정에 대하여 공정표를 작성하고 발주처에 제출하여 승인을 받거나 발주처가 동의할 수 있는 새로운 공정을 제안한다.

2) 공정은 모든 일정이 작성되어야 하고 수급인은 발주처가 동의한 공정계획에 의한 업무의 이행에 책임을 진다.

3) 공정계획은 용역착수 시 뿐만 아니라 용역수행 과정에서도 항상 재검토 되어 적절한 대응이 이루어질 수 있도록 한다.

다. 보안

1) 업무내용의 비공개

수급인은 발주처와 업무수행 중 알게 된 내용과 각 단계별 성과품, 기타 자료에 대하여 발주처의 승인 없이 이를 공개해서는 아니된다.

2) 성과품은 발주처에 최초 제출

수급인이 작성한 발주처와 관련한 모든 성과품은 이를 공개, 공모 또는 다른 행위를 시작하기에 앞서 발주처에 최초로 제출하여야 한다.

3) 검토 및 승인창구 단일화와 절차 체계화

수급인과 발주처의 관계에서 성과품, 보고서 등에 대한 검토 및 승인 창구는 단일화 되어야 하고, 절차가 일정한 양식을 통하여 체계화되어 보안 유지가  용이하도록 하여야 한다.

라. 계약서와의 관계

1) 발주처와 수급인은 계약내용의 이행에 상호책임을 진다.

2) 발주처의 승인으로 업무내용 변경 시 계약 변경

(가) 발주처는 설계용역 계약의 관리에 책임이 있고, 수급인은 발주처의 승인이없는 한 계약을 위반할 수 없다.

(나) 과업 내용의 변경은 발주처와 수급인이 문서화하여 상호 승인을 하여야하고 이는 계약변경의 근거서류가 된다.

(다) 계약서 및 본 과업 내용서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 발주처와수급인이 상호 협의하여 결정하기로 하며, 이때 업무내용의 변경이 발생할때는“(나)”항에 따른다.

마. 공사비와 예산

1) 수급인은 용역수행 시 추정공사비를 지속적으로 검토하고 발주처와 협의하여 적정 공사비의 산출 및 관리에 노력해야 한다.

2) 특히 환경 친화적 설계에 따른 추가공사비용에 대하여는 과업 착수 단계부터 소요 예산의 증감사항 및 적절성에 발주처와 수시로 협의하여 발주처의 승인을 득한 후 후속 공정을 진행하여야 한다.

3) 개산견적과 별도로 상세견적은 계약서에 의한다. 수급인은 설계용역이 진행되는 동안 견적을 위한 올바른 정보를 유지하고, 물가나 공사 범위, 시공 중 예상되는 추가발생 비용, 기존시설의 일시 이동비용 등을 포함하여 공사에 관련된 모든 비용을 종합하여야 한다.

4) 증축 위치의 모든 소요 비용도 함께 포함 되어야 한다.

바. 과업 변경

1) 본 과업수행 상 정부의 상위계획 변경 또는 발주처 사정으로 인하여 과업시행 범위가 변경될 수 있으며, 이 경우 발주처 방침에 따라야 한다.

2) 과업변경 요인이 발생될 경우나 계약체결 후 예정가격 또는 계약결정금액에 하자 착오가 있음이 발견되거나 기타 계약금액의 감액사유가 발생하였을 때는 해당 금액을 당초 금액에서 감액 환산 조치함에 동의하여야 한다.

3) 수급자는 과업 준공 이후라도 변동사항이나 보완사항이 있어 관련서류(도서)와 현장 확인을 요구할 때에는 적극 협조하여야 한다.

제2장 설계용역 진행사항

1. 설계도서 작성

설계도서의 작성 방법은 발주처가 정하는 소정 양식에 의하고, 설계도서의 작성 중

이의가 있을때에는 반드시 발주처와 협의한 후 후속 작업을 진행하여야 한다.

본 설계지침서는 일반적인 사항을 규정한 것으로 제시한 과업의 목적, 증축공사의

규모, 예산액 등에 적합하게 설계가 진행될 수 있도록 합리적인 방법으로 과업을 수행해야 하며, 발주자가 사전에 예측할 수 없었던 공사비의 증가 또는 설계용역 이행에 문제점이 발생되는 경우에는 즉시 서면질의 후 후속 작업을 진행하여야 한다.

2. 설계 진행 시 제출서류

설계자는 설계 진행 시 다음 서류를 제출하여야 한다.

가. 착수 시 : 계약 후 14일 이내 착수한다.

설계자는 용역 착수 시 다음의 제반서류(이하“착수계”라 한다.)를 3부 제출

하여야 한다.

1) 착수계

2) 기술용역 공정예정표

3) 설계용역 예정 공정표(계획, 실시설계의 납품 예정일자 명시)

4) 인력 및 장비투입계획서

5) 분야별 참여기술자 보안각서

6) 분야별 책임기술자 선임계

7) 설계용역수행 조직표

8) 각 공종의 분야별 책임기술자 명단, 구체적 업무내용, 소지한 기술자격증

사본, 기술경력증명서, 이력서 등

9) 건설기술인협회 등 공인기관에서 발행하는 경력증명서 첨부

10) 분야별 하도급승인 요청서(하도급 승인 요청은 착수 후 4주 이내 제출)

11) 공동도급(분담이행방식) 협정서 등

12) 설계용역수행 조직표(책임기술자 및 분야별 책임기술자 포함, 연락처 기재)

13) 낙찰(계약)금액에 의한 산출내역서

14) 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 사항

나. 수급인은 기술용역 공정예정표상의 완료일 이전에 다음서류를 제출한다.

1) 기본․실시설계 검사원, 각종 측량 성과표

2) 건축법 및 과업 지시서 등 제반 법규 검토서

3) 건축협의(인·허가)에 필요한 각종 서류

4) 각종 심의에 필요한 서류 등

다. 실시설계 제출 시

1) 실시설계 작성방법에 따라 실시설계도서에 대하여 지침에서 정한 사항

2) 실시설계 설명서

3) 기타 발주자가 필요하다고 판단하는 사항(구체적 사항은 납품도서에 명시)

라. 업무 협의 및 공정 보고

1) 수급인은 착수계 제출 후 3일 이내에 착수계 내용, 책임기술자의 적합성,

하도급의 적정성 등에 대한 협의한다.

2) 수급인은 다음과 같은 경우 업무협의를 하고 협의결과 보고서를 작성 보고 한다.

(가) 조사 및 자료수집 완료 시

(나) 기획업무, 계획 설계 완료 시

(다) 공법 및 각종 시스템 결정 시, 주요자재 선정 시

(라) 기본, 실시설계 검사원 제출 전․후

(마) 기타 발주처가 필요 시

3) 수급인은 다음과 같이 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 공정보고서

(용역수행 대표자명의)를 작성하고, 발주처에게 보고하여야 한다.

가) 본 설계안 및 추진계획 보고

나) 기본설계 완료 보고

다) 주간보고 : 매주 1회 작성(주말기준 작성 익주 화요일 제출)

라) 수시보고 : 발주처의 요청 시 수급인은 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

(자료제출 포함)

마) 실시설계 종합보고 : 계획설계에서 실시설계 완료까지의 모든 과정에 걸쳐

논리적, 사실적, 기술적으로 작성되어야 하고, 구조물의 특성과 용도의 개념을

명확하게 기술해야 하며, 관리 운영에 관한 사항과 각 실 면적 및 기능과 시설

개요 등 각 주요 실별로 작성하여 사용자의 편의를 도모하게 하여야 한다.

(1) 보고서 내용은 공사수행에 이용할 수 있는 모든 자료가 포함된 종합                 보고서이어야 되며 다음 사항을 수록하여야 한다.

㉮ 과업의 목적              ㉯ 과업의 범위

㉰ 과업의 내용              ㉱ 사전 조사내용 요약

㉲ 설계기준                 ㉳ 구조물 설계안별 검토 내용

㉴ 세부설계 내용(공종별 비교검토 내역 포함)

㉵ 주요자재 및 수급계획     ㉶ 시공계획

㉷ 도면첨부                 ㉸ 기타 참고자료

㉹ 기타 발주처의 요구사항

바) 최종보고 : 납품 10일 전에 최종도면 및 내역서는 감독관의 검토를 받은 후

보고(검토 날인이 없는 것은 인정치 않음)

3. 업무 회의

가. 일반사항

1) 설계자는 설계진행과 관련하여 업무에 대해 발주처와 협의하고자 하는 경우에는

책임기술자로 하여금 협의하도록 하여야 한다. 단, 세부적인 공종별 설계내용에

대하여는 분야별 책임기술자가 협의할 수 있다.

2) 본 설계지침서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에 대하여는

설계자가 임의로 해석할 수 없으며, 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

3) 본 설계지침서에 대한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른 객관성 있는 자료를

제출하여 발주처의 승인을 받아 채택할 수 있다.

4) 발주처는 설계자에게 설계 중 이행이 완성된 부분의 설계도서를 제출․요구하여

수정․보완 지시할 수 있으며 설계자는 정당한 사유 없이 이를 거절할 수 없다.

5) 설계자는 자문회의 등 각종 회의 시 책임기술자로 하여금 회의장소와 참석범위

등을 협의하고 회의에 필요한 자료의 작성과 회의에 참석토록 하여야 한다.

나. 업무 착수회의

1) 업무 착수회의(Kick-off Meeting)는 착수일 또는 착수일로부터 늦어도 5일 이내

장소와 일자를 협의하여 개최한다.

2) 업무 착수회의 시 책임기술자는 착수계 내용을 기초로 설계 진행계획을 설명

하여야 한다.

3) 수시 회의

(가) 설계진행 시 문제점이 발생하거나 계획, 중간 및 실시설계 보고 시 보고에

필요한 자료를 작성․배부하여야 하며 보고 회의는 상호 간 일시와 장소를

협의하여 개최한다.

(나) 계획 및 중간설계 과정에 있어서는 최종안이 확정되기까지 발주처의 협의

요구(회의 횟수, 시기 등)에 적극적으로 협조하여 최상안이 확정되도록 한다.

* 업무협의 및 회의 발의자는 개최일 3일 전, 모든 참석자에게 시간, 장소,

참석범위, 안건, 기타 필요한 정보를 전달한다.

4. 사용 자재

가. 본 설계용역에 사용하는 각종 재료와 제품은 국내에서 생산된 제품, KS제품과 고효율(에너지절약, 절수) 인증제품, 조달청 우수제품, 소방산업기술원에서 검증․인증된 제품을 우선적으로 사용함을 원칙으로 한다.(가능한 충북소재 업체 선정)

나. 기타 자재는 공인된 기관에서 인정한 규격품을 선정하며, 외국산 자재의 사용은 최소화(국산제품의 수급이 어려울 경우)를 원칙으로 한다.

다. 인체에 유해한 물질(석면 등)이 함유된 자재는 사용하여서는 안 된다.

5. 관련기관 인·허가 협조

1) 수급인은 본 과업과 관련하여 관련법규에 의한 협의․허가 및 발주기관의 심사 결과를 반영한 설계 도서를 작성 제출하여야 하며, 이와 관련된 일체의 비용은 수급인의 부담으로 한다.

2) 수급인은 과업수행 전 부지 내･외 지하 지장물의 매설여부(도시가스관, 상･하 수도관, 기타) 및 전력공급 가능여부, 상수도 공급 가능 여부, 도시가스의 공급

가능 여부 등을 수급인의 책임 하에 관련기관(부서)과 협의한 후 설계에 반영

하여야 한다.

6. 하도급의 범위

수급인은 도급받은 설계용역 전체를 다른 설계자에게 일괄하여 하도급 할 수 없으며,

하도급 시 건설기술(설계) 용역계약 특수조건 제6조(하도급 승인)에 따라 발주처의

승인을 받아야 한다.(단 수급인은 하도급 된 당해업무에 대하여 모든 책임을 진다)

7. 각종 조사 및 자료수집

가. 현지답사

1) 수급인은 현지를 답사하여 계획한 시설물이 현지조건에 적합한지의 여부를

확인하여야 한다.

2) 또한 지형, 지질, 주변도로, 용지조건 등을 상세히 파악하여 공사용 도로, 공사

부지, 작업장 등의 확보 가능 여부를 판단하여야 한다.

3) 용지조사

(1) 본 과업에 따른 각종 법규 및 인․허가사항을 조사하여 기재한다.

(2) 계획구간 내의 도시계획 현황과 토지이용계획 등을 조사하여 검토한다.

(3) 민원 발생 예정지역 및 협의 사항을 조사 검토한다.

4) 기타 조사

(가) 기조사된 자료가 있는 경우에는 조사된 내용을 요약하여 기재한다.

(나) 기조사된 자료가 있으나 충분치 못한 경우에는 추가 조사범위, 조사물량

등 필요한 조사내용을 기재한다.

(다) 각 조사 항목별 조사방법, 조사범위, 조사물량 등을 작성한다.

(라) 본 건축물이 주변시설에 미치는 경관상의 문제, 민원 문제 등을 조사 검토

한다.

(마) 수급자는 설계 착수 전에 최근 증축 하여 유사한 구조의 소방서를

현지 조사하여 설계에 반영 참조하여야 한다.

5) 기타

(가) 과업수행에 있어서 과업 지시서의 해석 등에 대하여 계약 양방 간의 의견이

상이할 때는 상호 협의하되, 상호 협의가 이루어지지 않을 경우에는 관련 회계

법규에 따른다.

- 본 용역성과 최종안을 작성 감독관의 검토를 받아 완성한다.

- 본 과업의 완료는 강원도에서 실시하는 계약심사 결과에 따른 과업수정

결과에 대한 발주처의 승인을 득함으로써 과업이 종료된다.

(나) 과업 기간 중에도 발주처와 협의를 지속적으로 하여야 하며, 협의 결과 및

보완사항 발생 시 이를 보완 하여야 한다.

(다) 본 과업수행 중 책임기술자 및 각 분야의 기술자 교체 시는 반드시 사전에

감독관의 승인을 받아야 한다.

(라) 수급자는 과업 수행과 관련된 제반 업무 수행시 안전상의 문제가 발생하지

않도록 항상 안전교육을 하여야 하며, 안전사고 발생에 대한 책임은 수급자

에게 있다.

제3장 일반지침

1. 기본 방향

가. 건축물 외부 디자인

1) 권위적, 획일적 119안전센터 이미지 탈피, 친근한 119안전센터의 이미지 부여

2) 주변 환경과 조화성 있는 외부 디자인

나. 직원복지 기능을 고려한 건축계획

다. 미래 소방청사 방향에 대비한 공간구조

라. 소방청사 사용자에 대한 안전성 고려 설계

1) 건축물 내 시설물에 대한 안전성 고려

2) 소방차의 진·출입 시 안전 확보 가능성 부여

2. 적용 기준

가. 본 과업 지시서는「춘천소방서 퇴계119안전센터 신축공사」에 필요한 기본적인 요구조건을 제시한 것이므로 설계자는 과업 지시서에 명기된 기준 이상의 성능 및 재질과 공법을 적용한 설계를 하여야 하며, 발주처가 요구한 소요 시설 외에 품질과 기능이 향상되는 시설은 설계자가 판단하여 설계에 반영할 수 있다.

나. 과업지시서 등의 자료는 발주처에서 설계자의 편의를 도모하기 위하여 제시하는  것으로 설계자는 충분한 사전 조사를 통해 설계에 반영하여야 한다.

(사전 조사에 소요 되는 비용은 설계자의 부담으로 한다.)

다. 설계자(수급인)는 발주처의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 수급인의 잘못

으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 발생한 모든 하자 등에 따른 책임(민․형사상)은 수급인(설계용역자)이 진다. 수급인은 용역준공 후에도 이러한 사항에 대하여 발주처의 수정․보완 요구가 있을 때에는 수급인 부담으로 시정조치하여야 한다.

라. 특수자재, 공법의 적용으로 부득이 본 설계지침에 명시한 대로 설계할 수 없는 경우 설계 설명서(기본설계)에 적용부위, 자재, 공법의 명칭과 공인기관의 기술검토서 및 시험데이터 등 적용 부위에 적합한 자재, 공법임을 인정할 수 있는 성능관련 입증 자료를 명시하여야 하며, 시방서(실시설계 도서)에 그 품질규격 및 시공방법 등이 명시되어야 한다. 이때 입증하여야 할 성능 명목은 KSF 1010(건축물에 영향을 주는 각 요인의 성능분류)에 따른다.

마. 본 시설은 기본 목적에 맞게 설계되어야 한다. 아울러 설계는 공사의 능률성과 경제성이 제고될 수 있는 기법으로 시행되어야 하며, 특히 시공에 있어서는 신공법 및 기술개발에도 기여할 수 있는 기법으로 하고 준공 후 유지관리 측면을 고려하여야 한다.

바. 본 시설의 설계기준은 관계법규․규정․지침․고시․조례․KS규격 및 국토해양부 등 정부

기관에서 제정한 관련 표준시방서와 관련 설계기준, 본 도서 작성지침 및 설계지침이 정하는 기준 이상으로 하며 서로 상이한 경우에는 강화된 기준 이상으로 한다. 납품일 이전에 관계 법규 등의 내용이 변경된 경우에는 변경된 내용에 따라야 한다.

사. 본 과업지시서에 본 시설의 기본적 기능 및 관리상 필요한 사항임에도 불구하고 누락된 경우에는 설계에 반영하여야 한다.

아. 본 과업지시서의 내용 및 기본계획에 대한 변경 또한 수정을 요할 경우, 이에 부수되는 모든 사항은 발주처의 승인을 득하여야 한다.

자. 건축, 설비, 전기, 통신 등 부대시설에 대한 설계기준은 관련 법규와 제반기준 및 설계지침서에 의한다.

4. 일반 사항

가. 본 지침은 일반원칙을 제시한 것으로 별도의 지시나 특이사항이 없는 한 본 지침을   준용함을 원칙으로 하고, 이의가 있을 경우에는 설계자 임의로 판단해서는 아니   되며 서면질의에 의하여 확인하여야 한다.

나. 건축, 기계, 전기, 소방, 통신 기타 부대공사에 대한 설계는 관련 법규에 의한 제반규정 및 본 지침서의 기준 이상으로 한다.

다. 설계는 에너지 절약형의 경제적인 구조와 기능을 갖춘 안전한 구조로 한다.

라. 신기술을 최대한으로 도입하여 합리적인 설계가 되도록 하며, 신기술(특허)이 포함된 경우 신기술 개발자와 사전에 협의하여 발주부서와‘기술사용 협약서’작성에 문제가 없어야 한다.

마. 설계자는 건물 완공 후 운영자가 시설을 운영하는 데 있어 현장대원이 편리하게 이용할 수 있고 실용적 유지관리가 될 수 있도록 설계에 검토하여 반영되도록 하여야 한다.

바. 장애인 등에 대한 편의시설은 장애인 인증 실시해야 할 경우 발주자와 협의하며, 장애인 편의시설은 관련법 기준 이상으로 설계에 반영 한다.

사. 기타 발주자 측의 요구사항 반영

5. 설계시 참고사항

가. 기본계획(안)은 3개안 이상을 제시하여야 하며, 심의를 거쳐 확정 후 실시설계를 하여야 한다.

나. 발주처의 심의결과 수정 또는 보완을 요구할 시에는 즉각 수정ㆍ보완 후 심의를 통과하여야 한다.

6. 부문별 설계지침

가. 건축 설계 지침

1) 기능 및 건축구조가 적정하여야 하며 각종 침하에 대한 우려가 없고 안전하여야 한다.

2) 방수, 타일 등 내․외장재가 기계시설 등에 의하여 파손되지 않도록 하며, 증축된 실은 바닥 충격을 흡수할 수 있고, 방음시설 등으로 활동에 지장이 없도록 한다.

3) 친환경 소재를 사용하고 관련 규정에 의한 검사에 합격한 재료를 사용한다.

4) 장애인이 이용함에 있어 장애인 관련법을 고려, 설계되도록 하여야 한다.

8) 제반 부수시설의 가구, 사인 보드, 특수시설 및 기구 등은 그 종류, 필요 위치, 소요개수 등을 면밀하게 분석 및 검토하여 실시설계에 반영할 수 있도록 충분한

계획 및 자료를 제시한다.

9) 건축물의 구조계획 및 재료선정은 안전성, 경제성, 내구성, 기능성, 미관, 유지 관리 등을 종합적으로 고려하여 합리적인 설계가 되도록 하며, 방수재료 및 공법 선정은 주요 자재 선정 검토서를 작성 제출한다.

10) 증축건물은 물론 기존 건축물을 포함한 지진재해를 방지할 수 있는 대책이 고려된 내진설계가 되도록 한다.

11) 각 실은 건축계획 각론에 따라 설치하고, 발주처의 의견을 관계 법규 및 예산

범위 내에서 최대한 반영한다.

12) 건축물의 배치는 사업부지의 여건과 세부시설을 고려하여 창의적이고 기능적인 119안전센터를 계획할 것

가) 대지의 입지와 형태를 고려하여 접근성과 가로경관을 고려한 건축물 위치,형태, 입면디자인을 고려할 것

- 차량 진입을 위한 가감속 차로 및 도로점용에 대한 협의 필요

나) 긴급출동차량의 신속한 출동을 위해 회전반경, 시야확보 등을 우선적으로 고려 하여 배치계획할 것

다) 대지의 배치계획은 종합적 부지 활용계획을 고려하여

[외부활동공간, 외부훈련공간, 교육공간, 차량정비공간,개인장비정비공간 등 ] 외부 활동공간을 확보하고 건축물을 배치 계획하며 주변공간과의 조화를 생각하여 계획한다.

나. 기계설비 설계지침

1) 기본지침

가) 시설별 요구 조건에 충족할 수 있는 방식을 채택하고 모든 자재는 건축물의 에너지 절약 설계기준에 의한 에너지 절약형 자재를 우선적으로 선정한다.

나) 건축, 전기 등 관련된 타 기술 분야의 긴밀한 협조하에 건축물의 각 구성

요소가 서로 원활한 기능을 유지할 수 있도록 하여야 한다.

다) 보수, 유지 관리가 용이 하여야 하고 장래에 증설, 변경 및 개․보수에 대한 적용성이 있어야 하며, 향후 증축 등에 대비하여 기계실을 확보한다.

라) 냉․난방, 위생, 환기 기타 모든 공급처리 시설은 최신의 시설 방식을 원칙으로 하여 소수인원으로 운전이 가능하도록 그 효율을 극대화하고 유지관리 비용을

최소화 한다.

마) 건축 시설별 운영 계획(사용시간, 사용요일 등)을 고려한 설비를 구성한다.

2) 냉·난방 설비

가) 에너지 이용 합리화법을 적용 안전하고 경제성을 고려한 지역난방, 도시가스

등 냉·난방시스템을 계획한다.

나) 쾌적한 환경의 지속적인 유지 및 공간 활용이 되도록 방열기구를 선정한다.

다) 실내 공기질의 청정화와 쾌적성이 보장되는 외기 환기횟수 및 공기정화 계획을

수립한다.

라) 동파 방지 및 결로 방지에 대한 대책을 강구하여 설계에 반영한다.

마) 소음과 진동을 줄일 수 있는 설계를 한다.

3) 소방설비

소방 관련 법령 및 시행규칙, 소방기술기준에 관한 규칙에 적법하게 설계한다.

4) 기타사항

장애인·노인·임산부 등 편의 증진에 관한 법령에 적합하게 계획한다.

다. 전기설비 설계지침

1) 수변전설비

가) 전력 수급지점은 사전에 현장을 충분히 조사ㆍ확인 후 해당기관인 한국

전력공사와 협의하여 결정한다.

나) 피뢰설비와 접지설비는 관련 법규 및 규정에 적합하게 계획한다.

2) 전력간선설비

가) 각층에 분전반을 설치하고 분전반은 부하의 중심점에 설치한다.

나) 간선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적인 강도, 단락 시 허용전류 등을

고려하여 결정한다.

다) 간선설비는 안정성, 효율성 및 장래 부하설비 증설을 고려하여 간선의 구성

및 용량을 결정하되, 관리자 주체 실별 분리를 위하여 간선 분리를 구성한다.

라) 배전전압은 3상 4선식 380V/220V로 계획하고 간선의 길이는 가급적 최단

거리가 되도록 하며, 분기회로의 부분에 누전차단기를 설치한다.

3) 동력설비

가) 동력제어반과 각 기기의 평면배치 및 조화성을 고려한다.

나) 진동하는 기기의 배관에는 가요전선관을 사용한다.

다) 동력배관과 설비배관의 증기 및 고열에 대한 배관 이격거리를 고려하여 설계

한다.

라) 제어반, 배전반, 전동기 등의 접지선 굵기는 충분토록 고려한다.

4) 전등설비

가) 건축물의 각 실별 용도에 적합한 광원과 등기구 종류가 각 실에 맞고, 눈의

피로 및 보호를 위한 적정 조도(KSA3011)로 설계한다.

나) 에너지 이용 합리화법 제3조의 규정에 의한 고효율에너지 기자재(LED 등

반영구적인 제품 등)를 사용한다.

다) 전등은 부분조명이 가능하도록 등기구수 6개 이내의 전등 군으로 구분하여

전등군마다 점멸이 가능하도록 하되, 에너지 절약을 위하여 창과 가장 가까운

전등은 따로 점멸이 가능하도록 한다.

라) 매입 조명기구의 설치 위치에 타 설비 또는 덕트 배관 등 장애물을 감안하여

건축 층고 높이 설계 시 천정 부분의 충분한 설치공간을 협의하여 확보 반영

한다.

마) 가급적 조명기구 종류 수를 단순화하여 준공 후 유지보수비 절감 및 자재

확보의 편의성을 고려한다.

5) 전열설비

가) 전열 1회로 당 최대 수구수는 10개 이하로 설계하고 실별, 용도별로 구분한다

나) 일반용 수구는 220V 접지형을 사용한다.

다) 수구부하의 용량은 150VA/EA로 하며 분기회로는 용량의 80%를 초과하지

않도록 한다.

라) 수구의 사용 전압이 다를 경우 사용자가 쉽게 구분 및 사용이 가능하게

분류한다.

6) 접지설비

가) 고감도 장비의 보호를 위하여 등전위 접지로 설계한다.

나) 건축물 용도에 적합한 접지구성 설비로 설계한다.

라. 정보통신 설계지침

1) 전화 및 교환설비, 인터폰설비

가) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비를 구성하는 배관시설은

설치된 후 배관의 교체나 증설 시공이 용이한 구조로 설치한다.

나) 구내 통신선로설비 또는 이동통신 구내 선로설비는 그 구성과 운영에 있어

사업용 전기통신설비와의 접속이 용이하게 한다.

다) 구내 통신선로설비, 이동통신 구내 선로설비, 종합유선방송 구내 전송선로

설비 등은 초고속 정보통신망 및 종합 유선방송망을 접속하기 위한 통신

장비를 통신장비를 설치할 수 있도록 하여야 하며, 구체적인 설치 방법은

정보통신부 장관의 고시를 따른다.

라) 구내 통신 선로설비에는 구내로 인입되는 국선의 수용, 구내 회선의 구성

및 단말장치 등의 증설에 지장이 없도록 충분한 회선을 확보한다.

마) 예비 회선수를 20% 이상 확보할 것. 다만, 이를 수용할 수 있는 배관시설이

확보되는 경우에는 그러하지 아니하다.

바) 사무자동화 추세에 따른 각종 사무기기 설치를 고려하여 소요 회선 수 및

제반 시스템에 적합하도록 설계한다.

2) 방송설비

가) 일반방송(안내방송, BGM) 및 비상 시 화재수신반과 연동하여 비상 방송이

가능하도록 계획한다.

나) 실별, 용도별 그룹 구성 검토와 전관방송의 일반 방송기능과 비상 발생 시

방송연계 기능이 가능하게 한다.

다) 스피커의 수량과 Amp의 용량은 충분하고 스피커의 배치를 적절하게 한다.

라) 비상 방송을 겸한 방송설비의 스피커 배선은 HIV 1.6㎜ 이상의 전선을 사용

한다.

마) 방송용 스피커는 반사음 및 반경을 구획하여 충분한 음량으로 한다.

3) 기타 설비

가) 낙뢰로부터 건물 인원 및 장비를 보호하기 위한 피뢰설비를 고려한다.

나) 모든 시설은 장래 확장(초기, 중기, 최종)에 대응 할 수 있도록 각종 설비

용량을 감안하여 설계한다.

마. 에너지 절약 설계(건축물 에너지 효율 등급 인증에 관한 규칙 제2조 3항)

1) 건물 에너지 효율 인증제도에서 건물 에너지 효율 1등급 취득이 가능 하도록

설계하여야 한다.

2) 녹색 소방 실천을 위해 청사에 대한 에너지 효율을 높이고 오염물질 배출을

최소화하여야 한다.

(가) 건물 외벽 면적에 대한 창 면적비 50% 미만

(나) 친환경 건축자재 사용 등(바닥재, 벽지, 페인트 등)

바. 구조 설계지침

1) 기능이 적절한 구조

2) 안전하고 경제적인 구조

※ 국토해양부 고시 건축물 기준 등에 적합하여야 한다.

제4장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

가. 수급인은 설계용역 성과품을 기술용역 공정예정표의 제출일 이전에 발주처의

승인을 득한 후 인쇄한다.

나. 수급인은 조달청 시설분야“건축설계 내역서 작성 안내”기준으로 작성하여 향후

조달청(발주처)에 공사 원가 검토, 시설공사 발주 의뢰가 원활히 될 수 있도록 조달청

기준에 부합하게 한다.

2. 유의사항

가. 관급자재 내역서(수량, 금액)는 도급 예정자가 설치할 관급자재와 구분 제출

나. 설계도면, 시방서, 내역서 상의 품명, 규격 등을 일치시킬 것

다. 전문 업체 견적가격 적용한 품목은 견적서 첨부

라. 관련 법령에 의한 분리 발주 부분 성과서 구분 제출

1) 전기 / 통신 / 소방 / 기계설비 부분

2) 기타 법령에서 규정한 사항

3. 성과품 작성

가. 설계설명서

1) 공통분야

공사개요(위치, 규모, 공사기간, 공사금액 등), 공종별 주요 시공 및 공정,

총공사비 산출 및 산출근거 등을 설명한다.

2) 건축분야

기본계획, 환경 및 대지 조건, 배치계획, 예상공법 타당성 검토, 법규 검토,

주요 사용재료 결정, 평면․주요 단면선정, 구조․부대시설 등 기본 방식 결정,

공정계획 및 세부 공사비 등

3) 설비분야

주요설비, 냉․온열원, 도시가스, 환기, 소화설비, 공조덕트, 자동 제어, 위생 등

기타설비, 에너지 절감ㆍ유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 시공 및 공정계획,

세부 공사비 등

4) 전기ㆍ통신분야

수변전, 비상발전, UPS, 전등전열, 옥외 외등설비, 전력간선, 전화교환, 구내 통신,

전기 및 전화설비, 에너지 절감ㆍ유지관리에 관한 사항 및 대책, 세부 공정계획

및 공사비, 유지관리 시설 등

5) 인테리어분야

기본계획, 실내마감, 가구 배치계획, 주요 사용재료 결정, 천정평면․주요 단면

선정, 색채 계획, 공정계획 및 세부 공사비 등

나. 각종 계산서

구조계산서, 전력 부하 계산서, 조도 계산서, 냉난방 부하계산서, 기계설비용량

계산서, 에너지절약 계산서, 내진성능확인서, 정화조 등 용량계산서를 포함하되

세부사항은 다음과 같다.

1) 구조계산서

가) 구조계산서는 계산내용이 알기 쉬우며 정확하고 상세하게 정리되어 검토가

용이하게 작성되어야 하며, 특히 프로그램의 입․출력 자료는 모든 CASE별로

이해하기 쉽게 정리되어 구조계산서에 포함되어야 한다.

나) 계산에 사용된 프로그램과 이를 이용하여 설계한 사항 또는 부재 등을 정리

하여 수록한다.

다) 전산프로그램의 출력자료는 구조계산서의 부록으로 별책 작성한다.

라) 출력자료가 구조계산서의 형태 및 순서로 정리되어 인쇄된 경우에는 발주

처와 협의 후 본 구조계산서의 해당항목에 수록한다.

마) 구조계산서의 각 페이지 우측 상단에 작성자와 검토자, 확인자란을 만들어

계산의 적정 여부를 확인 후 서명한다.

(6) 구조계산 시 주요 설계계수가 가정값인 경우 반드시 가정 값임을 표시한다.

2) 설비분야 설계계산서

주요 장비·설비의 용량계산서 및 선정서, 부하계산서, 화재수신반 회로계산서

3) 전기·통신분야 설계계산서

단락전류 변압기, 용량 비상 발전기 용량 배터리 및 충전기, 용량 전압 강화,

전화회선 산정, 방송용 앰프 용량 등의 계산서, 부하계산서, 조도계산서 등

다. 설계도면

1) 일반사항

가) 설계도면은 이해가 쉽도록 작성한다.

나) 설계도면은 한글(필요시 부분적 영문 사용), 아라비아 숫자를 사용한다.

다) 도면 하단의 표제란의 형식은 발주기관과 협의하여 결정한다.

라) 모든 설계도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임기술자가 적정 여부를 확인한

후 서명 또는 날인하여야 한다.

마) 설계도면에는 주석(note)란을 만들어 구조물 설계방법, 사용재료의 종류 및

강도, 주요 설계조건, 시공 시 유의사항 및 특기사항을 수록한다.

바) 설계도면에는 관련 도면란을 만들어 해당 도면과 주요 관련 있는 도면의

번호 및 도면명을 표기한다.

사) 모든 도면은 정부에서 제정, 보급하게 되는 건설CALS/EC 전자도면 작성표준

(안)에 준하여 CAD를 이용하여 작성하고 그 결과를 CD 및 USB에 저장하여

제출한다(PDF로 변환한 도면 동시 첨부).

라. 유지관리 지침

유지관리지침은 다음과 같은 사항을 포함하여 작성한다.

1) 시설개요 : 구조형식, 설계방법, 설계하중, 사용자재, 지반조건, 기타

2) 구조계획도 : 구조 일반도, 주요단면도

3) 구조의 특성 : 구조의 역학적 특성, 주요 구조 부재의 특징

4) 주요 점검내용 : 각종 법령에서 규정하고 있는 주요 점검항목 및 점검 방법

5) 보수방법 : 건축 마감, 기계설비, 전기설비 등 보수 방법

마. 공사 시방서

1) 공사 시방서는 공사 계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능,

구조, 재료 등과 시공 절차, 방법, 기타 시공 및 유지 관리에 필요한 요구사항

등을 규정한 것으로 국토교통부 제정 표준 시방서 및 관련 법규 등을 근간으로

설계 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

2) 공사 시방서에는 다음과 같은 사항이 포함되어야 한다.

가) 적용범위, 용어의 정의, 설계도서의 적용 우선순위, 설계도서 검토의무 등에

관한 상세사항

나) 해당 건설공사 표준시방서 및 전문 시방서, 관련법규 및 지침, 제 기준의 명칭

다) 계약문서의 계약조건 이외의 필요한 계약조건에 관한 사항

라) 관련 법규에 따른 요구사항 및 조건에 관한 상세사항

마) 시공자가 작성하여야 할 시공 상세도 목록

바) 시공자가 제출할 각종 보고서 및 서류 등에 관한 방법, 시기 및 절차 등에

관한 세부사항

사) 발주기관과 시공자 사이의 책임범위 및 한계

아) 각종 검사, 기성 지급, 설계변경 등에 대한 절차, 방법, 시기

자) 공사관리, 공정관리, 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 대한 상세사항

차) 주요공정별 시공방법 및 절차, 시험방법, 허용오차, 사용자재, 사용장비,

소요인원 등에 대한 상세한 규정

카) 공사 전반에 관한 주의사항 및 절차

타) 건물 시설물에 대한 유지관리 지침

파) 기타 주요공사 사항(인테리어, 시방서 등)

3) 공사 시방서 작성 시 유의사항

가) 공사 시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단명료하게 작성

하여 해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준양식을 사용하도록 하고 작성 형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며, 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 공사기성에 관련된 사항은 이해하기 쉽도록 명확하게 작성한다.

아) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고, 발주기관의 감독, 계약대상자, 감리자

등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

자) 독과점 품목의 경우를 제외하고는 제조회사의 고유 제품명을 표기할 수

없으며 학술적 명칭을 사용하여야 한다.

바. 공사내역서

1) 공사내역서의 작성은 정부제정 관련공사 표준품셈을 참조 발주처와 협의하여

적용하여야 한다.

2) 공사비 내역서는 재정경제원 회계예규 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙

및 건설공사 표준안전관리비 계상기준 및 사용기준을 적용한다.

가) 재료비

·조달청장이 조사하여 통보한 가격(조달정보지 게재가격/적용기준일 명시)

으로 한다.

·조달정보지에 미 수록된 자재는 기획경제부에 등록한 전문기관에서 조사,

공표한 2가지 이상의 물가지가격(견적서 첨부) 중에서 최저가격을 적용한다.

·상기에서 조사ㆍ공표한 가격이 없는 경우 2 이상의 사업자에 대하여 당해

물품의 거래가격을 현장조사 실시, 정확하게 확인하여 적용한다.

나) 직접노무비 : 대한건설협회 및 중소기업중앙회 등에서 공표한 가장 최근

시중노임 단가를 적용한다(적용기준일 명시).

3) 예정 공사비는 발주처와 사전 협의한다.

4) 내역서 비고란에 일위대가표의 해당 코드번호를 필히 기록하고 일위대가가 없는

자재의 경우 단가산출조서 근거를 기록한다.

5) 표준품셈에 명시되지 아니한 특수사항에 대하여는 외국의 관련자료를 인용할

수 있으나, 이 경우 국내의 기술수준과 여건이 감안되어야 한다.

6) 복합단가의 산출은 일위대가표를 작성하여 국내 관련기준 및 외국사례를 참조

작성하여야 한다.

7) 정부기관 준용품셈, 기타 적산 참고자료를 적용 시 반드시 근거를 제시하여야

한다.

8) 운반비는 운반장비, 운반거리, 도로상태 등 운반비 산정에 따른 세부산출내역을

첨부해야 한다.

9) 주요자재 수량은 별도 집계표로 작성하여야 한다.

10) 설계도서 및 내역서 등은 조달청 계약발주가 가능하도록 작성(분리)하여 제출한다.

사. 예정공정표 작성

1) 예정공정표 작성에서 1개의 Activity는 특별한 경우를 제외하고는 30일 이하로

하고 1개의 Activity의 공사비는 전체의 20% 이하로 하여 실제적인 공정검토가

가능 하도록 구체적으로 작성할 것

2) 예정공정표는 CPM/Net Work 기법으로 설계원도 및 청사진에 작성하고, A3 규격

으로 축소하여 제출한다.

아. 지장물 조서 및 인․허가 도서 작성

1) 지장물조서 작성 : 지장물은 발주처와 협의하여 그 범위 등을 결정 조사한다.

2) 관계 법규 인․허가 도서 작성 : 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 신청용

설계도서를 작성한다.

4. 성과품의 납품

가. 기본설계(건축, 기계, 소방, 전기, 통신설비 포함)

구 분	내 용	수 량
기본도서 (건축, 기계, 소방, 전기, 통신설비 포함)	○ 설계설명서 ○ 배치도, 평면도, 입면도, 단면도(종․횡), 상세도 ○ 구조계획서 ○ 현황도 (기존 부지, 도시계획 포함) ○ 재료 마감표 ○ 설비계획도 (기계, 소방, 전기, 통신설비 등) ○ 우․오수 배수처리계획도 ○ 지질조사 보고서 ○ 법규검토서	5부 (합본)

나. 실시설계(기계, 소방, 전기, 통신설비 포함)

순번	품 목	규 격	원 본	부 본	비 고
1	설계도면 (A3 반접이)	A3	1부	4부
2	설계설명서	A4	1부	4부
3	공정표	A4	1부	4부
4	각 시방서	A4	각1부	각4부
5	각종 계산서 ［조도 및 부하계산서, 장비 및 부하계산서, 구조계산서 등］	A4	각1부	각4부
6	공사비 내역서 ［원가계산서, 일위대가표, 견적서, 단가 적용조사서 등 포함］	A4	1부	4부
7	주요자재 사용계획서	A4	1부	4부
8	물량산출서	A4	각 1부	4부
9	성과품 내용 담긴 USB제작 제출 (CAD파일 및 PDF 변환파일제출)		4장		USB 3개
10	건축 조감도 또는 투시도 ［3컷 이상 작성하여야 하며, 전자 그림파일도 별도로 제출필요함. 단, 인쇄본은 1면만 제출］	800×600	1면
11	기타 감독관이 요구하는 자료

※ 발주처에서 요구하는 추가적 규격의 성과품에 대해 수급인은 성실히 납품하여야 한다.

5. 설계도서의 분리작성

건축, 전기, 기계설비, 통신, 소방 등 공종별로 분리하여 발주 단위별로 내역을 작성

하여야 한다.(도면, 내역서, 일위대가표, 수량산출기초 등)

단, 발주단위에 대하여는 발주처와 협의하여 결정하여야 한다.

6. 설계도서 표기

가. 설계도서에 사용하는 언어 및 문자는 기술용역계약 일반조건 제5조(사용언어)에

의한다.

나. 약어(Abbreviation)를 사용하는 경우에는 설계도면에서 1~2회 나타나는 것은 원어

사용을 원칙으로 하며, 약어는 대문자를 사용하며 마침표로 끝나는 것을 원칙으로

한다.

다. 도면표기의 기호문자는 특별한 경우를 제외하고는 다음을 준수한다.

1) 건축도면 : A                       2) 구조도면 : S

3) 토목도면 : C                       4) 조경도면 : L

5) 기계설비도면 : M (기계소방 : MF)     6) 전기도면 : E (전기소방 : EF)

7) 통신도면 : T                       8) 소방도면 : F

라. 설계 도면을 작성함에 있어서 각종 상세도면을 충분히 작성하여 수량 산출 및

시공이 용이 하도록 하여야 한다.

1) 각부 치수 및 사용자재의 명확한 표기

2) 각종 부착시설물의 표시

3) 건축, 기계설비 등 기타 부대설비 관련 공사와 관련하여 명확한 구분 표시

4) 특수공법인 경우 시공방식을 이해할 수 있도록 설계도서

(상세도, 특기시방서 등)를 작성

5) 국내에서 시행된 바 없는 특수공법인 경우에는 공인기관 기술검토서 첨부

7. 도면 작성

가. 제도용지는 영구보관에 지장이 없는 최상품을 사용한다.

나. 도면규격은 A3 규격을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

다. 도면은 기둥 및 옹벽선과 조적선이 식별 가능하도록 상세하게 표기한다.

라. 건축, 기계설비도면은 발주자의 지시에 따라 동일한 축척으로 표현하여 공종간

대조(Overlapping에 의한 Cross Check)가 가능하도록 하여야 한다.

마. 설계 도면에는 모든 면에 참여기술자가 서명 날인하여야 하며 종결 보고서에는

구체적으로 공종별 참여기술자의 성명, 담당업무, 기술자격, 참여기간 등을 구체적

으로 명시하여야 한다.

※「건설기술진흥법 시행규칙」제43조(설계도서 작성 참여 기술인의 업무 수행내역 기록)에 의거 설계 등 용역업자는 최종용역보고서 및 설계도면에 참여건설기술자의 성명·담당업무·참여기간 등을 구체적으로 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인한 후 날인하도록 하여야 한다.

제5장 설계도서 작성요령

1. 일반사항

1) 중간설계를 기초로 하여 작성하되 설계지침서 및 수정․ 보완 지시서에 따라 작성

한다.

2) 축척에 의거 정확히 도시하고 규격, 용량 등을 모두 기록한다.

3) 설계도서 작성기준에 맞게 작성하며 분야별로 수량 및 공사비를 세밀하게 산정

하여야 한다.

2. 설계서 구성

가. 건 축

1) 설계 설명서

- 공사개요 : 위치, 대지면적, 공사기간, 설계금액 등

- 설계개요 : 지역, 지구, 구조, 규모, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적률,  주차

면적, 조경면적, 최고높이, 층고, 층별 면적, 각층 주용도 등

- 사전조사사항 : 지반고, 지질, 강우량, 동결심도, 바람, 상하수도, 도로 상황 등

사전 조사 내용을 바탕으로 설계내용에 반영

- 세부 시공방법             - 공사비 산정(공종별 물량 및 공사비) 요약

- 건물의 색채사용계획       - 공정계획(공정표 포함)

- 기타 필요한 사항

2) 구조 계획서

- 설계 근거기준                      - 구조재료의 성질 및 특성

- 제반 하중조건에 대한 분석          - 각부 구조계획

- 구조성능 : 단열, 내화, 차음, 진동 등

- 구조계산서

3) 시방서

- 당해 공사에 필요한 일반 및 특기 시방서

- 특기 시방서에는 자재의 물성, 시험방법, 시공순서 등이 모두 기술

4) 도면 종류

- 부근 안내도 : 방위, 도로 및 목표가 되는 지물 등

- 투시도 : 천연색채 사용

- 도면 목록표

- 배치도 : 축척, 방위, 대지가 면하는 도로의 위치와 폭, 대지 및 도로 경계선

에서 건축물까지의 거리, 담, 옹벽, 정화조, 배수시설,  건축물 부수

시설의 위치, 레벨표시의 기준이 되는 Bench Mark 기타 시공에 필요한

사항

- 부분 배치도 : 상기 배치도를 구체적으로 표시

- 주차장 평면도 : 주차장 배치 평면, 도로 및 출입구의 위치, 폭 등

- 구적도

- 건축면적 산출표

- 내․외부 마감표 : 바닥, 천정, 내벽, 외벽, 지붕 등

- 각층 평면도, 단위 평면도

- 각층 천장 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 지붕 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 입면도(4면) : 시공에 필요한 사항 일체

- 주단면도 : 구조를 파악하기 용이한 위치에서 종횡 2면 이상 표기

- 주 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각실 단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 계단 평․단면상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 샷다, 핏트, 발코니 등 부분 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 창호일람표, 각층 창호평면도, 창호상세도

- 각부 구조배근상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각부 구조단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 구조부재 접합상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각층 기둥․보 위치 및 일람표 : 시공에 필요한 사항 일체

- 부착시설물 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 건물 색채사용계획 도면 기타 필요한 도면

- 기타 시공에 필요한 사항 일체

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료 등

나. 기계설비

1) 설계 설명서

냉·난방시스템 및 기타 설비별 개요와 공사비 및 에너지 절약 측면에서 초기

투자와 유지관리비와의 세부비교 검토내용, 간단한 운전요령서 등

2) 시방서 : 당해공사에 필요한 특기사항 및 일반사항을 상세히 작성

3) 설계 계산서 : 부하계산서, 장비 용량계산서, 관경계산서(위생, 오․배수), 공조장비

선정서(습공기선도에 공기상태 표기), 필요시 견적서 등

4) 도면 종류

- 건축 주요 부분 평면도, 단면도

- 범례

- 도면목록표, 계통도

- 기계기구 및 장비일람표(수량, 용량, 시방서 기타 필요한 사항)

- 배치도 : 옥외 평면(정화조, 공동구 등 전체 배치도)

- 계통도 : 공조, 덕트, 위생, 소화, 자동제어, 연도, 기타 설비 세부계통도

- 평면도 : 각종 설비평면도, 기계실 확대평면도, 정화조평면도

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체(엘리베이터 건축단면도 포함)

- 옥외 공동구 : 관로 및 각종설비 평면도 단면도(확대도면 포함)

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 산출근거, 내역서, 일위대가표, 가격조사자료, 견적서 등

다. 전 기

1) 설계 설명서

- 전기설비 개요 : 각 설비(전력, 통신, 소방, 약전, TV 공청 기타 설비 등)에

대한 설명

- 수변전 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 인입, 변전실의 배치, 결선도

등에 대한 경제성 및 안전성의 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준, 시설물 등에 대한 설명

- 에너지 절감 및 유지관리에 관한 고려사항, 인입방식 및 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

- 각종 계산에 적용한 계산기준 공식, 적용한 상수 등에 대한 채택 근거서

- 조도계산서, 부하계산서, 수배전 설비용량 계산서

- 전력간선계산서(전압강하 계산서 포함), 발전기 용량계산서,

- 수변전 장비에 따른 변압기 용량계산서, 차단기 용량계산서, 케이블트레이

및 덕트 규격 계산서

3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격 사용방법, 제작기준 등에 대해 설명

한다. 단, KS 등은 해당규격의 번호로 표시가능

- 특기시방서 : 도면에 표시하기 힘든 내용의 각종 기기의 설치기준, 설치방법,

주의사항 등을 명기한다. 단, 필요할 때에는 일반적인 내용과

특별한 내용을 분리하여 작성할 수 있다.

4) 도면 종류

- 도면목록표, 현장 안내도

- 범례 특기사항 : 사용될 기호 및 시공상 유의할 특기사항

- 배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외에 설치되는 시설물의 위치평면도 및 전기기기 정격상세도 등

- 옥외간선도 : 전력통신설비, 방재설비 및 필요설비의 옥외간선 평면도, 제반

간선의 정격설치 방법, 설치상세도 등

- 수변전 설비도 : 수변전설비의 평면도(결선 포함), 단면도, 구조물도, 입면도

및 발전기, 기타 상세도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 필요한 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함),

가격조사자료 등

라. 정보통신

1) 설계 설명서

- 통신설비개요 : 각 설비(통신, 방송, A/V, CCTV, MATV, CATV 기타 설비)

대한 설명

- 교환설비 설비도와 결선도 등에 대한 채택 설명 : 국선인입, 통신실의 배치,

결선도 등에 대한 경제성 및 안전성의 검토사항을 포함한다.

- 본 설계에 적용된 특수한 공법, 기준 시설물 등에 대한 설명

- 에너지 절감 및 유지관리, 정전대비 방안 등에 관한 고려사항

- 국선 및 CATV 인입방식과 인입지점에 대한 설명

2) 계산서

- 회선용량계산서, 전계강도계산서, 교환기용량계산서

- DVR 용량계산서

3) 시방서

- 자재시방서 : 각종 기자재의 특성, 정격사용 방법, 제작기준 등에 대해 설명

한다. 단, KS 등 제규격에 맞는 제품은 해당규격의 번호 등으로

표시할 수 있다.

4) 도면 종류

- 현장 안내도(건축개요, 마감표 등)

- 범 례 : 사용될 기호

- 배치도 : 각 건축물, 시설물의 배치 및 위치 평면도

- 옥외간선도 : 통신설비 및 필요설비의 옥외 간선평면도, 국선인입지점

및 경로, 통신설비의 연결지점 및 단자 또는 구내설비와의

연결방법 표시

- 통신장비 설치도 : 각종 기기의 배치계획도

- 각종 설비의 계통도 : 전화, LAN, CATV, CCTV, MATV, 통신 및 기타 설비의

계통도

- 각종 설비의 배치도 : 통신실, EPS(TPS)실, 교환기, 전관방송, A/V, MATV 등

통신설비 및 기타 필요 설비의 배치도

- 각종 설비의 계통도 : 시공에 필요한 사항 일체(블럭다이어그램 포함)

- 각종 설비의 배치도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 설비의 결선도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 각종 기기의 상세도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 평면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 단면도 : 시공에 필요한 사항 일체

- 기타 실시설계의 기준이 되는 도면

5) 공사비 산출서 : 수량 및 공량 산출근거, 내역서, 일위대가표(분전반 포함),

가격조사자료 등

(별지 1)

착 수 신 고 서

1. 용    역    명  :

2. 계    약    액  :

3. 계 약 연 월 일  :      년    월    일

4. 착 수 연 월 일  :      년    월    일

5. 완  료  기  한  :      년    월    일

6. 첨  부  서  류  : 착수 서류 각 1부.

상기와 같이 착수하였기에 「지방자치단체용역계약 일반조건」 따라 착수 신고서를 제출합니다.

년    월    일

주    소

회 사 명

대표성명                     인

강원특별자치도지사  귀하

(별지 2)

책임기술자 지명 신고서

1. 용  역  명  :

2. 계 약 금 액 :

3. 계약 연월일 :      년    월    일

4. 용 역 기 간 :      년    월    일부터 년    월    일까지(    일간)

5. 책임 기술자

가. 성    명 :

나. 생년월일 :

다. 주    소 :

라. 기술자 면허 종류 :

마. 기술자 면허 번호 :

위와 같이 책임기술자를 지명 위 용역사업에 대하여 계약 문서와 용역감독관의 감독 또는 지시에 따라 우리회사를 대표하여 용역사업에 관한 모든 사항을 처리하며, 이에 책임기술자 지명 신고서를 제출합니다.

붙임 :  1. 건설기술자 경력증명서(건설기술인협회 발행)

2. 국가기술자격증 사본

3. 기술자 보유 증명서(건설기술인협회 발행)

년      월      일

주    소

회 사 명

대표성명                       인

강원특별자치도지사  귀하

(별지 3)

분야별 참여기술자 명단
계약자		회사명 :
		업 종 :				면허번호 또는 등록번호 :
		대표자 : (인)				법인등록번호(또는 사업자등록번호) :
		주소 : (전화 : )
참여 사업		사업명 :
		용역기간 :
		발주청 :
		공사(용역)개요
		공사(용역)금액 : (원)
기술경력
연번	성명		주민등록번호	참여기간	직무 분야		전문 분야	공사 종류	담당 업무	직위	공법	서명또는 (인)
1
2
3
4
5
위와 같이 본 용역사업에 대한 참여 기술자 명단을 제출합니다.
년 월 일장 귀하
※첨부서류 1. 재직증명서 2. 경력증명서 3. 기술자별 국가기술 자격증 사본

(별지 4)

보 안 각 서

1. 용  역  명  :

2. 계 약 금 액 :

3. 계약 연월일 :      년    월    일

4. 용 역 기 간 :      년    월    일부터 년    월    일까지(    일간)

본인은 위 용역을 시행함에 있어 보안업무 관련규정을 준수하여 보안상의 제반조치를 이행함은 물론 업무상 인지한 사실을 납품 후에도 누설치 않을 뿐만 아니라, 본 용역을 위하여 종사하는 모든 고용인에 대하여도 위 사항을 준수하도록 필요한 조치를 취할 것이며, 만일 위 사항을 위반하였을 때에는 어떠한 처벌도 감수 할 것을 이에 각서를 제출합니다.

덧붙임 : 보안각서 대상자 명부

20  년    월    일

주    소 :

상    호 :

대표이사 :

주민등록번호 :

강원특별자치도지사  귀하

보안각서 대상자 명부

1. 건    명 :

2. 용역기간 :      년    월    일부터 년    월    일

3. 대상자명단

분야	소속회사명	직 책	성 명	서명	기술자격 종목	연락처
건축	oo 설계사무소	건축사
		건축사
		건축사보

20  년    월    일

(별지 5)

청렴 용역 이행각서

용 역 명 :  ---------------용역

용역기간 : 20-- . -- . --  - 20-- . -- . -- .

본인은 ----------------용역과 관련하여 담당 용역 감독관에게 향응이나, 금품을 제공하지 않을 것이며, 만약 감독관으로부터 향응이나 금품을 요구 받았을 시 관련자를 도 감사실로 고발할 것이며, 이를 어길 경우 어떠한 처벌도 감수할 것임을 서약합니다.

20-- 년 -- 월 -- 일

서약자  회  사  명 : ---------

책임기술자 :  ----- (인)

강원특별자치도지사  귀하

(별지 6)

납 품 검 수 원

용역감독자 경유             (인)

1. 용  역   명 :              용역

2. 계 약 금 액 :

3. 계약 년월일 :      .    .    .

4. 착수 년월일 :      .    .    .

5. 납 품 기 한 :      .    .    .

6. 실지납품년월일 :      .    .    .

7. 첨 부 서 류 : 납품 목록

위 용역의 도급 시행에 있어서 용역 전반에 걸쳐 설계용역과업지시서 및 관련 제반 법규, 설계 기준에 따라 어김없이 납품하였음을 확인하오며 만약 공사의 시공· 감독 및 검사에 관하여 설계 하자가 발견 시는 즉시 실액변상 또는 설계 변경 수행할 것을 서약하고 이에 납품검수원을 제출합니다.

20 년  00 월 00 일

주   소 :

상   호 :

성   명 :            (인)

강원특별자치도지사  귀 하

(별지 7)

용역 납품 목록

1. 용 역 명 :

2. 납품목록

품 명	명 칭	규 격	단위	납품부수	비 고