- 태백소방서 신축 - 설 계 공 모 지 침 서

2024. 9.

강원특별자치도

Ⅰ. 설계공모 규정

1. 공모 개요

1.1 공모 목적

본 설계공모의 목적은 청사 노후 및 소방력(인원, 장비)증가에 따른 수용 공간 적정 확보와 이용자 근무 여건 개선으로 최적의 소방서비스를 제공하고자 함에 목적이 있다.

1.2 사업개요

구 분		내 용
사 업 명 칭		태백소방서 청사신축
대 지 위 치		강원도 태백시 황지동 212-1, 621-209
시행 및 주관기관		강원특별자치도 (소방본부)
주 요 용 도		공공업무시설(소방서)
대 지 면 적		3,399㎡
건 축 규 모		연면적 3.650㎡ (±3% 내외)
건폐율 / 용적률		법적기준이하 ( 제2종일반주거지역 기준 : 법정 60% / 250%)
규모	층 수	지상 4층 이내
	주 차 장	법정주차대수 이상 확보
추정 공사비		12,498,000,000원
예정 사업기간		2024년 01월 ~ 2026년 12월 (36개월 간)
설계비		594,690,000원 (인증비용포함)
설계기간		270일 (기본설계 60일, 실시설계 210일)
과업 주요내용		- 기본 및 실시설계(건축, 토목, 인테리어, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등 포함) 기타 본 과업에 필요한 제반사항 각종 인증관련 업무포함 (수수료별도비용) 제로에너지건축물인증 (5등급이상) / 건축물에너지효율등급 인증 (1++등급이상) / 녹색인증 (그린등급이상) 포함 BF인증 (우수) / 지반조사 / 기존 건축물 철거는 별도

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 이에 따른 설계용역비는 동일 기준에 의해 재산정한다.

※ 추정 공사비 초과 불가, 추정공사비 내 설계 (향후 실행공사비 동일)

※ 추정 공사비는 부가세 등 포함으로 건축(필로티포함), 토목, 인테리어, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등을 포함한 금액임

※ 예정 설계비는 기본 및 실시설계비, 각종 접수 수수료, 건축협의, 부가세 기타 발주처가 필요시 요구하는 각종 자료 등에 대한 용역비 포함

- 제로에너지건축물인증 (5등급) / 건축물에너지효율등급 인증 (1++등급이상) / 녹색인증(그린이상) 포함

- BF예비인증에 소요되는 비용은 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준 (2020-635호)에 따라 추후 실비정액가산식으로 산정하여 설계비 포함 예정임

- 각종 인증 심사 수수료는 강원특별자치도 소방본부에서 부담

∘ 시행□주관기관 : 강원특별자치도 소방본부

∘ 공모 홈페이지 : https://fire.gwd.go.kr/fire (참여/알림마당-입찰공고)

∘ 공모 담당자 : 강원특별자치도 소방본부 소방장비회계과 (efu1627@korea.kr. 033-249-5123)

※ 참가등록 후 등록된 이메일로 변경사항에 관련된 공지가 진행되나 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

1.3 사업대상지

태백시 황지동 212-2 : 건축물 배치가능

태백시 황지동 621-209 : 건축물 배치불가 (조경 및 주차가능)

2. 공모 일정 및 방법

2.1 설계공모 방식 : 제안공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조 및 같은법 시행령 제17조, 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 04. 01.)에 따라 ‘제안공모’로 시행한다.

“제안공모”라 함은 설계자의 경험 및 역량, 수행계획 및 방법 등을 심사하여 건축물 또는 공간환경을 건축하거나 조성하기 위한 설계자를 선정하는 설계 공모방식을 말한다.

2.2 설계공모 일정

구 분		일 시	유의사항
공 고		`24. 9. 30.(월)	홈페이지/나라장터 공고
응모신청		`24. 9. 30.(월)~10. 7.(월) 17:00까지	E-mail 또는 방문 접수
현장설명		미실시(개별 현장 방문 후 서면질의)	신축예정부지(태백소방서 현 청사 부지)
질의접수		`24. 10. 08.(화) 17:00까지	질의서 양식 서면질의(E-mail접수)
질의회신		`24. 10. 11.(금)	홈페이지에 게재
작품접수		‘24. 11. 4.(월) 17:00까지	장소 : 강원특별자치도청 신관1층 소방장비회계과
심 사	사전검토	‘24. 11. 7.(목) ~ 11. 11.(월)	심사위원에 본심사 5일전 공모제안서 제공
	작품심사	‘24. 11. 13.(수)	장소 : 강원특별자치도청 신관3층 소방본부 전략회의실
심사결과 발표		‘24. 11. 18.(월)
계약체결		‘24. 12월 중	보상급사항 홈페이지 별도 공지

※ 단, 상기 일정 및 장소 변경 시 강원특별자치도 소방본부 홈페이지 공지

2.3 참가자격

1. 공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 필한 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

※ 응모신청서 등록일로부터 작품 접수기간까지 해당 관청으로부터 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 입찰참가 제한 등 기타 이와 유사한 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음.

2. 공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 공동응모참가자 및 회사(업체) 모두 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 위의 자격조건을 갖추어야 한다. 다만, 외국 건축사 면허·자격을 취득한 자는 상기 1항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 국내 건축사가 대표자가 되어야 한다.

※ 응모신청서 제출 후에는 공동응모자를 변경할 수 없음

3. 심사위원, 기술위원 혹은 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며 건축기획 업무용역 및 설계공모 관련 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 건축사사무소는 참가할 수 없다.

4. 당선작으로 선정된 업체(당선자)가 설계용역 계약 체결 시 전기, 통신, 소방분야 설계업의 등록업자와 공동도급(분담이행)방식의 공동수급체를 구성하여 발주자와 계약하여야하며, 이때 강원특별자치도 도내 업체와 공동도급을 권장함. (단, 당선자가 분야별 자격요건 충족 시에는 예외)

※ 대표자는 분담이행업체의 해당 업무를 총괄 조정하는 역할을 수행하여야 하며 공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항은 대표자(주계약자)에게 귀속됨.

5. 당선자가 용역 수행과정에서 계약 의무사항을 성실히 이행하지 아니하여 소방본부로부터 행정처분을 받았을 경우 행정처분을 통보받은 날로부터 1년 동안 소방본부에서 시행하는 설계공모에 참여할 수 없다.

* 유자격업체 기준

가) 전기분야 설계:「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을  등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

나) 정보통신분야 설계:「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(정보통신)를 등록한 업체

다) 소방분야 설계:「소방시설공사업법」제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설설계업 등록을 마친 업체

2.4 응모신청

1. 등록일시 : 2024. 09. 30.(월) 09:00 ~ 10. 7.(월) 17:00 까지

2. 접수방법 : E-mail 또는 방문 접수 (우편 또는 팩스 접수 불가, 수신 여부 반드시 확인할 것 )

3. 접수장소 : 방문 시(강원특별자치도 소방본부 소방장비회계과) 메일 접수 시(efu1627@korea.kr)

※ 등록일시 및 E-mail 주소는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 홈페이지에 게재

4. 구비서류

1. 설계공모 참가등록 신청서 1부 [서식 제1호]

2. 설계공모 참여자 명단 [서식 제2호]

3. 서약서 1부 [서식 제3호]

4. 사용인감계 및 인감증명서 각1부 (법인의 경우 법인인감증명서) [서식 제4호]

5. 대표자 선임계 1부 [서식 제5호]

6. 사전접촉 금지서약서 1부 [서식 제6호]

7. 공동응모협정서 1부(공동응모 할 경우에 한함) [서식 제7호]

8. 보안각서 [서식 제8호]

9. 개인정보 수집·이용 동의서 [서식 제9호]

10. 심사위원 기피신청서 1부(필요시) [서식 제10호]

11. 법인등기부등본(법인의 경우) 또는 사업자등록증(개인의 경우) 사본 각 1부

12. 건축사면허증 및 건축사사무소 등록증(또는 업무신고필증) 사본 각 1부

13. 건축사협회 또는 등록관청에서 발급한 건축사 행정처분사실 확인서류(공동응모자 포함) 1부

※ 자격증 등 영문(외국어)으로 작성된 구비서류의 경우 한글로 번역하고 번역공증을 받아 제출

※ 공동응모의 경우에는 1,2호를 제외한 모든 구비서류를 각각 제출

※ 참가등록 자격제한 : 공고일 현재 관계 법령에 따라 등록취소, 영업정지, 자격정지, 휴업 중인

건축사 사무소 또는 건축사

※ 심사위원 기피신청과 관련해서는 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조 바람.

2.5. 현장 설명회

1. 별도로 실시하지 않음 (개별 현장 방문 후 서면 질의)

2.6. 질의접수 및 회신

1. 제출방법 : 질의서(서식 제11호)양식에 의한 서면질의로 E-mail을 통해 제출한다.

2. 질의기간 : 2024. 10. 08.(화) 17:00까지

3. 질의접수 : efu1627@korea.kr

4. 유의사항

가. 질의서 발송 후 수신 여부를 반드시 유선 확인(☎033-249-5123, 소방장비회계과)하여야 하며, 오류 및 미확인 등에 의해 응답할 수 없는 경우에는 답변하지 아니할 수 있다.

나. 질의서는 기간 내에 접수해야 한다.

다. 공정한 공모 진행을 위해 유선 질의는 불가함.

5. 질의회신

가. 질의회신일 : 2024. 10. 11. (금)

나. 회신 방법 : 강원특별자치도 소방본부 홈페이지에 일괄 게재 (참여/알림마당-입찰공고)

다. 유의사항

1) 질의에 대한 답변은 설계 공모 규정 또는 지침에 대한 추가 또는 수정으로 간주하며, 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

2) 메일 전송오류 등으로 내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의 및 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 회신하지 않음.

2.7 공모심사

1. 평가방법

가. 심사는 PT발표 및 질의응답 그리고 토론으로 실시되며 전 과정은 실시간 공개 됨

나. PT발표 10분 + 질의응답 5분으로 진행

1) 일    시 : 2024. 11. 13. (수) 14:00

2) 장    소 : 강원특별자치도청 신관3층 소방본부 전략회의실  ※ 변경 시 홈페이지 등록 및 별도 안내

3) 발 표 자 : 업체 대표 또는 직원 1인 (직원일 경우 재직증명서 지참)

4) 설명내용 : 참가업체가 작품제출 시 제출한 PDF형식 발표 자료로 한정됨

※ 순서는 응모작 접수 당일 접수순서에 따라 제비뽑기로 결정하며, 설명시간은 10분을 기준으로 심사위원회 의결에 따라 조정 가능하다. 단, 제출 작품수가 7개 이상일 경우 원활한 심사를 위해 1차 심사(서면심사)에서 선정된 팀만 2차 심사(인터뷰/PT발표) 기회를 부여한다.

※ 1차 심사 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모심사위원회에 결정에 따르며, 선정 결과에 따른 이의 제기는 일체 불가함.

2.8 제공자료  [설계공모 참가등록자에 한하여 이메일 개별 송부]

1. 설계공모제안서 서식 - hwp   2. 현황실측평면도 – dwg  3. 119안전센터 표준설계 가이드라인 – pdf

4. 119감염관리실 설치에 관한 규정 – pdf  5. 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정 – pdf

2.9 공식 언어 및 계량 단위

1. 설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 아이디어를 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

2. 모든 계량단위는 ‘미터법’을 사용한다.

3. 공모안의 제출 및 작성

3.1. 공모안 제출

1. 제출일시 : 2024. 11. 4. (월) 17:00까지

2. 제출장소 : 강원특별자치도 춘천시 중앙로 1, 도청 신관1층 소방장비회계과

3. 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)  ※ 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류 제출은 불가

4. 제출 도서 및 서류

		제출목록	서식목록
제안공모	①	설계공모 (제안) 제출서 1부	서식 제12호
	②	설계공모제안서 11부 (표지에 “태백소방서” 10부, “제출업체명” 표기 1부)	첨부 1
	③	발표자료 PDF : ③설계설명서와 동일내용으로 순서만 변경 가능	파일명 태백소방서 00 00 : 접수번호
	④	위 1~3 내용을 저장한 USB 1매 (PDF형식)
	⑤	설계공모 참가등록 신청서 접수증	(확인용)
	⑥	위임장/재직증명서 (대리인접수시)	서식 제13호

5. 유의사항

가. 참가자는 설계공모 참가등록 신청서(서식 제1호)를 지참하여 공지된 장소에 인편으로 작품 제출해야 한다.

나. 응모 등록을 하지 않은 자는 작품을 제출할 수 없으며, 작품 수는 응모자별로 1점으로 제한한다.

다. 규정된 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수하지 않는다.

라. 접수한 작품은 일체의 수정, 변경 또는 보완 등을 할 수 없다.

6. 제출물의 익명성

가. 설계설명서 표지의 “인식명칭”에는 “제출업체명”을 공모안 제출 부수 11부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고, 나머지 10부는 “인식명칭”란에 “태백소방서”로 기재하여 제출한다.

나. 익명사용 원칙은 심사위원회 최종 결정 시까지 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음.

1) 심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

2) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료 시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 본 설계공모와 관련하여 심사위원 또는 심사 관련자와 접촉 또는 접촉을 시도할 경우 심사위원회에서 참가업체를 실격시키며 사후에 발견될 경우도 당선 및 수상을 취소할 수 있음

다. 설계설명서의 표지에는 심사 시 사용할 “심사번호 기재란”을 우측상단에 흑색으로 표시하여야 한다.

(별첨 서식에 따라 작성할 것)

라. 참가자의 정보는 심사 결과가 발표되기 전까지 공개되지 않으며, 공정한 심사 평가를 위하여 당선작 선정·발표 시점까지 SNS 등의 매체를 통하여 제출안을 공개하지 않아야 함.

3.2. 설계공모 제안서 작성 공통사항

1. 제출도서는 백색 무광택 백상지를 사용한다.

2. 모든 제출도서의 여백은 상 25㎜, 하 20㎜, 좌우여백은 15㎜로 작성한다.

3. 표지는 태백은하수체로 통일하며, 첨부한 양식에 따른다.

4. 표지를 제외한 제안서 내용부분은 글자체, 글자크기, 줄간격은 제한을 하지 아니한다. 글자 크기는 식별 가능한 크기로 적절하게 조정한다. (글자크기 10미만 사용불허, 영문 소문자 사용 불허).

5. A3횡용지 단면인쇄를 하여 좌측 전부를 스테이플러 후 검정색 테이핑(1cm)하여 제출한다.

6. 페이지표기는 가운데 아래에 표기하며 줄표가 있는 형태를 사용한다. (표지,목차 제외/대표작품부터적용)

7. 모든 설계도서는 제시된 형태나 디자인을 따라야 하며, 특히 제본된 도서의 측면에서 볼 때 아무런 표식이 보이지 않아야 한다.

8. 제출된 제출물은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

9.. 제출 제안서는 심사용과 보관용을 구분, 포장하여 제출한다.

가. 심사용은 제안서 각 10부를 파손되지 않도록 백색포장지로 포장하며, 겉포장에는 제출도서 제목을 기입 후 심사용이라고 표기하고 업체(대표사) 직인을 날인하여 제출한다.

(단, 겉포장 외에 심사용 제안서에는 일체의 업체명 표기(식)이 불가함)

나. 보관용은 제안서(표지에 업체명 표기) 1부와 USB(표지에 업체명 표기) 1매를 함께 포장하되 제안서, USB별로 대표자 날인을 확인할 수 있도록 한다. 또한 겉포장에는 제출도서 제목 및 보관용이라고 표기하여 제출한다.

(단, USB 내 전자파일에는 일체의 업체명 표기(식)이 불가함)

11. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 등을 표기(식)할 수 없다.

12. 설계공모 제안서의 표지는 제공되는 서식을 사용한다.

▮ 그림1  렌더링하지 않은 3차원 이미지 예시 >

출처 : 국가공공건축지원센터, 공공건축 설계발주 가이드(Ver.2), p.22-23 (2018.12.)

3.3. 공모제안서 작성기준

가. 배치도 또는 1층 평면도에는 외부 동선과 내부동선을 함께 파악할 수 있도록 외부와 내부평면을 함께 표기한다.

나. 도면은 배치도, 평면도(저층에서 고층으로), 입면도, 단면도(종, 횡)의 순으로 작성한다.

다. 공모제안서의 구성은 1면 인쇄, 11부, 표지 포함 15쪽으로 한다.

라. 표지/목차를 제외한 각 쪽에는 번호를 넣는다.

<표 1> 제안서 구성 및 작성 순서  ※ 총 15쪽 준수

순서	항 목	세부 사항	매수
1	표지	○ 표지	1쪽
2	목차	○ 배경이미지 불가	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	○ 담당건축사의 대표작품의 포트폴리오 (최근 10년간) - 설계개요, 설계철학과 의도, 주요 도면 및 사진 등 - 2작품 모두 담당건축사가 프로젝트의 대표건축사 또는 책임으로 수행하였음을 증빙하는 서류를 제출하여야 함 - 대표작품부터 쪽번호 시작 - 칼라가능	2쪽
4	조감도	○ 랜더링하지 않은 3차원 이미지 (칼라가능)	1쪽
5	건축개요 및 공간별 면적표	○ 층별 실구성 및 면적표 - 층별 실 구성 및 면적표 제시 (공사비에 영향을 미치는 확장형 발코니, 필로티 등의 면적 표기)	1쪽
6	과제에 대한 제안과 수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도 - 과업의 범위와 내용, 관련계획 및 법령 등의 적용방안, 주요한 고려사항, 발생가능한 문제점과 개선방안 등	1쪽
7		○ 과제에 대한 제안 (칼라가능) - 배치개념도, 평면·입면·단면도, 다이어그램 제시 ※ 설계의 내용과 검토가 가능한 축척을 사용하여 표현(자율)	6쪽
8		○ 수행계획 - 단계별 작업계획 및 작업방법, 과업수행일정표, 과업 수행체계 등	1쪽
9	법규검토서 및 개략공사비	○ 법규 검토서, 개략공사비	1쪽

3.4 설계공모 제안서 작성지침

가. 설계자의 경험 및 역량 부문

1) 담당건축사가 수행한 기본 2개 프로젝트의 포트폴리오(입찰공고일 기준 최근 10년)

2) 설계개요, 철학과 의도 등

3) 프로젝트 및 발주처 익명처리(예시: OOO 설계용역)

※ 포트폴리오는 실제 수행한 프로젝트(본 시설의 용도와 무관)에 한하며, 수행사실여부의 확인은 경력관리수탁기관의 경력증명서 등에 의하며, 허위사실 판명 시 실격 처리

※ 포트폴리오에 수상실적을 표기 할 경우, 공모안 제출 시 증빙자료를 함께 제출하여야 함

※ 공동응모 시에는 대표건축사의 작품으로 함

나. 과제에 대한 제안

1) 과제에 대한 제안에서는 문장과 이미지, 다이어그램, 유사사례의 사진 등이 포함 될 수 있다. 계획의도가 명확히 표현된 배치, 평면, 입면 및 단면 개념도 혹은 다이어그램과 3D 이미지를 제시한다.

2) 3D 이미지 사용은 아래의 기준에 따른다.

가) 3D 모델링 프로그램(예. 스케치업, 라이노, 오토캐드 등)은 사용가능하나 랜더링이나 포토샵등에 의한 이미지 편집은 불가

나) 다이어그램은 스케치업, 라이노, 오토캐드 등에 의해 작성된 단선 다이어그램만 인정되며, 이미지편집(포토샵, 일러스트 등에 의한)은 불가

다. 수행계획 및 방법 부문

1) 총공사비는 건축, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신, 소방 등의 모든 비용을 포함한다.

2) 업무에 대한 이해도

가) 과업의 범위와 내용에 대한 이해와 분석, 문제점 등을 정리한다.

나) 대지와 건물의 기능 분석에 따른 문제점과 해결방안을 제시한다.

다) 사업계획, 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 개선방안을 제시한다.

3) 수행계획 부문

가) 설계 소요 기간 및 행정절차 등을 고려한 설계 일정 제시

나) 건축물의 완성도를 높이며 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정 방안 제시

① 관련 분야 전문가 구성 계획 및 운영방안

② 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협력 계획

③ 설계내용 해석 자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 (“설계의도구현” 업무 관련)

3.5 과제에 대한 제안 작성 세부지침

1) 업무에 대한 이해도 ( 1쪽 )

① 설계의 기본방향 및 주안점을 감안한 실현방안 (최우선과제, 아이디어 등) 제시

② 설계 및 시공, 운영 등에 있어서 발생 가능한 문제점을 지적하고, 개선방안을 제시

③ 기존 청사 부지에 철거 및 신축에 따른 문제점 및 해결방안 제시

2) 과제에 대한 제안 ( 6쪽 )

① 【과제1】 주변사항을 고려한 마스터플랜 및 외부 배치 개념에 대한 설계방향 제시 (1쪽)

- 소방활동 및 훈련에 지장이 없는 합리적인 동선을 고려한 외부 환경을 제시

- 외부공간과의 접근성과 관련하여, 여유있는 외부공간 제시

- 소방차 및 일반 차량의 합리적인 배치 제시

② 【과제2】 사용자 중심의 기능과 편의성을 고려한 공간구성 (3쪽)

- 소방 관련 활동에 전념할 수 있는 합리적인 평면 계획 및 수직 동선 계획

- 실의 용도를 기능별로 제시하여 쾌적한 실내·외 환경 확보 방안 제시 (외부와 연계고려)

- 소방활동 전용 공간 및 외부 방문자 공간을 자연스럽게 분리 할 수 있는 최적화 된 공간 제시

- 업무 활동 이외의 공간에 대한 프라이버시 확보 및 쾌적성 확보 방안 제시

- 장애인 및 이동약자 편의를 고려, 비상시 원활한 피난동선 확보를 고려한 공간 계획 제시

③ 【과제3】 친환경 건축물계획을 포함한 건축물 입단면 설계방향 제시 (2쪽)

- 주변 풍경을 고려한 입면 디자인 제시 (조망)

- 소방서로의 상징성 및 인지성을 고려한 외부 색채계획 제시

- 태양광 및 태양열 설비 등 옥외에 설치되는 신재생에너지 계획시 미관을 고려하여 외부 디자인 제시

- 합리적인 단면 구성 및 패시브 디자인 등 최신 기법을 적극 도입하여 에너지 절감방안, 유지관리의 경제성, 효율성 확보 방안 제시

- 현장출동인원의 대기 및 출동시 합리적으로 이용할 수 있는 단면 계획 제시

3) 수행계획 ( 1쪽 )

① 설계기간 및 설계 업무상 중점사항(수행업무의 범위와 내용) 등을 감안한 설계 일정계획

② 설계의 완성도 및 발주기관의 이해도 향상 등 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정 방법 제시 (관련 분야 전문가 구성 계획 및 운영방안 / 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협력 계획)

③ 설계내용 해석․자문 등 시공과정의 설계자 참여 방안 (「건축서비스산업 진흥법」 제22조 (설계의도 구현) 업무 관련)

4. 심사 및 입상작 선정

4.1 일반사항

1. 설계공모 제안서를 심사위원회 개최 5일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 한다.

2. 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정한다.

4.2 실격기준

1. 「건축 설계공모 운영지침」 제9조(공모안의 제출)에 따라 설계공모 심사에 영향을 미칠 수 있는 다음의 중요한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않은 것으로 설계공모심사위원회에서 의결한 경우

가. 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우(단, 보완이 가능한 것으로 판단되는 경우 제외)

나. 건축규모, 총 공사비, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우(단, 보완이 가능한 것으로 판단되는 경우 제외)

다. 제출도서의 규격을 현격히 위반한 경우

라. 제출도서에 해당 업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

2. 설계공모 참가자가 심사위원을 사전접촉 하거나 설계공모 참가자가 제3자로 하여금 심사위원을 사전접촉하게 한 것으로 확인된 경우(‘사전접촉’은 심사위원 공개시점부터 심사위원회 개최 전까지 정보통신기기를 이용하거나 우편, 방문 등을 통해 심사위원으로 하여금 설계공모 참가자 자신 또는 해당 공모안을 인식하게 하려 한 경우를 말함)

3. 해당 설계공모와 관련하여 설계공모 참가자가 심사위원에게 금품, 향응 등을 제공 또는 제3자로 하여금 이를 제공하게 하거나 부정한 청탁 등을 요청한 것으로 확인된 경우

4. 설계공모 참가자가 공모안 제출 마감일 이후 심사절차의 종료전에 부도, 부정당업자제재, 영업정지 등의 사유가 발생한 것으로 확인된 경우(공동수급체를 구성한 경우에는 대표자에 한함)

5. 설계공모 참가자 간에 서로 상의하여 미리 공모안의 내용 등을 협정하였거나 특정 참가자의 당선을 위해 담합한 것으로 확인된 경우

6. 기존에 공개된 타인 또는 본인의 작품이거나 그와 유사한 경우 심사위원의 합의에 따라 심사 진행과 관계없이 탈락시킬 수 있으며, 사후에 발견되는 경우라도 심사 위원회의 결정에 의해 수상을 취소 할 수 있다.

7. 그밖에 해당 공모안이 심사위원회 의결에 따라 실격으로 결정된 경우

4.3 심사위원회 구성 및 운영

1. 심사위원회의 구성

건축서비스산업 진흥법 제21조 및 같은 법 시행령 제17조, 건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 04. 01.) 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조의4에 준하여 발주기관에서 관련분야 전문가 등 7인의 심사위원으로 구성한다.

2. 심사위원장 선정

가. 심사위원회의 위원장은 심사위원 중에서 호선으로 선출한다.

나. 심사위원장은 회의를 진행하며 심사위원회의 동의를 얻어 공모안의 심사에 필요한 세부적인 사항을 결정할 수 있다.

3. 심사위원장의 권한과 역할

- 심사의 세부적인 방법 및 절차를 토의를 통해 결정한다.

- 부지와 주변 상황, 설계공모 지침서의 내용에 대해 정확히 사전에 이해하고 심사위원회를 주관한다.

- 시전기술검토서를 미리 검토하여 검토의견서를 발주처에 제출한다. 필요시 추가적인 기술검토를 요청 할 수 있다.

- 기술검토서의 판정 내용에 대해 심사위원회 토의를 통해 최종 결정한다.

- 건축물의 기능과 용도에 부합한 공모안을 선정할 수 있도록 심사위원들과 충분한 논의를 통해 결정하고 심사에 반영한다.

- 심사 전 별도의 심사위원회를 소집하여 토론을 주재할 수 있다.

4. 심사위원회 운영 방법

가. 심사위원회는 심사위원 과반수 이상 참석으로 개회한다.

나. 심사위원회의 결정이 필요한 사항은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

5. 심사위원의 제척·기피·회피

가. 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척된다.

① 심사위원이 해당 심의대상 업체에 용역(하도급을 포함한다), 자문, 연구 또는 그 밖의 방법으로 관여한 경우

② 심사위원이 해당 심사대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

③ 최근 3년 이내 해당 심사대상 업체에 임직원으로 재직한 경우(사외이사를 포함한다)

④ 그 밖의 심사대상자와 동업관계에 있거나 심의안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우

나. 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청을 할 수 있다. (심사위원회 개최 3일전 기피신청서 제출)

다. 심사위원은 (가)항 각호에 해당 될 경우 회피신청서를 제출하고 그 안건의 심사에서 회피하여야 한다.

6. 심사위원 명단                                                              * 성명 가나다 순

연번	소 속	성 명	전문분야	비고
1	강원대학교	김민규	건축
2	김용기건축사사무소	김용기	건축
3	가톨릭관동대학교	김주민	건축
4	건축사사무소마루	권용보	건축
5	한라대학교	엄상권	건축
6	에이스건축사사무소	정병거	건축
7	에이앤지정미건축사사무소	조정희	건축

4.4 심사의 절차 및 기준

1. 심사방법

가. 심사는 채점제를 원칙으로 진행한다. 다만, 심사위원회 결정으로 심사 방법을 변경할 수 있다.

나. 발표(PT), 토론, 당선작 선정 등 심사 전과정을 공개하는 것을 원칙으로 하며(심사과정 녹화), 심사위원회의 결정에 의해 부분적 비공개를 할 수도 있다.

다만, 심사위원회의 의결을 통해 발표심사 과정(발표심사 과정 공개 시 먼저 발표하는 자가 불리할 수 있다고 판단되는 경우)과 내부 토의과정은 원활한 심사를 위해서 비공개할 수 있다. (회의 종료 후에는 전 과정을 공개할 수 있음)

다. 심사위원은 토론 시작 전, 사전검토내용 및 발표내용을 기초로 심사방향과 주안점을 공유할 수 있다.

라. 심사위원 간의 충분한 토론을 거쳐 당선작 및 입상작들을 선정한다.

마. 심사위원은 당선작 및 입상작에 대한 작품별 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

바. 심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다.

사. 설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

아. 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정하며, 공정하고 적합한 심사를 위해 필요시 세부평가기준을 별도로 심사위원회에서 정할 수 있고, 배점 기준을 변경할 수 있다.

2. 설계공모 제안서 설명 방법

가. 응모자는 심사위원회에 해당 작품에 대하여 설명한다. 발표순서는 응모작 접수번호 제비뽑기로 결정한다.

나. 발표 내용은 이미 제출한 PDF 파일로 작성된 자료 발표이며, 설명 시간은 작품별 10분, 질의 시간 5분을 원칙으로 진행하되 심사위원회에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다.

다. 발표자는 참가 등록한 업체에 공모공고일 이전부터 재직하고 작품계획에 참여한 설계자(설계공모관련 용역책임자 등 실무자 권장)에 한하며, 발표당일 재직기간이 명기된 재직증명서를 제출하여야 한다.

라. 발표내용은 타 작품과의 비교설명을 금지한다.

※ 참고사항

① 발표자는 심사 당일 발주 기관의 별도 공지 시간까지 지정된 장소에 참석하여야 하며, 미참석시 작품설명 대상에서 제외한다.

② 발표자가 타 작품과의 비교설명, 시간초과 등 공정한 발표에 지장을 줄 수 있는 행위 시 심사위원장은 즉시 발표를 중지시킬 수 있다.

③ 질의응답을 위한 답변자는 2명(주관사 1인, 공동응모자 1인 반드시 참석)으로 제한한다.

3. 작품평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준

평 가 항 목		배 점 (100점)	평 가 방 법
설계자의 경험 및 역량 (30)	담당건축사의 경력	10	발주기관 평가 후 심사위원회의 의결
	담당건축사의 유사프로젝트 실적	10
	담당건축사의 대표작품 포트폴리오	10	심사위원회의 심사 및 의결
수행계획 및 방법 (70)	업무에 대한 이해도	10
	과제에 대한 제안	45
	수 행 계 획	10
	제안서 발표 및 면접	5

나. 세부 평가기준

【발주기관 평가】 경력 및 유사프로젝트 실적부문 (20점)

평 가 항 목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

20

담당건축사의

경      력

10

∙ 담당건축사의 경력 (건축사자격취득일 이후만 인정)

5년 이상	4년이상	3년 이상	2년이상	1년 이상	1년 미만
10	9	8	7	6	5

담당건축사의

유사 프로젝트

실      적

10

∙ 유사 프로젝트 실적

2건 이상	1건	0건
10	9	8

※ 건축 설계용역(공공업무시설, 문화 및 집회시설, 노유자시설 신축에 한함)으로, 공고일 기준 최근 10년 내 국가, 지방자치단체, 공공기관에서 발주한 단일(완료) 실적

※ 공동응모의 경우 대표사만 평가함

※ 실적관리 수탁기관(대한건축사협회) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류 제출

【심사위원회 평가】 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 및 수행계획 및 방법 (80점)

평 가 항 목

배 점

세 부 평 가 기 준

계

80

담당건축사의

대표작품

포트폴리오

10

∙ 설계의 작품성, 창의성 등

A	B	C	D	E
10	9	8	7	6

※ 담당건축사의 유사 프로젝트 실적 중 1작품 제출

업무에 대한

이해도

10

∙ 업무내용 및 추진배경 등에 대한 이해도

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

45

(과제1: 15)

(과제2: 15)

(과제3: 15)

∙ 제안의 적절성, 독창성, 실현성 등 (과제당 점수를 합산)

A	B	C	D	E
15	12	9	6	3

수 행 계 획

10

∙ 공정계획의 타당성, 과업수행체계의 적절성 등

A	B	C	D	E
10	8	6	4	2

제안서 발표

및 면접

5

∙ 추진의지의 적극성 등

A	B	C	D	E
5	4	3	2	1

※ 공모 제출자 수에 따른 평가등급 배분 안 (채점제 적용 시)

심 사 대상수	등 급					심 사 대상수	등 급
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
2	1	1	-	-	-	11	1	2	5	2	1
3	1	1	1	-	-	12	1	3	5	2	1
4	1	1	1	1	-	13	1	3	5	3	1
5	1	1	2	1	-	14	1	3	6	3	1
6	1	1	2	1	1	15	2	3	6	3	1
7	1	1	3	1	1	16	2	3	6	3	2
8	1	2	3	1	1	17	2	3	7	3	2
9	1	2	3	2	1	18	2	4	7	3	2
10	1	2	4	2	1	19	2	4	7	4	2

다. 심사 시 가점 및 감점기준

1) 지역업체 참여비율에 따른 가점기준

내 용	가점기준	가점	비 고
∙ 도내 업체 단독 또는 도내 업체와 공동응모 시 참여지분율	49% 이상	5점
	40%이상 49%미만	4점
	40%미만	2점

2) 감점기준

위 반 내 용	감점기준	감점한도	비 고
∙ 제안서 작성 일반사항	항목당 0.2점	2점
∙ 제안서 구성 및 작성방법	초과시 쪽 당 0.2점	2점
∙ 제안서 작성 시 유의사항	항목당 0.2점	2점
∙ 제출부수 부족 시	부 당 0.2점	2점

5. 당선작 및 입상작 선정

5.1 당선작 및 입상작 구분

1. 당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같다.

[보상 예산 15,000천 원]

결 과	구 분		지 침	보 상
	참가업체 수	보상대상 수
입상작	2개 이하	1	보상 예산의 1/ 3	5,000천 원
	3개	2	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10	6,000천 원 4,500천 원
	4개	3	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10	6,000천 원 4,500천 원 3,000천 원
	5개 이상	4	보상 예산의 4/10 보상 예산의 3/10 보상 예산의 2/10 보상 예산의 1/10	6,000천 원 4,500천 원 3,000천 원 1,500천 원

※ 설계의도구현권에 대한 비용은 추후 계약 시 정한다.

2. 1등 당선자는 발주기관과 설계계약 체결의 설계권과 설계의도구현권을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

3. 보상금은 1등 당선자를 제외한 각 입상자에게 차등 지급된다.

4. 발주기관은 다음과 같은 경우 1등 당선자를 차순위자에게 협상권을 부여할 수 있다. 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 한다.

가. 당선자가 설계권을 포기한 경우

나. 당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

다. 당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

라. 소정의 기한 내(계약요구일부터 14일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주처가 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

5. 심사 결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

6. 심사위원장은 심사위원회 동의를 얻어 입상작의 순위 및 세부적인 사항을 별도로 정할 수 있다.

5.2 당선작 및 입상작 발표 및 시상식

1. 심사위원회의 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 홈페이지를 통해 발표한다.

2. 입상작에 대한 시상식은 추후 발주처가 지정한 날짜와 장소에서 시행한다. (필요시)

5.3 당선작 및 입상작 사용권 및 저작권

1. 당선작 및 입상작에 대한 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반 사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

2. 다만 발주처가 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

3. 참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

6. 계약에 관한 사항

6.1 일반사항

1. 계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

2. 발주처의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

3. 당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법령을 준수하여야 한다.

4. 발주처는 당선작품에 대한 설계용역 과정에서 수정을 요구할 수 있으며, 계약자는 그 요구가 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 이를 수용하여야 한다.

5. 당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

6.2 계약의 당사자 조건

1. 당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

2. 당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

6.3 당선작 설계자의 의무

1. 당선자는 심사위원회의 보완 요구사항과 발주기관의 요구사항으로 설계변경 등이 필요한 경우 계획하여, 중간 및 실시설계에 이를 반영하여야 한다.

2. 당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

3. 당선자는 본 사업과 관련된 업무 수행 시 발주처의 요청에 대한 각종 자료를 작성․제출하는 등 업무수행에 적극 협조하여야 한다.

4. 당선자는 계약 후 설계용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의 등 필요한 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주처가 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무수행에 협조하여야 한다.

5. 당선자는 각종 인증업무를 수행해야 하며 접수 수수료 및 용역비는 설계비에 포함되어 있다.

※ 각종 인증 심사 수수료는 발주처에서 부담

7. 기타사항

7.1 규정의 준수

1. 참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며, 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

2. 기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(제2023-180호, 2023. 4. 1.)을 준용한다.

3. 당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

7.2 작품의 반환 및 처리

1. 당선작은 반환하지 아니한다.

2. 당선작 이외의 도판 반환 일정은 추후 홈페이지에 게시하며, 참가자가 미회수한 작품은 임의로 처분한다.

7.3. 기타 기준

1. 본 설계공모는 2개 이상의 업체가 응모하여야 성립되며, 응모자가 2개 업체 미만인 경우 재공고한다.

2. 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주기관의 결정에 따라 진행된다.

3. 기타 입상작을 선정하기 곤란하다고 판단될 경우 발주기관은 설계공모 진행여부 및 공모방식 등에 대해 달리 정할 수 있다.

4. 응모자는 설계공모에 응모함으로써 이 지침서의 내용을 숙지하고 인정한 것으로 간주한다.

5. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관 및 응모자 간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 한다.

Ⅱ. 건축설계 지침

1. 사업의 배경/목적 및 부지현황

1.1 사업의 배경

1. 현 태백소방서 건물은 38년 경과된 노후건축물로서 사무공간, 차고 협로, 지진재난에 대비한 내진보강이 필요하고, 지속적으로 증가하는 소방수요에 대응하고 노후청사의 기능·구조 개선 및 주변과 조화되는 디자인 강화 등 안전하고 쾌적한 청사 건립이 필요함

1.2 사업의 목적

1. 청사 노후 및 조직개편에 따른 수용 공간 적정 확보와 이용자 근무 여건 개선으로 증가되는 소방수요에 최적의 소방서비스를 제공하고자 함

2. 공공적 가치를 구현하고, 적정한 수준의 품격을 갖추며, 합리적 기준에 맞는 환경 조성

1.3 사업부지 현황

1. 대상지 위치 : 강원도 태백시 황지동 212-1, 621-209

건립예정지 (동측)	건립예정지 (서측)

2. 대상지 토지현황

지번	지목	면적(기존)	소유자
태백시 황지동 212-1	대	3,027 ㎡	태백시
태백시 황지동 621-209	잡	372 ㎡	태백시
합 계		3,399㎡	-

3. 토지이용계획확인원

4. 대상부지내 건물배치 가능영역 (212-1 건물배치가능 / 621-209 건물배치불가 조경 및 주차가능)

* 계획부지내 건물배치 가능영역에만 건축배치가능하며, 건물배치 불가 부분에는 주차장 및 외부 조경가능

2. 계획의 기본방향

2.1 기본계획

가. 공공청사로서 소방관서의 고유기능 외에도 주변 지역주민과 시민들에게 친근한 이미지를 나타내도록 계획한다.

나. 주변 환경과 조화된 배치계획, 건물의 특성 및 주변 경관을 고려한 입면계획, 시설 이용에 편리한 평면계획 등 기능성, 상징성, 예술성을 고려하되, 기존 소방서와 차별화된 창의적인 공간을 제시한다.

다. 119안전센터 및 구조대(외근)는 24시간 대기와 출동에 용이하도록 하고 소방서 본서(내근)는 행정사무 기능이 최대한 발휘 될 수 있도록 혼합된 건축물로 계획한다.

라. 내근과 외근 각각의 역할과 기능을 충분히 파악하고 계획에 반영하여 조직별 기능을 만족하여야 한다.

마. 119안전센터 및 구조대의 24시간 근무형태를 고려하여 직원의 쾌적한 근무환경을 조성한다.

바. 유지관리 측면을 충분히 고려하여 시설물 완공 후 과다한 유지관리비의 부담 등이 없도록 설계한다.

사. 사업부지 주변은 철도가 지나가는 철도보호지구에 위치함에 따라 관련 법령에 근거하여 인허가시 지장이 없도록 설계하여야 한다.

아. 소방서의 차고 바닥뿐만 아니라 출동이 빈번한 진출․입 동선, 정비를 위해 사용되는 옥외공간 등도 고하중 차량에 의해 지반침하가 일어날 수 있으므로 이를 고려하여 지반개량 계획범위를 정한다.

자. 추후 북쪽 부지로의 확장성을 고려하여 설계한다.

차. 총공사비는 부가가치세를 포함하여 계획해야 하며, 반드시 분야별․공종별 공사비 등을 구체적으로 산정하여 총공사비가 초과되지 않도록 확인한 후 작품을 제출하여야 한다.

2.2 배치 및 동선계획

가. 소방차량의 진·출입은 동측으로 접한 도로(태백로) 방향으로 하며, 청사 내 차고 또한 남향으로 배치하여 즉각적인 출동이 가능하도록 한다.

나. 부지 내 청사 배치, 청사 내 동선계획은 소방대원들의 긴급출동 및 복귀를 최우선으로 고려한다.

다. 소방차량의 출동 동선을 고려하여야 하며, 출동뿐 아니라 귀소 시 차량 회전반경을 면밀히 검토하여 회차 및 주차방법을 출입구 계획에 반영하고, 보행자와 차량의 안전을 확보한다.

라. 부지 내 차량동선은 긴급(출동)차량과 일반차량의 동선(영역)을 분리하여 계획한다.

마. 안전센터 사무실 및 구조대는 민원인 응대와 원활한 출동을 위하여 1층에 둔다.

바. 직원들이 긴급출동 시 최단거리 출동으로 골든타임을 확보할 수 있도록  소방차고–사무실(안전센터, 구조대)–대기실–계단의 동선을 합리적으로 설계하고, 출동대원이 식사 및 운동·휴게 시에도 신속한 출동이 가능하도록 동선을 계획한다.

사. 계단 및 승강기는 청사 내 동선의 효율성이 극대화되도록 설계·배치한다.

아. 민원인 및 외부인이 방문하는 공간은 직원들과의 동선을 분리하여 최대한 간섭되지 않도록 한다.

자. 차량 진출입은 전면 25m, 보행자 진출입은 전/후면에서 가눙함

(단, 건물배치를 고려하여 후면 차량 진입 제안 가능)

2.3 공간 및 시설계획

가. 연면적은 ±3％, 실별 면적은 ±3％ 범위 내 증감이 가능

나. 제한된 법령과 건축한계를 준수하고 설계지침을 충족하는 조건 내에서 배치를 자유롭게 설계한다.

다. 근무자의 쾌적한 근무 환경을 배려하고 내․외부 공간과 유기적으로 연계될 수 있는 적절한 휴게 공간(심신안정실, 체력단련실, 휴게실 등)을 계획하여야 한다.

※ 옥상 및 테라스 등 옥외공간을 활용한 외부 휴게공간 연계 고려

라. 외부공간은 일정 규모 이상의 훈련공간, 주차공간, 조경공간, 휴게공간 등을 고려하여 효율적인 활용계획을 수립한다.

마. 지상조경, 옥상조경을 효율적으로 배치하여 야외 휴게공간을 조성한다. (태백지역 대표수종 반영)

2.4 주차장 및 외부 훈련공간 계획

가. 주차장은 법정 주차면수 이상을 계획한다.

나. 주차장은 야외 자주식 주차장 운영을 기본으로 한다.

다. 훈련공간은 고가차 1대와 펌프차 1대가 동시에 주차될 수 있는 공간이어야 한다.

※ 소방차고와 인접하여 소방차량을 정비하고 조작 및 훈련 가능한 공간을 확보한다

(소방차량을 온전히 주차할 수 있도록 전장과 여유폭 고려).

라. 필요시 주차장을 훈련공간으로 추가 활용할 수 있도록 서로 인접 배치하고, 소방차량이 차고 또는 외부 출입로를 통하여 주차장 및 훈련장으로 진출․입 가능하도록 계획한다.

2.5 세부지침

- 소방서 내부 시설에 대한, 특히 현장 출동 부서의 청사영역 개념은 소방청, 국립소방연구원 배포 「119안전센터 표준설계 가이드라인」“제3장 – 119안전센터 주요공간에 대한 세부 가이드라인”을 참조한다.

2.6 근무조건(여건)

가. 근무체계

1) 운영 소방력

- 전체인원: 113명(본서 45, 안전센터 49, 구조대 19)

- 소방차량: 23대

2) 1일 근무인원: 59명

- 본서(일근) 29명 / 본서(현장대응단) 6명 / 안전센터 17명 / 구조대 7명

3) 출동부서

- 화재, 구조, 구급, 현장지휘 등 재난발생 시 해당 부서 출동

▸본서 현장대응단 현장지휘팀, 안전센터, 구조대

4) 기구 및 정원

기구	부서(일일근무인원)	정원		근무형태
		부서장	직원
본서	소방서장(1)	1		내근 (일근부서)
	소방행정과(12)	1	11
	대응총괄과(16)	1	15
	현장대응단(6)	1	15	외근 (출동부서, 교대근무)
안전센터	119안전센터(17)	1	48
구조대	구조대(7)	1	18
태백소방서 총원		113명		일일근무인원 59명

※ 시설별 면적(안)을 참고하여 각 부서별 정원 외 기타 인원까지 책상 배치를 고려한다. 추가로 1~2개의 여유 자리를 설계하여 향후 정원 증가에 대비한다.

나. 근무여건

1) 출동부서는 평상시 사무실에서 근무, 야간에는 대기실에서 휴식 중 출동 시 차고로 이동 후 소방차량 탑승 후 출동

2) 현장 복귀 후 물, 연기, 그을음, 오염 등에 대한 복장, 장비 등 세척

3) 구급대는 감염관리실에서 구급장비 등 세척

4) 24시간 출동대기 소방관의 휴식 및 체력단련 공간 확보 필요

5) 사무실 뿐만 아니라 청사 어디서든 출동 지령을 인지할 수 있도록 전관 방송 및 지령방송 시스템을 적절히 설치

6) 본서 내근은 행정업무를 담당하는 부서로 일반적인 공공기관과 근무형태 및 사무실 구성이 유사

27 시설조건

가. 소방차고

1) 신속하고 안전한 소방차량 출동을 위해 인접도로와 진․출입이 용이하고, 통행차량 운전자의 시야가 충분히 확보되도록 한다. (차량충격방지대 반영)

2) 유해물질 노출, 감염 등을 고려하여 차고와 청사의 내부 연결 출입문에는 이중문 등 완충공간을 두어 직접적인 공기유입을 차단하고 필요시 에어커튼을 설치한다.

3) 차고 내부 원활한 환기를 위하여 차고 뒤편에도 전면적인 개폐가 가능한 오버헤드도어 등을 넓게 설치하여 자연환기가 될 수 있도록 한다. 또한 환기를 보완할 수 있는 덕트 또는 송풍기를 설치한다.

4) 차종별 제원을 고려하여 주차면적을 확보하고, 대원의 안전과 활동 공간 확보를 위해 차량간 측면 간격은 2.0m 이상, 차량측면과 외벽은 1.8m 이상의 여유공간을 확보한다. 차량전면과 차고문 사이 1.0m 이상, 차량을 이중 배치 하였을 경우 차량 전후면 사이 1.5m 이상 간격을 확보한다.

5) 차고 내 유효높이 5.5m 이상 확보한다.

- 차고 출입문 높이 4.5m 이상

- 오버헤드도어 개방 시 차고 내 유효높이 4.8m 이상 확보한다.

※ 유효높이 : 차고 바닥 마감부터 차고층 지붕 최하단 보 마감까지 높이

6) 차고 내부 소방차량의 배치는 다음과 같다. (관련자료 확인)

- 전면배치(7대) : 구급차, 화학차, 구조차, 지휘차, 굴절차, 산악구조차, 고가차

- 후면배치(5대) : 수난구조, 물탱크, 생활구조, 펌프차, 배연차

7) 부지 한계로 인하여 외부 소방차 배치시 화물, 트레일러, MTV, 행정차(②)는 이중주차 배치도 가능하다.

8) 차고내 차량 충전을 위한 콘센트는 근접한 기둥에 다수 확보 할 것.

9) 차고문은 자동식 오버헤드도어로 설치하고, 비상시 수동 개폐 가능토록 설계한다.

10) 차고 바닥은 소방차량 등의 하중을 반영하여 설계하고, 바닥높이는 전면도로보다 높게 한다. 단 차고와 전면도로의 단차로 인한 경사면으로 소방차량 진출입 시 차량 바닥과 후미가 바닥에 접촉되지 않도록 높이와 경사를 적절히 설계한다.

11) 차고 내 바닥은 배수가 가능토록 충분한 경사를 두어 물 고임이 없도록 설계하고 차고 앞뒤 배수시설(트렌치 배수 등)을 설치한다.

12) 청사의 감염관리를 위하여 구급차 1대는 감염관리실과 인접 배치 하여 효율적인 감염관리가 이루어지도록 한다.

13) 소방차량 제원( 차고내 전면배치 / 후면배치  , 외부 이중주차 가능)

번호	구분	관리부서	차 종		차량규격			비고
			차명	차종	전장	전폭	전고
1	기존	소방행정과	행정차	중형승용	4,845	1,835	1,455
2	기존		행정차	중형승용	4,570	1,800	1,440
3	기존	대응총괄과	진단차	중형승합	5,150	1,920	1,925
4	기존		통제단장비운반	중형화물	6,750	2,080	2,915
5	기존		진단차	경형승용	3,995	1,595	1,485
6	기존	현장대응단	지휘차	중형승합	5,150	1,920	1,925
7	기존		화재조사차	중형승합	4,480	1,855	1,635
8	기존	황지센터	순찰차	중형승용	4,480	1,855	1,635
9	기존		고가차	대형특수	11,000	2,495	3,830	46m
10	기존		고가차(굴절)	대형특수	9,330	2,495	3,750	28m
11	기존		물탱크차	대형화물	8,030	2,495	3,230
12	기존		화학차	대형화물	7,695	2,380	2,890
13	기존		펌프	대형화물	7,385	2,380	2,940
14	기존		화물	소형화물	4,825	1,740	2,100
15	기존		중계버스	대형승합	12,000	2,490	3,550
16	기존		배연차	중형특수	7,715	2,390	3,065
17	기존		구급차	중형승합	6,195	2,040	2,805
18	기존	구조대	구조공작차	대형특수	8,490	2,495	3,470
19	기존		산악구조	소형화물	4,990	1,910	1,790
20	기존		수난구조	소형화물	5,065	1,765	2,230
21	기존		생활안전	중형승합	5,150	1,920	2,350
22	기존		트레일러	소형화물	4,540	2,130	700
23	기존		MTV	중형승합

14) 소방차량 차고 배치도

후 면	20 수난구조	11 물탱크	21 생활구조	13 펌프	16 배연
전 면	17 구급	12 화학	18 구조	6 지휘	10 고가(굴절)	9 고가	19 산악구조

나. 장비세척실

1) 대원들의 방화복 및 공기호흡기(면체)를 전용세탁기로 세탁하고 건조하는 장소이다.

2) 출동 복귀 후 장비의 오염물질을 제거 및 세척한다.

3) 장비를 편히 세척할 수 있는 작업대, 싱크대를 설치한다.

4) 대원들이 간단히 씻을 수 있는 세면대를 설치한다.

5) 세척을 위해 물을 많이 사용하는 공간으로 원활한 배수가 되도록 적정한 배수구와 환기창을 계획한다.

다. 감염관리실(구급세척실)

1) 오염된 구급장비의 세척·소독·보관 공간을 확보하고 감염의 원인물질을 차단하여 2차 감염을 방지하는 데 그 목적이 있다.

2) 2차 감염 예방을 위해 타 공간과는 구분하여 배치한다. (내부설치시 최소면적:26㎡)

3) 구급차고와 최대한 인접하여 배치한다.

4) 내부는 온습도를 잘 견딜 수 있어야 하고, 환기시설을 필수로 설치한다.

* 119감염관리실 설치에 관한 규정 참조

라. 공기충전기실/정비실

1) 호흡용 공기를 고압용기에 충전하기 위한 시설설비가 갖추어진 실이다.

2)「고압가스 안전관리법」에 의거하여 시설을 완비한다.

3) 고압충전기 설치에 따른 진동방지 및 유해(배기)가스 유입 차단조치

4) 양개도어 설치

마. 창고(화재, 구조, 구급, 기타)

1) 화재진압장비창고 : 20㎡

- 안전센터 화재진압장비 보관

2) 구조장비창고 : 40㎡

- 구조대 구조장비 보관

3) 현장대응단 창고 : 20㎡

- 현장대응단 사용

4) 대응총괄과 창고 : 30㎡

- 대응총괄과 사용

5) 용도창고 : 30㎡

- 소방행정과 사용

* 창고별 시건 장치 필요

바. 개인보호장비실

1) 현장14, 센터49, 구조16 명 사용중으로, 80개 캐비넷 설치 (600*600*2100)

사. 사무실(안전센터, 구조대)

1) 사무실 내 탕비공간(싱크대 포함) 마련, 정수기 설치 가능토록 급·배수를 설치한다.(공유가능)

2) 사무실에 소규모 희의를 할 수 있는 개방된 공간 필요

3) 사무실 내 센터장(구조대장) 사무실은 파티션등으로 별도 구획한다. (가변형)

4) 가급적 1층에 배치

4) 안전센터, 구조대 사무실 일일 근무인원 (기준)

- 안전센터 : 1명(센터장) + 1명(팀장) + 15명(팀원) / 3팀

- 구조대 : 1명(구조대장) + 1명(팀장) + 5명(팀원) / 3팀

아. 현장대응단 사무실

1) 재난현장의 정보수집·분석과 판단·전파, 상황관리, 현장지휘 및 조정·통제 등의 업무를 수행하기 위한 모니터링 및 통신장비를 배치한 시설 (외부인출입통제)

2) 상황실에는 상황판단 회의 등을 할 수 있는 개방된 회의 공간 필요

3) 바닥 마감은 ACCESS FLOOR(이중마루)로 설계 / 탕비실 설치

자. 현장대응단장실

1) 현장대응단사무실과 연계, 내실(침대/옷장)

차. 당직실

1) 본서 야간 당직 직원 대기실 / 현장대응단 사무실 인근 설치

2) 당직실(8㎡) 2개소 + 여당직실(8㎡) 1개소

- 당직원 1인 대기공간 총 3개소

카. 식당

1) 다이닝룸, 조리실, 부식창고, 조리원(2~3명) 대기실로 구성, 가스인입

2) 일일 식수인원(중식 기준) 약59명 / 2회전

타. 심신안정실   * 119감염관리실 설치에 관한 규정 참조

1) 소방공무원의 심리안정, 치유 및 휴식을 취할 수 있도록 마련된 공간이다.

2) 상담, 치유, 회복을 위한 각각 구획된 공간을 확보한다. (권장 면적 50㎡)

3) 365일 24시간 연중 이용가능 (전 직원 누구나)

3) 멘탈케어실, 바디케어실, 치유 및 상담실, 휴게실로 구성

4) 구성물품 : 안마의자, 커피머신, 눈/발마사지기, 공기청정기, TV, 오디오, 헬스케어, 산소발생기

파. 체력단련실

1) 외부 공간과 연계

하. 대기실(현장대응단, 안전센터, 구조대, 구급대, 여직원) : 2인실 x 18실

▸ 모든 대기실은 침대 및 파티션, 사물함 설치, 난방은 실별 제어 (바닥난방)

1) 현장대응단 (사용인원 : 6명)

- 기준면적 : 8.64㎡ x 2인 = 17.28㎡ 약 18㎡

- 필요면적 : 18㎡ x 3개실 = 54㎡

2) 황지센터 (사용인원 : 12명 / 여성, 구급대 제외)

- 기준면적 : 8.64㎡ x 2인 = 17.28㎡ 약 18㎡

- 필요면적 : 18㎡ x 6개실 = 108㎡

3) 구조대 (사용인원 : 6명)

- 기준면적 : 8.64㎡ x 2인 = 17.28㎡ 약 18㎡

- 필요면적 : 18㎡ x 3개실 = 54㎡

4) 구급대 (사용인원 : 6명)

- 기준면적 : 8.64㎡ x 2인 = 17.28㎡ 약 18㎡

- 필요면적 : 18㎡ x 3개실 = 54㎡ (남자 2개실 / 여자 1개실)

5) 여직원 (사용인원 : 6명)

- 기준면적 : 8.64㎡ x 2인 = 17.28㎡ 약 18㎡

- 필용면적 : 18㎡ x 3개실 = 54㎡

거. 샤워·세탁실

1) 센터, 구조대 직원들의 샤워 및 세탁실

2) 샤워실(남), 탈의실(남), 세탁실(남)로 구성한다.

- 남샤워실 동시 사용인원 최대 6인 (세면대 6개 + 샤워기 4개)

- 남세탁실은 세탁기 3대, 건조기 2대 설치 가능하도록 구성

- 여자 샤워실 및 세탁실은 내근직 대기실 사용하도록 구성

너. 서장실

1) 부속실, 업무·회의공간, 대기실(화장실 포함)로 구성

- 부속실 : 비서 1인 사무공간, 탕비공간, 출입대기공간

- 대기실 : 기관장 1인 대기 공간으로 화장실,세면대,침대 포함

더. 소회의실

1) 소방서 산하 간부 회의실, 30명 이상 동시 회의

러. 사무실(소방행정과,대응총괄과)

▸ 사무실 내 탕비공간(싱크대 포함) 마련, 정수기 설치 가능토록 급·배수 설치

▸ 사무실 내 소규모 희의 공간 필요

1) 소방행정과장실 : 1명(과장)

2) 소방행정과 : 행정지원팀 6명 + 예산장비팀 5명

3) 대응총괄과장실 : 1명(과장)

4) 대응총괄과 : 대응전략팀 3명 + 예방총괄팀 9명 + 구조구급팀 3명

5) 대응총괄과 민원실 : 은행창구와 유사한 형태로 연계 배치

머. 탈의·대기실 (내근직)

- 별도의 대기실이 없는 본서 내근직원들의 개인장비 보관과 출퇴근시 근무복 탈의를 위한 실을 부서별 인원을 고려하여 층별 또는 통합으로 적정 위치에 배치

- 남자 30명 기준 / 여자 5명 기준 / 바닥 난방(전기판넬)

- 여자탈의·대기실에는 세면/샤워/세탁 가능하게 구성

(여샤워실 동시 사용인원 최대 3인)

버. 특사경 조사실

- 일반 사무실로 구성 하며, 필요시 노조사무실로 사용될 수 있음

서. 문서보존실(자료실)

- 렉설치를 통한 자료 보관장비 설치

어. 정보통신기계실 및 전산실 (현장대응단사무실과 수평/수직 연계)

1) UPS(무정전전원장치), 서버 등 건물 전체 통신시설 보관 및 제어실

2) 바닥 마감은 ACCESS FLOOR(이중마루)로 설계

저. 화재분석실 및 방염성능실험실

1) 화재현장 시료분석, 발화 실험을 위한 버너설치

2) 방염분석, 화재성능 테스트를 위한 버너설치

3) 환기시설 설치 및 싱크대 설치

처. 안전체육(교육)장

1) 애니, 심장충격기 및 응급처치 교보재를 활용한 응급처치 교육 실습장

2) 교육장 내 급·배수시설 싱크대 설치 : 손 세척 및 소형 장비 세척

3) 각종 행사, 다목적 회의, 체육관으로 활용

4) 방송실, 집기류 보관창고 등 확보

5) 배드민턴장 설치 가능한 크기로 층고는 높게 설정

커. 의소대사무실

1) 의용소방대원을 위한 공간으로 평상시에는 간이회의실로 사용.

2) 7인 소회의실과 유사 (최소 7명 이상)

퍼. 직원휴게실

1) 업무시간 중 본서 직원들의 휴식을 위한 카페와 유사한 공간

2) 탕비공간, 싱크대 설치

3) 테라스 등과 연계하여 카페테리아 분위기 연출

4) 공용공간 복도에 설치

허. 직원기숙사 : 5개실

1) 타지역에서 전출온 직원을 위한 원룸형태의 숙소공간

2) 내부화장실 및 샤워실, 싱크대, 인덕션 등 설치

3) 외부 발코니 연계

4) 최대한 프라이버시 확보

고. 화장실 (남/여)

1) 장애인 화장실 포함

2) 남년 비율을 고려한 화장실 각층 배치

3) 남자 대변기 4, 소변기 4, 세면대 2 / 여자 대변기 2개, 세면대 2, 청소도구함 1

노. 기타

- 전기실, 기계실, 발전기실 등 관련 면적 확보

- 1층에 오폐수처리 시설 확보

- 공용공간 최대한 확보

- 내부공간은 추후 확장성을 고려하여 가변형 구조로 할 것

2.8 설비조건

가. 오버헤드도어

- 차고문은 자동식 오버헤드도어를 설치한다.

- 차량 2대당 1개 도어를 설치한다.

나. 소방호스건조대

- 건물 내‧외벽 등을 이용하여 건물과 조화로운 건조대를 설치한다.

- 소방호스건조대 아래 호스를 세척할 수 있는 수도시설을 설치한다.

다. 소화용 급수시설(소화전)

- 차고지 앞 또는 부지 내 소방차량에 급수가 원활하도록 상수도소화전 지상식  1개소 이상 설치한다.

라. 채널사인

- 건물 외벽에 “태백소방서” 및 “119안전센터” 채널사인을 설치한다.

※ 사인 및 로고 등은 「소방표지규정」과 해당 지자체의 BI(Brand Identity) 규정·매뉴얼을 적용

2.9 정보통신분야

가. 소방재난본부 종합상황실과 연계하여 일제지령방송을 위한 방송통신장비(지령컴퓨터 및 지령프린터포함) 설비를 설계하고, 호환성문제를 검토하여야 한다(소방재난본부 종합상황실과 협의하여 설계).

나. 출동부서 대원들이 어디서든 출동지령을 인지할 수 있도록 스피커를 설치한다.

다. 옥탑에는 무선국 안테나를 설치하고, 피뢰시설, 건물 및 공중선이 보호될 수 있도록 한다.

라. 통신기계실에는 한국통신 전화국 국선케이블 40P 및 건물 구내 케이블을 연결할 수 있는 MDF를 설치한다.

마. 안전센터사무실, 구조대사무실, 현장대응단 상황실에는 일제지령방송 시스템, 청사전용방송장치를 설치하고 무정전전원장비(UPS), 서버 등은 통신실에 통합 관리하도록 설계한다.

2.10 기타조건

가. 창고의 문은 대형장비가 이동할 수 있도록 양문형으로 한다.

나. 대기실의 문은 여닫이로 하되, 안전사고 예방을 위해 실내로 열리게 설계한다.

다. 대기실, 회의실 벽은 향후 가변적인 사용을 위하여 가벽으로 구획한다.

라. 차고에서 발생하는 매연이 실내로 직접적으로 유입되지 않게 차고공간과 실내 연결 출입문에 완충공간을 설계한다.

마. 부지 내 법정주차대수 기준에 의거하여 직원들 주차장을 계획한다.

주차장 설계 시 전기자동차 충전소를 반영한다.

바. 청사 출입문의 잠금장치를 사무실에서 제어 가능하도록 설계한다.

사. 대지의 조경은 건축법령에 적합하게 설치한다.

아. 해당 건물은 에너지효율등급 의무대상, 제로에너지건축물 인증, 녹색건축물 인증 대상으로 친환경 건축물을 설계한다. (지역 특색을 감안한 에너지 계획 적용)

자. 건물의 상징성을 고려하여 건물의 우선적 역할을 저해하지 않는 범위에서 PV, BIPV, 자연채광 등 다양한 신재생에너지 공급방식을 검토하여 합리적인 에너지 계획을 수립한다.

차. 건물 유리창 빛반사 방지, 에너지 절감 등을 위해 전면유리로 된 커튼월 구조는 지양하고 하절기 유입일사량 저감을 위해 차양 또는 이에 준하는 설계기법을 고려하며, 특히 환경친화형 자재 사용을 검토한다.

카. 공공기관 에너지 이용 합리화 규정 기준과 건축물의 에너지절약 설계기준에 적합하게 계획한다.

타. 건축물 유지관리기준에 따라 유지관리에 용이하고, 유지관리 비용 등 경제성을 고려하여 계획한다.

파. 장애물 없는 생활환경 인증기준에 적합하고, 범죄예방설계(CPTED) 기법을 도입하여 방범, 안전관리가 용이하게 계획한다.

하. 기존 외부 차량차고 1개소는 존치함.

거. 외부환경에 대응할 수 있는 외장재 및 고드름방지 대책 추가 반영

너. 예산을 고려하여 바닥 스노우멜팅 추가 반영

3. 시설규모 기준

가. 시설규모

구 분		내 용
사업명칭		태백소방서 건립 설계공모
대지위치		강원도 태백시 황지동 212-1, 621-209
지역지구		도시지역, 제2종일반주거지역
발주기관		강원특별자치도 (소방본부)
공모 사업 범위	주요용도	공공업무시설 (소방서)
	대지면적	3,399㎡
	건축규모	연면적 3.650㎡ (±3% 내외)
	건폐율/용적률	법적기준이하 ( 제2종일반주거지역 기준 : 법정 60% / 250%)
규모	층수	지상 4층 이내
	주차장	법정주차대수 이상 확보
추정공사비		12,498,000,000원 (제경비 및 부가세 포함)

1) 제시된 시설내역을 참고로 계획하고, 연면적 및 실별면적은 3,650㎡ (±3%)범위 내에서 계획

2) 설계안 제출 시점에서 관계법규에 적합하여야 한다.

3) 소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정 등 시설기준을 지켜 설계하여야함.

(시설기준에 미달시 영업신고 불가함)

4) 소방청사 특성과 출동 동선, 근무형태 등을 충분히 고려하여야 함

(참고기준: 소방청 훈령 제135호 「소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정」, 참고자료: 국립소방연구원 배포 「119안전센터 표준설계 가이드라인」)

나. 시설별 소요면적(안)

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거 (소방청사 표준면적 세부 실별면적표 및 삼척소방서 신축 청사 자료 인용)
전체	공용면적포함	3,650	◦ 공용면적 : 3,650㎡ * 23% = 830㎡
	연면적	3,650
지하층	전기실, 발전실	80
	기계실	90
	소 계	170
1층	소방차고	650	◦ 기준(1대) : 차량간 이격거리 2.0m 높이 5m ◦ 소요 : 23대(대형 8, 소형 15) - 예비1 포함 ◦ 면적 : (4.5㎡*8)+(45㎡*15*1/2)
	황지센터 사무실	114	◦ 기준 : 센터장 8.3㎡, 직원 8.3㎡ ◦ 소요 : 센터장1명, 직원 48*1/3 → 정원 49명 ◦ 면적 : [(8.3㎡*1명)+(8.3㎡*16명)]
	구조장비창고	40	◦ 기준 : 40㎡/1실 ◦ 구조대사용
	진압장비창고	20	◦ 기준 : 20㎡/1실 ◦ 황지센터사용
	장비세척실	21	◦ 기준 : 21㎡/1실
	개인보호장비실	80	◦ 기준 : (0.85㎡ * 외근직정원) + 여유공간14㎡ ◦ 소요 : 78명(현장14, 센터49, 구조16) ◦ 면적 : [(0.85㎡*78명)]+14㎡
	감염관리실	26	◦ 기준 : 최저 26㎡/1실
	공기호홉기충전 및 정비실	21	◦ 기준 : 21㎡/1실
	구조대사무실	50	◦ 기준 : 대장 8.3㎡, 직원 8.3㎡ ◦ 소요 : 대장1명, 직원 15*1/3 → 정원 16명 ◦ 면적 : [(8.3㎡*1명)+(8.3㎡*5명)]
	공용부	170	◦ 복도/화장실/계단실
	소 계	1,192

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거 (소방청사 표준면적 세부 실별면적표 및 삼척소방서 신축 청사 자료 인용)
2층	현장대응단장실	22	◦ 기준 : 22㎡/1인 ◦ 면적 : 22㎡*1명
	현장대응단 사무실	75	◦ 기준 : 담당 8.3㎡, 직원 8.3㎡, 상황실 30㎡ ◦ 소요 : (담당3명 + 교대9명)*1/3, 일근 1명 → 정원 5명 ◦ 면적 : (8.3㎡*5명)+30㎡
	당직실	24	◦ 기준 : 8.0㎡/1인 ◦ 소요 : 3명 (비상근무시 당직보강 포함) ◦ 면적 : 8.0㎡*3실
	탈의·대기실 (현장대응단)	54	◦ 기준 : 8.64·㎡/1인, 소요 6명 ◦ 면적 : 8.64㎡*6명
	탈의·대기실 (황지센터)	108	◦ 기준 : 8.64·㎡/1인, 소요 12명 ◦ 면적 : 8.64㎡*6명
	탈의·대기실 (구조대)	54	◦ 기준 : 8.64·㎡/1인, 소요 6명 ◦ 면적 : 8.64㎡*6명
	탈의·대기실 (구급대)	54	◦ 기준 : 8.64·㎡/1인, 소요 6명 ◦ 면적 : 8.64㎡*6명
	탈의·대기실 (여직원)	54	◦ 기준 : 8.64·㎡/1인, 소요 6명 ◦ 면적 : 8.64㎡*6명
	세면실/샤워실	45	◦ 기준 : 45㎡/1실
	현장대응단창고	20	◦ 기준 : 20㎡/1실
	공용부	170	◦ 복도/화장실/계단실
	소 계	680

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거 (소방청사 표준면적 세부 실별면적표 및 삼척소방서 신축 청사 자료 인용)
3층	서장실(부속대기)	86	◦ 기준 : 62.0㎡ 1실(4급 기관장기준) + 대기실 24㎡ ◦ 면적 : 62.0㎡ + 24㎡
	소회의실	75	◦ 기준 : 50㎡+0.7㎡(정원-20) ◦ 소요 : 55명(일근+1일 교대근무 인원) ◦ 면적 : 50㎡ + (0.7㎡*35명)
	소방행정과장실	22	◦ 기준 : 22㎡/1인 ◦ 면적 : 22㎡*1명
	소방행정과 사무실	75	◦ 기준 : 담당 8.3㎡, 직원 8.3㎡ ◦ 소요 : 담당2명 + 직원7명 ◦ 면적 : 8.3㎡*9명
	대응총괄과장실	22	◦ 기준 : 22㎡/1인 ◦ 면적 : 22㎡*1명
	대응총괄과 사무실	108	◦ 기준 : 담당 8.3㎡, 직원 8.3㎡ ◦ 소요 : 담당3명 + 직원10명 ◦ 면적 : 8.3㎡*13명
	민원실	30	◦ 기준 : [(6.55㎡x민원담당공무원 수)x1.1]]+ [(0.13㎡~0.2㎡x민원인수x0.5)
	탈의대기실(남)	45	◦ 기준 : 1인당 1㎡x내근직수 ◦ 면적 : 1㎡*23명
	탈의대기실(여)	40	◦ 기준 : 1인당 1㎡x내근직수 ◦ 면적 : 1㎡*5명 ◦ 세탁, 샤워, 세면 가능
	심신안전실	50	◦ 기준 : 50㎡+0.7*(1일교대근무인원-20) ◦ 면적 : 50㎡+0.7*(25-20)
	문서보존실 (자료실)	30	◦ 기준 : 30㎡/1실
	용도창고(행정과)	30	◦ 기준 : 30㎡/1실
	대응총괄과창고	30	◦ 기준 : 30㎡/1실
	정보통신기계실 및 전산실	30	◦ 기준 : 30㎡/1실
	화재분석실 및 방염성능실험실	20	◦ 기준 : 20㎡/1실
	체력단련실	60	◦ 기준 : 75㎡ + (총인원수-100)*0.16㎡ ◦ 소요 : 105명 (본서인원) ◦ 면적 : 75㎡+(5명*0.16㎡)
	공용부	170	◦ 복도/화장실/계단실
	소 계	923

층별	용 도	면적(㎡)	산 출 근 거 (소방청사 표준면적 세부 실별면적표 및 삼척소방서 신축 청사 자료 인용)
4층	안전체험(교육장)	200	◦ 기준 : 200㎡/1실
	특사경조사실	15	◦ 기준 : 15㎡/1실
	의소대	70	◦ 기준 : 70㎡/1실
	직원기숙사	160	◦ 기준 : 32㎡/1인, 소요 5명 ◦ 면적 : 32㎡*5명
	식당(주방,창고)	90	◦ 기준 : 1.63㎡*공무원(이용자수)*0.3 ◦ 소요 : 70명(내군+외근1일교대자+추가인원15) ◦ 면적 : 1.63㎡*(30+25+15)*0.3+주방28㎡+창고21㎡
	공용부	150	◦ 복도/계단실/휴게실
	소 계	685

➢ 사정에 의해 설계변경 시 소요면적 및 용도 변동될 수 있음

4. 대상지 관련법규

1. 제출된 설계안은 다음 관련 법규를 준수하여야 한다.

가. 『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 의 『태백시 계획조례』, 『지구단위계획』 및 관련법규

나. 『건축법』 및 『태백시 건축조례』 등 하위법령

다. 『건축물의 에너지절약 설계기준』, 『공공기관 에너지이용 합리화 표준지침』, 『신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법』,

라. 『주차장법』 및 하위법령, 『태백시 주차장설치 및 관리 조례』

마. 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진에 관한 법률』 및 하위법령

바. 『실내공기질관리법』 및 하위법령

사. 『119안전센터 표준설계 가이드라인』

아. 『119감염관리실 설치에 관한 규정』

저. 『소방청사 부지 및 건축기준에 관한 규정』

차. 기타 본 건축물 설계에 반영되어야 할 법률

5. 첨부

- 서식 제1호) 설계공모 참가등록 신청서

- 서식 제2호) 설계공모(제안) 참여자 명단

- 서식 제3호) 서약서

- 서식 제4호) 사용인감계

- 서식 제5호) 대표자 선임계

- 서식 제6호) 사전접촉 금지서약서

- 서식 제7호) 공동응모협정서

- 서식 제8호) 보안각서

- 서식 제9호) 개인정보 수집·이용 동의서

- 서식 제10호) 심사위원 기피신청서

- 서식 제11호) 질의서

- 서식 제12호) 설계공모(제안) 참여 신청서

- 서식 제13호) 위임장

- 서식 제14호) 담당건축사 경력 및 실적

- 서식 제15호) 평가사유서

(서식 제1호)

설계공모(제안) 참가등록 신청서

본인은 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 태백소방서 신축 설계공모 설계 공모지침을 준수하고, 동 설계공모에 참가할 것을 신청합니다.

2024년    월    일

대표업체	업 체 명		대 표 자	(인)
	주 소		전화번호
	사업자등록번호 또는 생년월일		FAX/ E-ㅡMail
공동응모 업체(자)	업 체 명		대 표 자	(인)
	주 소		전화번호
	사업자등록번호 또는 생년월일		FAX/ E-ㅡMail

강원특별자치도 소방본부 귀하

--------------------------- 절 취 선 ----------------------------

설계공모(제안) 응모 신청서 접수증
※ 접수번호 :				접 수 인
설 계 사무소명		전화번호 (FAX번호)
대 표 자 (건축사)		주민등록번호
※ 발주기관 : 강원특별자치도 소방본부

(서식 제2호)

설계공모(제안) 참여자 명단

소 속	직 위	공 종	성 명	전화번호

본인은 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 태백소방서 신축 설계공모 에

응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2024 년    월    일

대표자 : 소속          직위          성명          (인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제3호)

서   약   서

당사는 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 태백소방서 신축 설계공모에 응모함에 있어 다음의 내용을 준수 및 이행할 것을 확약하고 이에 서약서를 제출합니다.

1. 당사는 태백소방서 신축 설계공모 규정에서 정한내용 및 절차를 인정하고, 설계공모지침을 성실히 준수하겠으며, 본 지침을 위반할 시 어떠한 불이익도 감수하겠습니다.

2. 당사는 관련 서류 및 증빙자료를 신의성실의 원칙에 입각하여 작성‧제출하며, 만일 제출한 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위 기재사항 등이 확인될 경우 법적·재정적·행정적 책임을 감수하겠습니다.

2024 년    월    일

○ 대표업체                      업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

○ 공동응모업체(자)              업체명 :

주  소 :

대표자 :               (인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제4호)

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 태백소방서 신축 설계공모에 있어 입찰･계약 및 이에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2024 년    월    일

주  소 :

업체명 :

대표자 :                           (인)

붙임 : 인감증명서 1부.

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제5호)

대표자 선임계

□  공   모   명 : 태백소방서 신축 설계공모

□  대표자 선임

① 소   속 :                       ☎ :

② 성   명 :

(주민등록번호 :            -             )

③ 건축사 면허번호 :

상기인을 공동 응모자 전원의 합의하에 대표자로 선임하여 강원특별차지도 소방본부

에서 시행하는 위 설계공모에 관한 모든 권한을 위임합니다.

2024 년    월    일

○ 대표업체	업체명 :
	소재지 :
	대표자 :		(인)
○ 공동응모업체(자)	업체명 :
	소재지 :
	대표자 :		(인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제6호)

사전접촉 금지서약서

본인은 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 태백소방서 신축 설계공모에 응모함에 있어 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하며, 특히 공모와 관련한 불공정행위 방지를 위하여 심사위원에 대한 사전접촉을 하지 않을 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민․형사상 등 일체의 책임을 감수하겠기에 서약서를 제출합니다.

2024 년    월    일

서 약 자 :	○ 대표업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

업 체 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제7호)

공동응모협정서

제1조 (목적) 이 협정서는 「태백소방서 신축 설계공모」 건축설계 제안공모를

(   )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및  구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리ㆍ의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리ㆍ의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게         될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를         다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )       통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2024.    .     .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제8호)

■ 부동산종합공부시스템 운영 및 관리규정 [별지 제4호 서식]
보 안 각 서
본 기관(또는 인)은 부동산종합공부시스템 관련 자료를 사용함에 있어 업무상 취득한 제반 기밀사항 및 자료 등을 외부에 누설 또는 유출하지 않을 것을 서약하며, 협조(제공) 받은 자료를 규정대로 태백소방서 신축 설계(공모)용 목적에만 사용할 것이며, 만약 이를 위반하였을 경우에는 동기여하를 막론하고 보안관련 제반 법규에 의거 처벌받음은 물론, 어떠한 제재나 조치도 이의 없이 감수하겠음을 서약하고 이에 본 각서를 제출합니다.
구 분	소속기관명	부서	성명	서명
책임자	강원도특별자치도소방본부	소방장비회계과	문병원
수령자	(업체명)	(업체부서명)	(대표자성명)	(서명)
2024 년 월 일
강원특별자치도 소방본부 귀하
210㎜×297㎜(보존용지(1종) 70g/㎡)

(서식 제9호)

【개인정보 수집･이용 동의서】

∎ 관 리 처 : 강원특별자치도 소방본부 (소방장비회계과)

∎ 관련법규 : 개인정보 보호법 제15조, 제22조

∎ 기본 개인정보 수집 • 활용   [필수]

수집·이용하려는 개인정보의 항목	개인정보의 수집·이용의 목적	개인정보 이용기간 및 보유기간
성명, 휴대폰번호	건축설계공모 관련 안내 등	기본 및 실시설계 준공일로부터 1년

※ 개인정보 제공 동의 거부 권리 및 동의 거부에 따른 불이익 내용 또는 제한사항

- 귀하는 개인정보제공 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부에 따른 불이익은 없음

개인정보 수집 • 활용에 동의 하십니까 ?    □ 동의함.     □ 동의하지 않음.

※ 개인정보 제공자가 동의한 내용외의 다른 목적으로 활용하지 않으며, 제공된  개인정보의 이용을 거부하고자 할 때에는 개인정보 관리책임자를 통해 열람, 정정, 삭제를 요구할 수 있음

「개인정보보호법」 등 관련 법규에 의거하여 상기 본인은 위와 같이 개인정보 수집 및 활용에 동의함.

2024 년    월    일

신청자 :                (인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제10호)

심사위원 기피신청서

□ 용 역 명 : 태백소방서 신축 설계공모

□ 기피사유

○ 심사위원명 :

○ 기 피 사 유 :

건축 설계공모 운영지침 제12조에 따라 당해 설계공모의 위 심사위원을 기피하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

주) 필요시 증빙자료 첨부

2024 년    월    일

대표자 :               (인)

강원특별자치도 소방본부 귀하

(서식 제11호)

질   의   서

대표자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
회사명		전화번호 (FAX번호)
소재지		E-mail주소
관련규정․지침 (Page)	질 의 내 용

(서식 제12호)

설계공모(제안) 제출서
접수번호
공 모 명					｢태백소방서 신축｣ 설계공모
작 품 제출자		업 체 명
		대 표 자
		소 재 지									전화
공 동 응모자		업 체 명
		대 표 자
		소 재 지									전화
강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 ｢태백소방서 신축｣ 설계공모 응모작품을 제출합니다. 구비서류 1. 설계도면 (설계설명서 포함) 11부 2. 설계도면 내용을 저장한 USB(저장형식 PDF) 1매 3. 위임장 (대리인접수시) 2024. . . 신청자(대표자): (인) 강원특별자치도 소방본부 귀하
						절 취 선
설계공모 작품 접수증
접수번호								접수일자					접 수 인
공 모 명				｢태백소방서 신축｣ 설계공모
업 체 명							소 재 지
대 표 자							전화번호
제 출 자				소속: 직위: 성명: (인)

(서식 제13호)

위    임   장

대리인	성 명		생년월일
	주 소
	업체명		연 락 처		☎ : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 강원특별자치도 소방본부 에서 시행하는 ｢태백소방서 신축｣ 설계공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2024. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 강원특별자치도 소방본부 귀하
재 직 증 명 서
성 명				생년월일
소 속				직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 2024. . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리 접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

(서식 제14호)

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지					E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 경력 : 경력관리수탁기관에서 발행한 증명서 첨부

※ 실적 : 실적관리수탁기관 또는 발주기관에서 발행한 증명서 첨부, 건축물대장 첨부

※ 경력증명서상 설계분야 참여기간만 인정

(서식 제15호)

평 가 사 유 서

□ 공모명 : 태백소방서 신축 설계공모

작품명	세부 평가 내용
작품1
작품2
작품3
~
작품10

2024 년    월    일

심 사 위 원 :                 (서명 또는 인)

강원특별자치도 소방본부 귀하